Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-15738/2025

06 августа 2025 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых, рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению Администрация муниципального округа Луховицы(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ООО "АРТ-СТРОЙ М"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить гарантийные обязательства, при участии в заседании: стороны не явились, извещены 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «АРТ - СТРОЙ М» ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***> исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 01.08.2023 № 0848300048323000198, заключенного с администрацией городского округа Луховицы Московской области, на «Выполнение работ по текущему ремонту: приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания по адресу: 

<

...> кв. №№ 1, 11, 13, 16; ул. Зеленая, д.102, кв. №№ 4, 9, 1, 14, 10; ул. Зеленая д. 103, кв. №№ 1, 4, 5, 11» и устранить недостатки выполненных работ в следующих квартирах, расположенных по адресу: 

<

...>:  

 1. в квартирах № 1 дома 102; №№ 1, 4, 5, 11 дома 103 произвести замену некачественно поклеенных обоев;  

 2. в квартирах: №№ 1, 9 дома 102; №№ 1, 4,5 дома 103перестелить линолеум с очисткой основания от строительного мусора;  

 3. в квартирах: № 1 дом 102, № 1 дома 103 запенить щели под подоконными досками;  

 4. в санузле квартир: № 5 дома 102, №№ 1. 4, 5 дома 103, вдоль канализационных труб выполнить ремонт стен и пола;  

 5. в санузле квартиры № 4 дома 103 заменить смеситель с душевой сеткой; 

 6. в квартирах: №№ 11, 13, 16 дома 100, №№ 1, 5 дома 102, №№ 1, 4, 5 дома 103 заменить смывные бочки унитазов;  

 7. в квартирах: № 11 дома 100, № 9 дома 102выполнить работы по равномерной окраске стен в санузлах;  

 8. во всех квартирах установить внутренние дверные блоки согласно актов выполненных работ от 27.11.2023;  

 9. в квартирах: №№ 11, 13 дома 100, №№ 4, 14 дома 102, №№ 4, 5, 11 дом 103 установить дверные наличники вплотную к стенам;  

 10. в квартире № 1 дома 103 переустановить входную металлическую дверь, устранив щель между квартирой и коридором в подъезде;  

 11. в квартире № 16 дома 100 заменить стеклопакет одной створки оконного блока (замена треснувшей).  

 Взыскать с ООО "АРТ-СТРОЙ М"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 50 000 руб. 00 коп.  

 Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.  

Судья Е.А. Морозова