Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-196270/23-80-1565

г. Москва

13 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 апреля 2024 года

Полный текст решения изготовлен 13 июня 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Пронина А.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кочарской Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

истец АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСТРОЙ" (121357, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, ФИО1 УЛ., Д. 5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.11.2002, ИНН: 

<

***>)

ответчик АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСТРОЙ ГРУП" (121357, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, ФИО1 УЛ., Д. 29, СТР. 33, ЭТАЖ 2, КОМ. 16/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.11.2005, ИНН: 

<

***>)

третье лицо временный управляющий АО «Промстрой» ФИО2

о взыскании 339 759 282 руб. 10 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО3 по доверенности № 01-01/2024-01 от 20.12.2023 г.

от ответчика: ФИО4 по доверенности № 08-01/2024 от 08.01.2024 г.

от третьего лица: не явилось, извещено 

 

УСТАНОВИЛ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПРОМСТРОЙ ГРУП" о взыскании задолженности в размере 385 949 250 руб. 40 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 61 522 199 руб. 94 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму задолженности, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 18.04.2024 г. по день фактической уплаты задолженности. (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий АО «Промстрой» ФИО2.

Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, по доводам, изложенным в отзыве на иск.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явилось. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком возникли взаимные обязательства из двух договоров, в соответствии с которыми истец обязательства выполнил в полном объеме, а ответчик встречное исполнение произвел частично, в результате образовалась задолженность перед истцом в общей сумме 337 561 755 руб. 03 коп. по следующим договорам:

Так по договору субподряда № П-МНПЗ2016-0008 от 07.11.2016 г.:

Ответчиком АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП» (далее – генподрядчик) был заключен договор субподряда № П-МНПЗ2016-0008 от 07.11.2016 г. (далее – договор) с истцом АО «Промстрой» (далее – субподрядчик), по условиям которого субподрядчик принял на себя обязательства по выполнению части комплекса работ по строительству «Комбинированной установки переработки нефти (КУПН)» в объеме, указанном в приложении № 1 «Техническое задание» и приложении № 2 «Сводная стоимость и объем работ», осуществить поставку материалов и оборудования в соответствии с приложением № 5 к договору «Разделительная ведомость поставки», сдать генподрядчику результат выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием, рабочей документацией со штампом «в производство работ», а генподрядчик обязался надлежащим образом и своевременно выполнить свои обязательства по договору, в том числе принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену работ.

Согласно п. 14.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 27.11.2018 г. (далее - ДС № 1), дополнительного соглашения № 2 от 30.11.2018 г. (далее - ДС № 2), дополнительного соглашения № 3 от 30.03.2019 г. (далее - ДС № 3), дополнительного соглашения № 4 от 21.06.2019 г. (далее - ДС № 4), дополнительного соглашения № 5 (далее - ДС № 5) за проведение и завершение субподрядчиком работ и выполнение им обязательств по договору генподрядчик выплачивает субподрядчику сумму, составляющую предварительно 3 815 350 987 руб. 15 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - цена договора).

Цена договора является предварительной и подлежит уточнению после получения субподрядчиком от генподрядчика рабочей документации в полном объеме.

Цена договора состоит из прямых затрат (фиксированных единичных расценок, умноженных на фактический объем работ) и косвенных затрат, а также затрат на строительную технику для подъема тяжелых грузов, погрузо-разгрузочных работ и логистических операций, компенсации простоя техники, сумм дополнительного вознаграждения, суммы компенсации, в пределах установленного лимита, документально подтвержденных субподрядчиком дополнительных затрат на выполнение последним мероприятий по завершению работ по договору, а также возмещения инфляционной составляющей принятых объемов работ в 2017 -2018 годах в пределах лимита инфляции в соответствии с приложением № 2 к «Сводная стоимость и объем работ» к договору.

В силу п. 16.1.2 договора (в редакции ДС № 2, ДС № 5) оплата выполненных работ, производится генподрядчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 35 календарных дней с момента получения счета от субподрядчика, при условии приемки работ генподрядчиком и соблюдения субподрядчиком порядка выставления счета.

В соответствии с п. 24.2 договора (в редакции ДС № 5) договор действует до 30.09.2019 г., а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате - до их полного исполнения».

За время действия договора субподрядчиком были выполнены, а генподрядчиком приняты работы на сумму 4 323 949 961 руб. 13 коп., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат и актами о приемке выполненных работ.

Оплата ответчиком произведена на сумму 4 409 050 344 руб. 26 коп. Со стороны истца ответчику произведены возвраты денежных средств в общем размере 329 637 498 руб. 06 коп., поскольку оплату за выполненные работы ответчик ошибочно производил без учетов п.п. 6.3.1-6.3.3. В процессе исполнения договора стороны пришли к соглашению, что истец произведет частичный возврат за ранее оплаченные выполненные работы в счет гарантийных удержаний (обеспечительный платеж). Истец произвел возврат ранее оплаченных средств на общую сумму 329 637 498 руб. 06 коп., что подтверждается платежными поручениями № 31300 от 27.06.2017 г. на сумму 9440000 руб., № 84031 от 25.01.2019 г. на сумму 104 000 000 руб., № 164676 от 03.02.2021 г. на сумму 50 000 000 руб., № 164899 от 09.02.2021 г. на сумму 80 000 000 руб., № 165458 от 12.02.2021 г. на сумму 70 000 000 руб., № 169350 от 11.03.2021 г. на сумму 14 000 000 руб., № 195482 от 03.09.2021 г. на сумму 2 197 498 руб. 06 коп.

Согласно условиям п. 6.3.1 договора предусмотрено - в случае не предоставления субподрядчиком по истечении 10 (Десяти) дней с даты подписания настоящего договора оригинала банковской гарантии надлежащего исполнения субподрядчиком обязательств по настоящему договору генподрядчик из суммы причитающегося субподрядчику платежа за выполненные в отчетном месяце работы ежемесячно удерживает сумму в размере 10 % (Десять процентов) от стоимости выполненных и принятых генподрядчиком в отчетном периоде работ (отложенный платеж, гарантийное удержание).

В соответствии с п. 6.3.2 удержанная генподрядчиком в пункте 6.3.1 сумма является гарантией надлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств по настоящему договору, обеспечивает надлежащее исполнение субподрядчиком всех обязательств по договору, в том числе обязательств по уплате убытков, неустоек и иных платежей, и выплачивается субподрядчику в следующем порядке: - 50% от суммы отложенного платежа, формируемой генподрядчиком согласно пункта 6.3.1. настоящего договора, выплачиваются субподрядчику при наличии подписанного сторонами в установленные настоящим договором сроки акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору в полном объеме в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания указанного выше акта; - 50% от суммы отложенного платежа с учетом условий, изложенных в подпункте g пункта 18.2.3.15. договора, — формируемой генподрядчиком — согласно пункта 6.3.1. настоящего — договора, выплачиваются субподрядчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предоставления генподрядчику независимой гарантии надлежащего исполнения субподрядчиком гарантийных обязательств по настоящему договору либо в случае не предоставления - в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания гарантийного срока.

В случае досрочного расторжения настоящего договора, независимо от оснований, послуживших причиной расторжения договора, генподрядчик вправе удерживать сумму гарантийных удержаний до даты предоставления субподрядчиком независимой банковской гарантии надлежащего исполнения субподрядчиком гарантийных обязательств по настоящему договору, а в случае если таковая независимая банковская гарантия не будет предоставлена субподрядчиком - до даты истечения гарантийного срока (п. 6.3 договора).

18.2.3.14 гарантийный срок на результат выполненных работ и оборудование поставки субподрядчика, а) гарантийный срок на результат выполненных работ (гарантийный срок) по настоящему договору начинает исчисляться с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору в полном объеме либо при прекращении действия договора по иным основаниям (если применимо), чем надлежащее и полное его исполнение, и составляет: - 3 года (с учетом норм и правил РФ о предъявлении претензий в отношении обнаруженных дефектов и недостатков).

Гарантийный срок но договору № П-МНП32016-00008 от 05.12.2016 г. составляет 3 года и исчисляется с момента прекращения договора (пункт 18.2.3.14 указанного договора).

Срок действия договора № П-МНП32016-00008 от 05.12.2016 г. установлен в дополнительном соглашении № 5 к нему датой 30.09.2019 года.

Гарантийный срок завершен 30.09.2022 г. Срок возврата гарантийных удержаний - 30.10.2022 г.

Таким образом, на сегодняшний день задолженность по оплате выполненных работ генподрядчика перед субподрядчиком по договору составляет 244 537 114 руб. 93 коп. (4 323 949 961 руб. 13 коп. (выполнено работ) - 4 409 050 344 руб. 26 коп. (оплачено работ) + 329 637 498 руб. 06 коп. (возвращено ответчику)).

Ответчиком АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП» (далее – генподрядчик) был заключен договор субподряда № П-МНПЗ2016-0011 от 05.12.2016 г. (далее – договор) с истцом и АО «Промстрой» (далее – субподрядчик), по условиям которого субподрядчик принял на себя обязательства по выполнению части комплекса работ по строительству «Комбинированной установки переработки нефти (КУПН)» в объеме, указанном в приложении № 1 «Техническое задание» и приложении № 2 «Сводная стоимость и объем работ», осуществить поставку материалов и оборудования в соответствии с приложением № 5 к договору «Разделительная ведомость поставки», сдать генподрядчику результат выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием, рабочей документацией со штампом «в производство работ», а генподрядчик обязался надлежащим образом и своевременно выполнить свои обязательства по договору, в том числе принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену работ.

Согласно п. 14.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2018 г. (далее - ДС № 1), дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2019 г. (далее - ДС № 2), дополнительного соглашения № 3 от 21.06.2019 г. (далее - ДС № 3), дополнительного соглашения № 4 от 05.09.2019 г. (далее - ДС № 4) за проведение и завершение субподрядчиком работ и выполнение им обязательств по договору генподрядчик выплачивает субподрядчику сумму, составляющую предварительно 2 621 655 205 руб. 06 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - цена договора).

Цена договора является предварительной и подлежит уточнению после получения субподрядчиком от генподрядчика рабочей документации в полном объеме.

Цена договора состоит из прямых затрат (фиксированных единичных расценок, умноженных на фактический объем работ) и косвенных затрат, а также затрат на строительную технику для подъема тяжелых грузов, погрузо-разгрузочных работ и логистических операций, компенсации простоя техники, сумм дополнительного вознаграждения, суммы компенсации, в пределах установленного лимита, документально подтвержденных субподрядчиком дополнительных затрат на выполнение последним мероприятий по завершению работ по договору, а также возмещения инфляционной составляющей принятых объемов работ в 2017 -2018 годах в пределах лимита инфляции в соответствии с приложением № 2 к «Сводная стоимость и объем работ» к договору.

В силу п. 16.1.2 договора (в редакции ДС № 1, ДС № 4) оплата выполненных работ, производится генподрядчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 35 календарных дней с момента получения счета от субподрядчика, при условии приемки работ генподрядчиком и соблюдения субподрядчиком порядка выставления счета.

В соответствии с п. 24.2 договора (в редакции ДС № 4) договор действует до 30.09.2019 г., а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате - до их полного исполнения».

За время действия договора субподрядчиком были выполнены, а генподрядчиком приняты работы на сумму 2 902 713 607 руб. 92 коп., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат, актами выполненных работ и актами о приемке выполненных работ.

Оплата произведена на сумму 2 903 597 685 руб. 08 коп. Ответчику произведены возвраты средств в общем размере 166 525 829 руб. 50 коп. (также были удержаны штрафные санкции в размере 9 950 000 руб.) поскольку, производя оплату за выполненные работы ответчик ошибочно производил оплату без учета п.п. 6.3.1 - 6.3.3. В процессе исполнения договора стороны пришли к соглашению, что истец произведет частичный возврат за ранее оплаченные выполненные работы в счет гарантийных удержаний (обеспечительный платеж). Истец произвел возврат ранее оплаченных средств на общую сумму 166 525 829 руб. 50 коп., что подтверждается следующими платежными поручениями № 11018 от 04.02.2022 г. в размере 9 900 000 руб., № 125731 от 30.01.2020 в размере 4 000 000 руб., № 126564 от 10.02.2020 г. в размере 8 000 000 руб., № 127298 от 20.02.2020 г. в размере 4 000 000 руб., № 127485 от 21.02.2020 г. в размере 4 000 000 руб., № 128077 от 28.02.2020 г. в размере 4 000 000 руб., 129102 от 06.03.2020 г. в размере 4 000 000 руб., № 130622 от 20.03.2020 г. в размере 4 000 000 руб., № 169303 от 10.03.2021 г. в размере 34 000 000 руб., № 176823 от 26.04.2020 г. в размере 80 000 000 руб., № 195483 от 03.09.2021 г. в размере 10 625 829 руб. 50 коп. Согласно условиям п. 6.3.1 договора предусмотрено - в случае не предоставления субподрядчиком по истечении 10 (Десяти) дней с даты подписания настоящего договора оригинала банковской гарантии надлежащего исполнения субподрядчиком обязательств по настоящему договору генподрядчик из суммы причитающегося субподрядчику платежа за выполненные в отчетном месяце работы ежемесячно удерживает сумму в размере 10 % (Десять процентов) от стоимости выполненных и принятых генподрядчиком в отчетном периоде работ (отложенный платеж, гарантийное удержание).

В соответствии с п. 6.3.2 удержанная генподрядчиком в пункте 6.3.1 сумма является гарантией надлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств по настоящему договору, обеспечивает надлежащее исполнение субподрядчиком всех обязательств по договору, в том числе обязательств по уплате убытков, неустоек и иных платежей, и выплачивается субподрядчику в следующем порядке: - 50% от суммы отложенного платежа, формируемой генподрядчиком согласно пункта 6.3.1 настоящего договора, выплачиваются субподрядчику при наличии подписанного сторонами в установленные настоящим договором сроки акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору в полном объеме в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания указанного выше акта: - 50% от суммы отложенного платежа с учетом условий, изложенных в подпункте g пункта 18.2.3.15 договора, — формируемой генподрядчиком — согласно пункта 6.3.1. настоящего — договора, выплачиваются субподрядчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предоставления генподрядчику независимой гарантии надлежащего исполнения субподрядчиком гарантийных обязательств по настоящему договору либо в случае не предоставления - в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания гарантийного срока.

В случае досрочного расторжения настоящего договора, независимо от оснований, послуживших причиной расторжения договора, генподрядчик вправе удерживать сумму гарантийных удержаний до даты предоставления субподрядчиком независимой банковской гарантии надлежащего исполнения субподрядчиком гарантийных обязательств по настоящему договору, а в случае если таковая независимая банковская гарантия не будет предоставлена субподрядчиком - до даты истечения гарантийного срока (п. 6.3.3 договора).

18.2.3.14 гарантийный срок на результат выполненных работ и оборудование поставки субподрядчика, а) гарантийный срок на результат выполненных работ (гарантийный срок) по настоящему договору начинает исчисляться с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору в полном объеме либо при прекращении действия договора по иным основаниям (если применимо), чем надлежащее и полное его исполнение, и составляет: - 3 года (с учетом норм и правил РФ о предъявлении претензий в отношении обнаруженных дефектов и недостатков).

Гарантийный срок по договору № П-МНП32016-0011 от 05.12.2016 г. исчисляется с момента прекращения договора (пункт 18.2.3.14 указанного договора).

Срок  действия договора №  П-МНП32016-0011  от  05.12.2016 г.  установлен  в дополнительном соглашении № 4 к нему датой 30.09.2019 года (пункт 24.2 договора).

Гарантийный срок завершен 30.09.2022 г. Срок возврата гарантийных удержаний - 30.10.2022 г.

Таким образом, на сегодняшний день задолженность по оплате выполненных работ генподрядчика перед субподрядчиком по договору составляет 141 412 135 руб. 47 коп. (2 878 483 991 руб. 05 коп. (выполнено работ) - 2 903 597 685 руб. 08 коп. (оплачено работ) + 166 525 829 руб. 50 коп. (возвращено ответчику)).

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ответчиком обязательства по возврату истцу гарантийной суммы не исполнены.

В результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств, принятых по договорам, образовалась задолженность в размере 385 949 250 руб. 40 коп.

В нарушение требований ст. 65 АПК РФ доказательств перечисления суммы задолженности полностью или в части ответчик суду не представил. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании изложенного требование истца о взыскании с ответчика суммы гарантийного удержания в размере 385 949 250 руб. 40 коп. обоснованно и подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ истец вправе начислить проценты за пользование чужими денежными средствами, поэтому требования истца о взыскании процентов в размере 61 522 199 руб. 94 коп. за период с 31.10.2022 г. по 17.04.2024 г. и процентов, начисленных на сумму задолженности, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 18.04.2024 г. по день фактической уплаты задолженности, обоснованы и подлежат удовлетворению. Расчет судом проверен, ответчиком не оспорен.

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам.

К предварительному судебному заседанию от ответчика поступило заявление об оставлении искового заявления без рассмотрения, из содержания которого следует, что в адрес ответчика никакие досудебные претензии не поступали. Также не поступал иск.

Вместе с тем, 31.01.2023 г. в адрес ответчика были направлены три претензии (№ 5 от 20.07.2023 г., № 6 от 20.07.2023 г., № 7 от 29.08.2023 г.), а также исковое заявление (почтовое уведомление с отметкой в получении).

Согласно п. 28 Постановление Пленума ВС РФ № 18 предусмотрено, что суд первой инстанции или суд апелляционной инстанции, рассматривающий дело по правилам суда первой инстанции, удовлетворяет ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора, если оно подано не позднее дня представления ответчиком первого заявления по существу спора и ответчик выразил намерение его урегулировать, а также если на момент подачи данного ходатайства не истек установленный законом или договором срок досудебного урегулирования и отсутствует ответ на обращение либо иной документ, подтверждающий соблюдение такого урегулирования (часть 5 статьи 3, пункт 5 части 1 статьи 148, часть 5 статьи 159 АПК РФ, часть 4 статьи 1, статья 222 ГПК РФ).

Исходя и буквального толкования вышеуказанного пункта 28 Постановления Пленума ВС РФ № 18, а также имеющейся судебной практики (например, определение ВС РФ от 09.08.2022 г. г. №22-КГ22-2-К5), чтобы оставить исковое заявление без рассмотрения должно быть одновременно соблюдены совокупность следующих условий.

1-ое условие - ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения должно быть заявлено не позднее дня представления ответчиком первого заявления по существу спора и ответчик выразил намерение его урегулировать в досудебном порядке.

2-ое условие - на момент подачи ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения не истек установленный законом или договором срок досудебного урегулирования и отсутствует ответ на обращение либо иной документ, подтверждающий соблюдение такого урегулирования.

Применительно к рассматриваемому спору ответчиком не было соблюдено 1-ое условие.

Заявленное ходатайство не содержит намерений об урегулировании спора в досудебном порядке. Каких-либо предложений урегулировать спор в досудебном порядке в адрес истца не поступало. Соответствующие документы в материалы дела со стороны ответчика не представлены.

Оставление судом искового заявления без рассмотрения в целях лишь формального соблюдения процедуры досудебного порядка урегулирования спора противоречит смыслу и целям института досудебного порядка урегулированию споров, а также не соответствует задачам гражданского судопроизводства.

Расходы по госпошлине возлагаются на ответчика в порядке ст. 102, 110 АПК РФ и подлежат взысканию в доход федерального бюджета, поскольку истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307, 309, 310, 395, 711 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРОМСТРОЙ ГРУП" в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРОМСТРОЙ" задолженность в размере 385 949 250 (Триста восемьдесят пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч двести пятьдесят) руб. 40 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 61 522 199 (Шестьдесят один миллион пятьсот двадцать две тысячи сто девяносто девять) руб. 94 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму задолженности, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 18.04.2024 г. по день фактической уплаты задолженности.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРОМСТРОЙ ГРУП" в доход Федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 200 000 (Двести тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                                   Пронин А.П.