АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 www.kemerovo.arbitr.ru, E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru тел./факс (384-2) 58-37-05 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А27-16062/2020

город Кемерово

02 октября 2020 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., при ведении  протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Гутовой И.В., рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Управляющая компания «Зенит», г.Новокузнецк (ОГРН: 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «СибЖилСтрой», г.Новокузнецк (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, о взыскании 138 846,81 руб. штрафа, 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

решил:

Исковые требования удовлетворить. 

Обществу с ограниченной ответственностью «Сибжилстрой» в течение одного месяца  со дня вступления решения суда в законную силу устранить следующие недостатки работ:  

- устранить трещины на асфальтобетонном покрытии отмостки многоквартирного  дома по адресу 

<

...> у подъезда № 1 (4м), между подъездами № 1 и   № 2 (7м), у подъезда № 3 (7м), с торца подъезда № 4 (1,5м);  

- завезти землю в количестве 2м3 и разровнять ее вдоль детской площадки,  расположенной по адресу 

<

...>;  

-  устранить трещины в асфальтобетонном покрытии дворового проезда  многоквартирного дома по адресу 

<

...> у подъезда № 1 (7м), вдоль  бордюра (63м) и примыканий подходов к крыльцам (12м).  

- устранить 136м трещин на асфальтобетонном покрытии вдоль дорожного бордюра  многоквартирного дома по адресу 

<

...>;  

- устранить застой воды площадью 15м2 на проезжей части придомовой территории  многоквартирного дома по адресу 

<

...> между подъездами № 1 и   № 2;  

-  забетонировать стыки бордюрных камней 14шт., ограждающих парковку,  расположенную по адресу 

<

...>;  

- завезти землю в количестве 9мЗ и разровнять ее вдоль парковки (3м3) и детской  площадки (6м3), расположенных по адресу 

<

...> .  

- устранить провал 1м2 на отмостке многоквартирного дома по адресу 

<

...>;  

- устранить трещины на асфальтобетонном покрытии отмостки многоквартирного дома по  адресу г. Новокузнецк, ул. Космонавтов, 6 в торце подъезда № 1 (25м), между подъездами № 1 и   № 4 за домом (38м), между подъездами № 1 и № 4 во дворе дома (22м);  

- забетонировать стыки бордюр на отмостке за многоквартирным домом по адресу 

<

...> бис торца подъездов № 1 и № 4 (37шт.);  

- завезти землю в количестве 4,5м3 и разровнять ее вдоль бордюров детской площадки,  расположенной по адресу 

<

...>;  

- устранить трещины на асфальтобетонном покрытии проезжей части придомовой территории  многоквартирного дома по адресу 

<

...> между подъездами № 1 и   № 2 (7м), между подъездами № 2 и № 3 (15м и 11м);  

- устранить просадку асфальтового покрытия 1 м2 на пешеходной дорожке с торца  подъезда № 4 многоквартирного дома по адресу 

<

...>.  

- устранить провал 1м2 на отмостке многоквартирного дома по адресу 

<

...>;  

- устранить трещины на асфальтобетонном покрытии отмостки многоквартирного дома по  адресу 

<

...> в торце подъезда № 1 10м), между подъездами № 1 и   № 4 за домом (65м), между подъездами № 1 и № 4 во дворе дома (15м);  

- забетонировать стыки бордюр на отмостке за многоквартирным домом по адресу 

<

...> и с торца подъездов № 1 и № 4 (10шт.), вдоль парковки (3шт.),  вдоль детской площадки (7шт.);  

- завезти землю в количестве 8,8м3 и разровнять ее по периметру отмостки в торце  подъезда № 1 (0,5м3), за домом (2,5м3), в торце подъезда № 4 (2м3), вдоль бордюрного камня  парковки (1м3), вдоль детской площадки (2м3), у контейнерной площадки (0,8м3)  многоквартирного дома по адресу 

<

...>;  

- устранить трещины на пешеходной дорожке придомовой территории многоквартирного  дома по адресу 

<

...> в районе подъездов № 2, № 3 (2м),  

- заменить один бордюрный камень у подъезда № 4 многоквартирного дома по адресу 

<

...>;  

- устранить трещины на асфальтобетонном покрытии подхода к крыльцу подъезда № 1 (4м),  дворового проезда между подъездами № 1 и № 2 (7м), в местах примыкания асфальта к  дорожному бордюру (38м) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу 

<

...>.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибжилстрой» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Зенит» 138 846 руб. 81  коп. штрафа, 200 руб. почтовых расходов, 11 165 руб. расходов по уплате государственной  пошлины.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Зенит»  справку на возврат из федерального бюджета 4869 руб. государственной пошлины, уплаченной  по платёжному поручению № 1324 от 05.12.2019.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской  области.  

Судья Т.Н. Куликова