АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

440000, г. Пенза,  ул. Кирова,35/39, тел.: (8412) 52-99-09, факс: 55-36-96, http://penza.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Пенза  дело №А49-426/2019

«02» апреля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 марта 2019 года

В полном объеме решение изготовлено 02 апреля 2019 года

Арбитражный суд Пензенской области в составе председательствующего судьи Алексиной Г.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мясниковой С.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

закрытого акционерного общества «Пензенская горэлектросеть», Московская ул., д. 82В, Пенза г., Пензенская область, 440600 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-ком», Пушкари ул., д. 51, Пенза г., Пензенская область, 440068 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 1 354 120 руб. 80 коп.

при участии в заседании:

от истца: представитель ФИО1 (доверенность),

у с т а н о в и л:

закрытое акционерное общество «Пензенская горэлектросеть» (далее – ЗАО  «Пензенская горэлектросеть», истец) обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-ком» (далее – ООО «Альфа-ком», ответчик) о взыскании неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №2016-00280-ТП от 13.05.2016 г. за период с 20.06.2017 г. по 20.06.2018 г. в сумме 1 354 120 руб. 80 коп.

Исковые требования заявлены на основании ст.ст. 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судебное заседание назначено на 26.03.2019 г.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела считается надлежащим образом извещенным в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путём размещения информации о движении дела на сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://penza.arbitr.ru/.

Неявка надлежаще извещенных о месте и времени рассмотрения дела участников судебного процесса не препятствует рассмотрению дела по существу в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд, с учетом мнения представителя истца, признал возможным проведение судебного заседания в отсутствие представителя ответчика. 

Истец исковые требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в иске. 

В нарушение требований ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик письменный отзыв на иск не представил, о причинах невозможности представления суду отзыва не пояснил.

В силу ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения  ими процессуальных действий.

Согласно п. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам. 

Изучив материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд пришел к следующему.

Между ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (сетевая организация) и                                     ООО «Альфа-ком» (заявитель) был заключен договор №2016-00280-ТП от 13.05.2016 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)), по условиям которого истец обязался осуществить за плату технологическое присоединение энергопринимающих устройств ответчика  для электроснабжения нежилого здания (бойня) лит. А, расположенного по адресу: г. Пенза, Первомайский район, ул. Пушкари, д. 51 (л.д. 10-12).

Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца со дня заключения договора.

В приложении к договору приведены технические условия №2016-00280-ТУ от 11.05.2016 г. для присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 8.5. договора ответчик принял на себя обязательство надлежащим образом исполнять указанные в разделе III договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 31.12.2015 г. №191 и составляет 1 483 968  руб., в том числе НДС 226 368 руб.

В соответствии с п. 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 5 процентов платы за технологическое присоединение (74 198 руб. 40 коп.) вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора,

- 95 процентов платы за технологическое присоединение (1 409 769 руб. 60 коп.) вносятся в течение 3 лет со дня подписания Сторонами акта об осуществлении технологического присоединения равными долями ежеквартально.

Также в силу п. 8.1. договора заявитель принял на себя обязательство надлежащим образом исполнять обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

В соответствии с п. 8.2. договора ответчик обязался после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Соглашением от 11.08.2016 г. стороны договорились считать договор №2016-00280-ТП от 13.05.2016 г. незаключенным (л.д. 14).

Соглашением от 08.12.2016 г. стороны пришли к соглашению считать соглашение от 11.08.2016 г. расторгнутым с даты его подписания и приняли новую редакцию договора об осуществлении технологического присоединения №2016-00280-ТП от 13.05.2016 г. (л.д. 15-17).

Согласно п. 5 договора (в редакции соглашения от 08.12.2016 г.) срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца со дня заключения договора.

В соответствии с п. 3 соглашения от 08.12.2016 г. договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №2016-00280-ТП от 13.05.2016 г. считается заключенным в редакции, указанной в п. 2 соглашения, с даты поступления подписанного заявителем экземпляра соглашения в сетевую организацию.

Согласно отметки на стр. 1 соглашения, датой поступления подписанного заявителем экземпляра соглашения в сетевую организацию является 17.02.2017 г.

Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – до 17.06.2017 г.

Согласно п. 4 договора (в редакции соглашения от 08.12.2016 г.) технические условия №2016-00280-ТУ от 11.05.2016 г. являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения настоящего договора (то есть, срок действия технических условий – до 17.02.2019 г.).

В п.п. 8.1., 8.2. договора (в редакции соглашения от 08.12.2016 г.) также содержится предусмотренная в первоначальной редакции договора обязанность заявителя надлежащим образом исполнять обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, а также уведомлять сетевую организацию о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями. 

Перечень мероприятий по технологическому присоединению, входящих в обязанности сторон, указан в технических условиях №2016-00280-ТУ от 11.05.2016 г., являющихся приложением к договору. 

Согласно пункту 10 технических условий в обязанности сетевой организации входит:

1)Монтаж комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 10/0.4 кВ 250 кВА в месте, согласованном с Управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Пензы. Определение проектом марки электрооборудования.

2)Подключение проектируемой ТП на напряжении 10 кВ с прокладкой KЛ-10 кВ расчетного сечения от РУ-10 кВ проектируемой ТП до точки врезки в КЛ-10 кВ ТП-682 до ТП-1059. Определение проектом точки врезки в КЛ-10 кВ от ТП-682 до ТП-1059 и объемов по подключению. Запрос и согласование трасс КЛ-10 кВ с Управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Пензы.

3)Обеспечение точки технологическою присоединения не далее 25 метров от границы земельного участка заявителя с прокладкой КЛ-1 кВ расчетного сечения от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП. Запрос и согласование трассы КЛ-1 кВ с Управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Пензы на стадии проектирования.

4)Разработка проектной документации по мероприятиям, осуществляемым ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

5)Включение электроустановки заявителя после выполнения всех мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

Согласно пункту 11 технических условий в обязанности заявителя входит:

1) Выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта в границах участка заявителя с учетом действующих нормативных документов.

2) Монтаж прибора учета электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении единства измерений, а также раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442, на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сетевой организации и заявителя.

3) Установка приборов защитного отключения, обеспечивающих защиту от сверхтоков, технологических нарушений в электросетях, импульсных помех и коммутационных перенапряжений с номинальным током расцепителя, соответствующим расчетной нагрузке на вводе и разрешенной мощности на присоединение с учетом селективности. Мероприятия по монтажу заземления нулевого провода на вводе объекта с устройством контура повторного заземления. 

Фактическое присоединение энергопринимающего устройства ответчика к объектам сетевой организации возможно осуществить только после выполнения ответчиком всех мероприятий, предусмотренных техническим условиями к договору №2016-00280-ТП от 13.05.2016 г.

В рамках выполнения своих обязательств по договору №2016-00280-ТП от 13.05.2016 г. ЗАО «Пензенская горэлектросеть» построило и ввело в эксплуатацию КТП-250/10/0,4 кВ №1070, кабельные линии КЛ-10 кВ до ТП-1070 и кабельные линии КЛ-1 кВ от ТП-1070 до границы участка ответчика.

Указанные обстоятельства подтверждаются актом №83 о 30.06.2017 г. о приемке работ по строительству КТП, актом №92 от 31.08.2017 г. о приемке работ по прокладке кабельных линий, актом о приемке в эксплуатацию КТП 250/10/0,4 кВ №1070 от 29.12.2017 г.,  актом о приемке в эксплуатацию КЛ-10 кВ от 29.12.2017 г. (л.д. 18-24).

Ответчиком же обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями, в срок, указанный в договоре (до 17.06.2017 г.) выполнены не были.

Уведомление о выполнении технических условий в соответствии с п. 8.2. договора от ответчика в адрес истца не поступало.

Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленных п. 5 договора, истец в соответствии с п. 17 договора (в редакции соглашения от 08.12.2016 г.) начислил ответчику неустойку за период с 20.06.2017 г. по 20.06.2018 г. в сумме 1 354 120 руб. 80 коп., взыскать которую с ответчика он просит в рамках настоящего дела.

Пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой. 

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

Факт неисполнения обязательств по договору в установленный срок является основанием для взыскания неустойки (статьи 331, 431 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с подпунктом «в» пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (далее – Правила №861), договор о технологическом присоединении должен содержать в качестве существенного условия положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе, обязательств по соблюдению срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором.

Данное существенное условие договора было согласовано сторонами и содержится в п. 17 договора  №2016-00280-ТП от 13.05.2016 г. (в редакции соглашения от 08.12.2016 г.), согласно которому сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящем абзацем порядке за год просрочки.

Таким образом, в соответствии с положениями пункта 16 Правил №861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению относится к существенным условиям договора, за нарушение которого сторона договора несет ответственность в виде неустойки, условие о которой также отнесено к существенным условиям договора в соответствии с положениями пункта 16 Правил №861.

Согласно расчету истца, приведенному в исковом заявлении, размер неустойки за период с 20.06.2017 г. по 20.06.2018 г. составляет 1 354 120 руб. 80 коп. (л.д. 5).

Проверив расчет истца с учетом норм действующего законодательства и судебной практики, суд признает его верным, соответствующим условиям п. 17 договора №2016-00280-ТП от 13.05.2016 г. (в редакции соглашения от 08.12.2016 г.).

Ответчик своевременно не исполнил взятые на себя обязательства по договору, связанные с выполнением мероприятий по технологическому присоединению, в связи с чем, требования истца о взыскании неустойки суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Основания для применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют, поскольку ответчиком не было заявлено о несоразмерности взыскиваемой неустойки последствиям нарушения обязательства, доказательства несоразмерности в материалы дела ответчиком не представлены.

На основании вышеизложенного, исковые требования подлежат удовлетворению полностью.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины в сумме 26 541 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить полностью, расходы по госпошлине отнести на ответчика. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа-ком» в пользу закрытого акционерного общества «Пензенская горэлектросеть» неустойку в сумме 1 354 120 руб. 80 коп., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 26 541 руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья                                                                                 Г.В. Алексина