АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-24887/2017

11 апреля 2018 года

город Омск

Резолютивная часть решения объявлена 05.04.2018 г. 

Полный текст решения изготовлен 11.04.2018 г.

Арбитражный суд Омской области в составе

судьи Целько Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания              ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Галит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ответчику бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 317 общеразвивающего вида» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 543 504 руб. 64 коп.

 

В заседании приняли участие:

от истца: не явились

от ответчика: ФИО2 (приказ № 339-кр от 02.07.2014 г.)

Сущность спора: общество с ограниченной ответственностью «Галит» обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 317 общеразвивающего вида» о взыскании 543 504 руб. 64 коп., из которых 143 727 руб. 92 коп. - задолженность по договору на выполнение ремонтных работ № 1/ДС317 от 03.08.2017 г., 399 776 руб. 75 коп. – задолженность по договору на выполнение ремонтных работ № 2/ДС317 от 03.08.2017 г.

Истец в судебное заседание не явился, направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Учитывая, что общество с ограниченной ответственностью «Галит» надлежащим образом извещено о месте и времени рассмотрения дела, суд, руководствуясь ст. 156 АПК РФ, считает возможным разрешить спор в его отсутствие, удовлетворив соответствующее ходатайство.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не оспорил.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя ответчика, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Галит» (подрядчик) и бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 317 общеразвивающего вида» (заказчик) заключили договор на выполнение ремонтных работ № 1/ДС317 от 03.08.2017 г. и договор на выполнение ремонтных работ     № 2/ДС317 от 03.08.2017 г.

Согласно п. 1.1 договора № 1/ДС317 от 03.08.2017 г. подрядчик  обязался выполнить ремонт кровли пищеблока БДОУ г. Омска «Детский сад № 317 общеразвивающего вида», расположенного по адресу: 644109, 

<

...>, и передать их заказчику, а заказчик – принять и оплатить  выполненные работы.

Цена договора, согласно приложению № 1, является твердой и составляет                 143 727 руб. 92 коп. (п. 2.1 договора).

В п. 3.1 договора согласованы сроки выполнения работ: начало работ – с момента  заключения настоящего договора, окончание – 31.10.2017 г.

 Согласно п. 1.1 договора № 2/ДС317 от 03.08.2017 г. подрядчик обязался выполнить ремонт кровли детского сада БДОУ г. Омска «Детский сад № 317 общеразвивающего вида», расположенного по адресу: 644109, 

<

...>, и передать их заказчику, а заказчик – принять и оплатить  выполненные работы.

Цена договора, согласно приложению № 1, является твердой и составляет                  399 776 руб. 75 коп. (п. 2.1 договора).

В п. 3.1 договора согласованы сроки выполнения работ: начало работ – с момента  заключения настоящего договора, окончание – 31.10.2017 г.

Как видно из материалов дела, работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Галит» и приняты ответчиком по актам о приемке выполненных работ формы № КС-2 № 1 от 18.08.2017 г. на сумму 143 727 руб. 92 коп. и № 1 от 18.08.2017 г. на сумму 399 776 руб. 75 коп.

Сторонами подписаны справки о стоимости выполненных работ и затрат формы              № КС-3 № 1 от 18.08.2017 г. на сумму 143 727 руб. 92 коп. и № 1 от 18.08.2017 г. на сумму 399 776 руб. 75 коп. 

В нарушение условий договоров (ч.ч. 4) обязательства по оплате выполненных                   обществом с ограниченной ответственностью «Галит» работ ответчиком не исполнены, в связи с чем у бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 317 общеразвивающего вида» образовалась задолженность перед истцом в сумме 543 504  руб. 64 коп.,  и в связи с чем истцом заявлен настоящий иск.  

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. п. 4.1 договоров оплата выполненных работ осуществляется заказчиком в форме перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 5 календарных дней с момента подписания актов приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3. 

Доказательства оплаты выполненных работ на сумму 543 504 руб. 64 коп. бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 317 общеразвивающего вида» в материалы дела не представило, иск по существу не оспорило.

Поэтому требования истца о взыскании 543 504 руб. 64 коп. основного долга подлежат удовлетворению. 

Расходы по  уплате государственной пошлины относятся на ответчика по  правилам  ст. 110 АПК РФ.

В связи с подачей иска в электронном виде государственная пошлина взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета, поскольку документ об уплате государственной пошлины в электронном виде не является основанием для решения вопроса об её распределении.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с  бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 317 общеразвивающего вида» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Галит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 543 504 руб. 64 коп. основного долга.

Взыскать с бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 317 общеразвивающего вида» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 13 870 руб. государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                Т.В. Целько