Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-48292/2019

10 октября 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  26 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  10 октября 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Панюшкиным Н.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭНЕРГОИНВЕСТ" (адрес:  Россия 199106, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт СРЕДНИЙ В.О. 88/ЛИТЕР А; Россия 196105, Санкт-Петербург, а/я 324, ОГРН:  1107847053050; 1107847053050);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ТЭК-СЕРВИССТРОЙ" (адрес:  Россия 117623, МОСКВА, УЛИЦА. СТАРОНИКОЛЬСКАЯ ВЛАДЕНИЕ/85, СТРОЕНИЕ 3/1, ОФИС 101, ОГРН:  1137746880260);

о взыскании 326892.98

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 25.03.19,

- от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,

установил:

ООО "СТРОЙЭНЕРГОИНВЕСТ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "ТЭК-СЕРВИССТРОЙ" о взыскании 326 892 руб. 98 коп. неустойки за просрочку выполнения работ по состоянию на 30.07.15.

Определением от 24.06.19 года суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства на основании статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без его участия на основании ст.156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между ООО «СтройЭнергоИнвест» (далее - Генподрядчик) и ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ» (далее - Субподрядчик) был заключен Договор подряда №ПСК16ТП/224/14-ТЭК от 01.11.2014 г. (далее - Договор), в соответствии с условиями которого Субподрядчик обязался выполнить работы, а Генподрядчик обязался принять и оплатить их.

В соответствии с п. 1.4. Окончание выполнения работ по настоящему договору 30.04.2015г. по объекту «Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек в 2014 г.)» производственного отделения «Западные и северные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада Псковэнерго»

В нарушение договорных обязательств, работы выполнены Субподрядчиком и сданы Генподрядчику актами о приемке выполненных работ №2 от 30.07.2015 г.

В целях досудебного урегулирования спора Ответчику была направлена претензия № 13 от 20.06.2018 г. Данная претензия была оставлена Ответчиком без ответа.

Согласно п. 5.1.18 Договора предусмотрена ответственность Субподрядчика за нарушение сроков выполнения этапа работ по Договору - пени в размере 0,5% от общей стоимости этапа работ за каждый день просрочки, за период с 01.05.15 по 30.07.15 в размере 326 892 руб. 98 коп. 

 Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТЭК-СЕРВИССТРОЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭНЕРГОИНВЕСТ" 326 892 руб. 98 коп. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТЭК-СЕРВИССТРОЙ" в доход федерального бюджета 326 892 руб. 98 коп. государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.