АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

дело № А84-1256/19

11 июля 2019 года

город Севастополь

 

Резолютивная часть решения оглашена 04.07.2019.

Решение в полном объёме составлено 11.07.2019.

 

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Погребняка А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1, рассмотрев дело

по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью «Крымский Гипс» (Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Севэлектромонтаж-464» (г. Севастополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о расторжении договора и обязании предоставить документы

 

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Севэлектромонтаж-464» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Крымский Гипс» 

о взыскании задолженности в размере 760 758 рублей

 

при участии в судебном заседании:

от истца по первоначальному иску: ФИО2 – представитель по доверенности;

от ответчика по первоначальному иску: ФИО3 – представитель по доверенности;        

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Крымский Гипс» (далее – истец, ООО «Крымский Гипс») обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Севэлектромонтаж-464» (далее – ответчик, ООО «Севэлектромонтаж-464») о расторжении договора № 10/04-18 на изготовление и поставку комплектной трансформаторной подстанции промышленной, заключенного 10.04.2018 между сторонами, обязании предоставить подписанный акт о приёмке выполненных работ, а также об обязании документы (справку о стоимости выполненных работ, товарную накладную по форме ТОРГ-12, счёт-фактуру по договору) на сумму 5 717 351,32 рубль.

Определением суда от 27.03.2019 исковое заявление было принято судом к рассмотрению.

В обоснование исковых требований истец ссылается на следующее: 10.04.2018 между сторонами по делу был заключен договор № 10/04-18 на изготовление и поставку комплектной трансформаторной подстанции промышленной, по условиям которого предусмотрена поставка трансформаторной подстанции (соответствует 90 % общей цены договора), а также передача покупателю документов (паспорт, чертежи и схемы, инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации, инструкция по техническому обслуживанию), необходимых для её эксплуатации (соответствует 10 % общей цены договора); поставщиком поставлено само оборудование, за которое перечислены денежные средства в размере 5 717 351,32 рубль, однако не переданы предусмотренные условиями договора документы; со стороны поставщика имеет место длительное неисполнение обязанности по передаче документов на поставленное оборудование; покупатель самостоятельно ввёл объект в эксплуатацию; дальнейший интерес к исполнению поставщиком его обязанности по передаче документов у покупателя утрачен, в связи с чем, просил суд обязать поставщика предоставить акт приёма-передачи оборудования, а также бухгалтерские документы на сумму 5 171 351,32 рубль, соответствующую сумме произведенной оплаты (90 % от предусмотренной договором общей цены).

В дальнейшем от ООО «Крымский Гипс» поступило заявление об отказе от первоначальных исковых требований в части обязания ООО «Севэлектромонтаж-464» предоставить подписанный Акт приёма-передачи оборудования по Договору № 10/04-18 на изготовление и поставку комплектной трансформаторной подстанции промышленной от 10.04.2018.

Согласно резолютивной части определения от 04.07.2019, судом принят отказ ООО «Крымский Гипс» от первоначальных исковых требований в части обязания ООО «Севэлектромонтаж-464» предоставить подписанный Акт приёма-передачи оборудования по Договору № 10/04-18 на изготовление и поставку комплектной трансформаторной подстанции промышленной от 10.04.2018; производство по делу № А84-1256/19 в данной части первоначального иска прекращено.

Представитель ООО «Севэлектромонтаж-464» возражал против заявленных требований, ссылался на фактические исполнение всех обязательств по договору, в том числе, в части передачи документации в отношении поставленного оборудования.  

От общества с ограниченной ответственностью «Севэлектромонтаж-464» поступил встречный иск к обществу с ограниченной ответственностью «Крымский Гипс» о взыскании задолженности по указанному выше договору поставки, взыскании неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Определением суда от 06.05.2019 встречный иск ООО «Севэлектромонтаж-464» принят судом к совместному рассмотрению с первоначальным иском ООО «Крымский Гипс».

Истцом по встречному иску требования уточнялись. В результате уменьшения исковых требований, ООО «Севэлектромонтаж-464» просило суд взыскать с ООО «Крымский Гипс» задолженность в размере 635 261 рубль, а также неустойку в размере 207 095 рублей за просрочку срока оплаты поставленного оборудования.

Представитель ООО «Крымский Гипс», ссылаясь на доводы первоначального иска, возражал против удовлетворения встречного иска.      

Судом установлены следующие фактические обстоятельства дела.

10.04.2018 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Севэлектромонтаж-464» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Крымский гипс» (Покупатель) был заключен договор № 10/04-18 на изготовление и поставку комплектной трансформаторной подстанции промышленной, в соответствии с пунктом 1.1 которого Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить комплектную трансформаторную подстанцию промышленную (далее по тексту - Оборудование) в соответствии с техническим заданием и утвержденным проектом, являющимися неотъемлемой частью Договора.

В соответствии с пунктом 3.4. Договора, в течение 5 рабочих дней с даты отгрузки Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:

оригинал удостоверения качества;

счет-фактуру;

товарные накладные по форме ТОРГ-12.

Согласно пунктам 4.9, 4.10 Договора, монтаж Оборудования осуществляется силами Поставщика.

Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующую техническую документацию: паспорт; чертежи и схемы; инструкции по монтажу Оборудования; инструкции по эксплуатации Оборудования; инструкции по техническому обслуживанию.

В случае поставки Оборудования без технической документации на него, поставка считается некомплектной и срок гарантии исчисляется со дня получения Покупателем технической документации (п.4.11 Договора).

Разделом 5 Договора предусмотрено, что Поставщик обязуется:

- изготовить и осуществить поставку Оборудования Покупателю в количестве, в порядке и в сроки, определенные в договоре и в спецификациях;

- известить надлежащим образом Покупателя об отправке Оборудования;

- передать Покупателю документы, указанные в пунктах 3.11, 4.10 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.1 Договора, общая сумма договора составляет 6 352 612,59 рублей, в т.ч. НДС 18 %.

Согласно пункту 6.5 Договора, конечной датой исполнения обязательств Покупателя по оплате Договора считается дата зачисления суммы расчета в размере 10% от общей суммы Договора на расчетный счет Поставщика, которые перечисляются после монтажа КТПП на объекте Покупателя, проведения пуско-наладочных работ, передаче документов на КТПП и сдаче в эксплуатацию Оборудования контролирующей организации.

Покупателем представлены копии платёжных поручений, согласно которых Поставщику перечислен аванс в размере 5 617 351,32 рубль.  

25.04.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «Севэлектромонтаж-464» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Регионэнерго» (Подрядчик) заключен договор № 19-04/2018 на выполнение подрядных работ, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется на свой страх и риск и/или привлеченными силами выполнить в соответствии с условиями настоящего договора электромонтажные работы по строительству сетей внешнего электроснабжения электроустановок завода ООО «Крымский гипс» по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Промышленная, 1Б.

14.06.2018 года сторонами подписан Акт приёма-передачи оборудования, согласно которому Покупателем принято оборудование по Договору, а именно: комплектная трансформаторная подстанция промышленная 2х1250/10/04кВ в полной комплектации, согласно проекта 20/25-27-18. В акте указано, что оборудование в полной комплектации и при визуальном осмотре без повреждений.

Обществом с ограниченной ответственностью «Севэлектромонтаж-464» представлены:

- Акт приёмки траншей под монтаж кабелей по объекту «Внешнее электроснабжение электроустановок завода ООО «Крымский гипс» по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Промышленная, 1Б»;

- Акт освидетельствования скрытых работ (прокладка кабельной линии 10 кВ) по объекту «Внешнее электроснабжение электроустановок завода ООО «Крымский гипс» по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Промышленная, 1Б»;

- Акт сдачи-приёмки выполненных электромонтажных работ от 12.07.2018, составленный комиссией в составе: заказчика – ООО «Крымский гипс», субподрядчика – ООО «Регионэнерго». Согласно указанному акту, ООО «Регионэнерго» к проверке и сдаче предъявлены: анкерные опоры; КЛ-10кВ, фундамент по КТПГС с контуром заземления, КТПГС в комплекте. Заключение комиссии: внешнее электроснабжение электроустановок завода ООО «Крымский гипс» по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Промышленная, 1Б» выполнены субподрядчиком ООО «Регионэнерго» в полном объёме. Замечаний по качеству работ и срокам нет.

Обществом с ограниченной ответственностью «Крымский гипс» представлен суду Акт ГУП Республики Крым «Крымэнерго» от 12.12.208 № 45/1148/1494/18 об осуществлении технологического присоединения объекта электроэнергетики (энергопринимающего устройства) по адресу: «Завод», 

<

...>».

19.11.2018 Покупателем в адрес Поставщика направлена претензия о предоставлении счёта-фактуры и акта об оказанных услугах.

25.02.2019 Покупателем в адрес Поставщика направлена претензия, в которой указывалось на необходимость исполнения Поставщиком его обязанности, предусмотренной пунктом 4.10 Договора, относительно предоставления паспорта, чертежей и схем, инструкции по монтажу Оборудования, инструкции по эксплуатации Оборудования, инструкции по техническому обслуживанию.

В судебных заседаниях представитель ООО «Крымский гипс» ссылался на неисполнение Поставщиком (ООО «Севэлектромонтаж-464») обязанности по передаче предусмотренной пунктом 4.10 договора и необходимой для эксплуатации КТП документации.

Представитель ООО «Севэлектромонтаж-464» настаивал на передаче Покупателю предусмотренной пунктом 4.10 Договора документации, ссылался на факт её отправки почтой в адрес ООО «Крымский гипс», подтверждением чему, по мнению представителя, являются описи вложения в ценное письмо, в которых указан перечень отправляемой документации.

Согласно описи вложения от 27.11.2018, в адрес ООО «Крымский гипс» отправлены: акт приёма-передачи оборудования; акт сверки взаимных расчётов; спецификация на изготовленное оборудование; счёт на оплату; УПД счёт-фактура.

Согласно представленной описи вложения от 21.02.2019, в адрес ООО «Крымский гипс» отправлены: дубликат справки о стоимости выполненных работ и затрат; дубликат акта о приёмке выполненных работ за октябрь 2018 г., дубликат локального сметного расчёта, дубликат акта сверки, дубликат акта сдачи-приёмки оборудования, дубликат счета на оплату.

Ссылаясь на указанные документы, представитель ООО «Севэлектромонтаж-464» просил суд удовлетворить встречный иск о взыскании с ООО «Крымский гипс» задолженности в размере 635 261 рубль, а также неустойки за просрочку оплаты.

Выслушав пояснения представителей сторон, исследовав фактические обстоятельства дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения первоначального иска и к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения встречного иска исходя из следующего.

Между сторонами заключен договор на изготовление и поставку комплектной трансформаторной подстанции промышленной.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК Ф), по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (пункт 5 статьи 454 ГК РФ).

Согласно статье 478 ГК РФ, продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи о комплектности.

В случае, когда договором купли-продажи не определена комплектность товара, продавец обязан передать покупателю товар, комплектность которого определяется обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьёй 464 ГК РФ, если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи (пункт 2 статьи 456), покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором.

Пунктом 1 статьи 519 ГК РФ предусмотрено, что покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 480 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.

Статьёй 480 ГК РФ установлено, что в случае передачи некомплектного товара (статья 478) покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца:

соразмерного уменьшения покупной цены;

доукомплектования товара в разумный срок.

Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему выбору: потребовать замены некомплектного товара на комплектный; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

В настоящем случае, в рамках заключенного между сторонами договора № 10/04-18, истцу по первоначальному иску поставлена трансформаторная подстанция промышленная, которая принята и за которую произведена оплата в размере 5 717 351,32 рубль, что соответствует условиям договора и составляет 90 % общей цены договора.

В соответствии с пунктом 24 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018), покупатель не вправе полностью отказаться от оплаты товара, поставленного без необходимой документации, если он не заявил об отказе от такого товара по правилам ст. 464 ГК РФ.

Истец по первоначальному иску, как покупатель, не заявлял об отказе от товара ввиду не передачи поставщиком необходимой документации, не заявлял требования о возврате денежных средств в размере 5 171 351,32 рубль. В судебных заседаниях представитель ООО «Крымский Гипс» указывал на сохранение потребности в поставленном товаре.

При этом, представленными сторонами доказательствами подтверждается факт установки КТП на объекте ООО «Крымский гипс», а также факт осуществления технологического присоединения объекта ООО «Крымский гипс» посредством поставленной КТП.

Указанные обстоятельства не оспариваются сторонами.

Истец по первоначальному иску ссылается на не передачу ему документов, которые по условиям договора (п. 4.10) должны были быть переданы (паспорт, чертежи и схемы, инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации, инструкция по техническому обслуживанию), необходимые для эксплуатации трансформаторной подстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии с пунктом 4.10 Договора, Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующую техническую документацию: паспорт; чертежи и схемы; инструкции по монтажу Оборудования; инструкции по эксплуатации Оборудования; инструкции по техническому обслуживанию.

Согласно пункту 6.5 Договора, конечной датой исполнения обязательств Покупателя по оплате Договора считается дата зачисления суммы расчета в размере 10% от общей суммы Договора на расчетный счет Поставщика, которые перечисляются после монтажа КТПП на объекте Покупателя, проведения пуско-наладочных работ, передаче документов на КТПП и сдаче в эксплуатацию Оборудования контролирующей организации.

Таким образом, обязанность Покупателя по осуществлению окончательного расчета (10 % от общей суммы Договора) возникает после выполнения Поставщиком комплекса мероприятий, в том числе, по передаче документов на КТПП.

При этом, стороны договора согласовали его условия, в соответствии с которыми на поставщика возлагается обязанность по передаче конкретного перечня документов, сопровождающих поставку и установку КТПП.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поставщиком (ООО «Севэлектромонтаж-464») не представлены суду какие-либо доказательства, подтверждающие исполнение им обязанности, предусмотренной пунктом 4.10 Договора.

Представленные суду описи вложения от 27.11.2018, от 21.02.2019 свидетельствует об отправке в адрес ООО «Крымский гипс» иных документов: акта приёма-передачи оборудования, акта сверки взаимных расчётов, спецификации на изготовленное оборудование, счёта на оплату, УПД счёт-фактура, а также дубликата справки о стоимости выполненных работ и затрат; дубликата акта о приёмке выполненных работ за октябрь 2018, дубликата локального сметного расчёта, дубликата акта сверки, дубликата акта сдачи-приёмки оборудования, дубликата счета на оплату.

Перечисленные выше документы не являются теми документами, которые ООО «Севэлектромонтаж-464» в силу пункта 4.10 Договора был обязан представить Покупателю (паспорт, чертежи и схемы, инструкции по монтажу Оборудования, инструкции по эксплуатации Оборудования, инструкции по техническому обслуживанию), в связи с чем, у Покупателя не возникла обязанность по оплате 10 % от общей суммы договора.

Поскольку сторонами договора определена цена самого оборудования (90 % от общей суммы договора), произведён расчёт за поставленное оборудование (5 717 351,32 рубль), отсутствует спор относительно качества и комплектности самой КТПП, однако имеет место неисполнение обязанности Поставщика по передаче документов на поставленный товар, суд считает подлежащими применению положения статьи 480 ГК РФ, регулирующей последствия передачи некомплектного товара, в соответствии с которой покупатель вправе требовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены.

При этом, сторонами Договора определена цена, соответствующая обязанности Поставщика выполнить комплекс работ по монтажу КТПП на объекте Покупателя, проведению пуско-наладочных работ, передаче документов на КТПП и сдаче в эксплуатацию Оборудования контролирующей организации – 10 % от общей суммы договора, что составляет 635 261 рубль.

Таким образом, ввиду не передачи Поставщиком Покупателю документов на КТПП, покупная цена, установленная договором, подлежит уменьшению на указанные в пункте 6.5 Договора 10% общей суммы договора, которые составляют размер встречных исковых требований.

С учётом изложенного, встречные исковые требования о взыскании с ООО «Крымский гипс» не подлежат удовлетворению в связи с отсутствием доказательств исполнения Поставщиком в полном объёме обязанностей, возложенных на него пунктом 4.10 Договора.

Исковые требования о взыскании пени также не подлежат удовлетворению ввиду отсутствия со стороны Покупателя какой-либо просрочки.        

Что касается первоначальных исковых требований о расторжении договора, суд исходит из следующего.

В соответствии со статьёй 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной.

Поскольку Поставщиком нарушены требования пункта 4.10 Договора, суд, с учётом положений статей 480, 519 ГК РФ, считает подлежащими удовлетворению первоначальные исковые требования ООО «Крымский гипс» о расторжении Договора № 10/04-18.

Факт предоставления ООО «Севэлектромонтаж-464» в материалы дела на стадии судебного разбирательства каких-либо документов, в том числе, предусмотренных пунктом 4.10 Договора, не опровергает права покупателя отказаться от договора. Исходя из пояснений представителя ООО «Крымский гипс» интерес к дальнейшему исполнению утрачен. 

При этом, требования первоначального иска в части обязания предоставить справку о стоимости выполненных работ, товарную накладную по форме ТОРГ-12, счёт-фактуру по договору на сумму 5 717 351,32 рубль не подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ, самостоятельно определив способы их судебной защиты (статья 12 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 11 ГК РФ определено, что судебной защите подлежат оспоренные или нарушенные права. Удовлетворение иска должно быть направлено на восстановление нарушенного материального права.

В силу пункта 1 статьи 2 АПК РФ основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации в указанной сфере.

Согласно пункту 1 статьи 1 ГК РФ необходимым условием применения того или иного способа защиты гражданских прав является обеспечение восстановления нарушенного права.

Под способами защиты гражданских прав в статье 12 ГК РФ понимаются закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.

По общему правилу выбор способа защиты нарушенного права предоставляется самому потерпевшему, если только в самом законе не указывается на возможность применения лишь конкретной меры и мер защиты.

Выбор способа защиты нарушенного определяется спецификой защищаемого права и характером нарушения.

В настоящем случае первоначальные исковые требования заключаются в обязании предоставить справку о стоимости выполненных работ, товарную накладную по форме ТОРГ-12, счёт-фактуру по договору на сумму 5 717 351,32 рубль, что соответствует 90 % общей суммы Договора, которая уплачена Поставщику за фактически поставленное оборудование (КТПП).

В то же время, условия заключённого сторонами Договора не возлагают на Поставщика обязанность по составлению и передаче Покупателю какой-либо бухгалтерской документации на сумму, соответствующую частичному исполнению.

Из закона такая обязанность также не следует.

Исходя из существа спорных правоотношений, нарушенное право Покупателя (ООО «Крымский гипс») защищается путём удовлетворения исковых требований о расторжении договора, а также путём отказа в удовлетворении встречных исковых требований о взыскании денежных средств.

На основании изложенного, в указанной части первоначальный иск не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Первоначальный иск Общества с ограниченной ответственностью «Крымский Гипс» удовлетворить частично.

Расторгнуть Договор № 10/04-18 на изготовление и поставку комплектной трансформаторной подстанции промышленной, заключенный 10.04.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «Крымский Гипс» и Обществом с ограниченной ответственностью «Севэлектромонтаж-464».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Севэлектромонтаж-464» (г. Севастополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Крымский Гипс» (Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 рублей.

В остальной части первоначальный иск оставить без удовлетворения.

В удовлетворении встречного иска Общества с ограниченной ответственностью «Севэлектромонтаж-464» отказать.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд города Севастополя.

 

Судья                                                                                           А.С. Погребняк