Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

28. 05. 2020 года.                                            Дело № А40-109598/19-43-990

Резолютивная часть решения объявлена 21. 05. 2020 года.

Решение изготовлено в полном объеме 28. 05. 2020 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " ТрансСтройБизнесИнжиниринг " (ОГРН 

<

***>)

к АО " Строительное управление № 1 " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 512 974 135 руб. 77 коп., в том числе: 475 521 368 руб. 68 коп. - долга, 37 452 767 руб. 09 коп. – процентов,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность б/н от 15.08.2019 г., от ответчика – не явился.

Заслушав представителя, изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 512 974 135 руб. 77 коп., в том числе: 475 521 368 руб. 68 коп. - долга, 37 452 767 руб. 09 коп. – процентов, на основании статей 309, 310, 314, 395, 1102, 1105, 1107 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал предъявленный иск по основаниям, изложенным в исковом заявлении с учётом заявления об увеличении размера исковых требований, представил истребованные судом документы, не согласился с возражениями ответчика против иска изложенными в отзывах на исковое заявление, в дополнениях к отзыву, каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, иск в заявленной сумме не признал по основаниям изложенным в отзывах на исковое заявление и в дополнениях к отзыву, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил; расчет истца оспорил по основаниям изложенным в отзывах и в дополнении к отзыву; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; заявил о рассмотрении дела без участия его представителя, каких-либо иных ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом и ответчиком, в отсутствие представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом и ответчиком обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Задолженность по договору купли-продажи имущества № 16/2018 от 22.02.2018.

Между ООО «ТСБИ» (продавец) и АО «Строительное управление №1» (покупатель) заключен договор купли продажи имущества №16/2018 от 22.02.2018 в соответствии с условиями которого, ООО «ТСБИ» приняло на себя обязательства передать в собственность АО «Строительное управление №1» имущество, перечень которого отражен в приложении №1 (строительные материалы, инструменты, оборудование).

Цена имущества: 25 639 600,50 руб. (в том числе НДС 18 % в размере 3 911 125,50 руб.) (п.2.1 Договора №16/2018 от 22.02.2018).

Срок оплаты: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи имущества (п. 2.2 Договора №16/2018 от 22.02.2018).

20.04.2018 г. между сторонами были составлены Универсальные передаточные документы, в соответствии с которым АО «Строительное управление №1» несколькими партиями (частями) приняло имущество, в соответствии с предусмотренным договором перечнем (в полном объеме и со всеми документами): на сумму 9 083 020,50 руб.; на сумму 16 556 580,00 руб. Итого на сумму 25 639 600,50 руб.

Имущество было принято в отсутствие претензий в отношении количества и качества передаваемых объектов.

Таким образом, в порядке п. 2.2 Договора №16/2018 от 22.02.2018 оплата цены передаваемого имущества должна быть произведена не позднее 07.06.2018.

Между тем, предусмотренная цена указанного договора не была уплачена до настоящего времени.

30.06.2018 между ООО «ТСБИ» и АО «Строительное управление №1» был составлен акт сверки, в соответствии с которым последнее подтверждает наличие и размер задолженности по Договору №16/2018 от 22.02.2018 в размере 25 639 600,50 руб.

Проценты, начисленные за период с 30.06.2018 по 19.04.2019 составляют 1 556 815,47 руб. 

Таким образом, задолженность АО «Строительное управление №1» по Договорукупли-продажи имущества №16/2018 по состоянию на 19.04.2019 составляет 27 196 415,97руб., из которых 25 639 600,50 руб. - сумма основного долга, 1 556 815,47 руб. -штрафные санкции.

Задолженность по договору поставки №73-2016-Д от 29.03.2016.

Между ООО «ТСБИ» (продавец) и АО «Строительное управление №1» (покупатель) заключен договор поставки №73-2016-Д от 29.03.2016 в соответствии с условиями которого, ООО «ТСБИ» приняло на себя обязательства поставить новый, не бывший в употреблении или эксплуатации товар производственно-технического назначения (Товар) в соответствии с условиями данного договора и спецификациями.

Номенклатура (ассортимент), количество, стоимость, сроки и порядок поставки согласовываются в спецификациях (п. 1.2 договора №73-2016-Д от 29.03.2016).

Согласно п. 4.2 договора №73-2016-Д от 29.03.2016 срок оплаты Товаров и порядок расчетов отражены в спецификации к договору №73-2016-Д от 29.03.2016.

В соответствии со спецификациями №1 от 29.03.2016, 1-1 от 29.11.2016, № 2 от 29.11.2016, 4/1 от 26.12.2016, 4/2 от 26.12.2016, 4/3 от 26.12.2016, 4/4 от 26.12.2016, 5 от 26.12.2016, 6 от 16.02.2017, 8 от 04.10.2017, 8 от 26.10.2017, 12 от 26.10.2017,13 от 01.02.2018, № 14 от 21.06.2018, №№15,16 от 25.06.2018 ООО «ТСБИ» поставило в пользу АО «Строительное управление №1», а последнее - приняло товар общей стоимостью 234 113 556,41 руб., что подтверждается следующими документами: Товарная накладная №44 от 31.10.2016 г. на сумму 426 884,71 руб.; Товарная накладная №58 от 01.11.2016 на сумму 341 110,00 руб.; Товарная накладная № 57 на сумму 545 841,45 руб.; Товарная накладная № 74 от 31.12.2016 на сумму 3 976 409,10 руб.; Товарная накладная № 75 от 31.12.2016 на сумму 1 093 468,82 руб.; Товарная накладная № 76 от 31.12.2016 на сумму 51 028,24 руб.; Товарная накладная № 77 от 31.12.2016 на сумму 314 335,00 руб.; Товарная накладная № 82 от 31.12.2016 на сумму 91 820,00 руб.; Товарная накладная № 83 от 31.12.2016 на сумму 19 635,00 руб.; Товарная накладная № 12 от 31.01.2017 на сумму 104 345,62 руб.; Товарная накладная № 2 от 26.02.2017 на сумму 20 000,00 руб.; Товарная накладная № 7 от 28.02.2017 на сумму 527 895,90 руб.; Товарная накладная № 357 от 01.11.2017 на сумму 1 854 720,00 руб.; Товарная накладная № 424 от 01.12.2017 на сумму 305 797,49 руб.; Товарная накладная №440 от 01.12.2017 на сумму 1 779 372,98 руб.; Товарная накладная № 443 от 01.12.2017 на сумму 1 080 964,30 руб.; Товарная накладная № 7 от 20.02.2018 на сумму -712 748,10 руб.; УПД от 02.04.2018 на сумму 150 999 669,97 руб.; УПД от 25.06.2018 на сумму 7 200 000,00 руб.; УПД от 25.06.2018 на сумму 5 209 665,71 руб.; УПД от 21.06.2018 на сумму 57 457 844,02 руб.

В рамках данного договора АО «Строительное управление №1» частично оплатило стоимость поставленных товаров, перечислив в пользу ООО «ТСБИ» 20.09.2016 и 07.02.2018 денежные средства в размере 56 215,20 руб. и 12 050 528,70 руб. соответственно.

Задолженность по договору №73-2016-Д от 29.03.2016 сформировалась по результатам сложения начального сальдо на 01.04.2018 в размере 1 139 632,81 руб. и задолженности по поставленному в период с 02.04.2018 по 25.06.2018 товару (см. УПД от 02.04.2018 на сумму 150 999 669,97 руб., УПД от 25.06.2018 на сумму 7 200 000,00 руб., УПД от 25.06.2018 на сумму 5 209 665,71 руб., УПД от 21.06.2018 на сумму 57 457 844,02 руб.).

30.06.2018 между ООО «ТСБИ» и АО «Строительное управление №1» был составлен акт сверки, в соответствии с которым последнее подтверждает наличие и размер задолженности по Договору №73-2016-Д о, 29.03.2016 в размере 222 006 812,51

Проценты, начисленные за период с 01.04.20l8 по 19.04.2019 составляют 14 958 829,85 руб. 

Таким образом, задолженность АО «Строительное управление №1» по договору №73-2016-Д от 29.03.2016 по состоянию на 19.04.2019 составляет 236 965 642,36 руб., из которых: 222 006 812,51 руб. - сумма основного долга, 14 958 829,85 руб. - штрафные санкции.

Задолженность по договору №07/2018 купли-продажи имущества от 22.02.2018.

Между ООО «ТСБИ» (продавец) и АО «Строительное управление №1» (покупатель) заключен договор купли продажи имущества №07/2018 от 22.02.2018 в соответствии с условиями которого, ООО «ТСБИ» приняло на себя обязательства передать в собственность АО «Строительное управление №1» имущество, перечень которого отражен в приложении №1 (строительные материалы, инструменты, оборудование).

Цена имущества: 72 103 302,46 руб. (в том числе НДС 18 % в размере 10 998 808,85 руб.) (п.2.1 Договора №07/2018 от 22.02.2018).

Срок оплаты: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи имущества (п. 2.2 Договора №07/2018 от 22.02.2018).

09.04.2018 г. между сторонами был составлен Акт приемки-передачи имущества, в соответствии с которым АО «Строительное управление №1» приняло имущество, в соответствии с предусмотренным договором перечнем (в полном объеме и со всеми документами). Имущество было принято в отсутствие претензий в отношении количества и качества передаваемых объектов.

В дополнение к составлению акта приемки-передачи 09.04.2018 стороны в двустороннем порядке оформили универсальный передаточный документ.

Таким образом, в порядке п. 2.2 Договора №07/2018 от 22.02.2018 оплата цены передаваемого имущества должна быть произведена не позднее 30.05.2018.

Между тем, предусмотренная цена указанного договора не была произведена до настоящего времени.

30.06.2018 между ООО «ТСБИ» и АО «Строительное управление №1» был составлен акт сверки, в соответствии с которым последнее подтверждает наличие и размер задолженности по Договору №07/2018 от 22.02.2018 в размере 72 103 302,46 руб.

Проценты, начисленные за период с 01.06.2018 по 19.04.2019 составляют 5 176 128,17 руб. 

Таким образом, задолженность АО «Строительное управление №1» по договору №07/2018 от 22.02.2018 по состоянию на 19.04.2019 составляет 77 279 430,63 руб., из которых 72 103 302,46 руб. - сумма основного долга, 5 176 128,17 - штрафные санкции.

Задолженность по договору подряда №167-ДПО-2017 от 10.02.2017.

Между ООО «ТСБИ» (подрядчик) и АО «Строительное управление №1» (генеральный подрядчик) заключен Договор подряда №167-ДПО-2017 от 10.02.2017 в соответствии с условиями которого АО «Строительное управление №1» поручило ООО «ТСБИ» выполнить в соответствии с проектной документацией строительно-монтажные работы и другие связанные с Объектом работы, обеспечивающие полноценную работу вновь построенных/реконструируемых объектов и их вод в эксплуатацию, перечень, объем и сроки которых определяются Ведомостью объемов и стоимости работ по объекту (приложение №1) и Графиком выполнения строительных, монтажных работ на объекте (Приложение №2).

В соответствии с терминологией, используемой в договоре подряда №167-ДПО-2017 под Объектом подразумевается «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово» г. Екатеринбург, Свердловская область» (II очередь)».

Стоимость работ в соответствии с приложением №1 к договору подряда №167-ДПО-2017 «Ведомость объемов и стоимости работ по объекту» составляет 321 105 893,79 руб.

Сроки выполнения работ установлены в приложении №2 к договору подряда №167-ДПО-2017 (в редакции дополнительного соглашения №3 от 29.09.2017) применительно к каждой части (разделу) и категории работ.

В соответствии с п. 12.5 договора подряда №167-ДПО-2017 оплата по договору производится на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и иные первичных и прочих документов, подтверждающих целевое использование выделенных средств в течение 17 (семнадцати) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и получения от подрядчика соответствующих счета и счета фактуры.

За период действия договора подряда №167-ДПО-2017 от 10.02.2017 ООО «ТСБИ» выполнило работы на общую сумму 97 509 866,78 руб., что подтверждается актом о выполнении работ КС-2 и справкой по форме, КО-3 №17 от 22.06.2017 на сумму 59 212 816,87 руб., а также актом и справкой (КС-2, КС-3) №2 от 15.01.2018 на сумму 38 297 049,91 руб. соответственно.

Таким образом, работы, выполненные в соответствии с актом по форме КС-2 от 22.06.2017 должны быть оплачены не позднее 18.07.2017, актом КС-2 от 15.01.2018 - не позднее 08.02.2018.

АО «Строительное управление №1» частично исполнило свои обязательства по оплате выполненных работ, перечислив в пользу подрядчика 14 000 000,00 руб. (п/п №157 от 25.08.2017 на сумму 8 000 000,00 руб., п/п № 308 от 15.09.2017 на сумму 6 000 000,00 руб).

Общая сумма неоплаченных работ по договору подряда №167-ДПО-2017 от 10.02.2017 составляет 83 509 866,78 руб.

30.06.2018 между ООО «ТСБИ» и АО «Строительное управление №1» был составлен акт сверки, в соответствии с которым последнее подтверждает наличие и размер задолженности по договора подряда №167-ДПО-2017 от 10.02.2017 в размере 83 509 866, 78 руб.

Проценты, начисленные за период с 18.07.2017 по 19.04.2019 составляют 9 753 747,87 руб. 

Таки образом, задолженность АО «Строительное управление №1» по договору подряда №167-ДПО-2017 от 10.02.2017 по состоянию на 19.04.2019 составляет 93 263 614,65 руб., из которых: 83 509 866,78 руб., руб. - сумма основного долга, 9 753 747,87- штрафные санкции.

Задолженность по договору 19-ДПО/16 от 05.09.2016.

Между ООО «ТСБИ» (подрядчик) и АО «Строительное управление №1» (генеральный подрядчик) заключен Договор подряда № 19-ДПО-2016 от 05.09.2016 в соответствии с условиями которого АО «Строительное управление №1» поручило ООО «ТСБИ» выполнить в соответствии с проектной документацией работы в части разработки Рабочей документации, строительные монтажные работы и другие связанные с Объектом работы, обеспечивающие полноценную работу вновь построенных/реконструируемых объектов и их вод в эксплуатацию, перечень, объем и сроки которых определяются Ведомостью объемов и стоимости работ по объекту (приложение №1) и Графиком выполнения строительных, монтажных работ на объекте (Приложение №2).

Под объектом в соответствии с условиями данного договора подразумевается выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово».

Согласно п. 11 Договора № 19-ДПО-2016 от 05.09.2016 сроки производства работ предусмотрены Графиком выполнения работ (приложение №2 к договору).

Цена по договору в соответствии с п. 12 Договора № 19-ДПО-2016 от 05.09.2016 (в редакции дополнительного соглашения №2 от 20.01.2017) установлена в размере 1 784 400 609,85 руб.

Оплата по договору производится на основании подписанных генеральным подрядчиком и подрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и иных первичных и прочих документов, подтверждающих целевое использование выделенных средств в течение 17 (семнадцати) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и получения от подрядчика соответствующих счета и счета-фактуры (п. 12.5. договора 19-ДПО/16 от 05.09.2016).

По состоянию на 01.04.2018 задолженность по данному договору у АО« Строительное управление №1» отсутствовала.

Однако в период с 03.02.2018 по 21.02.2018 ООО «ТСБИ» выполнило в пользу АО «Строительное управление №1» земляные работы: проходные тоннели (коллектора) под перроном для технического обслуживания воздушных судов на местах стоянок (этап строительства 1.3), а также работы в отношении искусственных покрытий (этап строительства 1.5), о чем были составлены акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 34 от 21.02.2018, №35 от 21.02.2018, а также соответствующая справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) № Г/ от 21.02.2018.

Общая стоимость выполненных работ за период 03.02.2018 по 21.02.2018 в соответствии с актами №№ 34, 35 составляет 86 378 785,79 руб.

В рамках данного договора АО «Строительное управление №1» частично оплатило стоимость произведенных и принятых работ, перечислив в пользу ООО «ТСБИ» 23.05.2018 и 25.05.2018 денежные средства в размере 1 000 000,00 руб. и 13 117 000,00 руб. соответственно.

Проценты, начисленные за период с 22.03.2018 по 19.04.2019 составляют 6 007 246,37 руб. 

30.06.2018 между ООО «ТСБИ» и АО «Строительное управление №1» был составлен акт сверки, в соответствии с которым последнее подтверждает наличие и размер задолженности по договору 19-ДПО/16 от 05.09.2016 в размере 72 261 785,79 руб.

Таким образом, задолженность АО «Строительное управление №1» по состоянию на 19.04.2019 составляет 78 269 032,16 руб., из которых 72 261 785,79руб. - сумма основного долга, 6 007 246,37 руб. - штрафные санкции.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Применительно к договорам подряда №19-ДПО/16 от 05.09.2016, №167-ДПО-2017 от 10.02.2017 во исполнение положений ст. ст. 702, 743, 740 ГК РФ ООО «ТСБИ» свои обязательства по выполнению работ исполнило, однако АО «Строительное управление №1» не в полном объеме оплатило стоимость данных работ.

Применительно к договорам купли продажи и поставки, руководствуясь положениями ст.ст. 454, 516 ГК РФ ООО «ТСБИ» передало в собственность ответчика обусловленные договорами №16/2018 от 22.02.2018, №73-2016-Д от 29.03.2016, №07/2018 от 22.02.2018 материальные ценности, цену которых АО «Строительное управление» оплатило не в полном объеме.

Общая сумма задолженности АО «Строительное управление №1» составляет 503 220 387,90 руб., из которых:

27 196 415,97 руб. (включая 25 639 600,50 руб. - сумма основного долга, 1 556 815,47 руб. - проценты в порядке ст. 395 ГК РФ) по договору купли-продажи имущества №16/2018 по договору купли-продажи имущества №16/2018

236 965 642,36 руб. (включая 222 006 812,51 руб. - сумма основного долга, 14 958 829,85 руб. - проценты в порядке ст. 395 ГК РФ) по договору поставки №73-2016-Д от 29.03.2016

11 279 430,63 руб. (включая 72 103 302,46 руб. - сумма основного долга, 5 176 128,17 руб. - проценты в порядке ст. 395 ГК РФ) по договору купли-продажи имущества №07/2018 от 22.02.2018.

93 263 614,65 руб. (включая 83 509 866,78 руб., руб. - сумма основного долга, 9 753 747,87 - проценты в порядке ст. 395 ГК РФ) по договору подряда №167-ДПО-2017 от 10.02.2017

78 269 032,16 руб. (включая 72 261 785,79руб. - основного долга, 6 007 246,37 руб. - проценты в порядке ст. 395 ГК РФ) по договору подряда №  19-ДПО/16 от 05.09.2016.

В соответствии с ч. 5 ст. 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

Применительно к фактическим обстоятельствам настоящего дела ООО «ТСБИ» был соблюден обязательный претензионный порядок разрешения спора путем направления в адрес АО «СУ №1» (в соответствии с местом нахождения общества, отраженному в ЕГРЮЛ), а также в адрес конкурсного управляющего АО «СУ №1» требования об оплате задолженности по упомянутой в разделе I настоящего иска задолженности (исх. 184-Д/ТСБИ/КУ от 06.03.2019)

Доводы Ответчика рассмотрены и отклонены судом как необоснованные и не подтвержденные документально, поскольку опровергаются представленными в материалы дела доказательствами.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает пли позволяет определить день его исполнения пли период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Требование истца о взыскании долга в сумме 475 521 368 руб. 68 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, в соответствии с которой, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Требование истца о взыскании процентов в сумме 37 452 767 руб. 09 коп. – законное, обоснованное, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению в соответствии с представленным истцом расчетом.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ.

В соответствии с изложенным на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 316, 328, 395, 401, 407, 408, 420-425, 431-434, 450, 452, 453, 454, 485, 486, 506, 516, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 102, 103, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с АО " Строительное управление № 1 " (ОГРН 

<

***>):

- в пользу ООО " ТрансСтройБизнесИнжиниринг " (ОГРН 

<

***>) 512 974 135 руб. 77 коп., в том числе: 475 521 368 руб. 68 коп. - долга, 37 452 767 руб. 09 коп. – процентов и расходы по уплате госпошлины в сумме 73 000 руб. 00 коп.;

- в доход федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 127 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья                                                           О.В. Романов