АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-25118/2021

14 марта 2023 года

город Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 06 марта 2023 года.

Решение изготовлено в полном объеме 14 марта 2023 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Радвановской Ю.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску ООО «Дорожные инновации» к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымавтодор», при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  - ООО «Промдорснаб» в лице конкурсного управляющего ФИО2, о взыскании денежных средств,

в отсутствии представителей сторон,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Промдорснаб» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ГУП РК «Крымавтодор» о взыскании денежных средств.

Определением АС РК от 09.06.2022г. произведена замена стороны по делу с ООО «Промдорснаб» в лице конкурсного управляющего ФИО2 на правопреемника - ООО «Дорожные инновации». 

В судебное заседание 06.03.2023г. лица, участвующие в деле, явку своих уполномоченных представителей в судебное заседание не обеспечили, при этом, суд в порядке положений статьи 123 АПК РФ признал их извещенными о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

В отсутствии ходатайств, свидетельствующих о невозможности рассмотрения данного дела, а также во избежание нарушения процессуальных сроков, принимая во внимание полноту материалов дела, суд признал возможным рассмотреть его по существу. 

Судом были установлены следующие обстоятельства.

26.09.2019г. между ГУП РК «Крымавтодор» и ООО «Промдорснаб» был заключен договор подряда № 80-ЕП/19.

Согласно пункта 1.1 договора генподрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по установке двухсторонних реверсивных светофоров с автономными источниками питания на автомобильной дороге общего пользования регионального значения 35 ОП РЗ 35К-003 Симферополь-Феодосия км 3+990-7+800, и сдает в установленные настоящим договором сроки выполненные работы генподрядчику и Государственному казенному учреждению Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» - заказчик по Государственному контракту № 0875200000518000093_315019 от 21.09.2018 г, устраняет за свой счет возникшие по его вине недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и в гарантийные сроки, а генподрядчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

В силу пункта 1.2. договора субподрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по настоящему договору, указанный в техническом задании к договору в строгом соответствии с условиями договора (и его приложениями). Качество выполняемых по договору работ должно соответствовать требованиям ГОСТов, территориальным строительным нормам, и требованиям ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

Согласно пункта 3.1 договора общая стоимость работ по настоящему договору составляет 2 017 04.14 руб., включая НДС 20% - 336 174.52 руб..

Пунктом 4.1 договора установлен порядок оплаты работ: оплата работ по настоящему договору производится в пределах доведенных до ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК» объемов финансирования расходов п лимитов бюджетных обязательств, а также в пределах средств на данный вид работ, предусмотренных в Государственном контракте № 0875200000518000093 315019 от 21.09.2018 г. на содержание автомобильных дорог общего пользования Республики Крым, заключенном между ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК» и Генподрядчиком.

В силу пункта 4.1.1 договора оплата выполненных работ по содержанию объекта за отчетный месяц производится на основании следующих документов:

- акта выполненных работ (КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ (КС-3);

- счета на оплату выполненных работ по содержанию;

- счета-фактуры.

Генподрядчик осуществляет оплату в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, после осуществления оплаты ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

В пункте 5.1 договора сторонами согласованы следующие сроки выполнения работ:

- начало - с момента заключения договора;

- окончание выполнения работ - с даты заключения договора до 30 сентября 2019 г.

При этом, срок выполнения работ может быть продлен по согласованию сторон, оформленному дополнительным соглашением.

В силу пункта 9.4 договора приемка выполненных работ осуществляется н оформляется в соответствии с действующими правилами, с составлением соответствующих Актов установленной формы КС- 2, КС-3 и счета фактуры, в том числе на электронных носителях, с составлением Акта скрытых работ (при необходимости).

27.09.2019г. между ГУП РК «Крымавтодор» и ООО «Промдорснаб» был заключен договор подряда № 81-ЕП/19.

Согласно пункта 1.1 договора генподрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по установке светофорных объектов, камер видеонаблюдения и датчиков движения на автомобильных дорогах общего пользования Республики 35 ОП РЗ 35К-002 Ялта-Севастополь км 0+750; 35 ОП РЗ 35 К-002 Ялта-Севастополь км 3+750, 35 ОП РЗ 35 К-002 Ялта- Севастополь км 4+810, 35 ОП РЗ 35 К-002 Ялта-Севастополь км 5+900, 35 ОП РЗ 35К-007 Западный обход г. Симферополя км 5+230,35 ОП РЗ 35 К-023 Восточный обход г. Симферополя км 2 - 990 и 35 ОП РЗ 35А-001 Граница с Украиной - Джанкой-Феодосия - Керчь км 323+400, и сдает в установленные настоящим Договором сроки выполненные работы Генподрядчику и Государственному казенному учреждению Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» - заказчик по Государственному контракту № 0875200000518000093 315019 от 21.09.2018 г., устраняет за свой счет возникшие по его вине недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и в гарантийные сроки, а генподрядчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

В силу пункта 1.2. договора субподрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по настоящему договору, указанный в техническом задании к договору в строгом соответствии с условиями договора (и его приложениями). Качество выполняемых по договору работ должно соответствовать требованиям ГОСТов, территориальным строительным нормам, и требованиям ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

Согласно пункта 3.1 договора общая стоимость работ по настоящему договору составляет 16 119 594.10 руб..

Пунктом 4.1 договора установлен порядок оплаты работ: оплата работ по настоящему договору производится в пределах доведенных до ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК» объемов финансирования расходов п лимитов бюджетных обязательств, а также в пределах средств на данный вид работ, предусмотренных в Государственном контракте № 0875200000518000093 315019 от 21.09.2018 г. на содержание автомобильных дорог общего пользования Республики Крым, заключенном между ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК» и Генподрядчиком.

В силу пункта 4.1.1 договора оплата выполненных работ по содержанию объекта за отчетный месяц производится на основании следующих документов:

- акта выполненных работ (КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ (КС-3);

- счета на оплату выполненных работ по содержанию;

- счета-фактуры.

Генподрядчик осуществляет оплату в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, после осуществления оплаты ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

В пункте 5.1 договора сторонами согласованы следующие сроки выполнения работ:

- начало - с момента заключения договора;

- окончание выполнения работ - с даты заключения договора до 30 сентября 2019 г.

При этом, срок выполнения работ может быть продлен по согласованию сторон, оформленному дополнительным соглашением.

В силу пункта 9.4 договора приемка выполненных работ осуществляется н оформляется в соответствии с действующими правилами, с составлением соответствующих Актов установленной формы КС- 2, КС-3 и счета фактуры, в том числе на электронных носителях, с составлением Акта скрытых работ (при необходимости).

В силу пункта 15.1 договора договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

В силу пункта 15.2 договора договор действует до 31.12.2019г., но в любом случае до момента исполнения сторонами обязательств.

Как указывает истец в своем исковом заявлении, между ООО «Промдорснаб» и ГУП РК «Крымавтодор» был подписан Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г. по Договорам субподряда № 80-ЕП/19, № 81-ЕП/19 от 31.12.2019 г.. Согласно данного Акта сумма задолженности составила 2 397 674.26 руб..

27.02.2020г. от ГУП РК «Крымавтодор» в адрес ООО «Промдорснаб» поступили денежные средства в размере 1 000 000 руб.

Истец утверждает, что задолженность ГУП РК «Крымавтодор» перед ООО «Промдорснаб» составляет 1 397 674.26 руб..

06.08.2021г. конкурсным управляющим ООО «Промдорснаб» ФИО2 в адрес ГУП РК «Крымавтодор» было направлено претензионное письмо о погашении дебиторской задолженности перед ООО «Промдорснаб» в размере 1 397 674.26 руб.. Направление указанной претензии подтверждается почтовым отправлением с почтовым идентификатором № 35001045563136.

В связи с непоступлением в адрес истца ответа на указанную претензию, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Определением АС РК от 09.06.2022г. произведена замена стороны по делу с ООО «Промдорснаб» в лице конкурсного управляющего ФИО2 на правопреемника - ООО «Дорожные инновации».

Как следует из материалов дела, основанием для замены стороны истца послужил договор уступки права требования от 03.06.2022г., заключенный между ООО «ПРОМДОРСНАБ» (цедент) и ООО «Дорожные инновации» (цессионарий), в соответствии с которым, цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме нрава требования к дебитору цедента, ГУП Республики Крым «КРЫМАВТОДОР», на общую сумму задолженности 1 397 674.26 руб., возникшую на основании договоров № 80-ЕП/19 на выполнение работ по установке двухсторонних реверсивных светофоров с автономными источниками питания на автомобильной дороге общего пользования регионального значения от 26.09.2019 и № 81-ЕП/19 на выполнение работ по установке светофоров, камер видеонаблюдения и датчиков движения на автомобильных дорогах общего пользования Республики Крым от 27.09.2019, заключенных между ООО «Промдорснаб» и ГУП  РК «Крымавтодор», согласно искового заявления о взыскании задолженности по договорам субподряда на сумму 1 397 674.26 руб. по делу № А83-25118/2021.

В силу пункта 1.7 договора право требования к должнику - ГУП РК «Крымавгодор» возникает у цессионария с момента подписания договора уступки (цессии).

Из поступивших от ООО «Дорожные инновации» письменных пояснений б/н от 20.12.2022г. следует, что им в полном объеме поддерживаются заявленные ООО «Промдорснаб» исковые требования, просит их удовлетворить.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Так, согласно искового заявления истец просил суд взыскать с ответчика задолженность по договорам субподряда № 80-ЕП/19 от 26.09.2019г., № 81-ЕП/19 от 27.09.2019г. в сумме 1 397 674.26 руб..

Возникшие между сторонами правоотношения регулируются параграфами 1, 3 и 5 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно положениям статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с положениями  статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с правилами статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт выполнения работ по договорам субподряда № 80-ЕП/19 от 26.09.2019г., № 81-ЕП/19 от 27.09.2019г. подтверждаются универсальными передаточными документами, а именно –  промежуточными Актами выполненных работ № 1 от 30.09.2019г.  на сумму 436 688.532 руб., № 1 от 30.09.2019г. на сумму 4 601 932.12 руб., подписанными ООО «Промдорснаб» и ГУП РК «Крымавтодор» и скрепленными их печатями.

Кроме того, факт наличия задолженности ответчика подтверждается Актом сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2019г. по 31.12.2019г. по договорам субподряда № 80-ЕП/19 от 26.09.2019г., № 81-ЕП/19 от 27.09.2019г., согласно которого ГУП РК «Крымавтодор» по состоянию на 31.12.2019г. имеет задолженность в пользу ООО «Промдорснаб» в сумме 2 397 647.26 руб.. 

Ответчиком доказательств оплаты задолженности предоставлено не было, мотивированных отказов от приемки работ в материалы дела также предоставлено не было.

В соответствии с частью 3-1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно постановлению Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 9608/11, оспаривая расчет стороны, другая сторона должна дать собственный контррасчет с обоснованием иного подхода.

Ответчиком контррасчета взыскиваемых сумм не представлено.

Непредставление такого расчета расценивается как недобросовестность (Постановление Двадцать первого Арбитражного апелляционного суда от 24.04.2018 по делу № А83-5275/2017).

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований о взыскании задолженности в сумме 1 397 674.26 руб. и признает их такими, что подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно пункта 1 части 1 статьи 333.21 НК РФ при цене иска от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей - 23 000 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 1 000 000 рублей.

При цене иска 1 397 674.26 руб. госпошлина составляет: 23 000.00 + 1% от (1 397 674.26 - 1 000 000.00) = 23 000.00 + 3 977.00 = 26 977.00 руб..

При этом, ввиду заявленного при обращении с исковым заявлением истцом ходатайством об отсрочке уплаты государственной пошлины, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями  110, 167 – 170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд -

РЕШИЛ:

1.      Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтодор» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.01.2015, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Дорожные инновации» (295047, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ ГОРОД, БАЗОВАЯ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 31.12.2019, ИНН: 

<

***>, КПП: 910201001) задолженность в сумме 1 397 674.26 руб..

3. Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтодор» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.01.2015, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 26 977.00 руб..

4. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

5. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                                      Ю.А. Радвановская