Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Пермь        

09.07.2024 года                                                             Дело № А50-5872/24

Резолютивная часть решения объявлена 26.06.2024 года. 

Полный текст решения изготовлен 09.07.2024 года.

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Овчинниковой С.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бызовой М.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску Администрации Косинского муниципального округа Пермского края (619430, Пермский край, Косинский район, Коса село, Ленина улица, дом 66, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Комфортная среда" (614064, 

<

...>, офис отдельный вход 1 эт, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 189 908 руб. 14 коп., об устранении недостатков работ, выполненных по муниципальному контракту,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

установил:

Администрация Косинского муниципального округа Пермского края (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Комфортная среда" (далее – ответчик) о взыскании неустойки в сумме 189 908 руб. 14 коп., об устранении недостатков работ, выполненных по муниципальному контракту №0156600038622000052 от 17.05.2022.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание 26.06.2024 не обеспечили, истец направил ходатайство о рассмотрении дела без его участия, на иске настаивает, ответчик отзыв на иск не представил, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. 

Дело рассмотрено в отсутствие сторон.

Как следует из материалов дела, 17.05.2022 между администрацией Косинского муниципального округа Пермского края (заказчик) и ООО «Комфортная среда» (исполнитель) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по итогам проведения электронного аукциона (протокол  0156600038622000052 от 06.05.2022) заключен муниципальный контракт №0156600038622000052 на выполнение работ по устройству детских площадок, по условиям которого истец поручает, а ответчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по устройству детских площадок в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Цена контракта составила 2 989 110 руб. 42 коп.

Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2022 (п.10.1 Контракта).

Дополнительным соглашением к контракту от 26.12.2022 срок действия контракта установлен до 01.06.2023.

На основании пункта 1.3 контракта срок начала выполнения работ определен с даты заключения контракта, срок окончания выполнения работ    - 01.09.2022.

Как указывает истец, данное условие контракта было нарушено, фактически обязательство подрядчиком было исполнено 12.05.2023.

Просрочка исполнения работ по контракту, допущенная подрядчиком, составила 253 дня.

Факт нарушения подрядчиком обязательств по контракту подтверждается актами о приемке выполненных работ № 1, 2, 3 от 12.05.2023.

В соответствии с пунктом 4.4.1. контракта подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить заказчику результаты выполнения работ, предусмотренных контрактом, документы, предусмотренные настоящим контрактом, в том числе документ о приемке, и порядке и сроки, установленные Контримом.

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Федерации предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения и ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

На основании пункта 7.1. контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим контрактом. заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Пунктом 7.4 контракта установлено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащею исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек {штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этана исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

31.05.2023 истец направил в адрес ответчика требование об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в котором предлагалось ответчику в срок до 16.06.2023 уплатить неустойку в сумме 189908 руб. 14 коп.

Однако данное требование осталось со стороны ответчика без ответа и удовлетворения.

Кроме того, в течение гарантийного срока заказчиком были выявлены недостатки в выполненных и оплаченных работах.

В соответствии с п. 4.2. Технического задания на выполнение работ по устройству детских площадок (Приложение 1 к контракту), на результаты выполненных строительно-монтажных работ на объекте должен устанавливаться гарантийный срок не менее 3 лет с момента подписания соответствующего акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

В соответствии с пунктом 4.1.4 контракта заказчик вправе требовать от подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ (ее результатов) в течение гарантийного срока.

Согласно пункту 4.4.8 контракта в случае, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) работ, подрядчик обязан их устранить безвозмездно в течение 5 календарных дней.

В соответствии с пунктом 6.1. контракта подрядчик гарантирует качество выполненных работ (их результата), а также надлежащее качество используемых при выполнении работ товаров (материалов) (в случае использования товаров (материалов) при выполнении работ), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями, установленными настоящим Контрактом и приложениями к нему.

20.07.2023 (в течение гарантийного срока) заказчик произвел осмотр детских площадок, работы по устройству которых выполнены в рамках контракта.

В результате осмотра объектов были выявлены следующие дефекты:

- на детской игровой площадке по адресу: с. Коса, ул. Молодежная, не скреплены между собой ступеньки подвесного моста детского игрового комплекса цепями при помощи болтов;

  - на детской игровой площадке по адресу: п. Сосновка, ул. Набережная, не выровнен столб калитки и не укреплен фундамент столба калитки, дорнит не засыпан песком;

   - на детской игровой площадке по адресу: д. Порошево, ул. Молодежная, разрушился фундамент столбов ограждения со стороны входа на детскую площадку.

Указанные дефекты произошли не вследствие нормального износа объектов или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объектов, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

27.07.2023 истец направил в адрес подрядчика претензию о безвозмездном устранении дефектов по гарантии, в которой предлагалось ответчику в срок до 25.08.2023 безвозмездно устранить недостатки работ по контракту, выявленные в результате осмотра объектов.

Данная претензия осталась со стороны ответчика без ответа и удовлетворения.

19.09.2023истец  повторно направил в адрес ответчика претензию о безвозмездном устранении недостатков, которая также осталась со стороны ответчика без удовлетворения.

До настоящею времени дефекты, возникшие в период действия гарантийного срока, не устранены со стороны подрядчика, каких-либо пояснений или обращений от ответчика в адрес истца не поступало.

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в суд с иском о взыскании с подрядчика неустойки за просрочку исполнения обязательств, а также об устранении недостатков в рамках гарантийных обязательств. 

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитор) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также н иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Судом установлено, что ответчик принял на себя обязательство выполнить работы в срок до 01.09.2022, между тем, работы в порядке, установленном контрактом, не исполнил.

Согласно прилагаемому расчету размер предъявленной ко взысканию неустойки составляет 189 908 руб. 14 коп. в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Расчет неустойки судом проверен и признан верным.

Ответчик контррасчет не представил.

Учитывая изложенное, исковые требования в части взыскания неустойки в размере 189 908 руб. 14 коп. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии с п.1 ст. 754 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

В соответствии с п. 2 ст. 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Согласно п. 1 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после ею приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - разумною срока, но не позднее двух лет (для недвижимою имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в ст. 723 Гражданскою кодекса Российской Федерации прав.

В соответствии с п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать от подрядчика, в том числе безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Судом установлено, что недостатки в выполненных работах подрядчиком не устранены, доказательств того, что данные недостатки возникли в результате неправильной эксплуатации со стороны заказчика в дело не представлены.    

Таким образом, поскольку в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика, требования истца об устранении недостатков подлежат также удовлетворению.

 В соответствии со ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины по иску в сумме 12 697 руб. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Комфортная среда" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Администрации Косинского муниципального округа Пермского края (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в сумме 189 908 руб. 14 коп.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Комфортная среда" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту №0156600038622000052 от 17.05.2022, в течение месяца со дня вступления решения в законную силу, а именно:

  - на детской игровой площадке по адресу: с. Коса, ул. Молодежная, скрепить между собой ступеньки подвесного моста детского игрового комплекса цепями при помощи болтов;

  - на детской игровой площадке по адресу: п. Сосновка, ул. Набережная, выровнять столб калитки и укрепить фундамент столба калитки, засыпать песком дорнит;

   - на детской игровой площадке по адресу: д. Порошево, ул. Молодежная,заменить фундамент столбов ограждения со стороны входа на детскую площадку.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Комфортная среда" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину по иску в сумме 12 697 руб. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

 

             Судья                                                             С.А. Овчинникова