Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-849/2018

20 августа 2018 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 13 августа 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 20 августа 2018 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Щепелина Ю.П., при ведении протокола заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "СИБСПЕЦСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 628433, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, поселок городского типа Белый Яр, улица Ермака, дом 4А) к публичному акционерному обществу "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 115035, 

<

...>), обществу с ограниченной ответственностью "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...> дом 26) о солидарном взыскании 157 552 рублей 40 копеек,

при участии представителей:

от истца - не явились,

от публичного акционерного общества "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" - ФИО2 по доверенности от 17.01.2017,

от общества с ограниченной ответственностью "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ" - ФИО2 по доверенности от 25.01.2018 № 109/18,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СИБСПЕЦСТРОЙ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением к публичному акционерному обществу "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" (далее – ответчик 1), обществу с ограниченной ответственностью "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ" (далее – ответчик 2) о взыскании 237 887 325 рублей 33 копеек, в том числе 116 170 рублей 65 копеек - основной задолженности по договору подряда от 28.03.2013 № 53-ПР/13 (далее - договор № 53), 21 590 рублей 09 копеек - законных процентов по договору № 53, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 19 791 рубля 66 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 53, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 8 074 450 рублей 80 копеек - основной задолженности по договору подряда от 25.06.2013 № 113-ПР/13 (далее - договор № 113), 1 500 621 рубля 80 копеек - законных процентов по договору № 113, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 1 375 622 рублей 25 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 113, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017,373 530 рублей 30 копеек - основной задолженности по договору подряда от 25.09.2013 № 149-ПР/13 (далее - договор № 149), 69 419 рублей 92 копеек - законных процентов по договору № 149, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 63 637 рублей 35 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 149, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017.876 428 рублей 16 копеек - основной задолженности по договору подряда от 25.09.2013 № 150-ПР/13 (далее - договор № 150), 162 882 рублей - законных процентов по договору № 150, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 149 314 рублей 67 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 150, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017,6 027 726 рублей 42 копеек - основной задолженности по договору подряда от 09.01.2014 № 242-ПР/14 (далее - договор № 242), 1 120 241 рубля 84 копеек - законных процентов по договору № 242, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 1 026 927 рублей 37 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 242, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017,11 636 276 рублей 01 копейки - основной задолженности по договору подряда от 08.05.2014 № 313-ПР/14 (далее - договор № 313), 2 162 580 рублей - законных процентов по договору № 313, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 1 982 440 рублей 69 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 313, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 3 867 380 рублей 38 копеек - основной задолженности по договору подряда от 12.05.2014 № 322-ПР/14 (далее - договор № 322), 718 745 рублей 51 копейки - законных процентов по договору № 322, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 658 875 рублей 09 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 322, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 1 476 343 рублей 95 копеек - основной задолженности по договору подряда от 19.05.2014 № 334-ПР/14 (далее - договор № 334), 274 375 рублей 80 копеек - законных процентов по договору № 334, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 251 520 рублей 70 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 334, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 5 022 705 рублей 14 копеек - основной задолженности по договору подряда от 19.05.2014 № 335-ПР/14 (далее - договор № 335), 933 460 рублей 48 копеек - законных процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 335, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 855 704 рублей 62 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 335, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 880 246 рублей 91 копейки - основной задолженности по договору подряда от 20.05.2014 № 369-ПР/14 (далее - договор № 369), 163 592 рублей 27 копеек - законных процентов по договору № 369, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 1449 965 рублей 27 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 369, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 704 869 рублей 93 копеек - основной задолженности по договору подряда от 11.06.2014 № 371-ПР/14 (далее - договор № 371), 130 998 рублей 78 копеек - законных процентов по договору № 371, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 120 086 рублей 77 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 371, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 503 897 рублей 92 копеек - основной задолженности по договору подряда от 11.06.2014 № 372-ПР/14 (далее - договор № 372), 93 648 рублей 51 копейки - законных процентов по договору № 372, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 85 847 рублей 72 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 372, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 25 704 рублей 85 копеек - основной задолженности по договору подряда от 01.07.2014 № 403-ПР/14 (далее - договор № 403), 4 777 рублей 19 копеек - законных процентов по договору № 403, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 4 379 рублей 26 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 403, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 29 931 186 рублей 49 копеек - основной задолженности по договору подряда от 11.09.2014 № 416-ПР/14 (далее - договор № 416), 5 562 655 рублей 76 копеек - законных процентов по договору № 416, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2107, 5 099 294 рублей 83 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 416, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 5 274 513 рублей 39 копеек - основной задолженности по договору подряда от 11.09.2014 № 417-ПР/14 (далее - договор № 417), 980 258 рублей 57 копеек - законных процентов по договору № 417, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 898 604 рублей 50 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 417, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 2 023 202 рублей 88 копеек - основной задолженности по договору подряда от 11.09.2014 № 418-ПР/14 (далее - договор № 418), 376 008 рублей 53 копеек - законных процентов по договору № 418, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 344 687 рублей 57 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 418, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 25 320 836 рублей 96 копеек - основной задолженности по договору подряда от 12.12.2014 № 467-ПР/14 (далее - договор № 467), 4 705 830 рублей 83 копеек - законных процентов по договору № 467, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 4 313 842 рублей 13 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 467, исчисленные за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 11 992 599 рублей 26 копеек - основной задолженности по договору подряда от 12.12.2014 № 473-ПР/14 (далее - договор № 473), 2 228 802 рублей 45 копеек - законных процентов по договору № 473, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 2 043 146 рублей 54 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 473, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 13 425 371 рубля 12 копеек - основной задолженности по договору подряда от 24.12.2014 № 505-ПР/14 (далее - договор № 505), 2 495 080 рублей 45 копеек - законных процентов по договору № 505, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 2 287 243 рублей 96 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 505, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 11 237 242 рублей 95 копеек - основной задолженности по договору подряда от 03.02.2015 № 563-ПР/15 (далее - договор № 563), 2 088 420 рублей 86 копеек - законных процентов по договору № 563, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 1 914 458 рублей 50 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 563, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 26 255 809 рублей 07 копеек - основной задолженности по договору подряда от 11.02.2015 № 569-ПР/15 (далее - договор № 569), 4 879 593 рублей 67 копеек - законных процентов по договору № 569, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 4 473 130 рублей 80 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 569, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 10 358 769 рублей 62 копеек - основной задолженности по договору подряда от 24.11.2015 № 691-ПР/15 (далее - договор № 691), 1 925 158 рублей 22 копеек - законных процентов по договору № 691, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 1 764 795 рублей 40 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 691, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017. В качестве основания для удовлетворения требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиками обязательств по указанным договорам.

Определением суда от 23.01.2017 по делу № А75-20025/2017 исковые требования, основанные на вышеуказанных договорах выделены в отдельные производства.

Определением суда от 01.02.2018 исковое заявление по делу № А75-833/2018 принято к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства.

В рамках настоящего дела судом рассматриваются требования истца о взыскании 157 552 рублей 40 копеек, в том числе 116 170 рублей 65 копеек - основной задолженности по договору подряда от 28.03.2013 № 53-ПР/13 (далее - договор № 53), 21 590 рублей 09 копеек - законных процентов по договору № 53, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017, 19 791 рубля 66 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 53, исчисленных за период с 19.01.2016 по 04.12.2017.

Представитель истца о времени и месте судебного заседания извещен.

Возражения истца относительно рассмотрения дела в отсутствие представителя в материалы дела не поступили.

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело по существу по имеющимся в деле доказательствам в отсутствие надлежаще извещенного истца.

Изучив материалы дела и доводы сторон, суд установил нижеследующее.

28 марта 2013 года между истцом (подрядчик) и ООО «РН-Юганскнефтегаз» (заказчик) заключили договор № 53, по условиям которого подрядчик по поручению заказчика принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по строительству объекта: «BJI 35 кВ на «КНС 2МБ» до точки врезки (куст 608) Малобалыкского месторождения (далее – объект)». Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Стоимость работ по договору определяется протоколом согласования договорной цены (приложение № 1) и составляет 60 705 196 рублей 76 копеек, в том числе НДС 18% 9 260 114 рублей 76 копеек (пункт 3.1 договора).

В соответствии с пунктами 3.2, 3.3, 3.4 договора, договорная цена является приблизительной, стоимость выполненных работ оплачивается заказчиком подрядчику за фактически выполненные работы согласно ценовым нормативам, утверждённым данным договором. Стоимость материалов, конструкций, оборудования, приобретённых подрядчиком, предварительно согласовывается с заказчиком и включается в объём выполненных работ и оплачивается заказчиком на основании предъявленных подрядчиком первичных документов с приложением перечня фактически смонтированного оборудования. Материалы, конструкции, оборудование, приобретённые подрядчиком, оплачиваются по цене фактического приобретения (с учётом транспортных расходов, с предоставлением копий соответствующих документов об их приобретении), но не более цены, установленной в договоре.

Расчет договорной цены представляется с обязательным приложением Разделительной ведомости поставки товарно-материальных ценностей между Заказчиком и Подрядчиком (Приложения №3), основанной на спецификации из проектно-сметной документации.

В пункте 4.1, 4.2 договора стороны согласовали, что календарные сроки выполнения работ определяются графиком производства работ, составленным по этапам строительства (приложение № 2). Начало производства работ – 15.10.2013, окончание производства работ по объекту и сдачи объекта заказчику – 25.12.2013.

Объект должен быть построен Подрядчиком и сдан Заказчику в сроки, указанные в пункте 4.1. настоящего Договора и Графике производства работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение любого из указанных сроков (как начального, конечного, так и промежуточных сроков).

Порядок оплаты определен в разделе 6 договора:

Оплата выполненных работ производится Заказчиком в рублях РФ. по факту выполненных работ, по законченному этапу (согласно Графика производства работ) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение календарного месяца, начиная с 1-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании 3-х комплектов следующих документов: оригинала счета-фактуры, акта сдачи приемки выполненных работ (форма КС-2), справки (форма № КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком. Указанные документы предоставляются Заказчику не позднее 24 числа текущего месяца (пункт 6.1.1).

Ежемесячно в срок до 20 числа, следующего за отчетным месяцем выполнения работ, стороны могут по обоюдному согласованию провести сверку исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов с подписанием соответствующего Акта (пункт 6.1.2).

В пункте 6.1.3 договора сторонами согласовано, что заказчик до окончания строительства объекта резервирует 10% от стоимости выполненных работ Подрядчика (строительно-монтажных, пусконаладочных и проектно-изыскательских работ). Заказчик производит оплату зарезервированной части в течение календарного месяца, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем в котором Стороны подписали нижеуказанные документы:: - акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11) при наличии положительных заключений государственных органов надзора; - акт приёмки территории временной базы подрядной организации (приложение к стандарту общества «Требования по согласованию и размещению подрядными организациями сооружений, оборудования, включая временные здания и сооружения на месторождениях, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью ООО «РН-Юганскнефтегаз»).

Пунктом 15.2 договора установлено, что Подрядчик за задержку оплаты выполненных Работ имеет право взыскать с Заказчика проценты, рассчитанные в соответствии со статьей 395 ГК РФ, но не более 3% годовых.

Договор вступает в силу с момента подписания, действует по 28 марта 2013 года и действует по 31 декабря 2013 года (пункт 25.1 договора).

В соответствии со статьёй 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определённый объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Согласно пункту 1 статьи 746 названного Кодекса оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьёй 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Из материалов дела следует, что во исполнение обязательств по договору истец выполнил работы на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат по  Форме № КС-3:

- от 19.05.2014 № 3 на 1 161 706 рублей 46 копеек (резерв 116 170 рублей 65 копеек).

Таким образом, в рамках данного дела истец фактически просил взыскать с ответчика сумму резервного удержания, предусмотренного пунктом 6.1.3 договора 53, в размере 116 170 рублей 65 копеек.

Выплата резервного удержания и оплата работ являются различными обязанностями заказчика, которые возникают не одновременно. Если заказчиком и подрядчиком подписаны акты по формам КС-2 и КС-3, но не подписан акт по форме КС-11 и договор не расторгнут, то выплата резервного удержания подрядчику возможна не ранее подписания акта КС-11. При отказе заказчика от договора до окончания выполнения всего объёма работ подрядчик может рассчитывать на оплату частично выполненных и принятых работ.

В случае привязки выплаты резервного удержания (зарезервированной части) к подписанию акта по форме КС-11 предполагается, что такое удержание не должно обеспечивать обязанности подрядчика в отношении качества результата работ после введения объекта в эксплуатацию (не обеспечивает именно гарантийные обязательства). Подразумевается, что с помощью гарантийного удержания подрядчик стимулируется только к своевременному выполнению и устранению возможных недостатков отдельных этапов или видов работ до подписания акта КС-11 (явных недостатков, которые выявляются в ходе оперативного контроля).

Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 не подписан, договор не расторгнут, в установленном порядке спорный объект в эксплуатацию не введен, соответственно, срок оплаты резервного удержания не наступил.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Норма статьи 190 ГК РФ позволяет определять срок указанием на неизбежное событие. При этом смысл такого регулирования заключается в том, чтобы избегать ситуаций, когда баланс интересов сторон был бы нарушен вследствие того, что одна из сторон будет обязана совершить действия в пользу другой стороны только при наступлении события, неизбежность которого не определена. В противном случае должник приобретает неограниченную по времени возможность не исполнять обязательство, пользуясь договорной свободой.

Статьи 711 и 746 ГК РФ связывают обязанность заказчика по оплате работ с приемкой результата работы.

С учетом требований статьи 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Надлежит признать, что, исходя из буквального толкования положений договора и их соотнесения друг с другом и смыслом договора в целом, пункт 6.1.3 договора подряда регулирует не обязательство по оплате самих выполненных работ, а по возврату удержанной суммы.

Пунктами 1, 2 статьи 755 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

По общему правилу подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Оформление сторонами итогового акта и его подписание обеими сторонами без оговорок является необходимым требованием для оплаты суммы гарантийного резервирования в соответствии с пунктом 6.1.3 договора подряда.

Таким образом, условие о возврате суммы гарантийного резервирования после подписания итогового акта, не противоречит закону.

Поскольку порядок оплаты работы определен сторонами в договоре подряда, а срок окончательной оплаты не наступил, у заказчика не возникла обязанность по оплате выполненных работ в полном объеме, в том числе и по выплате гарантийного резервирования в сумме 116 170 рублей 65 копеек.

Исходя из того, что у истца не наступило право требования удерживаемых средств, исковые требования о взыскании с ответчика 116 170 рублей 65 копеек долга (резервное удержание) по договору подряда № 53 не подлежат удовлетворению.

Поскольку обязательства по оплате выполненных работ не наступили, не подлежат удовлетворению требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и законных процентов.

Исходя из размера рассмотренных исковых требований, подлежащая уплате государственная пошлина в соответствии с пунктом 6 статьи 52, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составила 5 727 рублей.

В соответствии со статьями 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд относит судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 727 рублей на истца. 

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "СИБСПЕЦСТРОЙ" оставить без удовлетворения.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "СИБСПЕЦСТРОЙ" в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 727 рублей.

В случае неисполнения решения суда в указанной части выдать исполнительный лист.

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                  Ю.П. Щепелин