42_11632220  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-85809/20

16 ноября 2021 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Сергеевой А.С., при ведении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело   № А41-85809/20 по исковому заявлению АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛУХОВИЦЫ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к ООО "БИНГОЛЭНД" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>), ИП ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН:  

<

***>), ИП ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о возложении  обязанности по сносу  

третье лицо – Министерство жилищной политики Московской области при участии сторон в судебном заседании согласно протоколу 

руководствуясь статьями 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать ООО «Бинголэнд», ИП ФИО2 и ИИ ФИО3 привести нежилое здание:  унифицированной склад площадью 975,8 кв.м., инв. № 37-02500, расположенный по адресу: 

<

...> здание № 28 в соответствие с требованиями  Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «О техническом регламенте о безопасности зданий и  сооружений» в течение двух месяцев со дня вступления решения по настоящему делу в законную силу,  следующие работы по ремонту:  

1. По фундаменту: текущий ремонт, организация отмостки по периметру;  

2. По стенам: заделка стыков раствором, восстановление демонтированных элементов, замена металлической  колонны, установка горизонтальной железобетонной балки;  

3. По колоннам: зачистка, защита от коррозии; 

4. По перекрытию: устройство цементно-песчаных пробок в пустотах настила по всей опорной части, заделка  стыков раствором;  

5. По ферменным сводчатым кровельным конструкциям: зачистка, защита от коррозии металлических  элементов;  

6. По кровле: смена покрытия кровли с использованием старого материала не более 25 %;  

7. По фронтонам: замена деревянных элементов, замена поврежденных щитов фронтонов, устройство  дополнительных связей с несущими конструкциями;  

8. По полам: полная смена покрытия и основания; 9. По проемам: обустройство ворот на объекте; 

10. По внутренним электротехническим устройствам: обустройство пол вода, вводного распределительного  устройства.  

Взыскать с ООО "БИНГОЛЭНД" в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину по  иску в размере 2000 руб.  

Взыскать с ИП ФИО2 в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину по  иску в размере 2000 руб.  

Взыскать с ИП ФИО3 в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину по  иску в размере 2000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия решения в Десятый Арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.  

Судья А.С. Сергеева