Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-17868/2023

г. Хабаровск

04 апреля 2024 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена «27» февраля 2024 г.  Арбитражный суд Хабаровского края  

в составе судьи Трещевой В.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью «Востокинвестстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес:  6800221, 

<

...>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Бамстройуниверсал» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 680011, 

<

...>)  

о взыскании 14 640 204 руб. 30 коп. при участии в судебном заседании: 

от истца - ФИО2, представитель по доверенности от 23.10.2023 г., диплом о  высшем образовании.  

от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом;  

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Востокинвестстрой» (далее - «истец»)  обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к Обществу с  ограниченной ответственностью «Бамстройуниверсал» (далее - «ответчик») о взыскании  основного долга по договорам № 17/02/22/51 от 17.02.2022 г., № СП-22/57 от 23.03.2022 г.,   № СП-14/22 от 01.09.2022 г., № СП-2/23 от 13.03.2023 г. в размере 14 640 204 руб. 30 коп.  

22.11.2023 истцом подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде  наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут  поступать на банковский счет) и/или иное имущество, принадлежащее ответчику и  находящееся у него или других лиц, в пределах цены иска в размере 14 640 204 руб. 30  коп. до фактического исполнения решения суда. Также заявитель просит суд при  необходимости в тексте определения суда указать, что данный запрет не распространяется  на налоговые платежи, платежи, предшествующие исполнению обязательств по уплате  налогов и сборов, отчисления в Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования, Фонд  обязательного медицинского страхования, Государственный Фонд занятости населения,  платежи по заработной плате, вознаграждение авторам результатов интеллектуальной  деятельности, возмещения вреда, причиненного здоровью, требования по взысканию  алиментов, расчеты по выплате выходных пособий.  

Определением суда от 23.21.2023 заявление Общества с ограниченной  ответственностью «Востокинвестстрой» от 22.11.2023 об обеспечении иска  удовлетворено, наложен арест на денежные средства Общества с ограниченной  ответственностью «Бамстройуниверсал» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) (в  том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) и/или иное  

имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц, в пределах  цены иска в размере 14 640 204 руб. 30 коп. до фактического исполнения решения суда.  

Принято встречное обеспечение в виде независимой гарантии № 151 от 20.11.2023,  выданной ООО «Независимая гарантия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по  возмещению Обществу с ограниченной ответственностью «Бамстройуниверсал» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) возможных убытков в пределах 7 320 103 руб. 00 коп.,  возникших в результате принятия обеспечительных мер по делу № А73-17868/2023.  

Обществу с ограниченной ответственностью «Востокинвестстрой» выдан  исполнительный лист серии № ФС 041281965.  

Представитель истца в судебном заседании настаивал на заявленных требованиях в  полном объёме.  

Представитель ответчика возражал в удовлетворении исковых требований, однако  мотивированный отзыв на иск не представил.  

В соответствии со статьей 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе знать об  аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу,  участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному  суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать  свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе  рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица,  участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения  ими процессуальных действий.  

25.12.2023 от Общества с ограниченной ответственностью «Востокинвестстрой»  поступило ходатайство об отмене обеспечительных мер, принятых определением суда от  23.11.2023. В обоснование заявленного ходатайства пояснил, что между сторонами  заключено мировое соглашение.  

Определением суда от 09.01.2024 принято к производству заявление Общества с  ограниченной ответственностью «Востокинвестстрой» об отмене обеспечительных мер по  делу № А73-17868/2023 и назначить судебное заседание по его рассмотрению на «11»  января 2024 на 12 час. 45 мин.  

Лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не  обеспечили.  

ООО «Востокинвестстрой» предоставило письменное заявление об отказе от  заявления об отмене обеспечительных мер, принятых определением Арбитражного суда  от 23.11.2023 по делу № А73-17868/2023.  

Определением суда от 23.01.2024 принят отказ Общества с ограниченной  ответственностью «Востокинвестстрой» от заявления об отмене обеспечительных мер,  принятых определением Арбитражного суда от 23.11.2023 по делу № А73-17868/2023,  производство по заявлению прекращено.  

26.02.2024 представитель истца в порядке статьи 49 АПК РФ заявил ходатайство об  уменьшении исковых требований в связи с частичной оплатой суммы основного долга, в  связи с чем, просил взыскать с ответчика в пользу истца основной долг по договорам №  17/02/22/51 от 17.02.2022 г., № СП-22/57 от 23.03.2022 г., № СП-14/22 от 01.09.2022 г., №  СП-2/23 от 13.03.2023 г. в размере 3 140 204 руб. 30 коп.  

Суд принял уточнение исковых требований. 

В ходе судебного разбирательства суд, рассмотрев материалы дела и выслушав  представителя истца, установил следующие обстоятельства.  

1) Как следует из материалов дела, 17.02.2022 между Обществом с ограниченной  ответственностью «Востокинвестстрой» (далее – «субподрядчик») и Обществом с  ограниченной ответственностью «Бамстройуниверсал» (далее – «подрядчик») заключен  договор на выполнение работ комплекса строительно-монтажных работ о объекту  «Второй главный путь на перегоне Кенай-Удоми Дальневосточной железной дороги №  17/02/22/51, согласно пункту 1.1 которого, подрядчик поручает, а субподрядчик  

принимает на себя подряд на выполнение комплекса работ по строительству объекта,  включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы (далее«Работы») на Объекте железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО  «РЖД»: «Второй главный путь на перегоне Кенай-Удомн Дальневосточной железной  дороги» код ИП: 001.2018.10008263.  

Согласно пункту 1.4 договора, субподрядчик обязуется выполнить работы в  соответствии с условиями договора в полном соответствии с проектной документацией,  нормативно-правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов.  

Пунктом 2.1 установлено, что общая стоимость работ, подлежащих выполнению  субподрядчиком по настоящему договору оформлена в виде ведомости договорной цены  (приложению № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составляет  - 42 530 338 руб. 70 коп. (сорок два миллиона пятьсот тридцать тысяч триста тридцать  восемь рублей 70 копеек), кроме того НДС 20 % - 8 506 067,74 руб. (Восемь миллионов  пятьсот шесть тысяч шестьдесят семь рублей 74 копейки). Всего с учетом НДС 20 % - 51  036 406 руб. 44 коп. (пятьдесят один миллион тридцать шесть тысяч четыреста шесть  рублей 44 копейки), в том числе:  

- стоимость работ, подлежащих выполнению в 2022 году составляет - 42 530 338 руб.  70 коп. (сорок два миллиона пятьсот тридцать тысяч триста тридцать восемь рублей 70  копеек), кроме того НДС 20 % - 8 506 067 руб. 74 коп. (восемь миллионов пятьсот шесть  тысяч шестьдесят семь рублей 74 копейки). Всего с учетом НДС 20 % - 51 036 406 руб. 44  коп. (пятьдесят один миллион тридцать шесть тысяч четыреста шесть рублей 44 копейки).  

Подрядчик уведомляет субподрядчика о том, что согласно пункту 3.3 договора  подрядчик осуществляет оплату в пределах договорной цены и годового лимита  финансирования. Подрядчик удерживает 15 % за выполненные работы при закрытии  выполнения по форме № КС- 2 до получения заключения ГГЭ и выхода новой рабочей  документации со штампом к производству работ.  

Окончательная стоимость работ будет определена на основании уточненной  ведомости договорной цены, путем подписания дополнительного соглашения к  настоящему договору. Стоимость работ подрядчика может быть пересмотрена после  уточнения проектно-сметной документации, по результатам получения положительного  ГГЭ.  

Согласно пункту 3.3 договора (в редакции дополнительного соглашения № 2 от  21.04.2022) подрядчик осуществляет оплату выполненных по настоящему договору работ  после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и  предоставления счета-фактуры в пределах договорной цены и годового лимита  финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство объекта в течение  80 (восьмидесяти) календарных дней после принятия подрядчиком работ.  

Оплата выполненных и принятых работ производится в размере 98% от стоимости  выполненных работ. Оставшиеся 2% от стоимости выполненных работ представляют  собой гарантийное удержание и являются обеспечительной мерой, гарантирующей  надлежащее качество выполняемых работ и покрытие возможных расходов подрядчика,  вызванных ненадлежащим выполнением субподрядчиком обязательств, в том числе  гарантийных, по настоящему договору.  

Оплата оставшихся процентов гарантийного удержания от стоимости выполненных  работ производится подрядчиком в соответствии с пунктом 3.4. настоящего договора.  

Если стороны не предусмотрели иное в дополнительных соглашениях к настоящему  договору, в случае досрочного расторжения настоящего договора и привлечения для  производства строительных работ на объекте другого субподрядчика условие о  гарантийном удержании за выполненный по настоящему договору объем работ сохраняет  силу и действует в соответствии с пунктом 3.4. договора до полного завершения работ на  объекте и ввода объекта в эксплуатацию в установленном законом порядке.  

Счет-фактура на объем выполненных работ предоставляется после подписания  сторонами комплектов актов выполненных работ в следующем порядке:  

- за январь-ноябрь отчетного года - по 5 число месяца, следующего за отчетным.  Если указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока приемки работ  считается следующий за ним рабочий день;  

- за декабрь отчетного года - в течение 3 первых рабочих дней следующего года. 

Субподрядчик обязан предоставить счет-фактуру на объем выполненных работ за  отчетный месяц в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, но  не позднее вышеуказанных сроков. При отсутствии счета-фактуры оплата не  производится.  

Согласно пункту 3.4 договора (в редакции дополнительного соглашения № 2 от  21.04.2022) оплата гарантийных удержаний по настоящему договору производится  подрядчиком после полного завершения работ по настоящему договору, подписания  сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, включая устранение дефектов и  замечаний, выявленных при приёмке объекта, возмещения нанесённого ущерба  подрядчику и (или) третьим лицам, с зачётом ранее перечисленных средств в течение 80  (восьмидесяти) календарных дней после подписания акта приемки законченного  строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14 между заказчиком и  подрядчиком), с приложением к нему реестра счетов-фактур, актов о приемке  смонтированного оборудования формы № ФСУ-3, технической и исполнительной  документации, иных предусмотренных действующим законодательством Российской  Федерации и настоящим договором документов и получения денег от заказчика.  

При наличии дефектов, недостатков работ и иных замечаний к выполненным  субподрядчиком работам срок окончательного расчета по настоящему договору,  установленный в настоящем пункте договора, соразмерно продлевается на срок  фактического полного устранения субподрядчиком указанных недостатков, дефектов,  замечаний и исчисляется с момента подписания сторонами акта об устранении  недостатков работ либо составления сторонами иного документа, подтверждающего  выполнение субподрядчиком указанных обязательств.  

На основании пункта 4.1.3 подрядчик обязан принять выполненную работу и  оплатить субподрядчику установленную настоящим договором цену в порядке и на  условиях, предусмотренных настоящим договором.  

Пунктом 4.2.5 субподрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки,  предусмотренные настоящим договором, в соответствии с утвержденными проектными  решениями и календарным графиком производства работ и сдать объект подрядчику в  установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в  соответствии с функциональным назначением данного объекта.  

Согласно пункту 6.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 4 от  27.10.2022) начало работ - с даты заключения настоящего договора. Окончание работ:  март 2023. Сроки выполнения работ по отдельным этапам (видам) работ определены  сторонами в календарном графике производства работ (приложение № 1 к настоящему  дополнительному соглашению).  

 Представленными в материалы дела актами по форме КС-2 и КС-3 № 1 от  31.03.2022 г., № 2 от 30.04.2022, № 3 от 31.05.2022, № 4 от 30.06.2022, № 5 от 31.07.2022,   № 6 от 31.08.2022, № 7 от 30.09.2022, № 8 от 30.09.2022, № 8 от 31.10.2022, № 9 от  30.11.2022, № 10 от 15.01.2023 № 11 от 30.11.2022, № 23 от 31.03.23, № 24 от 31.03.2023,   № 25 от 30.04.2023, № 26 от 31.05.2023 подтверждается факт выполнения субподрядчиком  работ по договору от 17.02.2022 № 17/02/22/51 на общую сумму 52 614 582 руб. 00 коп.  

Представленными в материалы дела платежными поручениями № 68 от 24.03.2022,   № 426 от 21.04.2022, № 4635 от 27.06.2023, № 870 от 06.07.2022, № 2203 от 14.07.2022,   № 2811 от 05.08.2022, № 2813 от 05.08.2022, № 3191 от 19.08.2022, № 4196 от 22.09.2022,   № 4545 от 10.10.2022, № 4546 от 10.10.2022, № 4656 от 13.10.2022, № 5027 от 21.10.2022,  

 № 5094 от 27.10.2022, № 5447 от 11.11.2022, № 6170 от 05.12.2022 подтверждается факт  частичной оплаты подрядчиком суммы выполненных работ в размере 49 510 325 руб. 74  коп.  

2) 23.03.2022 между Обществом с ограниченной ответственностью  «Востокинвестстрой» (далее - «субподрядчик») и Обществом с ограниченной  ответственностью «Бамстройуниверсал» (далее – «подрядчик») заключен договор № СП- 22/57 на выполнение работ комплекса строительно-монтажных работ по объекту: Второй  главный путь на перегоне ФИО3 Дальневосточной железной дороги», согласно  пункту 1.1 которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя подряд на  выполнение комплекса работ по строительству объекта, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы (далее - «Работы») на объекте  железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД»: «Второй главный  путь на перегоне Кенай-Удоми Дальневосточной железной дороги» код ИП:  001.2018.10008263.  

Согласно пункту 2.1 договора, общая стоимость работ, подлежащих выполнению  субподрядчиком по настоящему договору оформлена в виде ведомости договорной цены  (приложению № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составляет  - 47 880 750 руб. 06 коп. (сорок семь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч семьсот  пятьдесят рублей 06 копеек), кроме того НДС 20 % - 9 576 150 руб. 01 коп. (девять  миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 01 копейка). Всего с  учетом НДС 20 % - 57 456 900 руб. 07 коп. (пятьдесят семь миллионов четыреста  пятьдесят шесть тысяч девятьсот рублей 07 копеек), в том числе:  

- стоимость работ, подлежащих выполнению в 2022 году составляет - 47 880 750 руб.  06 коп. (Сорок семь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят рублей 06  копеек), кроме того НДС 20 % - 9 576 150 руб. 01 коп. (Девять миллионов пятьсот  семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 01 копейка). Всего с учетом НДС 20 % - 57  456 900 руб. 07 коп. (пятьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч  девятьсот рублей 07 копеек).  

Подрядчик уведомляет субподрядчика о том, что согласно пункту 3.3 договора  подрядчик осуществляет оплату в пределах договорной цены и годового лимита  финансирования. Подрядчик удерживает 15 % за выполненные работы при закрытии  выполнения по форме № КС- 2 до получения заключения ГГЭ и выхода новой рабочей  документации со штампом к производству работ.  

Окончательная стоимость работ будет определена на основании уточненной  ведомости договорной цены, путем подписания дополнительного соглашения к  настоящему договору. Стоимость работ подрядчика может быть пересмотрена после  уточнения проектно-сметной документации, по результатам получения положительного  ГГЭ.  

Пунктом 3.3 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2022)  подрядчик осуществляет оплату выполненных по настоящему договору работ после  подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и  предоставления счета-фактуры в пределах договорной цены и годового лимита  финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство объекта в течение  80 (восьмидесяти) календарных дней после принятия подрядчиком работ.  

Оплата выполненных и принятых работ производится в размере 98% от стоимости  выполненных работ. Оставшиеся 2% от стоимости выполненных работ представляют  собой гарантийное удержание и являются обеспечительной мерой, гарантирующей  надлежащее качество выполняемых работ и покрытие возможных расходов подрядчика,  вызванных ненадлежащим выполнением субподрядчиком обязательств, в том числе  гарантийных, по настоящему договору.  

Оплата оставшихся процентов гарантийного удержания от стоимости выполненных  работ производится подрядчиком в соответствии с пунктом 3.4. настоящего договора.  

Если стороны не предусмотрели иное в дополнительных соглашениях к настоящему  Договору, в случае досрочного расторжения настоящего договора и привлечения для  производства строительных работ на объекте другого субподрядчика условие о  гарантийном удержании за выполненный по настоящему договору объем работ сохраняет  силу и действует в соответствии с п.3.4. договора до полного завершения работ на объекте  и ввода объекта в эксплуатацию в установленном законом порядке.  

Счет-фактура на объем выполненных работ предоставляется после подписания  сторонами комплектов актов выполненных работ в следующем порядке:  

- за январь-ноябрь отчетного года - по 5 число месяца, следующего за отчетным.  Если указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока приемки работ  считается следующий за ним рабочий день;  

- за декабрь отчетного года - в течение 3 первых рабочих дней следующего года. 

Субподрядчик обязан предоставить счет-фактуру на объем выполненных работ за  отчетный месяц в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, но  не позднее вышеуказанных сроков. При отсутствии счета-фактуры оплата не  производится.  

Согласно пункту 3.4 договора оплата гарантийных удержаний по настоящему  договору производится подрядчиком после полного завершения работ по настоящему  договору, подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, включая  устранение дефектов и замечаний, выявленных при приёмке объекта, возмещения  нанесённого ущерба подрядчику и (или) третьим лицам, с зачётом ранее перечисленных  средств в течение 40 (сорока) календарных дней после подписания акта приемки  законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14 между  заказчиком и подрядчиком), с приложением к нему реестра счетов-фактур, актов о  приемке смонтированного оборудования формы № ФСУ-3, технической и  исполнительной документации, иных предусмотренных действующим законодательством  Российской Федерации и настоящим договором документов и получения денег от  заказчика.  

При наличии дефектов, недостатков работ и иных замечаний к выполненным  субподрядчиком работам срок окончательного расчета по настоящему договору,  установленный в настоящем пункте договора, соразмерно продлевается на срок  фактического полного устранения субподрядчиком указанных недостатков, дефектов,  замечаний и исчисляется с момента подписания сторонами акта об устранении  недостатков работ либо составления сторонами иного документа, подтверждающего  выполнение субподрядчиком указанных обязательств.  

Пунктом 4.1.3 договора предусмотрено, что подрядчик обязан принять  выполненную работу и оплатить субподрядчику установленную настоящим договором  цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  

Пунктом 4.2.5 субподрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки,  предусмотренные настоящим договором, в соответствии с утвержденными проектными  решениями и календарным графиком производства работ и сдать объект подрядчику в  установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в  соответствии с функциональным назначением данного объекта.  

Согласно пункту 6.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 2 от  27.10.2022) начало работ - с даты заключения настоящего договора. Окончание работ:  март 2023. Сроки выполнения работ по отдельным этапам (видам) работ определены  сторонами в календарном графике производства работ (приложение № 1 к настоящему  дополнительному соглашению).  

Представленными в материалы дела актами по форме КС-2 и КС-3 № 1 от  30.04.2022, № 2 от 31.05.2022, № 4 от 30.06.2022, № 5 от 31.07.2022, № 6 от 31.07.2022, №  7 от 30.09.2022, № 8 от 30.09.2022, № 9 от 30.09.2022, № 10 от 31.10.2022, № 11 от  30.11.2022, № 23 от 15.01.2023, № 24 от 15.01.2023, № 25 от 15.01.2023, № 26 от  

15.01.2023, № 27 от 15.01.2023, № 28 от 31.03.2023, № 29 от 31.03.2023, № 30 от  31.03.2023, № 31 от 30.04.2023, № 32от 31.05.2023, № 33 от 31.03.2023, № 34 от  31.05.2023, № 35 от 31.05.20232, № 36 от 30.06.2023, подтверждается факт выполнения  субподрядчиком работ по договору от 23.02.2022 № СП-22/57 на общую сумму 53 708 186  руб. 40 коп.  

Представленными в материалы дела платежными поручениями № 869 от  05.07.22022, № 2812 от 05.08.2022, № 3734 от 12.09.2022, № 3733 от 12.09.2022, № 3947 от  15.09.2022, № 5457 от 11.11.2022, № 5455 от 11.11.2022, № 6976 от 30.12.2022, № 72 от  13.01.2023, № 1653 от 07.03.2023, № 1767 от 13.03.2023, № 3183 от 28.04.2023,  подтверждается факт частичной оплаты подрядчиком суммы выполненных работ в  размере 52 585 822 руб. 17 коп.  

3) 01.09.2022 между Обществом с ограниченной ответственностью  «Востокинвестстрой» (далее – «субподрядчик») и Обществом с ограниченной  ответственностью «Бамстройуниверсал» (далее – «подрядчик») заключен договор № СП- 14/22 на выполнение работ комплекса строительно-монтажных работ по объекту: Второй  главный путь на перегоне ФИО3 Дальневосточной железной дороги», согласно  пункту 1.1 которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя подряд на  выполнение комплекса работ по строительству объекта, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы (далее - «работы») на объекте  железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД»: «Второй главный  путь на перегоне Кенай-Удоми Дальневосточной железной дороге» код ИП:  0012018.10008263.  

Согласно пункту 2.1 договора, общая стоимость работ, подлежащих выполнению  субподрядчиком по настоящему договору оформлена в виде ведомости договорной цены  (приложению № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составляет  - 816 266 руб. 46 коп. (одиннадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч двести  шестьдесят шесть рублей 46 копеек), кроме того НДС 20 % - 2 363 253 руб. 29 коп. (два  миллиона триста шестьдесят три тысячи двести пятьдесят три рубля 29 копеек), Всего с  учетом НДС 20 % - 14 179 519 руб. 75 коп. (четырнадцать миллионов сто семьдесят девять  тысяч пятьсот девятнадцать рублей 75 копеек), в том числе:  

- стоимость работ, подлежащих выполнению в 2022 году составляет - 11 816 266 руб.  46 коп. (Одиннадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч двести шестьдесят шесть  рублей 46 копеек), кроме того НДС 20 % - 2 363 253 руб. 29 коп. (Два миллиона триста  шестьдесят три тысячи двести пятьдесят три рубля 29 копеек). Всего с учетом НДС 20 %14 179 519 руб. 75 коп. (Четырнадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч пятьсот  девятнадцать рублей 75 копеек).  

Подрядчик уведомляет субподрядчика о том, что согласно пункту 3.3 договора  подрядчик осуществляет оплату в пределах договорной цены и годового лимита  финансирования. Подрядчик удерживает 15 % за выполненные работы при закрытии  выполнения по форме № КС- 2 до получения заключения ГГЭ и выхода новой рабочей  документации со штампом к производству работ.  

Окончательная стоимость работ будет определена на основании уточненной  ведомости договорной пены, путем подписания дополнительного соглашения к  настоящему договору. Стоимость работ подрядчика может быть пересмотрена после  уточнения проектно-сметной документации, по результатам получения положительного  ГГЭ.  

Пунктом 3.3 договора установлено, что подрядчик осуществляет оплату  выполненных по настоящему договору работ после подписания справки о стоимости  выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры в пределах  договорной цены и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке  на строительство объекта в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней после принятия  подрядчиком работ.  

Оплата выполненных и принятых Работ производится в размере 98% от стоимости  выполненных работ. Оставшиеся 2% от стоимости выполненных работ представляют  собой гарантийное удержание и являются обеспечительной мерой, гарантирующей  надлежащее качество выполняемых работ и покрытие возможных расходов подрядчика,  вызванных ненадлежащим выполнением субподрядчиком обязательств, в том числе  гарантийных, по настоящему договору.  

Оплата оставшихся процентов гарантийного удержания от стоимости выполненных  работ производится подрядчиком в соответствии с пунктом 3.4. настоящего договора.  

Если стороны не предусмотрели иное в дополнительных соглашениях к настоящему  договору, в случае досрочного расторжения настоящего договора и привлечения для  производства строительных работ на объекте другого субподрядчика условие о  гарантийном удержании за выполненный по настоящему договору объем работ сохраняет  силу и действует в соответствии с п.3.4. договора до полного завершения работ на объекте  и ввода объекта в эксплуатацию в установленном законом порядке.  

Счет-фактура на объем выполненных работ предоставляется после подписания  сторонами комплектов актов выполненных работ в следующем порядке:  

- за январь-ноябрь отчетного года - по 5 число месяца, следующего за отчетным.  Если указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока приемки работ  считается следующий за ним рабочий день;  

- за декабрь отчетного года - в течение 3 первых рабочих дней следующего года.  

Субподрядчик обязан предоставить счет-фактуру на объем выполненных работ за  отчетный месяц в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, но  не позднее вышеуказанных сроков. При отсутствии счета-фактуры оплата не  производится.  

Пунктом 3.4 договора установлено, что оплата гарантийных удержаний по  настоящему договору производится подрядчиком после полного завершения работ по  настоящему договору, подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ,  включая устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке объекта,  возмещения нанесённого ущерба подрядчику и (или) третьим лицам, с зачетом ранее  перечисленных средств в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней после подписания  акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме  ШСС-14 между заказчиком и подрядчиком), с приложением к нему реестра счетов- фактур, актов о приемке смонтированного оборудования формы МФСУ-З, технической и  исполнительной документации, иных предусмотренных действующим законодательством  Российской Федерации и настоящим договором документов и получения денег от  заказчика.  

При наличии дефектов, недостатков работ и иных замечаний к выполненным  субподрядчиком работам срок окончательного расчета по настоящему договору,  установленный в настоящем пункте договора, соразмерно продлевается на срок  фактического полного устранения субподрядчиком указанных недостатков, дефектов,  замечаний и исчисляется с момента подписания сторонами акта об устранении  недостатков работ либо составления сторонами иного документа, подтверждающего  выполнение субподрядчиком указанных обязательств.  

Пунктом 4.1.3 договора предусмотрено, что подрядчик обязан принять  выполненную работу и оплатить субподрядчику установленную настоящим договором  цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  

Пунктом 4.2.5 субподрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки,  предусмотренные настоящим договором, в соответствии с утвержденными проектными  решениями и календарным графиком производства работ и сдать объект подрядчику в  установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в  соответствии с функциональным назначением данного объекта.  

Согласно пункту 6.1 договора начало работ - с даты заключения настоящего  договора. Окончание работ: декабрь 2022. Сроки выполнения работ по отдельным этапам  (видам) работ определены сторонами в календарном графике производства работ  (приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).  

Представленными в материалы дела актами по форме КС-2 и КС-3 № 1 от  31.10.2022, 32 от 30.11.2022, № 5 от 15.01.2023, № 6 от 28.02.2023, № 7 от 31.03.2023, № 8  от 30.04.2023, № 9 от 31.05.2023 подтверждается факт выполнения субподрядчиком работ  по договору от 01.09.2022 № СП-14/22 на общую сумму 14 577 031 руб. 20 коп.  

Представленными в материалы дела платежными поручениями № 1191 от  17.02.2023, № 1761 от 10.03.2023, № 2162 от 24.03.2023, № 2614 от 07.04.2023, № 3109 от  24.04.2023, № 6125 от 18.08.2023, № 6386 от 08.12.2022 подтверждается факт частичной  оплаты подрядчиком суммы выполненных работ в размере 13 346 819 руб. 05 коп.  

4)  13.03.2023 между Обществом с ограниченной ответственностью  «Востокинвестстрой» (далее - субподрядчик») и Обществом с ограниченной  ответственностью «Бамстройуниверсал» (далее - подрядчик») заключен договор № СП- 2/23 на выполнение работ комплекса строительно-монтажных работ по объекту: Второй  главный путь на перегоне Удоми-Оунэ Дальневосточной железной дороги», согласно  пункту 1.1 которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя подряд на  выполнение комплекса работ по строительству объекта, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы (далее - «работы») на объекте  железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД»: «Второй главный  путь на перегоне Удомя - Оуиэ Дальневосточной железной дороги» код ИП:  001.2018.10008265.  

Согласно пункту 2.1 договора, общая стоимость работ, подлежащих выполнению  субподрядчиком по настоящему договору оформлена в виде ведомости договорной цены  (приложению № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составляет  - 11 618 007 руб. 00 коп. (Одиннадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч семь  рублей) 00 копеек, кроме того НДС 20 % - 2 323 601 руб. 40 коп. Всего с учетом НДС 20  % - 13 941 608 руб. 40 (Тринадцать миллионов девятьсот сорок одна тысяча шестьсот  восемь рублей) 00 коп.  

Согласно пункту 3.3 договора, подрядчик осуществляет оплату выполненных по  настоящему договору работ после подписания справки о стоимости выполненных работ и  затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры в пределах договорной цены и  годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство  объекта в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней после принятия подрядчиком  работ.  

Оплата выполненных и принятых работ производится в размере 98% от стоимости  выполненных работ. Оставшиеся 2% от стоимости выполненных работ представляют  собой гарантийное удержание и являются обеспечительной мерой, гарантирующей  надлежащее качество выполняемых работ и покрытие возможных расходов подрядчика,  вызванных ненадлежащим выполнением субподрядчиком обязательств, в том числе  гарантийных, по настоящему договору.  

Оплата оставшихся процентов гарантийного удержания от стоимости выполненных  работ производится подрядчиком в соответствии с пунктом 3.4. настоящего договора.  

Если стороны не предусмотрели иное в дополнительных соглашениях к настоящему  договору, в случае досрочного расторжения настоящего договора и привлечения для  производства строительных работ на объекте другого субподрядчика условие о  гарантийном удержании за выполненный по настоящему договору объем работ сохраняет  силу и действует в соответствии с пунктом 3.4. договора до полного завершения работ на  объекте и ввода объекта в эксплуатацию в установленном законом порядке.  

Счет-фактура на объем выполненных Работ предоставляется после подписания  Сторонами комплектов актов выполненных работ в следующем порядке:  

- за январь-ноябрь отчетного года - по 5 число месяца, следующего за отчетным.  Если указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока приемки работ  считается следующий за ним рабочий день;  

- за май-сентябрь отчетного года - по 5 число месяца, следующего за отчетным.  Если указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока приемки работ  считается следующий за ним рабочий день.  

Субподрядчик обязан предоставить счет-фактуру на объем выполненных работ за  отчетный месяц в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, но  не позднее вышеуказанных сроков. При отсутствии счета-фактуры оплата не  производится.  

Пунктом 3.4 договора установлено, что оплата гарантийных удержаний по  настоящему договору производится подрядчиком после полного завершения работ по  настоящему договору, подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ,  включая устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке объекта,  возмещения нанесённого ущерба подрядчику и (или) третьим лицам, с зачетом ранее  перечисленных средств в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней после подписания  Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме  ШСС-14 между заказчиком и подрядчиком), с приложением к нему реестра счетов- фактур, актов о приемке смонтированного оборудования формы МФСУ-З, технической и  исполнительной документации, иных предусмотренных действующим законодательством  Российской Федерации и настоящим договором документов и получения денег от  заказчика.  

При наличии дефектов, недостатков работ и иных замечаний к выполненным  субподрядчиком работам срок окончательного расчета по настоящему договору,  установленный в настоящем пункте договора, соразмерно продлевается на срок  фактического полного устранения субподрядчиком указанных недостатков, дефектов,  замечаний и исчисляется с момента подписания сторонами акта об устранении  недостатков работ либо составления сторонами иного документа, подтверждающего  выполнение субподрядчиком указанных обязательств.  

Пунктом 4.1.3 договора предусмотрено, что подрядчик обязан принять  выполненную работу и оплатить субподрядчику установленную настоящим договором  цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  

Пунктом 4.2.5 субподрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки,  предусмотренные настоящим договором, в соответствии с утвержденными проектными  решениями и календарным графиком производства работ и сдать объект подрядчику в  установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в  соответствии с функциональным назначением данного объекта.  

Согласно пункту 6.1 договора начало работ - с даты заключения настоящего  договора. Окончание работ: июнь 2023. Сроки выполнения работ по отдельным этапам  (видам) работ определены сторонами в календарном графике производства работ  (приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).  

Представленными в материалы дела актами по форме КС-2 и КС-3 № 1 от  30.05.2023, № 2 от 30.06.2023, № подтверждается факт выполнения субподрядчиком  работ по договору от 13.03.2023 № СП-2/23 на общую сумму 7 756 497 руб. 60 коп.  

Представленными в материалы дела платежными поручениями № 8386 от  14.12.2023, № 372 от 25.01.2024, № 8386 от 29.01.2024 подтверждается факт частичной  оплаты подрядчиком суммы выполненных работ в размере 7 500 000 руб. 00 коп.  

На основании изложенного, сумма задолженности за выполненные работы по  спорным договорам с учётом вычета гарантийного удержания 2 % составила:  

- по договору № 17/02/22/51 от 17.02.2022 - 2 051 964 руб. 62 коп; - по договору № СП-22/57 от 23.02.2022 - 48 200 руб. 50 коп; - по договору № СП-14/22 от 01.09.2022 - 938 671 руб. 53 коп; 

- по договору № СП-2/23 от 13.03.2023 - 101 367 руб. 65 коп. 

16.10.2023 истец направил в адрес ответчика претензию исх. № б/н согласно,  которой просил оплатить задолженность по спорным договорам.  

Поскольку на момент подачи иска требование о взыскании задолженности  ответчиком не исполнено, истец обратился с настоящим иском в Арбитражный суд  Хабаровского края (с учетом принятого уточнения в порядке статьи 49 АПК РФ).  

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее - АПК РФ) представленные в материалы дела доказательства,  арбитражный суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по  следующим основаниям.  

Правоотношения сторон основаны на обязательствах подряда и регулируются  нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также  общими положениями ГК РФ об обязательствах.  

В силу пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик  обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется  создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и  уплатить обусловленную цену.  

Из пункта 1 статьи 746 ГК РФ следует, что оплата выполненных подрядчиком работ  производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке,  которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии  соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в  соответствии со статьей 711 настоящего кодекса.  

В пункте 4 статьи 753 ГК РФ указано, что сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне  изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных  законом.  

Предоставленными в материалы дела справками по форме КС- 3 и актами о приемке  выполненных работ по форме КС-2 подтверждается факт выполнения субподрядчиком  работ по договорам и их приемку подрядчиком в полном объеме в общем размере 128 656  297 руб. 20 коп. (по договору № 17/02/22/51 от 17.02.2022 на сумму 52 614 582 руб. 00  коп; по договору № СП-14/55 от 01.09.2022 на сумму 14 577 031 руб. 20 коп.; по договору   № СП-22/57 от 23.03.2022 на сумму 53 708 186 руб. 40 коп.; по договору № СП-2/23 от  13.03.2023 на сумму 7 756 497 руб. 60 коп.)  

Возражений по объему, стоимости и качеству выполненных работ, ответчиком не  заявлено.  

С учетом частичных оплат стоимости выполненных работ, у ответчика образовалась  задолженность по спорным договорам на общую сумму 3 140 204 руб. 30 коп.(за вычетом  суммы гарантийного удержания) (с учетом уточнения исковых требований в порядке  статьи 49 АПК РФ)  

Доказательства оплаты указанной задолженности ответчиком в порядке статьи 65  АПК РФ суду не представлены, следовательно, требование истца о взыскании основного  долга по спорным договорам в размере 3 140 204 руб. 30 коп. подлежит удовлетворению.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

В связи с тем, что требования истца удовлетворяются в полном объеме на основании  части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы в виде уплаченной госпошлины по  платежному поручению № 505 от 30.10.2023 г. в сумме 38 701 руб. 00 коп. подлежат  

возмещению с ответчика, а излишне уплаченная в размере 57 500 руб. 00 коп. в порядке  статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Бамстройуниверсал»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Востокинвестстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  основной долг в размере 3 140 204 руб. 30 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Бамстройуниверсал»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Востокинвестстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в сумме 38 701 руб. 00 коп.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Востокинвестстрой»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета уплаченную  госпошлину в сумме 57 500 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В  случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный  апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья В.Н. Трещева