АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: 8(4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: 8(4842) 599-457

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А23-1661/2022

18 августа 2022 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения объявлена 15 августа 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 18 августа 2022 года.

 

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Пашковой Е.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

при участии:

от ответчика ФИО2 (доверенность от 21.03.2022 № 03),

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление муниципального казенного учреждения "Центр по повышению энергетической эффективности"(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 248001, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Бастион" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 248911, Калужская обл., г. Калуга,

<

...>) о взыскании 1 190 216,78 руб.,

УСТАНОВИЛ:

муниципальное казенное учреждение "Центр по повышению энергетической эффективности" (далее – учреждение "ЦПЭЭ") обратилось в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Бастион" (далее – общество СК "Бастион") о взыскании1 190 216,78 руб. пени за нарушение срока выполнения работ, начисленной за период с 29.08.2021 по 22.12.2021, по муниципальному контракту от 29.06.2021№ 0137200001221002441 (далее – контракт).

Согласно ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец надлежаще извещен о судебном разбирательстве, времени и месте судебных заседаний, не обеспечил своевременную явку в суд представителя с надлежаще оформленными полномочиями, что в соответствии с ч. 1 ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения искового заявления в его отсутствие.

Истец просил рассмотреть исковое заявление в отсутствие представителя.

Ответчик представил отзыв.

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв.

Представитель истца поддержал иск, представитель ответчика возражал против его удовлетворения.

Оценив представленные доказательства, выслушав объяснения представителей истца, ответчика, суд установил следующее.

Во исполнение контракта подрядчик общество СК "Бастион" выполнило работы по капитальному ремонту многоквартирных домов полностью с нарушением срока, заказчик учреждение "ЦПЭЭ" приняло их без замечаний (акты от 25.10.2021 № 1, от 02.11.2021№ 2, от 02.11.2021 № 3, от 02.11.2021 № 4, от 02.11.2021 № 5, от 02.11.2021 № 6, от 02.11.2021 № 7, от 02.11.2021 № 8, от 17.11.2021 № 9, от 30.11.2021 № 10, от 02.11.2021№ 11, от 02.12.2021 № 12, от 02.12.2021 № 13, от 22.12.2021 № 15, т. 1 л. 51-150,т. 2 л. 1-72).

Ссылаясь на неудовлетворение в добровольном порядке требования об уплате пени за нарушение срока выполнения работ по контракту, истец предъявил указанный иск (претензия от 24.12.2021 № 680-21, квитанция от 28.12.2021, отчет, т. 2 л. 87-93).

Предметом иска является требование заказчика к подрядчику о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ по контракту.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указал на отсутствие вины в просрочке в связи с недостатками проектно-сметной документации, наличие правовых оснований для списания неустойки.

Существо спора выражается в разногласиях сторон по наличию вины должника, кредитора, правовых оснований для списания пени.

На основании с абз. вторым п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Как указано в п. 4 ст. 395 ГК РФ, с учетом разъяснений, изложенных в п. 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее – постановление № 7), если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение денежного обязательства, на которую распространяется правило абзаца первого пункта 1 статьи 394 ГК РФ, то положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка, установленная законом или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ (пункт 4 статьи 395 ГК РФ).

Согласно ст. 330 ГК РФ под неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с ч.ч. 4, 6, 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В ст.ст. 191, 193 ГК РФ закреплено, что течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

На основании п. 1 ст. 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

Согласно п.п. 1, 3 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Как разъяснено в п.п. 8, 9 постановления № 7, в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер.

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях.

Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали.

Кредитор не лишен права отказаться от договора, если вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес в исполнении. При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

Согласно п. 9.1 ст. 34 Закона о контрактной системе правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с пп. "а", "в"-"д" п. 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утверждения постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 (далее – Правила № 783), списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в"-"д" настоящего пункта.

Если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в период с даты заключения контракта до даты представления предусмотренного абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение.

Если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2022 № 439 внесены изменения в Правила № 783, распространив его действие, независимо от года возникновения обязательств.

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783, с учетом внесенных в него изменений, принято в целях поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам. Из анализа положений Правил № 783 следует, что оно применяется в отношении всех контрактов, обязательства по которым исполнены в полном объеме. При этом, по справедливому указанию суда, обязанность по списанию неустойки в предусмотренных Правилами № 783 случаях не может быть поставлена в зависимость от даты подачи искового заявления.

В п. 40 Обзора судебной практики указано, что списание или предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с частью 6.1 статьи 34 Закона о контрактной системе является обязанностью заказчика, в связи с чем суд обязан проверить соблюдение им требований указанной нормы. Несовершение заказчиком действий по сверке задолженности с исполнителем не может служить основанием для неприменения правил о списании или предоставлении отсрочки.

В п.п. 1.2, 2.1, 7.4, 7.5 контракта стороны согласовали общий срок выполнения работ – в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем вступления контракта в силу, в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение 4 к настоящему контракту), содержащим начальный, конечный, а также промежуточный сроки (этапы) выполнения работ, составленным "подрядчиком".

Цена контракта составляет 59 529 484 (пятьдесят девять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рублей 94 копейки, НДС не облагается. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных документацией об аукционе и настоящим контрактом.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Дополнительными соглашениями к контракту стороны внесли в него изменения в части реквизитов сторон, перераспределения объема финансирования, объема, стоимости работ в связи с несоответствием фактических объема, видов работ указанным впроектно-сметной документации.

Во исполнение контракта выполнил работы полностью с нарушением срока, заказчик принял их без замечаний (акты от 25.10.2021 № 1, от 02.11.2021 № 2, от 02.11.2021 № 3, от 02.11.2021 № 4, от 02.11.2021 № 5, от 02.11.2021 № 6, от 02.11.2021№ 7, от 02.11.2021 № 8, от 17.11.2021 № 9, от 30.11.2021 № 10, от 02.11.2021 № 11, от 02.12.2021 № 12, от 02.12.2021 № 13, от 22.12.2021 № 15, т. 1 л. 51-150, т. 2 л. 1-72).

Подрядчик уведомлял заказчика о недостатках проектно-сметной документации, просил оказать содействие, приостанавливал выполнение работ (письма от 13.08.2021№ 304, от 18.08.2021 № 497-21, от 13.10.2021 № 414, от 02.07.2021 № 287, от 10.08.2021№ 465-21,от 08.09.2021 № 354, от 13.09.2021 № 541-21, от 22.09.2021 № 376, от 17.08.2021 № 307, от 24.08.2021 № 504-21, от 30.09.2021 № 390, от 12.10.2021 № 574-21, от 26.07.2021 № 278, от 18.08.2021 № 495-21, от 02.09.2021 № 346, от 02.09.2021 № 347, от 30.09.2021 № 394, от 12.10.2021 № 576-21, от 14.07.2021 № 258, от 17.08.2021 № 308, от 10.09.2021 № 539-21, от 18.07.2021 № 313, от 26.08.2021 № 518-21, от 17.08.2021 № 309, от 31.08.2021 № 523-21, от 30.06.2021 № 234, от 09.07.2021 № 403-21, от 09.07.2021№ 249, от 13.07.2021 № 417-21, от 06.08.2021 № 462-21, от 22.11.2021 № 485, т. 2л. 133-150, т. 3 л. 1-11, 28-36).

Суд предложил истцу, уточнить иск, представить расчет в соответствии с фактическими обстоятельствами, согласованными условиями, требованиями закона, доказательства в обоснование доводов, разъяснил правовые последствия несовершения процессуальных действий (определения от 03.03.2022, 28.04.2022, 23.06.2022, 21.07.2022 т. 1 л. 1, т. 3 л. 16, 41, 56).

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ истец не уточнил иск, не представил расчет в соответствии с фактическими обстоятельствами, согласованными условиями, требованиями закона, доказательства наличия вины в просрочке подрядчика, исключения для списания неустойки, в связи с чем в силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ несет риск наступления последствий несовершения процессуальных действий.

Поскольку подрядчик обращался к заказчику за содействием, неоднократно незамедлительно уведомлял его о независящих от него обстоятельствах, препятствующих выполнению работ, приостанавливал их выполнение, кроме того, выполнил работы полностью, заказчик принял их без замечаний по контракту, размер неустойки не превышает 5 процентов от цены контракта, не установлено исключений для списания неустойки, то заказчик обязан был списать ее.

Истец не представил доказательства того, что заключение дополнительных соглашений к контракту связано с ненадлежащим выполнением подрядчиком обязательств по нему, а связано с необходимостью изменения объема и стоимости работ в связи с несоответствием проектно-сметной документации фактическим обстоятельствам, выявленным в процессе их производства в отсутствие претензий заказчика. Подписание дополнительного соглашения позволило заказчику зафиксировать объем работ фактически необходимых и выполненных подрядчиком по контракту. Дополнительное соглашение невозможно расценить как меру поддержки подрядчика.

Оценив представленные доказательства по правилам ст.ст. 67, 68 и 71 АПК РФ, с учетом указанных конкретных обстоятельств данного дела суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания с подрядчика в пользу заказчика1 190 216,78 руб. пени за нарушение срока выполнения работ, начисленной за период с 29.08.2021 по 22.12.2021, по контракту.

В связи с отказом в удовлетворении иска в соответствии с абз. первым ч. 1 ст. 110 АПК РФ 24 902 руб. расходов истца на его подачу подлежат отнесению на него (платежное поручение от 16.02.2022 № 41, т. 1 л. 4).

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

отказать в удовлетворении иска.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

 

Судья

Е.А. Пашкова