Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«27» июля 2023 года Дело № А12-27003/2022  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Васюковой Е.С., 

при ведении протокола судебного заседания и осуществлении его аудиозаписи  помощником судьи Козленковой В.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью «Жилком-Юг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 400081, 

<

...> пом. I) к индивидуальному предпринимателю  ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 312344324200060) об  обязании устранить недостатки,  

руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Жилком-Юг»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить в части.  

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН  

<

***>, ОГРНИП 312344324200060) в рамках исполнения гарантийных  обязательств по договору от 06.08.2021 № 1В/2021 в течение месяца со дня вступления в  законную силу решения суда по настоящему делу устранить недостатки работ по  капитальному ремонту общего имущества (крыши) многоквартирного дома,  расположенного по адресу 

<

...>, а именно:  

- на площади 36,5 м2 выполнить демонтаж ранее недемонтированной цементной  стяжки и выполнить устройство новой цементной стяжки толщиной 50 мм, с  последующей огрунтовкой поверхности и устройством двухслойного кровельного ковра,  выполнив демонтаж уложенного кровельного материала;  

- на площади 39 м2, где выполнить демонтаж поврежденного кровельного  материала, с последующей огрунтовкой поверхности и укладкой кровельного материала в  один слой (замена повреждённого верхнего слоя);  

- на кровле в местах примыкания кровли к парапету и в месте примыкания  кровельного материала к вентиляционному каналу № 5, на длине 42,5 п.м. выполнить  работы: демонтаж кровельного материала, имеющего вздутие; устройство примыканий  кровель из наплавляемых материалов;  

- для устранения недостатков соединения установленного на поверхности парапета  кровли, защитного фартука из оцинкованных металлических листов, произвести демонтаж  ранее установленного защитного фартука (с сохранением материала); установку  защитного фартука из ранее демонтированного материала с применением фальцевого  соединения.  

В случае неисполнения судебного акта в указанной части взыскать с  индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>,  ОГРНИП 312344324200060) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Жилком-Юг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере  30 000 руб.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 312344324200060) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Жилком-Юг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы на  проведение досудебной оценки в размере 50 000 руб., а также судебные расходы на  оплату судебной экспертизы в размере 40 000 руб., судебные расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

В удовлетворении иска в остальной части отказать. В полном объеме решение будет изготовлено в течение 5 рабочих дней. 

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Е.С. Васюкова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 09.02.2023 9:52:00Кому выдана Васюкова Елена Сергеевна