Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-12232/2019

14 мая 2020 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 12.05.2020

Мотивированное решение изготовлено 14.05.2020

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания Саввиной М.Г., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 38 "Золотиночка" с. Иенгра, Нерюнгринского района (ИНН 1434028258, ОГРН 1031401723572, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 03.07.2003, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 678996, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, с. Иенгра, ул. 50 лет Победы, д. 2, корп. 2)  № б/н к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Стройпрогресс" (ИНН 1435293604, ОГРН 1151447003619, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 01.04.2015, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Хатын-Юряхское шоссе, 8 км, д. 33, корп.1) об обязании устранить недостатки работ, выполненных по контракту от 10.08.2017 №08163000170117000159-0187539-01 до 30.04.2020, а также взыскании 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

В судебное заседание представители сторон не явились, извещены.

У С Т А Н О В И Л:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 "Золотиночка" с. Иенгра, Нерюнгринского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением № б/н к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Стройпрогресс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки работ, выполненных по контракту от 10.08.2017 №08163000170117000159-0187539-01 до 30.04.2020, а также взыскании 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. 

Определением суда от 24.03.2020 принято уточнение исковых требований: произвести в срок до 30.04.2020 невыполненные по контракту работы и устранить недостатки вследствие некачественно выполненных работ в следующем объеме:

1.Выполнить разборку покрытий кровель из рулонных материалов, 100 кв.м. покрытия в объеме - 7,50392.

2.Выполнить устройство подстропильных рам из бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме 10,28, из них устранить некачественно выполненные объемы -5,14, не выполненные объемы - 5,14.

3.Устранить некачественно выполненные работы - Установка стропильных ног из бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме -3,17.

4.Устранить некачественно выполненные работы - Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов в объеме - 2,92.

5.Устранить некачественно выполненные работы - Установка стоек, прогонов из бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме- 15,967.

6.Выполнить установку мауэрлата, лежней, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме - 7.03. из них устранить некачественно выполненные объемы - 0,96, не выполненные объемы-6,07.

7.Выполнить установку связей из бруска 50*150, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме- 3,634.

8.Выполнить устройство слуховых окон, 1 слуховое окно в количестве 4 штук.

9.Устранить некачественно выполненные работы по улучшенной окраске масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 кв.м. окрашиваемой поверхности в объеме - 0,0384.

10.Устранить некачественно выполненные работы по устройству карнизов с обшивкой доской толщиной 22 мм, 100 кв.м. стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов в объеме - 0,6909.

11.Устранить некачественно выполненные работы по устройству фронтонов, 100 кв.м. стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов в объеме - 0,68.

12.Выполнить устройство по фермам настила обрешетки толщиной 16 мм сплошного. 100 кв.м. покрытия в объеме - 9,853024, из них устранить некачественно выполненные объемы - 4.926512, не выполненные объемы - 4,926512.

13.Произвести огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» любой модификации при помощи аэрозольнокапельного распыления для обеспечения показателей пожарной опасности древесины, 100 кв.м. обрабатываемой поверхности в объеме-26,356.

Копия определения суда от 17.12.20.19 направлена ответчику по юридическому адресу: 677008, 

<

...> км, д. 33, корп.1 (почтовый идентификатор 67799942043613). Конверт возвращен в суд с отметкой организации почтовой связи «истек срок хранения».

Копия определения суда от 17.12.20.19 вручена представителю ответчика ФИО2 по доверенности от 08.10.2019 под расписку 23.01.2020 (л.д. 60).

Информация о времени и месте судебного заседания размещена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://yakutsk.arbitr.ru).

При изложенных обстоятельствах, суд считает ответчик надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного заседания.

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил рассмотреть дело в отсутствие представителей истца и ответчика, извещенных о времени и месте проведения судебного заседания.

17.04.2020 в суд от истца поступило пояснение. 

Суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщил документы в материалы дела.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

10 августа 2017 года между муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 38 "Золотиночка" с. Иенгра, Нерюнгринского района и обществом с ограниченной ответственностью "Строительная компания Стройпрогресс" заключен контракт № 0816300017017000159-0187539-01 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в здании детского сада № 38 "Золотиночка" с. Иенгра.

В соответствии с пунктом 1.2 контракта работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и графиков выполнения работ (приложение № 2), сметного расчета (приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью контракта.

По п. 2.1 контракта цена составляет 5 657 687, 48 рублей с учетом суммы НДС.

Срок выполнения работ с момента заключения контракта по 29.09.2017, согласно графику выполнения работ (п. 5.1 контракта).

 Место выполнения работ: 678996, Республика Саха (Якутия), 

<

...> Победы, д. 2, корп. 2 (п. 5.2 контракта).

Условия выполнения работ: согласно технического задания, локально-сметного расчета и конкретных показателей материалов (п. 5.3 контракта).

Согласно п. 6.1. контракта по окончании выполнения Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по контракту. Работы представить Заказчику в срок не позднее 2 рабочих дней с момента окончания срока выполнения Работ два экземпляра отчетной и исполнительной документации, включающей:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения Работ по контракту (паспорта, сертификаты на применяемые строительные материалы);

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

В силу раздела 7 Контракта гарантия качества действует не менее 2 (двух) лет с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать нормам действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие нормативным требованиям.

Подрядчик гарантирует качество и безопасность результата Работ в соответствии с условиями контракта действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки вследствие некачественно выполненных Работ, использования материалов ненадлежащего качества, то Подрядчик обязан устранить их своими средствами и за свой счет в разумные сроки, согласованные с Заказчиком. Срок гарантийной эксплуатации Объекта результата выполненных Работ в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

Наличие недостатков (дефектов) и сроки: их устранения фиксируются двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчиком.

Гарантийным письмом №106 от 23.10.2017 ответчик также дал гарантию, что обязуется в случае обнаружения в период таяния снега дефектов выполненных работ, которые невозможно было выявить на стадии приемки, в том числе скрытых работ, устранить их своими средствами и за свой счет в разума сроки, согласованные с Заказчиком.

20.03.2018 г. и 24.04.2018 г. Заказчиком с участием представителя Подрядчика, также специалиста 000«Центр Независимых Экспертиз» был составлен акт обследования № 26/03-18 с целью выявления наличия недостатков (дефектов).

В результате обследования комиссией выявлены недостатки вследствие некачественно выполненных работ.

В соответствии с п. 4.1.1 Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежаще о исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.

В силу п. 4.4.12. Контракта Подрядчик обязан обеспечивать устранение выявленных недостатков за свой счёт и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

26.03.2018 г. в адрес ответчика была направлена претензия с требованием в срок до 30 апреля 2018 г. устранить недостатки, указанные в претензии.

Истцом в адрес Ответчика 18.04.2019 г. была направлена повторная претензия от 15.04.2019 № б/н с требованием устранить в срок до 15.06.2019 г. дефекты кровли.

Между тем, ответчиком выявленные нарушения (недостатки) не устранены, что послужило основанием для предъявления настоящего иска в суд.

Истец также обратился в экспертное учреждение Автокомная некоммерческая организация «Центр досудебных и судебных экспертиз» с целью установления стоимости и объема некачественно выполненных и невыполненных работ.

В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением 08.12.2019, претензия от 15.04.2019 № б/н направлена ответчику 18.04.2019.

С учетом изложенного, суд считает досудебный порядок разрешения спора соблюденным.

Отзыв по существу заявленных исковых требований, а также доказательства устранения дефектов ответчик не представил, в связи с чем, суд в соответствии с частью 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело по имеющимся в материалах дела доказательствам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации названы договоры и иные сделки. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Предусмотренный статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) такой способ защиты гражданских прав, как присуждение к исполнению обязанности в натуре, подразумевает возможность восстановления прав обратившегося за судебной защитой лица путем обязания исполнить обязательство, возлагаемое на сторону в силу закона или договорного обязательства.

Правоотношения сторон вытекают из контракта на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд, правовое регулирование которого предусмотрено главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ч. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

В соответствии с пунктом 1 статьи 754 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

В силу пункта 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В силу статьи 737 Кодекса в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков.

В силу раздела 7 Контракта гарантия качества действует не менее 2 (двух) лет с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать нормам действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие нормативным требованиям.

Подрядчик гарантирует качество и безопасность результата Работ в соответствии с условиями контракта действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки вследствие некачественно выполненных Работ, использования материалов ненадлежащего качества, то Подрядчик обязан устранить их своими средствами и за свой счет в разумные сроки, согласованные с Заказчиком. Срок гарантийной эксплуатации Объекта результата выполненных Работ в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчиком.

20.03.2018 г. и 24.04.2018 г. Заказчиком с участием представителя Подрядчика, также специалиста 000«Центр Независимых Экспертиз» был составлен акт обследования № 26/03-18 с целью выявления наличия недостатков (дефектов). В результате обследования комиссией выявлены недостатки вследствие некачественно выполненных работ.

Истцом в адрес Ответчика 18.04.2019 г. была направлена повторная претензия от 15.04.2019 № б/н с требованием устранить в срок до 15.06.2019 г. дефекты кровли.

Таким образом, истец обратился с требованием в пределах гарантийного срока.

Факт наличия дефектов при проведении работ по капитальному ремонту кровли установлен на основании имеющихся в материалах дела доказательств, которые суд оценивает в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно экспертному заключению № 24-ДЭ-19 от 15.08.2019 г. в ходе проведения экспертизы установлено следующее:

№ п/п

Наименование работ

Объемы по

контракту

Некачественно

выполненные

объемы

Не

выполненные объемы

1

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 кв.м. покрытия

7,50392

7,50392

2

Устройство подстропильных рам из бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции

10,28

5,14

5,14

3

Установка стропильных ног из бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции

3,17

3,17

4

Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов

2,92

2,92

5

Установка стоек, прогонов из бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции

15,967

15,967

6

Установка мауэрлата, лежней, 1 куб.м. древесины в конструкции

7,03

0,96

6,07

7

Установка связей из бруска 50* 150, куб.м. древесины в конструкции

3,634

3,634

8

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно

4

4

9

Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 кв.м. окрашиваемой поверхности

0,0384

0,0384

10

Устройство карнизов с обшивкой доской толщиной 22 мм, 100 кв.м. стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

0,6909

0,6909

11

Устройство фронтонов, 100 кв.м стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

0,68

0,68

12

Устройство по фермам настила обрешетки толщиной 16 мм сплошного, 100 кв.м. покрытия

9,853024

4,926512

4,926512

13

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» любой модификации при помощи аэрозольнокапельного распыления для обеспечения показателей пожарной опасности древесины, 100 кв.м. обрабатываемой поверхности

26,356

26,356

14

Изоляция перекрытий изделиями из минеральной ваты насухо толщиной 100 мм, 1 куб.м. изоляции

75,0392

75,0392

15

Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 кв.м. поверхности покрытия изоляции

9,853024

9,853024

16

Устройство кровли из профилированного настила с полимерным покрытием по готовым прогонам, 100 кв.м. кровли

9,853024

9,853024

17

Облицовка поверхности карнизов, фронтонов, стенок слуховых окон профнастилом с полимерным покрытием без пароизоляционного слоя, 100 кв.м. поверхности облицовки

1,5438

1,5438

18

Укладка ходовых досок, 100 м ходов

0,4

0.2

0,2

19

Простая окраска масляными составами по дереву: ходовых досок, 100 кв.м.

0,56

0,56

20

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций рабочего хода при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности огнебиозащитным составом «Порилакс 3000», 100 кв.м.

0,36

0,36

21

Устройство желобов настенных, 100 м желобов

0,84

0,84

22

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов

1,23

1,23

23

Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения

1,15

1,15

24

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, ограждения кровли, количество окрасок 2, 100 кв.м.

0,656

0,656

25

Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (примыкания, конек), 100 кв.м. покрытия

0,35

0,35

26

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм, 100 кв.м. поверхности воздуховодов

2,2896

2,2896

27

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм, 100 кв.м. поверхности воздуховодов

0,8012

0,8012

28

Устройство колпаков над шахтами, 1 колпак

8

8

29

Вывод фоновых труб стальных диаметром 108 мм на кровлю до максимального уровня, 100 м трубопровода

0,14

0.14

30

Изоляция венткоробов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем, 1 куб.м. изоляции

14,45

14,45

31

Изоляция фановых труб матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем, 1 куб.м. изоляции

0,238

0,238

32

Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 кв.м. поверхности покрытая изоляции

3,1815

3,1815

33

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т мусора

5,85

5,85

34

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км., 1 т груза

5,85

5,85

35

Саморегулирующий греющий кабель

не выполнено

Стоимость некачественно выполненных работ в соответствии с Техническим зада нем на проведение электронного аукциона для определения Подрядчика на выполнение paбот по капитальному ремонту кровли в здании детского сада № 38 «Золотиночка» с. Иенгра (Приложение № 1 к Контракту № 0816300017017000159-0187539-01 от 10.08.2017 года) и Рабочей документацией на капитальный ремонт части здания шифр 05.17 от 2017 года составляет без учета НДС: 3 456 866 (Три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 82 копейки.

Стоимость невыполненных работ в соответствии с Техническим заданием на проведение электронного аукциона для определения Подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в здании детского сада № 38 «Золотиночка» с. Иенгра (Приложение № 1 к Контракту № 0816300017017000159-0187539-01 от 10.08.2017 года) и Рабочей документации на капитальный ремонт части здания шифр 05.17 от 2017 года составляет без учета НДС: 1 337 789 (Один миллион триста тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 59 копеек.

Экспертным заключением № 24-ДЭ-19 от 15.08.2019 г. подтверждается объем невыполненных и некачественно выполненных работ. 

Ответчиком отзыва, доказательства устранения выявленных дефектов, объема невыполненных и некачественно выполненных работ, в нарушение норм ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации не представлены, ходатайства о назначении экспертизы по установлению объема невыполненных и некачественно выполненных работ не заявлено.

Согласно части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Принятый по делу судебный акт должен быть исполнимым, иное означало бы отсутствие возможности восстановления нарушенных прав заявителя.

Судебный акт должен быть исполнимым, а применение мер принудительного исполнения, а также и выставление судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства требования должнику, должны быть соотносимыми с вступившим в законную силу судебным актом и соответствовать требованиям исполнительного документа. Расширительное толкование судебным приставом-исполнителем в процессе исполнительного производства названных судебного акта и исполнительного документа недопустимо.

В соответствии с требованиями гл. 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт должен быть ясным, понятным, исполнимым.

В Постановлении от 05.02.2007 № 2-П Конституционный Суд Российской Федерации указал также, что общеправовой принцип правовой определенности предполагает стабильность правового регулирования и исполнимость вынесенных судебных актов.

Принимаемый арбитражным судом судебный акт, исходя из указанных выше норм и системного анализа положений действующего законодательства, в том числе ст. 6 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации", ст. 16, 170, 174 и 182, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен быть законным, обоснованным, исполнимым и направлен на восстановление нарушенных прав заявителя.

Требование истца произвести в срок до 30.04.2020 невыполненные по контракту работы и устранить недостатки вследствие некачественно выполненных работ на момент рассмотрения дела (резолютивная часть решения суда объявлена 12.05.2020) является неисполнимым, в связи с чем суд приходит к выводу, что невыполненные работы и устранение недостатков вследствие некачественно выполненных работ по контракту №0816300017017000159-0187539-01 от 10.08.2017 по капитальному ремонту кровли   в здании детского сада №38 "Золотиночка" с. Иенгра следует произвести в месячный срок с момента вступления настоящего решения в силу.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела документы в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, а именно произвести в месячный срок с момента вступления настоящего решения в силу,  невыполненные работы и устранить недостатки вследствие некачественно выполненных работ по контракту №0816300017017000159-0187539-01 от 10.08.2017 по капитальному ремонту кровли   в здании детского сада №38 "Золотиночка" с. Иенгра, в следующем объеме:

1. Выполнить разборку покрытий кровель из рулонных материалов, 100 кв.м. покрытия в объеме - 7,50392.

2. Выполнить устройство подстропильных рам из бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме 10,28, из них устранить некачественно выполненные объемы -5,14, не выполненные объемы - 5,14.

3. Устранить некачественно выполненные работы - Установка стропильных ног из бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме -3,17.

4. Устранить некачественно выполненные работы - Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов в объеме - 2,92.

5. Устранить некачественно выполненные работы - Установка стоек, прогонов из бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме- 15,967.

6. Выполнить установку мауэрлата, лежней, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме - 7.03. из них устранить некачественно выполненные объемы - 0,96, не выполненные объемы-6,07.

7. Выполнить установку связей из бруска 50*150, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме- 3,634.

8. Выполнить устройство слуховых окон, 1 слуховое окно в количестве 4 штук.

9. Устранить некачественно выполненные работы по улучшенной окраске масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 кв.м. окрашиваемой поверхности в объеме - 0,0384.

10. Устранить некачественно выполненные работы по устройству карнизов с обшивкой доской толщиной 22 мм, 100 кв.м. стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов в объеме - 0,6909.

11. Устранить некачественно выполненные работы по устройству фронтонов, 100 кв.м. стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов в объеме - 0,68.

12. Выполнить устройство по фермам настила обрешетки толщиной 16 мм сплошного. 100 кв.м. покрытия в объеме - 9,853024, из них устранить некачественно выполненные объемы - 4.926512, не выполненные объемы - 4,926512.

13. Произвести огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» любой модификации при помощи аэрозольнокапельного распыления для обеспечения показателей пожарной опасности древесины, 100 кв.м. обрабатываемой поверхности в объеме-26,356.

В остальной части иска отказать.

С учетом результатов рассмотрения дела, на основании ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб. судом отнесены на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Обязать  общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Стройпрогресс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 01.04.2015, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677008, 

<

...> км, д. 33, корп.1) произвести в месячный срок с момента вступления настоящего решения в силу,  невыполненные работы и устранить недостатки в следствие некачественно выполненных работ по контракту №0816300017017000159-0187539-01 от 10.08.2017 по капитальному ремонту кровли   в здании детского сада №38 "Золотиночка" с. Иенгра, в следующем объеме:

3. Выполнить разборку покрытий кровель из рулонных материалов, 100 кв.м. покрытия в объеме - 7,50392.

4. Выполнить устройство подстропильных рам из бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме 10,28, из них устранить некачественно выполненные объемы -5,14, не выполненные объемы - 5,14.

14. Устранить некачественно выполненные работы - Установка стропильных ног из бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме -3,17.

15. Устранить некачественно выполненные работы - Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов в объеме - 2,92.

16. Устранить некачественно выполненные работы - Установка стоек, прогонов из бруса, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме- 15,967.

17. Выполнить установку мауэрлата, лежней, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме - 7.03. из них устранить некачественно выполненные объемы - 0,96, не выполненные объемы-6,07.

18. Выполнить установку связей из бруска 50*150, 1 куб.м. древесины в конструкции в объеме- 3,634.

19. Выполнить устройство слуховых окон, 1 слуховое окно в количестве 4 штук.

20. Устранить некачественно выполненные работы по улучшенной окраске масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 кв.м. окрашиваемой поверхности в объеме - 0,0384.

21. Устранить некачественно выполненные работы по устройству карнизов с обшивкой доской толщиной 22 мм, 100 кв.м. стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов в объеме - 0,6909.

22. Устранить некачественно выполненные работы по устройству фронтонов, 100 кв.м. стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов в объеме - 0,68.

23. Выполнить устройство по фермам настила обрешетки толщиной 16 мм сплошного. 100 кв.м. покрытия в объеме - 9,853024, из них устранить некачественно выполненные объемы - 4.926512, не выполненные объемы - 4,926512.

24. Произвести огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» любой модификации при помощи аэрозольнокапельного распыления для обеспечения показателей пожарной опасности древесины, 100 кв.м. обрабатываемой поверхности в объеме-26,356.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Стройпрогресс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 01.04.2015, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677008, 

<

...> км, д. 33, корп.1) в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья                                     Семёнова У. Н.