ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А57-13845/2022

г. Саратов

09 декабря 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 27 ноября 2024 года.

Судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Пузина Е.В.,

рассмотрев апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Саратовская область» на определение Арбитражного суда Саратовской области     от 30 сентября 2024 года о взыскании неустойки за неисполнение судебного акта по делу № А57-13845/2022 

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к публичному акционерному обществу «Газпром газораспределение Саратовская область» (410076, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

третье лицо: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (443035, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о возложении обязанности произвести ремонт зданий газорегуляторных пунктов и привести в надлежащее состояние их прилегающую территорию в отношении объектов согласно просительной части искового заявления,

при участии в судебном заседании: представителя Индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО2, действующей на основании доверенности от 25.03.2024г., представлен диплом о высшем юридическом образовании; представителя Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Саратовская область» – ФИО3, действующей на основании доверенности от 20.07.2022, представлен диплом о высшем юридическом образовании, 

                                                       УСТАНОВИЛ:

           в Арбитражный суд Саратовской области обратился Индивидуальный предприниматель ФИО1  с заявлением к Публичному акционерному обществу «Газпром газораспределение Саратовская область», уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, о взыскании неустойки за неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Саратовской области от 29.05.2023г. по делу №А57-13845/2022 в размере - по 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта по объектам ремонта; по 10 000 руб.  за каждый день просрочки исполнения судебного акта по Комплексу объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит.А).Нежилое здание ГРП (лит.Б). Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Новопушкинское муниципальное образование 

<

...> (ГРП №17, ГРП №18) ГРП№17; по 13 500 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта в части замены всех технических устройств, входящих в технологическую часть линии редуцирования газа и линии байпаса на аналогичные новые; а также в части установки манометров в соответствии с заключениями экспертиз промышленной безопасности на технические устройства на газорегуляторных пунктах, до дня фактического его исполнения ответчиком (должником) в полном объеме. 

            Определением суда от 30.09.2024г. с ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в пользу ИП ФИО1 взыскана судебная неустойка в размере: 

1. по 1000 за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> (ГРП №1) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, выполнить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- провести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,

-провести ремонт пола, 

- восстановить систему отопления; 7 А57-13845/2022 

2. по 1 000 за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...>. (ГРП №2) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- оштукатурить и окрасить наружные стены здания, 

- провести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- отремонтировать полы в помещении газового и отопительного оборудования, 

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию, 

- восстановить систему отопления; 

3. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/ в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Колотилова, №52а (ГРП №5)

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- провести ремонт верхней части кирпичной кладки наружной стены в оси 1/А-Б (заделать трещины), 

- произвести ремонт пола, 

- заменить окна, 

- оштукатурить и окрасить наружные стены здания, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- отремонтировать полы в помещении газового и отопительного оборудования,

 - предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию, 

- восстановить систему отопления, - восстановить покрытие на парапете; 

4. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Нежилое здание ГРП, 1-этажное Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Ставная, №51б (ГРП №12) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- оштукатурить и окрасить наружные стены здания, - восстановить примыкание кровли к парапету,

-восстановить верхнюю часть кирпичной кладки парапета, 

- произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- отремонтировать полы в помещении отопительного оборудования, 

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию, 

5. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое одноэтажное здание (лит. А) область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Безымянское муниципальное образование 

<

...> (ГРП №12) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, выполнить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- восстановить карнизный свес,

- произвести ремонт кровли, 

- восстановить целостность кирпичной кладки наружных стен по осям А/1-2, Б/1-2, 1/А-Б, 2/А-Б 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- произвести ремонт пола, 

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемые конструкции, 

- заменить окна,

- восстановить систему отопления; 

6. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> (ГРП №13) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС 9 А57-13845/2022 III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт наружной и внутренней отделки помещения, 

- предусмотреть легкосбрасываемую конструкцию в помещениях отопительного оборудования, 

- отремонтировать пол в помещении отопительного оборудования, 

7. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Сооружение газопровода от ГРП до места врезки (лит.I) том числе: Нежилое одноэтажное здание (лит.А) Российская Федерация, Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Новопушкинское муниципальное образование 

<

...> (ГРП №15 п. Лощинный въезд в село) (ГРП №15) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, выполнить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить карнизный свес,

 - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность кирпичной кладки стен по осям 2/А-Б, Б/1-2, 

- восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по осям А/1-2, Б/1- 2, 1/А-Б, 2/А-Б 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- восстановить систему отопления; 

8. по 1000 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Комплекс объектов недвижимости, включающий в себя: Сооружение газопровода до ГРП (лит.I) Нежилое одноэтажное здание (лит.А) площадью 26,90 кв.м Энгельсский район (п. Придорожный въезд в село) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить карнизный свес, 

-восстановить парапет, 

- произвести ремонт кровли, 

- восстановить целостность кирпичной кладки стен,

-демонтировать горючий материал покрытия пола (линолеум), 

- восстановить систему отопления; 10 А57-13845/2022 

9. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: ГРП № 16 лит. А площадью 36,40 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 47,64 п.м Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> (ГРП №16) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить примыкание кровли к парапету, 

- произвести ремонт кровли, 

- восстановить целостность верхней часть кирпичной кладки парапета, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- восстановить систему отопления; 

10. по 2000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит.А).Нежилое здание ГРП (лит.Б). Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Новопушкинское муниципальное образование 

<

...> (ГРП №17, ГРП №18) ГРП№17: 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

-оштукатурить и окрасить наружные стены здания, 

- восстановить верхнюю часть кирпичной кладки парапета, 

- произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- отремонтировать полы, 

- заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении, - восстановить систему отопления; 

ГРП№18: - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, спланировать отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции,

 - восстановить примыкание кровли к парапету, 

- произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- заменить над оконными и дверными проемами деревянные балки на металлические, 

- освободить прилегающую территорию к ГРП от деревьев и растительности; 

11. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Безымянское муниципальное образование 

<

...> участок №18а (ГРП №19) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, спланировать отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- произвести ремонт кирпичной кладки парапета, 

- произвести ремонт кровли, - заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении,

 - восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по осям А/1-2, Б/1- 2, 1/А-Б, 2/А-Б, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения (заделать швы в плитах перекрытия), 

- произвести ремонт пола, 

- заменить остекление окон (толщина оконного стекла не более 4,0 мм), 

- установить систему молниезащиты согласно требованиям ПУЭ п.1.7.101, - восстановить систему отопления; 

12. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание ГРП, лит.А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Красноярское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, поселок Взлетный, ул. Дружбы №8а (ГРП №19) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- оштукатурить и окрасить наружные стены здания, 

- восстановить целостность верхней часть кирпичной кладки парапета, 

- заделать стыки между кирпичной кладкой и стеновыми панелями, 

- произвести ремонт кровли, 

- отремонтировать полы, 

- установить систему молниезащиты согласно требованиям ПУЭ п.1.7.101, 12 А57-13845/2022 

- заменить деревянную дверь на двери металлическую, противопожарную и открываемую изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении, - восстановить систему отопления; - восстановить остекление окон; 

13. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

ГРП № 20 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> (ГРП 20) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- произвести ремонт кровли, 

- восстановить верхнюю часть кирпичной кладки наружных стен, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- произвести ремонт пола, - восстановить систему отопления; 

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; 14. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

ГРП № 23 лит. А площадью 16,50 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 38,2 п.м. Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 

<

...> (ГРП №23) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- произвести ремонт верхней части кирпичной кладки наружной стены в оси 2/А-Б, 

- восстановить верхнюю часть кирпичной кладки наружных стен, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- произвести ремонт пола (убрать линолеум), - восстановить систему отопления;

 - освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; 15. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

ГРП № 26 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, улица Мясокомбинатская, №6б (ГРП №26) 13 А57-13845/2022 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, выполнить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

-оштукатурить и окрасить наружные стены здания, 

- восстановить верхнюю часть кирпичной кладки карнизного свеса, 

- произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении, 

- восстановить систему отопления в здании ГРП; 

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; 16. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

ГРП № 27 лит. А, в том числе ограждение лит. I, протяженностью 41,2 кв.м Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> «б» (ГРП №27); 

- выполнить капитальный ремонт здания на основании проектной документации, разработанной в порядке, установленном Федеральным законом « 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с учетом законодательства о градостроительной деятельности и соблюдением требований технических регламентов; 

17. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 до фактического исполнения ответчиком (должником) решения суда в части ремонта газорегуляторного пункта: 

ГРП № 33 лит. А площадью 34,70 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 45,2 п.м Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, Энгельс-8, 3-й квартал, № 13 б (ГРП №33) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- восстановить примыкание кровли к парапету, 

- произвести ремонт кровли, 

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

-демонтировать горючий материал покрытия пола (линолеум) 

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию 

- заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении, - восстановить систему отопления; 

18. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

ГРП № 36 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> (ГРП №36) 

- восстановить систему отопления; 

19. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 

<

...> (ГРП №39) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- усилить фундамент на месте проседания по оси 1/А-Б, 

- восстановить карнизный свес, 

- восстановить парапет, 

- произвести ремонт кровли, 

- восстановить целостность кирпичной кладки верхней части наружной стены по оси 2/А-Б, 

- выполнить ремонт кирпичной кладки стены в месте образовавшейся трещины по оси 1/А-Б, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- произвести ремонт пола (убрать линолеум), 

- восстановить систему отопления, - освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; 

20. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Тельмана, №142б (ГРП №40) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- оштукатурить и окрасить наружные стены здания, - восстановить примыкание кровли к парапету 

- произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении, - предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию, - восстановить систему отопления; 

21. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> а»(ГРП №42) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- восстановить карнизный свес, - восстановить парапет, 

- произвести ремонт кровли, 

- восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по оси А/1-2 - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- демонтировать горючий материал покрытия пола ( линолеум), 

- установить систему молниезащиты согласно требованиям ПУЭ п.1.7.101, 

- заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении, 

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; 22. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

ГРП № 46 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, улица Гагарина, №1в (ГРП №46) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- восстановить верхнюю часть кирпичной кладки наружных стен и кирпичную кладку наружной стены по оси 2/А-Б, 

- оштукатурить и окрасить наружные стены, 

- произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию, 

- отремонтировать полы в помещениях газового и отопительного оборудования, - восстановить систему отопления 

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; 23. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование 

<

...> (ГРП) 

- произвести ремонт кровли, - заменить окна, 

- восстановить систему отопления, 

24. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит.А). Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Узморье, улица Пролетарская, №66 а (ГРП) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- восстановить карнизный свес, 

- восстановить парапет, 

- произвести ремонт кровли, 

- восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по осям осям А/1- 2, Б/1-2, 1/А-Б, 2/А-Б, 

- произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения, 

- произвести ремонт пола, 

- заменить двери в помещении отопительного оборудования; 

25. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание ГРП, лит.А Саратовская область, Энгельсский район, с. Березовка (ГРП) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- восстановить карнизный свес, 

- восстановить парапет, 

- произвести ремонт кровли, 

- восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по осям осям А/1- 2, Б/1-2, 1/А-Б, 2/А-Б, 

- произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения, - произвести ремонт пола, 

- восстановить систему отопления; 

26. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Сооружение газопровода, в том числе: нежилое здание ГРП (литер А), Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Терновка, улица Лиманная, №7а (ГРП) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения, - произвести ремонт пола (убрать линолеум), 

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемые конструкции, 

- установить систему молниезащиты согласно требованиям ПУЭ п.1.7.101 

- восстановить систему отопления; 

27. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

ГРП № 37 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> (ГРП №37) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить примыкание кровли к парапету, 

- восстановить целостность кирпичной кладки карнизного свеса по осям А/1-2, Б/1-2,

 - произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- демонтировать горючий материал покрытия пола ( линолеум), 

- заменить окна, 

- предусмотреть в помещениях газового и отопительного оборудования легкосбрасываемые конструкции. 

28. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

ГРП № 38 лит . А Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> №10г (ГРП №38) 18 А57-13845/2022

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- восстановить примыкание кровли к парапету, 

- произвести ремонт кровли, 

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; 

- произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения, 

- произвести ремонт пола, 

- демонтировать горючий материал покрытия пола ( линолеум), 

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию; 

29. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта газорегуляторного пункта: 

Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 2-й Микрорайон, №47к (ГРП №14) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС III-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, 

- произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения, 

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию; 

- произвести ремонт пола, 

- восстановить систему отопления 

30. по 2700 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части обязания ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» заменить все технические устройства, входящие в технологическую часть линии редуцирования газа и линии байпаса на аналогичные новые; а также установить манометры в соответствии с заключениями экспертиз промышленной безопасности на технические устройства на следующих газорегуляторных пунктах: 

- Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...>. (ГРП №2); 

- Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Колотилова, №52а (ГРП №5); 

- Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое одноэтажное здание (лит. А) область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Безымянское муниципальное образование 

<

...> (ГРП №12) 

- Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 2-й Микрорайон, №47к (ГРП №14); 

- Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Сооружение газопровода от ГРП до места врезки (лит.I) том числе: Нежилое одноэтажное здание (лит.А) Российская Федерация, Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Новопушкинское муниципальное образование 

<

...> (ГРП №15 п. Лощинный въезд в село) (ГРП №15); 

- Комплекс объектов недвижимости, включающий в себя: Сооружение газопровода до ГРП (лит.I) Нежилое одноэтажное здание (лит.А) площадью 26,90 кв.м Энгельсский район (п. Придорожный въезд в село) (ГРП); 

- ГРП № 16 лит. А площадью 36,40 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 47,64 п.м Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> (ГРП №16); 

- Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит.А).Нежилое здание ГРП (лит.Б). Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Новопушкинское муниципальное образование 

<

...> (ГРП №17, ГРП №18); 

- ГРП № 20 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> (ГРП 20); 

- ГРП № 23 лит. А площадью 16,50 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 38,2 п.м. Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 

<

...> (ГРП №23); 

- ГРП № 26 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, улица Мясокомбинатская, №6б (ГРП №26) - ГРП № 27 лит. А, в том числе ограждение лит. I, протяженностью 41,2 кв.м Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> «б» (ГРП №27); 

- ГРП № 33 лит. А площадью 34,70 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 45,2 п.м Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, Энгельс-8, 3-й квартал, № 13 б (ГРП №33); 

- ГРП № 36 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> (ГРП №36) 

- ГРП № 38 лит. А Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> №10г (ГРП №38); - Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 

<

...> (ГРП №39); 

- Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Тельмана, №142б (ГРП №40); 

- Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> а»(ГРП №42); 

- Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит.А). Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Узморье, улица Пролетарская, №66 а (ГРП); 

- Сооружение газопровода, в том числе: нежилое здание ГРП (литер А), Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Терновка, улица Лиманная, №7а (ГРП) - за исключением регулятора давления газа; 

- ГРП № 37 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> (ГРП №37), заменить все технические устройства, входящие в технологическую часть линии байпаса на аналогичные новые; а также установить манометры в соответствии с заключениями экспертиз промышленной безопасности на технические устройства на следующих газорегуляторных пунктах: 

- Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> (ГРП №13); 

- Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Безымянское муниципальное образование 

<

...> участок №18а (ГРП №19); 

- Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание ГРП, лит.А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Красноярское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, поселок Взлетный, ул. Дружбы №8а (ГРП №19), заменить все технические устройства, входящие в технологическую часть линии редуцирования газа на аналогичные новые; а также установить манометры в соответствии с заключениями экспертиз промышленной безопасности на технические устройства на следующих газорегуляторных пунктах: 

- ГРП № 46 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, улица Гагарина, №1в (ГРП №46); 

- Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское  муниципальное образование 

<

...> (ГРП); 

- Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание ГРП, лит.А Саратовская область, Энгельсский район, с. Березовка (ГРП); 

31. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части ремонта Сооружение ШРП, 1-этажное, лит. I Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Студенческая, №314в (ЖСК «Базальт») (ШРП №6): 

- заменить все технические устройства, входящие в технологическую часть линии редуцирования газа и линии байпаса на новые, 

- установить манометр на байпасной линии ГРПШ, 

32. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части проведения ремонтных работ по восстановлению опор на газопроводе низкого давления: Газопровод низкого давления от места врезки до жилых домов №2,4,6,8,12,14,16,18,20,22 по ул. Мясокомбинатская по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, от места врезки до жилых домов №2,4,6,8,12,14,16,18,20,22 по ул. Мясокомбинатская. 

33. по 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области от 06.06.2023 по делу № А57-13845/2022 в части проведения ремонтных работ по восстановлению опор на газопроводе низкого давления: Газопровод низкого давления от места врезки до жилых домов №2,4,8,10,10А,42,44,46,50,52,54,56,58 по ул. Чехова, лит I по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, от места врезки до жилых домов №2,4,8,10,10А,42,44,46,50,52,54,56,58, начиная с даты вынесения настоящего определения по день фактического исполнения решения суда. 

В остальной части в удовлетворении заявления отказано.

      ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» не согласилось с определением суда первой инстанции в части удовлетворения требований и обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции в обжалуемой части отменить, принять по делу новый судебный акт по основаниям, изложенным в жалобе. 

      ИП ФИО1 считает определение суда законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

       В судебное заседание явились представители предпринимателя и Общества.

       Иные участники процесса в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания  извещены надлежащим образом, явку представителей в судебное заседание не обеспечили. 

       Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kad.arbitr.ru). 

       Согласно пункту 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения дела, суд рассматривает дело в его отсутствие. 

          Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Саратовской области от 29.05.2023г. по делу № А57-13845/2022 исковые требования ИП ФИО1 к ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» удовлетворены.

Суд обязал ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в течение шести месяцев с даты вступления решения в законную силу - провести ремонт зданий газорегуляторных пунктов и привести в надлежащее состояние их прилегающую территорию в отшении: 1. Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> (ГРП №1) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, выполнить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово_предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - провести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, -провести ремонт пола, - восстановить систему отопления; 2. Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> б (ГРП №2) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - оштукатурить и окрасить наружные стены здания, - провести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - отремонтировать полы в помещении газового и отопительного оборудования, - предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию, - восстановить систему отопления; 3. Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсский униципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Колотилова, №52 а (ГРП №5) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - провести ремонт верхней части кирпичной кладки наружной стены в оси 1/А-Б (заделать трещины), - произвести ремонт пола, - заменить окна, - оштукатурить и окрасить наружные стены здания, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - отремонтировать полы в помещении газового и отопительного оборудования, - предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию, - восстановить систему отопления, - восстановить покрытие на парапете; 4. Нежилое здание ГРП, 1-этажное Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Ставная, №51 6 (ГРП №12) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - оштукатурить и окрасить наружные стены здания, - восстановить примыкание кровли к парапету, - -восстановить верхнюю часть кирпичной кладки парапета, - произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - отремонтировать полы в помещении отопительного оборудования, - предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию, 5. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое одноэтажное здание (лит. А) область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Безымянское муниципальное образование 

<

...> (ГРП №12) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, выполнить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово_предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить карнизный свес, - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность кирпичной кладки наружных стен по осям А/1-2, Б/1-2, 1/А-Б, 2/А-Б - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - произвести ремонт пола, - предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемые конструкции, - заменить окна, - восстановить систему отопления; 6. Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> (ГРП №13)  - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт наружной и внутренней отделки помещения, - предусмотреть вытяжную вентиляцию и легкосбрасываемую конструкцию в помещениях отопительного оборудования, - отремонтировать пол в помещении отопительного оборудования, 7. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Сооружение газопровода от ГРП до места врезки (лит.1) том числе: Нежилое одноэтажное здание (лит.А) Российская Федерация, Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Новопушкинское муниципальное образование 

<

...> (ГРП №15 п. Лощинный въезд в село) (ГРП №15) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, выполнить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово_предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отместки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить карнизный свес, - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность кирпичной кладки стен по осям 2/А-Б, Б/1-2, - восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по осям А/1-2, Б/1-2, 1/А-Б, 2/А-Б - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - восстановить систему отопления; 8. Комплекс объектов недвижимости, включающий в себя: Сооружение газопровода до ГРП (лит.1) Нежилое одноэтажное здание (лит.А) площадью 26,90 кв.м Энгельсский район (п. ПРИДОРОЖНЫЙ въезд в село) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить карнизный свес, - -восстановить парапет, - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность кирпичной кладки стен, - демонтировать горючий материал покрытия пола (линолеум), - восстановить систему отопления; 9. ГРП № 16 лит. А площадью 36,40 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 47,64 п.м Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> в (ГРП №16) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить примыкание кровли к парапету, - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность верхней часть кирпичной кладки парапета, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - восстановить систему отопления; 10. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит.А). Нежилое здание ГРП (лит.Б). Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области, Новопушкинское муниципальное образование 

<

...> 35A (ГРП №17, ГРП №18) ГРП№17: - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, -оштукатурить и окрасить наружные стены здания, - восстановить верхнюю часть кирпичной кладки парапета, - произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - отремонтировать полы, -заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении, - восстановить систему отопления; ГРП№18: - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, спланировать отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить примыкание кровли к парапету, - произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, -заменить над оконными и дверными проемами деревянные балки на металлические, - освободить прилегающую территорию к ГРП от деревьев и растительности; 11. Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области, Безымянское муниципальное образование 

<

...> участок №18а (ГРП №19) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, спланировать отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - произвести ремонт кирпичной кладки парапета, - произвести ремонт кровли, - заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении, - восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по осям А/1-2, Б/1-2, 1/А-Б, 2/А-Б, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения (заделать швы в плитах перекрытия), - произвести ремонт пола, - заменить остекление окон (толщина оконного стекла не более 4,0 мм), - установить систему молниезащиты согласно требованиям ПУЭ п.1.7.101, - восстановить систему отопления; 12. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание ГРП, лит.А Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области. Красноярское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, поселок Взлетный, ул. Дружбы №8а (ГРП №19) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - оштукатурить и окрасить наружные стены здания, - восстановить целостность верхней часть кирпичной кладки парапета, - заделать стыки между кирпичной кладкой и стеновыми панелями, - произвести ремонт кровли, - отремонтировать полы, - установить систему молниезащиты согласно требованиям ПУЭ п.1.7.101, - заменить деревянную дверь на двери металлическую, противопожарную и открываемую изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении, - восстановить систему отопления; - восстановить остекление окон; 13. ГРП № 20 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> г (ГРП 20) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - произвести ремонт кровли, - восстановить верхнюю часть кирпичной кладки наружных стен, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - произвести ремонт пола, - восстановить систему отопления; - освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; 14. ГРП № 23 лит. А площадью 16,50 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 38,2 п.м. Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 

<

...> (ГРП №23) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - произвести ремонт верхней части кирпичной кладки наружной стены в оси 2/А-Б, - восстановить верхнюю часть кирпичной кладки наружных стен, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - произвести ремонт пола (убрать линолеум), - восстановить систему отопления; - освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; 15. ГРП № 26 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, улица Мясокомбинатская, №66 (ГРП №26) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, выполнить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово_предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - оштукатурить и окрасить наружные стены здания, - восстановить верхнюю часть кирпичной кладки карнизного свеса, - произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении, - восстановить централизованную систему отопления в здании ГРП; - освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; - 16. ГРП №27лит. А, в том числе ограждение лит. I, протяженностью 41,2 кв.м Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, улица Дальняя, №59 «б» (ГРП №27); -  выполнить капитальный ремонт здания на основании проектной документации, разработанной в порядке, установленном Федеральным законом « 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с учетом законодательства о градостроительной деятельности и соблюдением требований технических регламентов; - 17. ГРП N9 33 лит. А площадью 34,70 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 45,2 п.м Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, Энгельс-8, 3-й квартал, № 13 б (ГРП N933) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить примыкание кровли к парапету, - произвести ремонт кровли, - освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, Демонтировать горючий материал покрытия пола (линолеум) - предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию - заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении, - восстановить систему отопления; 18. ГРП №36 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> в (ГРП №36) - восстановить систему отопления; 19. Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 

<

...> д (ГРП №39) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - усилить фундамент на месте проседания по оси 1/А-Б, - восстановить карнизный свес, - восстановить парапет, - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность кирпичной кладки верхней части наружной стены по оси 2/А-Б, - выполнить ремонт кирпичной кладки стены в месте образовавшейся трещины по оси 1/А-Б, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - произвести ремонт пола (убрать линолеум), - восстановить систему отопления, - освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; 20. Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Тельмана, №142 6(ГРП№40) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - оштукатурить и окрасить наружные стены здания, - восстановить примыкание кровли к парапету - произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении, - предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию, - восстановить систему отопления; 21. Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> а»(ГРП №42) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить карнизный свес, - восстановить парапет, - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по оси А/1-2 - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - демонтировать горючий материал покрытия пола (линолеум), - установить систему молниезащиты согласно требованиям ПУЭ п.1.7.101, -заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении, - освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; 22. ГРП №46 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, улица Гагарина, №1 в (ГРП №46) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить верхнюю часть кирпичной кладки наружных стен и кирпичную кладку наружной стены по оси 2/А-Б, - оштукатурить и окрасить наружные стены, - произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - отремонтировать полу в помещениях газового и отопительного оборудования, - восстановить систему отопления - освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; 23. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование 

<

...> (ГРП) - произвести ремонт кровли, - заменить окна, - восстановить систему отопления, 24. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит.А) Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Узморье, улица Пролетарская, №66 а (ГРП) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отместки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить карнизный свес, - восстановить парапет, - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по осям А/1-2, Б/1-2, 1/А-Б, 2/А-Б, - произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения, - произвести ремонт пола, - заменить двери в помещении отопительного оборудования; 25. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание ГРП, лит.А Саратовская область, Энгельсский район, с. Березовка (ГРП) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку попериметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш_10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить карнизный свес, - восстановить парапет, - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по осям осям А/1-2, Б/1-2, 1/А-Б, 2/А-Б, - произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения, - произвести ремонт пола, - восстановить систему отопления; 26. Сооружение газопровода, в том числе: нежилое здание ГРП (литер А), Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Терновка, улица Лиманная, №7а (ГРП) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения, - произвести ремонт пола (убрать линолеум), - предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемые конструкции, - установить систему молниезащиты согласно требованиям ПУЭ п.1.7.101 - восстановить систему отопления; 27. ГРП №37 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> (ГРП №37) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить примыкание кровли к парапету, - восстановить целостность кирпичной кладки карнизного свеса по осям А/1-2, Б/1-2, 51 А57-13845/2022 - произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - демонтировать горючий материал покрытия пола (линолеум), - заменить окна, - предусмотреть в помещениях газового и отопительного оборудования легкосбрасываемые конструкции. 28. ГРП № 38 лит. А Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> №10 г (ГРП №38) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - восстановить примыкание кровли к парапету, - произвести ремонт кровли, - освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности; - произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения, - произвести ремонт пола, - демонтировать горючий материал покрытия пола (линолеум), - предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию; 29. Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 2-й Микрорайон, №47к (ГРП№14) - обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень отместки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения, - предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию; - произвести ремонт пола, - восстановить систему отопления; - заменить все технические устройства, входящие в технологическую часть линии редуцирования газа и линии байпаса на аналогичные новые; а также установить манометры на технические устройства на следующих газорегуляторных пунктах: - Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...>. (ГРП №2); - Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Колотилова, №52а (ГРП №5); - Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое одноэтажное здание (лит. А) область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области, Безымянское муниципальное образование 

<

...> (ГРП №12) - Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 2-й Микрорайон, №47к (ГРП №14); - Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Сооружение газопровода от ГРП до места врезки (лит.1) том числе:Нежилое одноэтажное здание (лит.А) Российская Федерация, Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области, Новопушкинское муниципальное образование 

<

...> (ГРП №15 п. Лощинный въезд в село) (ГРП №15); - Комплекс объектов недвижимости, включающий в себя: Сооружение газопровода до ГРП (лит.1) Нежилое одноэтажное здание (лит.А) площадью 26,90 кв.м Энгельсскии район (п. Придорожный въезд в село) (ГРП); - ГРП № 16 лит. А площадью 36,40 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 47,64 п.м Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской облает, 

<

...> (ГРП №16); - Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит. А). Нежилое здание ГРП (лит. Б). Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области,^ Новопушкинское муниципальное образование 

<

...> (ГРП №17, ГРП №18); - ГРП № 20 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...>(ГРП20); - ГРП № 23 лит. А площадью 16,50 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 38,2 п.м. Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 

<

...> (ГРП №23); - ГРП № 26 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, улица Мясокомбинатская, №66 (ГРП №26) - ГРП № 27 лит. А, в том числе ограждение лит. I, протяженностью 41,2 кв.м Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> «б» (ГРП №27); - ГРП № 33 лит. А площадью 34,70 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 45,2 п.м Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, Энгельс-8, 3-й квартал, № 13 б (ГРП №33); - ГРП № 36 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> (ГРП №36) - ГРП № 38 лит . А Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> № Юг (ГРП №38); - Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 

<

...> (ГРП №39); - Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Тельмана, №1426 (ГРП №40); - Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> а»(ГРП №42); - Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит.А). Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Узморье, улица Пролетарская, №66 а (ГРП); - Сооружение газопровода, в том числе: нежилое здание ГРП (литер А), Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Терновка, улица Лиманная, №7а (ГРП); - ГРП № 37 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий 

<

...> (ГРП №37); - заменить все технические устройства, входящие в технологическую часть линии байпаса на аналогичные новые; а также установить манометры на технические устройства на следующих газорегуляторных пунктах: - Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город 

<

...> (ГРП №13); - Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Безымянское муниципальное образование 

<

...> участок №18а (ГРП №19) ; - Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание ГРП, лит.А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Красноярское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, поселок Взлетный, ул. Дружбы №8а (ГРП №19); - заменить все технические устройства, входящие в технологическую часть линии редуцирования газа на аналогичные новые; а также установить манометры на технические устройства на следующих газорегуляторных пунктах: - ГРП № 46 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, улица Гагарина, №1в (ГРП №46); - Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование 

<

...> (ГРП); - Комплекс объекте недвижимости, в том числе: нежилое здание ГРП, лит.А Саратовская область, Энгельсский район, с. Березовка (ГРП); - провести ремонтные работы по замене оборудования в целях устранения нарушений требований промышленной безопасности на следующем шкафном газорегуляторном пункте: - Сооружение ШРП, 1-этажное, лит. I Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Студенческая, №314 в (ЖСК «Базальт») (ШРП №6) - заменить все технические устройства, входящие в технологическую часть линии редуцирования газа и линии байпаса на аналогичные новые, - установить манометр на байпасной линии ГРПШ, - провести ремонтные работы по восстановлению опор на газопроводах низкого давления: - Газопровод низкого давления от места врезки до жилых домов №2,4,6,8,12,14,16,18,20,22 по ул. Мясокомбинатская по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, от места врезки до жилых домов №2,4,6,8,12,14,16,18,20,22 по ул. Мясокомбинатская и Газопровод низкого давления от места врезки до жилых домов №2,4,8,10,10А,42,44,46,50,52,54,56,58 по ул. Чехова, литIпо адресу: Саратовская область, г. Энгельс, от места врезки до жилых домов №2,4,8,10,10А,42,44,46,50,52,54,5

            Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2024г. решение Арбитражного суда Саратовской области от 29.05.2023 года по делу № А57-13845/2022 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения. 

            ИП ФИО1 обратился в суд первой инстанции с заявлением, уточнённым в порядке статьи 49 АПК РФ, в котором просит взыскать с ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» судебную неустойку по настоящему делу. 

             Суд первой инстанции, учитывая неисполнение судебного акта, степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по добровольному исполнению судебного акта, пришёл к выводу о том, что заявленный истцом размер судебной неустойки с учетом возможных негативных последствий для истца, является чрезмерным, снизил размер заявленной неустойки до 1000 руб. в день за объекты,  до 2000 руб. в части ремонта газорегуляторного пункта: Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит.А).Нежилое здание ГРП (лит.Б). Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Новопушкинское муниципальное образование 

<

...> (ГРП №17, ГРП №18) ГРП№17; до 2700 руб.  в части замены всех технических устройств, входящих в технологическую часть линии редуцирования газа и линии байпаса на аналогичные новые; а также в части установки манометров в соответствии с заключениями экспертиз промышленной безопасности на технические устройства на газорегуляторных пунктах, до дня фактического его исполнения ответчиком (должником) в полном объеме. 

            Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства на основании статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам. 

            В силу частей 1, 2 статьи 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. 

           Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную названным Кодексом и другими федеральными законами. 

           В соответствии с частью 4 статьи 174 АПК РФ арбитражный суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом арбитражным судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. 

         По смыслу данной нормы, предусмотренное в ней правовое регулирование сходно по своей сути с регулированием, установленным статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) для защиты прав кредитора в случае неисполнения должником гражданско-правового обязательства в натуре. 

          Как разъяснено в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка). 

            При этом уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения предусмотренных статьей 308.3 ГК РФ мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

            Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (абзац второй пункта 31 Постановления № 7). 

             В случае подачи истцом заявления о взыскании судебной неустойки через какое-то время после вынесения решения об исполнении обязательства в натуре взыскание судебной неустойки за период, предшествующий моменту рассмотрения судом вопроса о ее взыскании, недопустимо, поскольку ретроспективное взыскание судебной неустойки не соответствует той цели, на которую она в первую очередь направлена, - стимулирование должника к совершению определенных действий или воздержанию от них. 

             Целью судебной неустойки не является восстановление имущественного положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре. Таким образом, судебная неустойка не может быть взыскана за неисполнение судебного акта до момента ее присуждения, что обоснованно учтено судом первой инстанции при принятии обжалуемого определения. 

             Как усматривается из приведенных выше разъяснений, судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения. 

             Судом первой инстанции установлено, что решение суда по настоящему делу вступило в законную силу 24.01.2024г.

             Однако на момент вынесения судом первой инстанции обжалуемого определения решение суда Обществом не исполнено. 

             В суде апелляционной инстанции участники процесса пояснили суду апелляционной инстанции, что на момент вынесения судом первой инстанции обжалуемого определения решение суда Обществом не было исполнено в полном объеме по всем объектам, подлежащих ремонту. 

            Общество указывает, что судебный акт частично исполнен в настоящее время.

            Однако частичное исполнение судебного акта на настоящий момент не свидетельствует о незаконности принятого судом определения.  

            Довод Общества, изложенный в жалобе, о том, что оно предприняло все возможные меры для исполнения судебного акта, однако его объем требовал существенных финансовых и временных затрат, отклоняется судом апелляционной инстанции. 

            В пункте 31 Постановления № 7 разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. 

          Общество с соответствующими заявлениями об отсрочке, рассрочке исполнения судебного акта не обращалось. Такой отсрочки (рассрочки) исполнения решения суда Обществу не представлено. 

            Общество указывает на чрезмерность взысканной судом неустойки. 

            Согласно пункту 32 Постановления № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). 

            В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. 

             Суд первой инстанции учел доводы Общества о чрезмерности заявленной истцом неустойки, пришел к обоснованному выводу о том, что заявленный истцом размер судебной неустойки с учетом возможных негативных последствий для истца, является чрезмерным и счел необходимым снизить размер судебной неустойки, установив ее в размере 1000 руб. за каждый день, вместо заявленных истцом 5000 руб., по каждому объекту, подлежащему ремонту по решению суда; установив ее в размере 2 000 руб. за каждый день, вместо заявленных истцом 10 000 руб., по объекту, подлежащему ремонту по решению суда; установив ее в размере 2 700 руб. за каждый день, вместо заявленных истцом 13 500 руб., по объекту, подлежащему ремонту по решению суда.

          Установленный судом размер неустойки является справедливым и соразмерным. Оснований для еще большего снижения размера неустойки у суда апелляционной инстанции не имеется. 

           Суд апелляционной инстанции отмечает, что выбранный судом способ расчета неустойки - по каждому объекту, подлежащему ремонту, соответствует заявленному истцом и не нарушает прав ответчика, поскольку снижает общую сумму неустойки, в случае исполнения решения суда по конкретному объекту.           

            При указанных обстоятельствах, арбитражный апелляционной суд считает, что обжалуемое Обществом определение в обжалуемой части  является законным и обоснованным, основания для его отмены отсутствуют. Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не могут служить основаниями для отмены судебного акта в обжалуемой части. Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит. 

            При выполнении постановления в форме электронного документа данное постановление в соответствии с частью 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

           Руководствуясь статьями 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Саратовской области от 30 сентября 2024 года по делу № А57-13845/2022 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение месяца со дня изготовления постановления в полном объёме через арбитражный суд первой инстанции, принявший решение, в порядке, предусмотренном статьями 275-276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья                                                                                                                            Е.В. Пузина