АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А71- 5219/2021

17 августа 2021 года

г. Ижевск

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 августа 2021 года

Полный текст решения изготовлен 17 августа 2021 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Торжковой Н.Н., при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола в письменной форме секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Дельта-Строй" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к казенному учреждению Удмуртской Республики "Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 1 191 097 руб. 20 коп. долга по государственному контракту №05/08-2019 от 02.08.2019, 50 000 руб. 00 коп. судебных расходов на оплату услуг представителя,   

третье лицо Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики. 

при участии представителей:

от истца: Андреевских Н.В., представитель по доверенности от 30.12.2020,

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 24.12.2020,

от третьего лица: не явился (уведомлен), установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Строй" (далее – истец, ООО «Дельта-Строй») обратилось в арбитражный суд с иском к казенному учреждению Удмуртской Республики "Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики" (далее - ответчик, КУ УР «УКС Правительства УР») о взыскании 1 191 097 руб. 20 коп. долга по государственному контракту №05/08-2019 от 02.08.2019, 50 000 руб. 00 коп. судебных расходов на оплату услуг представителя.

Определением суда от 28.04.2021г. исковое заявление принято к производству, делу присвоен № А71-5219/2021.

Определением суда от 22.06.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.

Истец настаивает на иске, возражает в привлечении третьего лица в качестве соответчика.

Ответчик представил дополнения к отзыву, ранее заявлял ходатайство о привлечении в дело в качестве соответчика Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.

В обоснование заявленного ходатайства ответчик ссылается на то, что в силу статьи 123.22 ГК РФ Казенное учреждение отвечает по свои обязательства, находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества. Таким образом, надлежащим ответчиком в части взыскания стоимости работ по государственному контракту по мнению ответчика является Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики. 

В соответствии со статьей 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие).

Процессуальное соучастие допускается, если:

1) предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков;

2) права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно основание;

3) предметом спора являются однородные права и обязанности.

В соответствии с частью 5 указанной статьи Кодекса при невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца.

В части 6 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указано, что в случае если федеральным законом предусмотрено обязательное участие в деле другого лица в качестве ответчика, а также по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд первой инстанции по своей инициативе привлекает его к участию в деле в качестве соответчика.

В соответствии с  частью 5 статьи 47 АПК РФ, если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску.

В рассматриваемом случае возражение истца против привлечения Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики в качестве соответчика также исключает возможность удовлетворения ходатайства.

На основании вышеизложенного оснований для удовлетворения заявленного ходатайства суд не усматривает. 

Представитель третьего лица не явился.

В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие третьего лица, считающегося надлежащим образом извещенным о начавшемся судебном процессе, времени и месте заседания суда, в том числе публично путем размещения информации о месте, дате и времени судебного заседания на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ст.ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, 02.08.2019 между ответчиком (заказчик) и истцом (подрядчик) заключен государственный контракт №05/08-2019 (далее – контракт), согласно которому (п.1.1) подрядчик обязуется по заданию заказчика собственными и/или привлеченными силами в установленный настоящим контрактом срок выполнить работы по объекту «Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Воткинске» (далее – объект) и своевременно сдать результат работы заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях настоящего контракта. 

Согласно п. 2.1 в редакции дополнительного соглашения №5 от 28.08.2020 цена настоящего контракта составляет 198 307 969 руб. 20 коп., в том числе НДС 20% 33 051 328 руб. 00 коп.

Согласно п. 2.7 контракта оплата выполненных и принятых заказчиком работ по настоящего контракту осуществляется согласно графику оплаты выполненных по контракту работ (приложение №5) в течение 30 дней с даты подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленных подрядчиком в адрес заказчика счетов/счетов-фактур (в случае, если законодательством предусмотрено их предоставление), в пределах лимитов бюджетных обязательств, выполненных на соответствующий год, за исключением случаев, если иные оплаты установлены законодательством Российской Федерации. 

Виды и объем работ, выполняемые подрядчиком на объекте, стороны согласовали дополнительным соглашением №5 от 28.08.2020.

Согласно п. 8.17 контракта в редакции дополнительного соглашения №2 от 26.12.2019 после подписания заказчиком и подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, накладных и передачи подрядчиком предусмотренных пунктами 8.8 и 8.14 контракта документов, стороны подписывают акт приемки объекта капитального строительства.

Указанный акт приемки объекта капитального строительства подписан сторонами 15.09.2020 (л.д. 51).

08.10.2020 Главным Управлением по государственному надзору Удмуртской Республики вынесено положительное заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (л.д. 49-50).

16 ноября 2020 года Администрацией города Воткинска вынесено постановление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: «Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Воткинске» с инженерными сетями и о присвоении адреса, и выдано соответствующее разрешение (л.д. 59-63).

Во исполнение условий договора, на основании положительного заключения государственной экспертизы, 22.10.2020 истцом в адрес ответчика был направлен акт выполненных работ по устройству проездов и тротуаров №91 на сумму 1 337 764 руб. 80 коп. (л.д. 52).

Ответчик письмом № 02-05-21/3193 от 09.11.2020 просил исключить из акта №91 от 22.10.2020 пункты 1-6 ввиду того, что замере просвета под трехметровой рейкой на асфальтобетонном проезде были получены значения, превышающие допустимые (л.д. 53).

07 декабря 2020 года стороны подписали акт о приемке выполненных работ №91 за исключением пунктов 1-6 на общую сумму 146 666 руб. 40 коп. (л.д. 54).

Гарантийным письмом исх. №661П от 24.11.2020 истец, в том числе гарантировал, что замечания к выполненным работам по устройству асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, обозначенные в письме исх. № 02-05-21/3193 от 09.11.2020 будут устранены в срок до 31.05.2021.

Во исполнение условий контракта по пунктам 1-6, ООО «Дельта-Строй» представило в материалы дела акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 919 и справку по форме КС-3 № 10 от 07.12.2020 на сумму 1 191 097 руб. 20 коп. (л.д. 55-58).

Истец, ссылаясь на уклонение ответчиком оплаты задолженности по контракту, направил последнему претензию с требованиями подписать акт КС-2 и справку КС-3 на сумму 1 191 097 руб. 20 коп. и оплатить выполненные работы (л.д. 66-67).

Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относимость, допустимость, достоверность каждого из представленных в материалы дела доказательств в отдельности, а также достаточность и взаимную связь данных доказательств в их совокупности, исходя из конкретных обстоятельств дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с положениями статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу п. 1 ст. 711 и п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда оплате подлежит фактически выполненный (переданный заказчику) результат работ.

Согласно абз. 1 п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Вместе с тем, в соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Пунктом 6 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации специально предусмотрены основания, по которым заказчик вправе отказаться от приемки: если обнаруженные недостатки исключают возможность использовать результат работы для цели, которая указана в договоре, и к тому же ни подрядчик, ни сам заказчик не могут устранить недостатки (т.е. существенные недостатки).

По смыслу приведенных норм в предмет доказывания по данной категории дел входит установление следующих обстоятельств: факта уведомления заказчика о готовности к сдаче результата работ, факта выполнения работ, обоснованность причин отказа от подписания акта.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", статья 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

Пунктом 8.8 контракта предусмотрено, что заказчик в течение 10 рабочих дней с момента предоставления подрядчиком актов и справок (форма КС-2, КС-3) принимает выполненные работы, проверяет их и подписывает, либо направляет мотивированные отказ.

Согласно п. 8.17 контракта в редакции дополнительного соглашения №2 от 26.12.2019 после подписания заказчиком и подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, накладных и передачи подрядчиком предусмотренных пунктами 8.8 и 8.14 контракта документов, стороны подписывают акт приемки объекта капитального строительства.

Как следует из материалов дела, акт приемки объекта капитального строительства подписан сторонами 15.09.2020, акт КС-2 и справка КС-3 на спорную сумму также направлялись ответчику с претензией от 01.03.2021. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 1 ст. 65, ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Поскольку истец выполнил свои обязательства по выполнению работ, у ответчика возникла обязанность оплатить выполненные работы. 

В силу п. 3.1. ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств, учитывая, что наличие задолженности подтверждено истцом надлежащими доказательствами (ст. 65 АПК РФ), суд признал исковые требования о взыскании                         1 191 097 руб. 20 коп. долга правомерными, подтвержденными материалами дела и в силу ст. 309, 310, 711, 746, 753 ГК РФ подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Довод ответчика о том, что им были выявлены нарушения требований по качеству работ, в связи с чем, данные работы не подлежат оплате, судом отклоняются на основании следующего. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

По смыслу положений статей 702, 711, 720 ГК РФ в связи с передачей результата работ заказчику на стороне последнего возникает обязательство по оплате подрядчику за выполненные работы.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

На основании пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода; если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Из материалов дела следует, что работы были выполнены подрядчиком, 15.09.2020 между сторонами подписан акт приемки объекта капитального строительства.

Кроме того, согласно положительному заключению государственной экспертизы №66-02/1-2020 от 08.10.2020 указано начало строительства – май 2019 года, окончание строительства – август 2020 года. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 ГК РФ).

По смыслу указанной нормы, выполнение подрядчиком предусмотренных договором работ с устранимыми недостатками (дефектами) не освобождает заказчика от обязанности оплатить выполненные работы, но предоставляет ему возможность потребовать от подрядчика либо безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо соразмерного уменьшения стоимости выполненных работ, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Доказательств того, что выполненные работы не подлежат использованию ответчиком в материалы дела не представлено. 

24.11.2020 истец письмом №661П представил гарантийные обязательства по устранению  замечаний к выполненным работам в срок до 31.05.2021.

Согласно акту комиссионного осмотра от 31.05.2021, подписанного главным инженером ООО «Дельта-Строй», эксплуатирующей организацией МАУ СШ «Знамя», в рамках исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту в мае 2021 были выполнены работы по устранению замечаний. После устранения замечаний установлено, что покрытие тротуаров приведено в соответствие согласно п. 4.17 и п. 6.1 СП 82.13330,2016., отвод дождевых вод обеспечен.

Письмом исх. №247ИК от 29.06.2021 истец уведомил заказчика о направлении ответственного представителя для приемки спорных работ. Актом комиссионного осмотра от 01.07.2021, подписанного главным инженером ООО «Дельта-Строй», эксплуатирующей организацией МАУ СШ «Знамя» установлено, что покрытие тротуаров приведено в соответствие согласно п. 4.17 и п. 6.1 СП 82.13330,2016., отвод дождевых вод обеспечен.

Иные доводы ответчика признаны судом несостоятельными, опровергаемыми материалами дела (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в связи с чем, подлежат судом отклонению.

Требование истца о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб. подлежит удовлетворению в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (исполнитель) заключен договор об оказании юридических услуг, согласно п. 1.1 которого исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать юридические и иные услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги (л.д. 68-69).

Согласно п. 3.1 договора об оказании юридических услуг стоимость услуг составляет 50 000 руб.

Факт и размер понесенных издержек подтвержден квитанцией к приходному кассовому ордеру №12 от 22.03.2021 (л.д. 70). 

В соответствии со ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Судебные расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу (например, решение суда первой инстанции, определение о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, судебный акт суда апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, которым завершено производство по делу на соответствующей стадии процесса). Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). 

Как установил суд, расходы по оплате услуг представителя истца фактически понесены. 

Ответчик заявил о чрезмерности предъявленных к возмещению судебных издержек.

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 21.12.2004 № 454-О указал, что реализация судом предоставленного частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации права уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя, возможна лишь в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела, с учетом необходимости создания судом условий, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон. Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах, является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

Суд, определяя разумные пределы судебных расходов, вправе использовать любые доказательства. При этом суд правомочен уменьшить заявленные к возмещению расходы на оплату услуг представителя, если установит, что их размер явно превышает разумные пределы. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 20 Информационного письма от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

При определении суммы возмещения расходов на представителей, следует руководствоваться также разъяснениями, данными в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», согласно которым разумность расходов по оплате услуг представителей определяется судом исходя из таких обстоятельств, как длительность судебного разбирательства, проверка законности и обоснованности судебных актов в нескольких судебных инстанциях, сложность разрешающихся в ходе рассмотрения дела правовых вопросов, сложившаяся судебная практика рассмотрения аналогичных споров, необходимость подготовки представителем в относительно сжатые сроки большого числа документов, требующих детальных исследований, размер вознаграждения представителей по аналогичным спорам и делам, обоснованность привлечения к участию в деле нескольких представителей, фактическое исполнение представителем поручения поверенного и другие обстоятельства.

Критерий разумности является оценочным. Для установления разумности рассматриваемых расходов суд оценивает их соразмерность применительно к условиям договора на оказание услуг и характера услуг, оказанных в рамках этого договора, а также их необходимость и разумность для целей восстановления нарушенного права. 

Суд, при определении суммы судебных расходов, подлежащей возмещению, учитывает объем документов, составленных и подготовленных привлеченным представителем истца, время участия представителя в судебных заседаниях суда, занимаемую представителем активную позицию в ходе судебного процесса, сложность дела, а также сложившуюся в регионе гонорарную практику оплаты услуг представителей аналогичной квалификации в спорной области.

При этом суд учитывает, что право выбора исполнителя правовых услуг принадлежит лицу, нуждающемуся в защите своих прав, нарушенных действиями ответной стороны, и поэтому такое лицо  не обязано обращаться к исполнителям услуг, предлагающим наименьшую цену на рынке подобных услуг, поскольку результативные правовые услуги, как правило, оказываются высококвалифицированными специалистами в этой области, высоко оценивающими свой труд. 

Поскольку критерии разумности законодательно не определены, суд считает возможным исходить из выработанных с учетом сложившейся в Удмуртской Республике гонорарной практики рекомендаций о минимальных ставках вознаграждения за оказываемую юридическую помощь. 

Арбитражный суд при рассмотрении спора, согласно ст.71 АПК РФ, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Учитывая обстоятельства дела, принцип разумности, категорию спора, продолжительность судебного разбирательства, наличие сложившейся судебной практики, в соответствии с разъяснениями пункта 1 Информационного письма Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 121 от 05.12.2007 г. «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов  и иных лиц, выступающих  в качестве представителей в арбитражных судах», суд признал, что судебные издержки заявлены в разумных пределах.

То обстоятельство, что при защите своих прав и законных интересов в судебном порядке ответчик пользовался услугами представителя, а понесенные им расходы взаимосвязаны с материалами рассматриваемого дела,  подтверждено  имеющимися в деле процессуальными документами, в том числе доверенностями на имя представителя, заявлениями, ходатайствами,  оформленным от имени истца  его представителем, а также протоколами судебных заседаний. 

Ссылка ответчика на расценки юридических услуг, установленные решением Совета Адвокатской палаты Удмуртской Республики от 19.05.2016 "Об утверждении рекомендуемых минимальных ставок вознаграждения за юридическую помощь, оказываемую адвокатами Адвокатской палаты Удмуртской Республики", признается необоснованной, поскольку данное решение содержит сведения об ориентировочной (минимальной) стоимости юридических услуг без учета всех обстоятельств дела, сложности спора и фактического объема выполненной представителем работы. Доказательств, что по соответствующему спору, представителем истца была выполнена такая работа, которая в силу своего объема и (или) качества может быть оценена лишь по минимальным ставкам, в материалах дела не усматривается.

Принимая во внимание изложенное, на основании ст. ст. 106, 110, 112 АПК РФ заявление истца о возмещении за счет ответчика судебных издержек в размере 50 000 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению.

С учетом принятого решения на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

Р Е Ш И Л  :

Взыскать с казенного учреждения Удмуртской Республики "Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Дельта-Строй" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 191 097 руб. 20 коп. долга, 24 911 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины,  50 000 руб. 00 коп. судебных издержек. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru. 

Судья                                                                               Н.Н. Торжкова