АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 E-mail: info@crimea.arbitr.ru http://www.crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-16024/2024

08 июля 2025 года

город Симферополь

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить полностью. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Экомонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в месячный срок исполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков выполненных работ в рамках контракта № 02-ОКЭФ-21 от 22.06.2021 по объекту хозяйственного и административного здания и сооружений, расположенных на территории ФБЛПУ «Санаторий «Днепр» ФНС России» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, ш. Алупкинское, д. 13: Административный корпус № 3 (Литера А); Проходная (Литера Б); Проходная (Литера У), а именно:  

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в течение гарантийного срока по контракту от 22.06.2021 № 02-ОКЭФ-21 в административном корпусе № 3 (Литера А), в частности заменить покрытие полов в следующих помещениях: помещение 101 -25,41 м2; помещение 102 - 24,68 м2; помещение 103 -12,79 м2; помещение 104 - 8,3 м2; помещение 105 - 28,43 м2; помещение 106 - 24,16 м2; помещение 109 - 19,96 м2; помещение 110 - 36,49 м2; помещение 114 – 8,01 м2; помещение 205 – 15,7 м2; помещение 206 – 15,07 м2; помещение 208 – 35,3 м2; помещение 211 – 16,8 м2; помещение 212 – 28,4 м2; помещение 304 – 33,5 м2;  

в административном корпусе № 3 (Литера А) выполнить ремонт кровли, восстановить водосточную систему, провести ремонт фасада с окрашиванием в местах затекания;  

в административном корпусе № 3 (Литера А) на фасадной части выполнить устройство повреждённой водосточной системы;  

на проходной (Литера Б) выполнить ремонт фрионопровода системы кондиционирования;  

восстановить облицовку цоколя административного корпуса № 3 (Литера А) (в осях 1/АБ площадь 0,7 м2).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Экомонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу федерального бюджетного лечебно – профилактического учреждения «Санаторий «Днепр» Федеральной налоговой службы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) штраф в размере 866 158,20 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту от 22.06.2021 № 02-ОКЭФ-21.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Экомонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу федерального бюджетного лечебно – профилактического учреждения «Санаторий «Днепр» Федеральной налоговой службы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы на оплату государственной пошлины в размере 34 586 руб. 93 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме).  

Судья Е.А. Дергачев