АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело №А65-7779/2021 

Дата принятия решения – 18 мая 2021 года 

Дата объявления резолютивной части – 11 мая 2021 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Галеевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гильмутдиновой Г.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Флагман", г. Казань (ОГРН 1201600002955, ИНН 1655431440) к Обществу с ограниченной ответственностью "ЮнионСтрой Плюс", г. Казань (ОГРН 1141690049599, ИНН 1657143977) о взыскании 2 941 358 руб. 68 коп. долга по договору №22/04/20 от 22.04.2020 г. и 385 169 руб. 75 коп. долга по договору №20/07/20 от 20.07.2020 г.,

с участием:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 29.03.2021г.,

от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 10.08.2020г.,  

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Флагман", г. Казань (далее - истец), обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ЮнионСтрой Плюс", г. Казань (далее - ответчик) о взыскании 2 941 358 руб. 68 коп. долга по договору №22/04/20 от 22.04.2020 г. и 385 169 руб. 75 коп. долга по договору №20/07/20 от 20.07.2020 г.  

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик в судебном заседании задолженность подтвердил,  пояснил что не смог произвести оплату в связи с тяжелым финансовым положением.

В соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Возражений о рассмотрении дела по существу от   сторон  не поступило.

При отсутствии возражений истца и ответчика, суд в соответствии с  ч. 4 ст. 137 АПК РФ и п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда №65 от 20.12.2006г., завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела по существу. 

Исследовав материалы дела, суд находит правовые основания для удовлетворения исковых требований по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 22.04.2020г. между истцом (подрядчик) и ответчиком (генподрядчик) заключен договор подряда №22/04/20, по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего договора, с использованием оборудования и материалов подрядчика выполнить работы по монтажу профилированного листа и устройству мембранной кровли на объекте: «Склад холодильной техники на АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» в г. Зеленодольск, а генподрядчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость работ.

Согласно п.2.1 договора общая стоимость, выполняемых по настоящему договору работ, учитывая стоимость подлежащих поставке подрядчиком материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, а также суммы вознаграждения подрядчика составляет 9 618 647 руб. Стоимость работ и применяемых материалов является окончательной и изменению не подлежит.

Срок начала работ – 27.04.2020г.

Срок окончания работ – 15.07.2020г.

В соответствии с п.9.1 договора оплата генподрядчиком по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующих размерах, порядке и сроки:

- генподрядчик оплачивает аванс в размере 100% от стоимости материалов, накладных расходов, и 30% от стоимости работ и ГПМ, что составляет 4 731 436 руб. 50 коп. в течение 3 банковских дней после подписания договора на основании выставленного подрядчиком счета;

- дальнейшая оплата производится за выполненные и принятые генподрядчиком объемы работ в течение 15 банковских дней со дня подписания генподрядчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), подтверждающего выполнение подрядчиком объема работ, предусмотренного настоящим договором, при условии одновременного предоставления со стороны подрядчика справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и исполнительной документации по этапам выполненных работ;

- окончательный расчет за выполненные работы производится генподрядчиком после проверки качества выполненных подрядчиком работ в полном объеме путем непосредственной эксплуатации возведенного объекта строительства, но в любом случае окончательного расчета не может превышать 10 дней со дня подписания генподрядчиком акта приемки выполненных работ.

Во исполнение условий договора истец выполнил работы, которые подтверждаются актами о приемке выполненных работ №3 от 22.04.2020г., №4 от 29.05.2020г., №5 от 29.05.2020г., №6 от 03.06.2020г., №7 от 03.06.2020г., №8 от 03.06.2020г., №9 от 03.06.2020г., №10 от 15.06.2020г., №11 от 06.07.2020г., №12 от 06.07.2020г., №13 от 06.07.2020г., №14 от 06.07.2020г., №16 от 14.07.2020г., №17 от 14.07.2020г., №18 от 14.07.2020г., №19 от 14.07.2020г., №20 от 14.07.2020г., №27 от 28.09.2020г., №28 от 28.09.2020г., №29 от 28.09.2020г., №30 от 28.09.2020г., подписанными со стороны ответчика без каких-либо замечаний и претензий.

С учетом частичной оплаты задолженность ответчика перед истцом по договору №22/04/20 от 22.04.2020г. составляет 2 941 358 руб. 68 коп.

20.07.2020г. между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда №20/07/20, по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего договора, с использованием оборудования и материалов заказчика выполнить работы по благоустройству кровли на объекте: «Пивоваренный завод «Белый Кремль», расположенный на территории Индустриального парка «Чистополь», Блок №16 (БОС)», а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость работ.

Согласно п.2.1 договора общая стоимость, выполняемых по настоящему договору работ, учитывая стоимость подлежащих поставке подрядчиком материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, а также суммы вознаграждения подрядчика составляет 1 725 970 руб. Стоимость работ и применяемых материалов является окончательной и изменению не подлежит.

Срок начала работ – 10.08.2020г.

Срок окончания работ – 28.02.2021г.

В соответствии с п.9.1 договора оплата генподрядчиком по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующих размерах, порядке и сроки:

- генподрядчик оплачивает аванс в размере 100% от стоимости материалов, накладных расходов, и 30% от стоимости работ и ГПМ, что составляет 1 340 800 руб. 25 коп. в течение 3 банковских дней после подписания договора на основании выставленного подрядчиком счета;

- дальнейшая оплата производится за выполненные и принятые генподрядчиком объемы работ в течение 15 банковских дней со дня подписания генподрядчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), подтверждающего выполнение подрядчиком объема работ, предусмотренного настоящим договором, при условии одновременного предоставления со стороны подрядчика справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и исполнительной документации по этапам выполненных работ;

- окончательный расчет за выполненные работы производится генподрядчиком после проверки качества выполненных подрядчиком работ в полном объеме путем непосредственной эксплуатации возведенного объекта строительства, но в любом случае окончательного расчета не может превышать 10 дней со дня подписания генподрядчиком акта приемки выполненных работ.

Во исполнение условий договора истец выполнил работы, которые подтверждаются актом о приемке выполненных работ №2 от 10.02.2021г., подписанным со стороны ответчика без каких-либо замечаний и претензий.

С учетом частичной оплаты задолженность ответчика перед истцом по договору №20/07/20 от 20.07.2020г. составляет 385 169 руб. 75 коп.

Претензия №16 от 01.03.2021г., направленная истцом в адрес ответчика с требованием оплатить задолженность по договорам подряда за нарушение условий договора, оставлена последним без внимания и удовлетворения, что в свою очередь послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

Статьями 307 – 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Учитывая, что задолженность ответчика перед истцом подтверждается документально, в том числе актами о приемке выполненных работ, подписанными сторонами, требование истца о взыскании 2 941 358 руб. 68 коп. долга по договору №22/04/20 от 22.04.2020 г. и 385 169 руб. 75 коп. долга по договору №20/07/20 от 20.07.2020 г., в силу ст. ст. ч.1 ст. 702 ГК РФ является правомерным и подлежит удовлетворению судом

Расходы по уплате госпошлины согласно ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЮнионСтрой Плюс", г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Флагман", г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 941 358 руб. 68 коп. долга по договору №22/04/20 от 22.04.2020 г., 385 169 руб. 75 коп. долга по договору №20/07/20 от 20.07.2020 г. и 39 633 руб. госпошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судьяЮ.Н. Галеева