Арбитражный суд Калининградской области 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Калининград Дело № А21-8067/2015 

«02» марта 2017года  

 Руководствуясь статьями 167-170,174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТЛИТСТРОЙ» (ИНН:  3906077449;ОГРН: 1023900585940) в месячный срок со дня вступления решения в  законную силу устранить за счет собственных средств строительные недостатки  (дефекты) в выполненных работах по строительству физкультурно- оздоровительного комплекса по адресу: 

<

...>, а именно произвести следующие работы:  

- выполнить ремонт эксплуатационной кровли в месте примыкания к выступающей  лестничной клетке(над помещениями № 170 и № 172 второго этажа по техническому  паспорту) - 12м2;  

- выполнить герметизацию в помещении цокольного этажа в месте опирания  наружных стен из сендвич-панелей на бетонные стены цоколя и в местах опирания  конструкций козырьков входов на стены-150п.м.;  

- произвести замену трубопроводов из них: диаметром 65мм-24п.м.; диаметром  80мм-25п.м.; диаметром 100мм-5п.м.; диаметром 150мм-220п.м.;  

- произвести восстановление гидроизоляции пола и стен цокольного этажа в местах  ее нарушения -401м2.  

 В остальной части иска отказать. 

 Требования Администрации Советского городского округа (ИНН: 

<

***>;  ОГРН: 

<

***>) в части взыскания с Общества с ограниченной  ответственностью «БАЛТЛИТСТРОЙ» (ИНН: 3906077449;ОГРН: 1023900585940)  неустойки в размере 234 191 412руб.42коп. оставить без рассмотрения.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТЛИТСТРОЙ»: 

- в доход Федерального бюджета Российской Федерации 6 000руб.00коп.  госпошлины;  

- в пользу Администрации Советского городского округа 223 047руб.10 коп. в  возмещение расходов по экспертизе.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.  

 Судья О.М.Педченко