﻿ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075  

http://fasuo.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ Ф09-1572/21 

Екатеринбург

30 апреля 2021 г.

 

Дело № А76-18733/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2021 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 апреля 2021 г. 

 

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Сулейменовой Т. В.,

судей Беляевой Н.Г.,  Купреенкова В.А.    

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Феникс-Гран» (далее – общество «Строительная компания «Феникс-Гран», ответчик) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.10.2020 по делу№ А76-18733/2020 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2021 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа.

С использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседание) принял участие представитель  общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Арт ФАСАД» (далее – общество «Арт ФАСАД», истец) – Окулова Е.К. (доверенность от 21.04.2020).

Общество «Арт ФАСАД» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу «Строительная компания «Феникс-Гран» о взыскании задолженности по оплате выполненных работ обществом «Арт ФАСАД» в сумме 2 192 422 руб. 31 коп.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 07.10.2020 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2021 решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество «Строительная компания «Феникс-Гран» просит обжалуемые судебные акты отменить, в удовлетворении исковых требований отказать, ссылаясь на нарушение судами норм процессуального права. Заявитель жалобы указывает на необоснованность отказа в отложении судебного заседания, в связи с чем, общество «Строительная компания «Феникс-Гран» было лишено возможности реализовать свои процессуальные права и заявить ходатайство о назначении экспертизы.

В отзыве на кассационную жалобу общество «Арт ФАСАД» просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, считая изложенные в ней доводы несостоятельными.

При рассмотрении судами установлено следующее.

Между обществом «Строительная компания «Феникс-Гран» (заказчик) и обществом «Арт ФАСАД» (подрядчик) заключен договор подряда от 01.11.2018 № 211 (далее – договор от 01.11.2018), по условиям которого подрядчик по заданию заказчика, обязуется выполнить в соответствии с проектом, техническим заданием на объекте заказчика - 10 (десяти) этажный панельный дом 97 серии, расположеный по адресу: г. Челябинск, Советский р-н, п. Новосинеглазово, ул. Одностороняя,10 (адрес строительный) следующие работы: изготовление и монтаж окон ПВХ, передать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 договора).

В пункте 1.3 договора от 01.11.2018 сторонами согласованы сроки выполнения комплекса работ:

1-й этап - изготовление и монтаж оконных блоков: с 0111.2018 по 15.12.2018;

2-й этап - отделочные работы, срок выполнения 20-30 дней, дата начала отделочных работ дополнительно согласовывается сторонами;

3-й этап - установка декоров, ручек, наклейка уголка ПВХ и регулировка, срок выполнения 5-10 дней при строительной готовности помещений. Промежуточные сроки определяются Графиком производства работ (приложение № 7).

Объем, содержание работ определяются проектно-сметной документацией к договору от 01.11.2018 (сводная спецификация - приложение № 1, смета № 1 - приложение № 2, акт передачи проектной документации - приложение № 3, акт приема передачи объекта - приложение № 4, рабочий проект - приложение № 5, техническое задание - приложение № 6).

Согласно пункту 2.1 договора от 01.11.2018 общая стоимость работ (цена) по настоящему договору согласована сторонами в смете (приложение № 2 к договору от 01.11.2018) и составляет 2 498 056 руб., в том числе налог на добавленную стоимость 18%.

В соответствии с пунктом 2.3 договора заказчик осуществляет расчет после приемки работ и подписания актов КС-2 и КС-3 или иным способом.

 Между обществом «Строительная компания «Феникс-Гран» (заказчик) и обществом «Арт ФАСАД» (подрядчик) заключен договор подряда от 20.02.2019 № 3 (далее – договор от 20.02.2019), по условиям которого подрядчик по заданию заказчика, обязуется выполнить в соответствии с проектом, техническим заданием на объекте: «10-этажный 40-квартирный жилой дом по ул. Могильникова в Центральном районе г. Челябинска», следующие работы: изготовление и монтаж окон ПВХ, передать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В пункте 1.3 договора от 20.02.2019 сторонами согласованы сроки выполнения комплекса работ:

1-й этап - изготовление и монтаж оконных блоков: с 25.02.2019 по 30.06.2019;

2-й этап - отделочные работы, срок выполнения: с 15.03.2019 по 30.03.2019;

3-й этап - установка декоров, ручек, наклейка уголка ПВХ и регулировка, срок выполнения 15 рабочих дней при строительной готовности помещений. Промежуточные сроки определяются Графиком производства работ (приложение № 7).

Объем, содержание работ определяются проектно-сметной документацией к настоящему договору (сводная спецификация – приложение№ 1, смета № 1 - приложение № 2, акт передачи проектной документации - приложение № 3, акт приема передачи объекта - приложение № 4, рабочий проект - приложение № 5, техническое задание - приложение № 6).

Согласно пункту 2.1 договора от 20.02.2019  общая стоимость работ (цена) согласована сторонами в смете (приложение № 2 к договоруот 20.02.2019  ) и составляет: 1 725 000 руб., в том числе налог на добавленную стоимость 20%.

В соответствии с пунктом 2.2 договора от 20.02.2019  заказчик осуществляет расчет после приемки работ и подписания актов КС-2 и КС-3 или иным способом.

Между сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 к договору от 20.02.2019, согласно которому подрядчик обязуется в установленный соглашением срок до 30.10.2019 выполнить по заданию заказчика дополнительные работы по установке уличных подоконников на балконных блоках и выполнить комплекс работ по устройству стены и входной части для «Машинного помещения», по системе перегородок «Кнауф» толщиной стены 120 мм (пункт 1).

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения № 1 перечень и стоимость выполняемых по настоящему дополнительному соглашению работ определяется сметой № 1 (приложение № 1 к дополнительному соглашению№ 1 к договору от 20.02.2019 ) на выполнение ремонтно-отделочных работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

В силу пункта 3 дополнительного соглашения № 1 стоимость выполненных работ по настоящему дополнительному соглашению составляет 97 400 руб.

Оплата производится в следующем порядке: заказчик оплачивает после выполнения работ и подписания акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней.

Между обществом «Строительная компания «Феникс-Гран» (заказчик) и обществом «Арт ФАСАД» (подрядчик) заключен договор подряда от 11.04.2019 № 11 (далее – договор от 11.04.2019) на проведение работ по устройству фасада жилого дома, согласно условиям которого подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика комплекс работ по устройству фасада (далее – работы) жилого дома, на объекте: «10-этажный 40-квартирный жилой дом по ул. Могильникова в Центральном районег. Челябинска», и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную договором стоимость работ (пункт 1.1 договора от 11.04.2019).

В пункте 1.3 договора от 11.04.2019 сторонами согласованы сроки выполнения работ по договору: начало выполнения работ – 25.04.2019; окончание выполнения работ – 15.07.2019 года. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента (даты) прописанного в договоре.

Объем, содержание работ определяются проектно-сметной документацией к указанному договору (сводная спецификация – приложение№ 1, смета № 1 - приложение № 2, акт передачи проектной документации - приложение № 3, акт приема передачи объекта - приложение № 4, рабочий проект - приложение № 5, техническое задание - приложение № 6).

Согласно пункту 2.1 договора от 11.04.2019 общая стоимость работ (цена) согласована сторонами в смете (приложение № 2 к настоящему договору) и составляет: 5 300 000 руб., в том числе налог на добавленную стоимость 20%. Стоимость работ определена на основании смет, являющихся неотъемлемым приложением к договору подряда от 11.04.2019.

В соответствии с пунктом 2.3 договора от 11.04.2019 оплата стоимости фактически выполненных работ за отчетный период осуществляется денежными средствами на расчетный счет подрядчика или иным способом, не запрещенным действующим законодательством, после подписания уполномоченными представителями сторон акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим договором или досрочно, и предоставлении подрядчиком оформленного в соответствии с действующим налоговым законодательством счета-фактуры.

Между обществом «Строительная компания «Феникс-Гран» и обществом «Арт ФАСАД» подписано дополнительное соглашение от 11.04.2019 № 2 к договору от 11.04.2019, согласно которому подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика дополнительные работы по обшивке ограждений лоджий асбестоцементным листом, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную дополнительным соглашением цену (пункт 1).

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения № 2 перечень и стоимость выполняемых по настоящему дополнительному соглашению работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (приложением № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

В силу пункта 3 дополнительного соглашения № 2 стоимость выполненных работ по настоящему Дополнительному соглашению составляет 130 010 руб. Оплата производится в следующем порядке: заказчик оплачивает после выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

Между обществом «Строительная компания «Феникс-Гран» и обществом «Арт ФАСАД» подписано дополнительное соглашение от 11.04.2019 № 3 к договору от 11.04.2019, согласно которому подрядчик обязуется в установленный соглашением срок до 31.10.2019 выполнить по заданию заказчика дополнительные работы согласно смете № 3 (пункт 1).

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения № 3 перечень и стоимость выполняемых по настоящему дополнительному соглашению работ определяется сметой № 3 (приложения № 1 к дополнительному соглашению№ 3 к договору от 11.04.2019) на выполнение ремонтно-отделочных работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

В силу пункта 3 дополнительного соглашения № 3 стоимость выполненных работ по настоящему дополнительному соглашению составляет 196 942 руб. Оплата производится в следующем порядке: заказчик оплачивает после выполнения работ и подписания акта выполненных работ в течение 10 дней.

Между обществом «Строительная компания «Феникс-Гран» и обществом «Арт ФАСАД» подписано дополнительное соглашение от 11.04.2019 № 4, согласно которому подрядчик обязуется в установленный соглашением срок до 31.10.2019 выполнить по заданию заказчика дополнительные работы согласно смете № 4 (пункт 1).

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения № 4 перечень и стоимость выполняемых по настоящему дополнительному соглашению работ определяется сметой № 4 (приложения № 1 к дополнительному соглашению№ 4 к договору от 11.04.2019) на выполнение ремонтно-отделочных работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

В силу пункта 3 дополнительного соглашения № 4 стоимость выполненных работ по настоящему Дополнительному соглашению составляет 228 402 руб. Оплата производится в следующем порядке: заказчик оплачивает после выполнения работ и подписания акта выполненных работ в течение 10 дней.

Между обществом «Строительная компания «Феникс-Гран» (заказчик) и обществом «Арт ФАСАД» (подрядчик) заключен договор заключен договор подряда от 09.10.2019 № 11/3 (далее – договор от 09.10.2019), по условиям которого подрядчик по заданию заказчика, обязуется выполнить в соответствии с проектом, техническим заданием на объекте заказчика, 1 подъезд: жилой дом, расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Могильникова 48 (адрес строительный) следующие работы: изготовление и монтаж алюминиевых конструкций лоджий, передать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 договора от 09.10.2019).

В пункте 1.3 договора от 09.10.2019 сторонами согласованы срок выполнения комплекса работ: 1-й этап - изготовление и монтаж алюминиевых конструкций лоджий при строительной готовности объекта с 09.10.2019 по 31.10.2019. Сдача и приемка этапов работ производится и подтверждается актом формы КС-2 и справкой формы КС-3. Объем, содержание работ определяются проектно-сметной документацией к договору 09.10.2019 (сводная спецификация алюминиевых конструкций лоджий - приложение № 1, смета № 1 - приложение № 2, рабочий проект - приложение № 3).

Согласно пункту 2.1 договора от 09.10.2019 общая стоимость работ (цена) согласована сторонами в смете (приложение № 2 к договору от 09.10.2019) и составляет 630 006 руб., в том числе налог на добавленную стоимость 20%.

В соответствии с пунктом 2.2 договора от 09.10.2019 оплата подрядчику производится любым не запрещенным законодательством способом и по согласованию сторон. Заказчик перечисляет подрядчику аванс . Окончательный расчет производится в течение 10 дней и при подписании актов КС-2 и КС-3, или иным способом.

В качестве подтверждения факта выполнения работ по вышеуказанным договорам общество «Арт ФАСАД» представило в материалы дела акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а именно:

- по договору от 01.11.2018: от 20.12.2018 № 1 на сумму 2 498 056 руб.;

- по договору от 20.02.2019 (с учетом дополнительного соглашения № 1от 20.02.2019): от 29.03.2019 № 1 на сумму 1 401 400 руб., от 11.10.2019 № 1 на сумму 97 400 руб., от 11.10.2019 № 2 на сумму 323 602 руб. 50 коп.;

- по договору от 11.04.2019 (с учетом дополнительных соглашений № 2, № 3, № 4): от 17.06.2019 № 1 на сумму 2 783 325 руб. 83 коп., от 22.07.2019 № 2 на сумму 857 505 руб. 14 коп., от 04.10.2019 № 3 на сумму1 102 503 руб. 82 коп., от 22.10.2019 № 1 на сумму 196 942 руб., от 04.10.2019 № 4 на сумму 130 032 руб., от 22.10.2019 № 1 на сумму 228 402 руб.;

- по договору от 09.10.2019: от 31.10.2019 № 1 на сумму 630 006 руб.

 Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 подписаны обществом «Строительная компания «Феникс-Гран» и удостоверены его печатью без каких-либо возражений по объему, качеству и стоимости выполненных работ.

Общество «Строительная компания «Феникс-Гран» выполненные работы обществом «Арт ФАСАД» по вышеуказанным договорам не оплатило в полном объеме.

Общая сумма задолженности ответчика перед истцом, согласно расчету истца составила 1 829 283 руб. 83 коп., в том числе по договору 01.11.2018 в сумме 52 488 руб. 33 коп., по договору от 20.02.2019 в сумме 421 002 руб. 50 коп., по договору от 11.04.2019 в сумме 725 787 руб., по договору от 09.10.2019 в сумме 630 006 руб.

Общество «Арт ФАСАД» направило обществу «Строительная компания «Феникс-Гран» претензию от 17.04.2020 исх.№ 11/19 с требованием оплатить задолженность в сумме 1 829 283 руб. 83 коп. Указанная претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Ссылаясь на неисполнение обществом «Строительная компания «Феникс-Гран» обязательств по оплате выполненных работ, общество «Арт ФАСАД» обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Удовлетворяя исковые требования, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно исходили из следующего.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить подрядчику выполненные им работы после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

По смыслу данной нормы определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком, при этом сдача и приемка результата - основные обязанности подрядчика и заказчика.

Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком, регламентирована статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приемка выполненных работ является обязанностью заказчика при условии сообщения подрядчиком о готовности их к сдаче, осуществляется по общему правилу с учетом акта выполненных работ.

В пункте 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 информационного письма от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Как установлено судами и следует из материалов дела, факт выполнения работ подтвержден представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ формы КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанными обществом «Строительная компания «Феникс-Гран» и удостоверенными его печатью без каких-либо возражений по объему, качеству и стоимости выполненных работ.

Доказательств оплаты обществом «Строительная компания «Феникс-Гран» в полном объеме в материалы дела не представлено.

Руководствуясь изложенным, суды пришли к обоснованному выводу о наличии задолженности у общества «Строительная компания «Фениск-Гран» в сумме 1 829 283 руб. 83 ком.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно статье 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В соответствии с пунктом 5.5 договоров за нарушение сроков оплаты выполненных работ заказчик выплачивает подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просрочки за каждый день до момента исполнения обязательств.

Кроме того, общество «Арт ФАСАД» заявило требование о взыскании пени по день фактического исполнения обязательства.

В соответствии с пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

При таких обстоятельства, суды обоснованно удовлетворили требования общества «Арт ФАСАД» о взыскании неустойки по договорам подрядаот 01.11.2018 за период с 21.12.2018 по 06.05.2020 в сумме 26 401 руб. 63 коп., от 20.02.2019 за период с 12.10.2019 по 06.05.2020 в сумме 87 568 руб. 52 коп., от 11.04.2019 за период с 31.10.2019 по 06.05.2020 в сумме 143 957 руб. 33 коп., от 09.10.2019 за период с 11.11.2019 по 06.05.2020 в сумме 105 211 руб.; а также о взыскании пени с 07.05.2020, исходя из расчета 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки, по день фактической оплаты задолженности.

Доводы общества «Строительная компания «Феникс-Гран» о том, что суд первой инстанции необоснованно отказал в отложении судебного заседания, в связи с чем, общество «Строительная компания «Феникс-Гран» было лишено возможности реализовать свои процессуальные права и заявить о назначении экспертизы судом кассационной инстанции отклоняются.

Нарушений норм процессуального права влекущих отмену судебных актов судом кассационной инстанции не установлено. Данный довод был предметом рассмотрения и оценки суда апелляционной инстанции, обоснованно им отклонен.

Из материалов дела усматривается, что на основании ходатайства общества «Строительная компания «Феникс-Гран» об отложении судебного заседания, судом первой инстанции вынесено определение от 02.09.2020 об отложении судебного заседания.

Обществом «Строительная компания «Феникс-Гран» 02.10.2020 вновь заявлено ходатайство об отложении судебного заседания.

 Суд апелляционной инстанции, отклоняя довод общества «Строительная компания «Феникс-Гран» о необоснованном отказе в отложении судебного заседания и отклоняя ходатайство о назначении экспертизы, указал на то, что в материалах дела имеются протокол и аудиозапись судебного заседания, согласно которым представитель ответчика заявлял ходатайство об отложении судебного разбирательства со ссылкой на пандемию и заболевание всех сотрудников офиса коронавирусом, пояснив, что намерен заявить ходатайство о назначении экспертизы, но данного ходатайства заявлено не было. Все возражения ответчика изложены исключительно в апелляционной жалобе, и ранее они, суду первой инстанции не заявлялись. Суд апелляционной инстанции обоснованно указал, что у ответчика было достаточно времени для изложения суду первой инстанции  своей позиции по делу, возражений относительно качеств работ, а также для подготовки ходатайства о назначении экспертизы, чем ответчик не воспользовался. В этой связи  суд апелляционной инстанции обоснованно указал на то, что ответчик надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет риск неблагоприятных последствий несовершения процессуальных действий.

Существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов, судом кассационной инстанции при рассмотрении данной кассационной жалобы не установлено (пункт 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Принимая во внимание, что при подаче кассационной жалобы государственная пошлина не была уплачена, заявителю предоставлена отсрочка оплаты госпошлины, при этом доказательств ее уплаты ко дню судебного заседания не представлено, с общества «Строительная компания «Феникс-Гран» подлежат взысканию в доход федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины по кассационной жалобе.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.10.2020 по делу № А76-18733/2020 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2021 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Феникс-Гран» – без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Феникс-Гран» в доход федерального бюджета 3000 рублей государственной пошлины по кассационной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

Председательствующий                                               Т.В. Сулейменова 

 

Судьи                                                                            Н.Г. Беляева     

 

                                                                                             В.А. Купреенков