АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru (29 отд., тел. 600-97-77) Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-283450/24-29-2532

город Москва

18 декабря 2024 года

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующего: Лежневой О.Ю. Судей: единолично 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фагмановой Э.И.  

рассмотрев заявление АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (ОГРН: 1027700257023, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 7728115183)  

к ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" (ОГРН: 1097799013652, Дата присвоения ОГРН: 14.08.2009, ИНН: 7717151380)  

об обязании Государственной компании «Российские автомобильные дороги» заключить с Акционерным обществом «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» дополнительное соглашение к долгосрочному инвестиционному соглашению от 23.05.2014 № ИД-2014461 на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап строительства) № 1, первый строительный участок (первая очередь строительства) № ИД-2014-461 от 23.05.2014, в редакции согласно приложению № 10 к иску,  

при участии: Истец: Чумаченко И.В., Иванушкина Е.Ю. по доверенности от 24.11.2024 б/ № 

Ответчик: Конюшкин Г.О. по доверенности от 06.04.2023 б/ №  

Р Е Ш И Л :

Удовлетворить исковые требования АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (ОГРН: 1027700257023, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 7728115183).  

Обязать ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" (ОГРН: 1097799013652, Дата присвоения ОГРН: 14.08.2009, ИНН: 7717151380) заключить с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (ОГРН: 1027700257023, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 7728115183) дополнительное соглашение к ДОЛГОСРОЧНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ  

 в редакции: 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к ДОЛГОСРОЧНОМУ 

ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ на строительство, содержание, ремонт и 

капитальный ремонт 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области,  

пусковой комплекс (этап строительства) № 1, первый строительный  

участок (первая очередь строительства) № ИД-2014-461 от 23.05.2014  

между 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И 

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» 

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ 

Москва «___» ____________ 2024 г. 

НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (далее – «Дополнительное  

Соглашение») к ДОЛГОСРОЧНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ на  

строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой  

автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап строительства)  

 № 1, первый строительный участок (первая очередь строительства) № ИД-2014-461 от  

23.05.2014 (далее – «Соглашение») заключено в городе Москве «___» _____________  

2024 года между 

(1) Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее«Государственная Компания»), в лице Председателя правления Петушенко Вячеслава Петровича, действующего на основании Федерального закона от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2019 года № 143-р «О председателе правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», с одной стороны,  

и 

(2) Акционерным обществом «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ», в лице Генерального директора (Президента) Агаларова Араса Искендер Оглы, действующего на основании Устава (далее – «Исполнитель»), с другой стороны, далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона».  

Исходя из того, что: 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 10.1 Соглашения, внесение изменений  

и(или) дополнений к Соглашению осуществляется по соглашению Сторон, Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:  

1. Стороны подтверждают, что в период 2016-2024 годов включительно Исполнителем сданы и Государственной Компанией приняты работы по позиции 2.1.7.1 Приложения 16 «Ведомость Объемов и Стоимости Работ» в объеме 2 112 776 м3 стоимостью 3 829 514 843,14 руб., по позиции 2.1.7.4 Приложения 16 Ведомость Объемов и Стоимости Работ» в объеме 218 408 м3 стоимостью 349 684 585,06 руб. Общая стоимость выполненных и принятых Сторонами работ по указанным позициям составляет 4 179 199 428,20 рублей.  

2. Корректировка стоимости выполненных и принятых по позиции 2.1.7.1 и 2.1.7.4 работ составляет 1 268 714 552,91 руб. и подлежит зачету Сторонами в счет погашения ранее выданного Государственной Компанией Исполнителю Аванса.  

3. Изложить Приложение № 16 «Ведомость Объемов и Стоимости Работ» к Соглашению в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному Соглашению.  

4. Все термины и выражения, определенные в Соглашении, при употреблении в настоящем Дополнительном Соглашении имеют то же значение, если иное не определено настоящим Дополнительным Соглашением.  

5. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным Соглашением, Стороны руководствуются условиями Соглашения и подписанными ранее дополнительными соглашениями к Соглашению.  

6. Положения Соглашения продолжают действовать в полной мере, с учетом изменений, установленных положениями настоящего Дополнительного Соглашения. Соглашение и настоящее Дополнительное Соглашение должны читаться и толковаться как один документ.  

7. Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.  

8. Дополнительное Соглашение оформляется в 2 (двух) экземплярах на русском языке: один для Государственной Компании и один для Исполнителя.  

9. Приложение к настоящему Дополнительному Соглашению:  

- Приложение № 1 «Ведомость Объемов и Стоимости Работ» (Приложение № 16 к  

Соглашению). 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Государственной Компании: От Исполнителя: 

Председатель правления Генеральный директор (Президент) 

____________________ В.П. Петушенко ___________________А.И. Агаларов 

 М.П. М.П.»     

 Взыскать с ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" (ОГРН: 1097799013652, Дата присвоения ОГРН: 14.08.2009, ИНН: 7717151380) сумму госпошлины в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (ОГРН: 1027700257023, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 7728115183).  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления в полном объеме в 9 Арбитражный Апелляционный Суд.  

СУДЬЯ: О.Ю. Лежнева