Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-21239/2017

г. Хабаровск

28 июня 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 июня 2018 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Акционерного общества «Энергоремонт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: 681013, 

<

...>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «КоксоХимЭлектроМонтаж-Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: 690003, 

<

...>, оф.6-М)

о   взыскании 11 450 158 руб. 62 коп.

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 06.10.2016 (до перерыва),

от ответчика – ФИО3 по доверенности № 14 от 01.11.2017,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Энергоремонт» (далее – истец, АО «Энергоремонт») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «КоксоХимЭлектроМонтаж -Восток» (далее – ответчик, ООО «КХЭМ-Восток») о взыскании 14 509 505 руб. 44 коп. задолженности по оплате поставленного товара по договору поставки продукции № 2/Д от 26.02.2015.

Определением суда от 15.01.2018 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу № А73-21239/2017, назначено предварительное судебное заседание на 12.02.2018 в 10 часов 00 минут.

Определением от 12.02.2018 дело назначено к судебному разбирательству на 15.03.2018 в 10 часов 00 минут.

Судебное разбирательство по делу неоднократно откладывалось.

Определением от 08.05.2018 судебное разбирательство отложено на 04.06.2018 в 12 часов 00 минут.

В судебном заседании представитель истца на основании статьи 49 АПК РФ заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 11 450 158 руб. 62 коп., в связи с исключением из расчета задолженности накладных по поставщикам ООО ПЭО «ЦЭТ», ООО «Строй Снаб», ООО «СтройКАД», ООО «Вл-Снаб». С заявлением об уточнении исковых требований истцом представлена расшифровка передаточных документов по реализации № 581 от 24.08.2017. 

Уменьшение размера исковых требований судом принято к рассмотрению, поскольку не противоречит закону и не нарушает права других лиц.  

Представитель истца поддержал исковые требования с учетом уточнения их размера, в обоснование привел обстоятельства, изложенные в исковом заявлении.

Представитель ответчика исковые требования полагал необоснованными, просил отказать в их удовлетворении, привел возражения, изложенные в отзыве на иск и письменных пояснениях.

В судебном заседании 04.06.2018 в порядке статьи 163 АПК РФ был объявлен перерыв до 10 часов 30 минут 09.06.2018, информация о котором размещена в открытом доступе на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После перерыва представитель истца в судебное заседание не явился, представил через систему электронной подачи документов «Мой арбитр» ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие, а также привел дополнительные пояснения в части позиции 31 расшифровки передаточных документов по реализации № 581 от 24.08.2017.

Неявка в судебное заседание после перерыва представителя истца не препятствует продолжению судебного заседания.

Представитель ответчика после перерыва поддержал позицию по отзыву на иск и письменным пояснениям, просил в удовлетворении уточненных исковых требований отказать.

Заслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.  

Между АО «Энергоремонт» (Поставщик) и ООО «КХЭМ-Восток» (Покупатель) был заключен договор поставки № 2/Д от 26.02.2015 (далее -договор), в соответствии с условиями которого Поставщик обязался поставить продукцию производственно-технического назначения, а Покупатель обязался принять и оплатить товар.

Согласно пункту 3.1 договора, цена на продукцию является договорной и подлежит уплате в рублях Российской Федерации.

Оплата производится Покупателем в порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца (пункт 3.3 договора).

Из пояснений представителей сторон и материалов дела установлено, что АО «Энергоремонт» в период 2015 и 2016 годы передавало ООО «КХЭМ-Восток» строительные материалы для выполнения работ по договору субподряда № 14/0012 суб 01/02 от 10.02.2014. Материалы выдавались уполномоченным лицам ответчика на основании накладных на перемещение, актов приема-передачи материалов в монтаж, требований. При этом договор подряда не предусматривал условие о давальческом материале. 

Передача материалов сторонами оформлялась как поставка в рамках договора поставки № 2/Д от 26.02.2015.

На переданные за определенный период строительные материалы АО «Энергоремонт» оформляло товарную накладную по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ, которые выставлялись к оплате ООО «КХЭМ-Восток».   

Как следует из искового заявления, АО «Энергоремонт» передало ООО «КХЭМ-Восток» товары (строительные материалы) на общую сумму 14 509 505 руб. 44 коп., в подтверждение истец представил в материалы дела следующие документы:

1.  Накладная на перемещение №2443 от 20.06.2016г.

2.  Накладная на перемещение №3435 от 05.09.2016г.

3.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.09.2016г.

4.  Накладная на перемещение №1693 от 27.04.2016г.

5.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 27.04.2016г.

6.  Накладная на перемещение №1694 от 27.04.2016г.

7.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 27.04.2016г.

8.  Накладная на перемещение №1633 от 25.04.2016г.

9.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 25.04.2016г.

10.  Накладная на перемещение №1876 от 11.05.2016г.

11.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 11.05.2016г.

12.  Накладная на перемещение №1297 от 25.03.2016г.

13.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 24.03.2016г. - 2шт.

14.  Накладная на перемещение №3291 от 10.08.2016г.

15.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 10.08.2016г.

16.  Накладная на перемещение №64 от 18.01.2016г.

17.  Накладная на перемещение №3294 от 13.08.2016г. 

18.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 13.08.2016г.

19.  Накладная на перемещение №4409 от 14.12.2016г.

20.  Накладная на перемещение №3287 от 15.12.2016г.

21.  Накладная на перемещение №3440 от 05.09.2016г.

22.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.09.2016г.

23.  Накладная на перемещение №4295 от 03.11.2016г.

24.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 03.11.2016г.

25.  Накладная на перемещение №3627 от 21.09.2016г.

26.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 21.09.2016г.

27.  Накладная на перемещение №3475 от 06.09.2016г.

28.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 06.09.2016г.

29.  Накладная на перемещение №4210 от 31.10.2016г.

30.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 31.10.2016г.

31.  Накладная на перемещение №3629 от 16.09.2016г.

32.  Накладная на перемещение №3616 от 20.09.2016г.

33.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 20.09.2016г.

34.  Накладная на перемещение №3730 от 30.09.2016г.

35.  Накладная на перемещение №3989 от 13.10.2016г.

36.  Накладная на перемещение №4155 от 25.10.2016г.

37.  Требование №1542 и требование №1546 от 08.09.2016г.

38.  Товарно-транспортная накладная №6К от 02.08.2016г.

39.  Товарно-транспортная накладная №4К от 02.08.2016г.

40.  Товарно-транспортная накладная №5К от 02.08.2016г.

41.  Товарно-транспортная накладная №1К от 20.08.2016г.

42.  Товарно-транспортная накладная №2К от 20.08.2016г.

43.  Товарно-транспортная накладная №ЗК от 20.08.2016г.

44.  Товарно-транспортная накладная №4К от 20.08.2016г.

45.  Товарно-транспортная накладная №5К от 20.08.2016г.

46. Товарно-транспортная накладная №6К от 20.08.2016г.

47.  Товарно-транспортная накладная №7К от 20.08.2016г.

48.  Товарно-транспортная накладная №8К от 20.08.2016г.

49.  Товарно-транспортная накладная №9-К от 20.08.2016г.

50.  Товарно-транспортная накладная №10-К от 20.08.2016г.

51.  Товарно-транспортная накладная №11-К от 20.08.2016г.

52.  Товарно-транспортная накладная №12-К от 20.08.2016г.

53.  Товарно-транспортная накладная №13-К от 20.08.2016г.

54.  Товарно-транспортная накладная №14-К от 20.08.2016г.

55.  Товарно-транспортная накладная №1К от 24.08.2016г.

56.  Товарно-транспортная накладная №2К от 24.08.2016г.

57.  Товарно-транспортная накладная №ЗК от 24.08.2016г.

58.  Товарно-транспортная накладная №4К от 24.08.2016г.

59.  Товарно-транспортная накладная №1/1К от 24.08.2016г.

60.  Товарно-транспортная накладная №1/2К от 24.08.2016г.

61.  Товарно-транспортная накладная №1К от 26.08.2016г.

62.  Товарно-транспортная накладная №2К от 26.08.2016г.

63.  Товарно-транспортная накладная №ЗК от 26.08.2016г.

64.  Товарно-транспортная накладная №4К от 29.08.2016г.

65.  Товарно-транспортная накладная №ЗК от 29.08.2016г.

66.  Товарно-транспортная накладная №2К от 29.08.2016г.

67.  Товарно-транспортная накладная №1К от 29.08.2016г.

68.  Товарно-транспортная накладная №1К от 30.08.2016г.

69.  Товарно-транспортная накладная №2К от 02.08.2016г.

70.  Товарно-транспортная накладная №ЗК от 02.08.2016г.

71.  Накладная на перемещение №4640 от 07.12.2016г.

72.  Накладная на перемещение №4308 от 07.11.2016г.

73.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 07.11.2016г.

74.  Накладная на перемещение №4775 от 22.12.2016г.

75.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 22.12.2016г.

76.  Накладная на перемещение №3907 от 10.10.2016г.

77.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 10.10.2016г.

78.  Накладная на перемещение №3994 от 14.10.2016г.

79.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 14.10.2016г.

80.  Накладная на перемещение №4139 от 15.10.2016г.

81.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.10.2016г.

82.  Накладная б/н от 12.09.2016г.

83.  Накладная б/н и №91 от 12.09.2016г.

84.  Накладная на перемещение №2420 от 21.06.2016г.

85.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 21.06.2016г.

86.  Накладная на перемещение №1793 от 04.05.2016г.

87.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 04.05.2016г.

88.  Накладная на перемещение №4910 от 29.12.2016г.

89.  Накладная на перемещение №3154 от 09.08.2016г.

90.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 09.08.2016г.

91.  Накладная на перемещение №4668 от 09.12.2016г.

92.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 09.12.2016г.

93.  Накладная на перемещение №3529 от 01.09.2016г.

94.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.09.2016г.

95.  Накладная на перемещение №4489 от 22.11.2016г.

96.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 22.11.2016г.

97.  Накладная на перемещение №4489 от 22.11.2016г.

98.  Акт приема-передачи материалов в монтаж от 22.11.2016г.

99.  Накладная на перемещение №4530 от 25.11.2016г.

100. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 25.11.2016г

101. Накладная на перемещение №4373 от 14.12.2016г.

102. Накладная на перемещение №4531 от 25.11.2016г.

103. Накладная на перемещение №4530 от 25.11.2016г.

104. Накладная на перемещение №4533 от 25.11.2016г.

105. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 25.11.2016г.

106. Накладная на перемещение №4669 от 09.12.2016г.

107. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 09.12.2016г.

108. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 28.12.2016г.

109. Накладная на перемещение №4774 от 22.12.2016г.

110. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 22.12.2016г.

111. Накладная на перемещение №4911 от 29.12.2016г.

112. Накладная на перемещение №4771 от 22.12.2016г.

113. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 22.12.2016г.

114. Накладная на перемещение №4635 от 06.12.2016г.

115. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 06.12.2016г.

116. Накладная на перемещение №4181 от 26.10.2016г.

117. Товарно-транспортная накладная №Р-1 К от 28.03.2016г.

118. Товарно-транспортная накладная №1-К от 29.03.2016г.

119. Товарно-транспортная накладная №2-К от 29.03.2016г.

120. Товарно-транспортная накладная №3-К от 29.03.2016г.

121. Товарно-транспортная накладная №Р-2-К от 29.03.2016г.

122. Товарно-транспортная накладная №Р-1-К от 30.03.2016г.

123. Накладная на перемещение №002629 от 01.07.2016г.

124. Накладная на перемещение №002628 от 01.07.2016г.

125. Накладная на перемещение №002626 от 01.07.2016г.

126. Накладная на перемещение №002624 от 01.07.2016г.

127. Накладная на перемещение №2066 от 17.05.2016г.

128. Накладная на перемещение №2065 от 11.05.2016г.

129. Накладная на перемещение №2391 от 18.06.2016г.

130. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 18.06.2016г.

131. Накладная на перемещение №3675 от 27.09.2016г.

132. Накладная на перемещение №4014 от 14.10.2016г.

133. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 14.10.2016г.

134. Накладная на перемещение №2745 от 01.07.2016г.

135. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 16.06.2016г.

136. Накладная на перемещение №3316 от 23.08.2016г.

137. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 23.08.2016г.

138. Накладная на перемещение №3723 от 30.09.2016г.

139. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 30.09.2016г.

140. Накладная на перемещение №3518 от 08.09.2016г.

141. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 08.09.2016г.

142. Накладная на перемещение №2855 от 21.07.2016г.

143. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 21.07.2016г.

144. Накладная на перемещение №284 от 01.02.2016г.

145. Накладная на перемещение №1520 от 12.04.2016г.

146. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 12.04.2016г.

147. Накладная б/н от 20.08.2016г.

148. Накладная б/н от 31.08.2016г.

149. Накладная б/н от 19.08.2017г. и 23.08.2016г.

150. Накладная б/н от 19.08.2016г.

151. Накладная б/н от 16.08.2016г.

152. Накладная б/н от 03.09.2016г.

153. Накладная б/н от 06.09.2016г.

154. Накладная б/н от 24.09.2016г.

155. Накладная б/н от 23.09.2016г.

156. Накладная б/н от 27.09.2016г. и 30.09.2016г.

157. Накладная на перемещение №1695 от 27.04.2016г.

158. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 27.04.2016г.

159. Накладная на перемещение №1957 от 17.05.2016г.

160. Накладная на перемещение №2015 от 20.05.2016г.

161. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 20.05.2016г.

162. Накладная на перемещение №2042 от 24.05.2016г.

163. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 24.05.2016г.

164. Накладная на перемещение №2740 от 01.07.2016г.

165. Накладная б/н от 13.07.2016г.

166. Накладная на перемещение №1633 от 25.04.2016г.

167. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 25.04.2016г.

168. Накладная на перемещение №2343 от 16.06.2016г.

169. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 16.06.2016г.

170. Накладная на перемещение №1794 от 05.05.2016г.

171. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.05.2016г.

172. Накладная на перемещение №2529 от 29.06.2016г.

173. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 29.06.2016г.

174. Накладная на перемещение №2536 от 01.06.2016г.

175. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.06.2016г.

176. Накладная на перемещение №3149 от 08.08.2016г.

177. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 08.08.2016г.

178. Накладная на перемещение №3238 от 12.08.2016г.

179. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 12.08.2016г.

180. Накладная на перемещение №1703 от 27.04.2016г.

181. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 27.04.2016г.

182. Накладная на перемещение №3723 от 30.09.2016г. 

183. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 30.09.2016г. 

184. Накладная на перемещение №2707 от 01.07.2016г. 

185. Накладная на перемещение №2709 от 01.07.2016г. 

186. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 27.07.2016г.

187. Товарно-транспортная накладная №4К от 27.07.2016г. 

188. Товарно-транспортная накладная №1К от 03.08.2016г. 

189. Товарно-транспортная накладная №2К от 03.08.2016г. 

190.  Товарно-транспортная накладная №ЗК от 03.08.2016г. 

191. Товарно-транспортная накладная №4К от 03.08.2016г. 

192. Товарно-транспортная накладная №1К от 27.07.2016г. 

193. Товарно-транспортная накладная №2К от 27.07.2016г. 

194. Товарно-транспортная накладная №1К от 12.08.2016г. 

195. Товарно-транспортная накладная №2К от 12.08.2016г. 

196. Товарно-транспортная накладная №1К от 15.08.2016г. 

197. Товарно-транспортная накладная №2К от 15.08.2016г. 

198. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 15.08.2016г. 

199. Товарно-транспортная накладная №1К от 16.08.2016г. 

200. Товарно-транспортная накладная №2К от 16.08.2016г. 

201. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 16.08.2016г. 

202. Товарно-транспортная накладная №4К от 16.08.2016г. 

203. Товарно-транспортная накладная №5К от 16.08.2016г. 

204. Товарно-транспортная накладная №6К от 16.08.2016г. 

205. Товарно-транспортная накладная №7К от 16.08.2016г. 

206. Товарно-транспортная накладная №8К от 16.08.2016г. 

207. Товарно-транспортная накладная №9К от 16.08.2016г. 

208. Товарно-транспортная накладная №10К от 16.08.2016г. 

209. Товарно-транспортная накладная №1/1К от 16.08.2016г. 

210. Товарно-транспортная накладная №Р-1К от 19.04.2016г. 

211. Товарно-транспортная накладная №Р-2К от 19.04.2016г. 

212. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 19.04.2016г. 

213. Товарно-транспортная накладная №2К от 19.04.2016г. 

214. Товарно-транспортная накладная №1К от 19.04.2016г. 

215. Товарно-транспортная накладная №1К от 19.08.2016г. 

216. Товарно-транспортная накладная №2К от 19.08.2016г. 

217. Товарно-транспортная накладная №4К от 19.08.2016г. 

218. Товарно-транспортная накладная №7К от 19.08.2016г. 

219. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 19.08.2016г. 

220. Товарно-транспортная накладная №6К от 19.08.2016г. 

221. Товарно-транспортная накладная №5К от 19.08.2016г. 

222. Накладная на перемещение №2536 от 01.06.2016г.

223. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.06.2016г. 

224. Накладная на перемещение №1703 от 27.04.2016г. 

225. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 27.04.2016г. 

226. Накладная на перемещение №1762 от 03.05.2016г. 

227. Накладная на перемещение №1700 от 27.04.2016г. 

228. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 22.04.2016г. 

229. Накладная на перемещение №3655 от 01.07.2016г. 

230. Накладная на перемещение №2311 от 15.06.2016г. 

231. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.06.2016г. 

232. Накладная на перемещение №2309 от 15.06.2016г. 

233. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.06.2016г. 

234. Накладная на перемещение №2716 от 01.07.2016г.

235. Накладная на перемещение №2715 от 01.07.2016г.

236. Накладная на перемещение №2076 от 26.05.2016г.

237. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 26.05.2016г.

238. Накладная на перемещение №3932 от 11.10.2016г.

239. Накладная на перемещение №2382 от 18.06.2016г.

240. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 21.06.2016г.

241. Накладная на перемещение №2076 от 26.05.2016г.

242. Накладная на перемещение №2420 от 21.06.2016г.

243. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 18.06.2016г.

244. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 11.10.2016г.

245. Накладная на перемещение №2157 от 01.06.2016г.

246. Накладная на перемещение №2182 от 02.06.2016г.

247. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 02.06.2016г.

248. Накладная на перемещение №2031 от 24.05.2016г.

249. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 24.05.2016г.

250. Накладная на перемещение №2134 от 31.05.2016г.

251. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 31.05.2016г.

252. Накладная на перемещение №2169 от 01.06.2016г.

253. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.06.2016г.

254. Накладная на перемещение №2073 от 07.05.2016г.

255. Накладная на перемещение №2068 от 15.05.2016г.

256. Накладная на перемещение №2070 от 04.05.2016г.

257. Накладная на перемещение №2068 от 15.05.2016г.

258. Накладная на перемещение №2066 от 17.05.2016г.

259. Накладная на перемещение №2858 от 02.07.2016г.

260. Накладная на перемещение №1305 от 01.04.2016г.

261. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.04.2016г.

262. Накладная на перемещение №4272 от 01.12.2016г.

263. Накладная на перемещение №4854 от 29.12.2016г.

264. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 29.12.2016г.

265. Накладная на перемещение №3601 от 05.09.2016г.

266. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.09.2016г.

267. Накладная на перемещение №2190 от 03.06.2016г.

268. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 03.06.2016г.

269. Накладная на перемещение №2790 от 14.07.2016г.

270. Накладная на перемещение №2710 от 01.07.2016г.

271. Товарно-транспортная накладная №1К от 24.06.2016г.

272. Товарно-транспортная накладная №Р-1К от 24.06.2016г.

273. Накладная на перемещение №002625 от 01.07.2016г.

274. Накладная на перемещение №002621 от 01.07.2016г.

275. Накладная на перемещение №2039 от 24.05.2016г.

276. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 24.05.2016г.

277. Накладная на перемещение №2858 от 02.07.2016г.

278. Накладная на перемещение №2500 от 17.06.2016г.

279. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.06.2016г.

280. Накладная на перемещение №4657 от 08.12.2016г.

281. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 08.12.2016г.

282. Накладная на перемещение №2815 от 15.07.2016г.

283. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.07.2016г.

284. Накладная на перемещение №3617 от 20.09.2016г.

285. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 20.09.2016г.

286. Накладная на перемещение №1857 от 10.05.2016г.

287. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 10.05.2016г.

288. Накладная на перемещение №1589 от 02.11.2015г.

289. Накладная на перемещение №107 от 24.01.2017г.

290. Накладная на перемещение №2747 от 01.07.2016г.

291. Накладная на перемещение №4628 от 01.12.2016г.

292. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.12.2016г.

293. Накладная на перемещение №3621 от 21.09.2016г.

294. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 21.09.2016г.

295. Накладная на перемещение №3297 от 10.08.2016г.

296. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 10.08.2016г.

297. Накладная на перемещение №2809 от 18.07.2016г.

298. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 18.07.2016г.

299. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 17.03.2015г.

300. Накладная на перемещение №3238 от 12.08.2016г.

301. Накладная на перемещение №3149 от 08.08.2016г.

302. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 08.08.2016г.

303. Накладная на перемещение №3317 от 18.08.2016г.

304. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 18.08.2016г.

305. Накладная на перемещение №3428 от 05.09.2016г.

306. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.09.2016г.

307. Накладная на перемещение №1488 от 14.04.2016г.

308. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 14.04.2016г.

309. Требование №1647 от 16.09.2016г.

310. Требование№1646 от 16.09.2016г.

311. Требование №1576, №1580, от 12.09.2016г.

312. Требование №1577, №1581, от 12.09.2016г.

313. Требование №1556, №1560, №1564 от 09.09.2016г.

314. Требование №1562от 09.09.2016г.

315. Требование №1531, №1532, №1534 от 07.09.2016г.

316. Требование №1538, №1536, от 07.09.2016г.

317. Требование №1537, №1535, №1533 от 07.09.2016г.

318. Требование №1489, №1488, от 03.09.2016г.

319. Требование №988 от 29.06.2016г.

320. Требование №1572 от 10.09.2016г.

321. Накладная б/н от 06.09.2016г.

322. Требование №1051 от 02.07.2016г.

323. Требование №1023, №1029, №1030 от 02.07.2016г.

324. Требование №1026, №1024, №1022 от 02.07.2016г.

325. Требование №1028, №1027, №1025 от 02.07.2016г.

326. Товарно-транспортная накладная №5/1-К от 25.03.2016г.

327. Товарно-транспортная накладная №4/1-К от 25.03.2016г.

328. Товарно-транспортная накладная №3/1-К от 25.03.2016г.

329. Товарно-транспортная накладная №2/1-К от 25.03.2016г.

330. Товарно-транспортная накладная №1/1-К от 25.03.2016г.

331. Товарно-транспортная накладная №1К от 31.08.2016г.

332. Товарно-транспортная накладная №2К от 31.08.2016г.

333. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 31.08.2016г.

334. Товарно-транспортная накладная №4К от 31.08.2016г.

335. Накладная на перемещение №3428 от 05.09.2016г.

336. Накладная на перемещение №3476 от 03.09.2016г.

337. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 03.09.2016г.

338. Накладная на перемещение №1876 от 11.05.2016г.

339. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 11.05.2016г.

340. Накладная на перемещение №2441 от 24.06.2016г.

341. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 24.06.2016г.

342. Накладная на перемещение №1699 от 27.04.2016г.

343. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 26.04.2016г.

344. Накладная на перемещение №4210 от 31.10.2016г.

345. Товарно-транспортная накладная №Р-1К от 05.07.2016г.

346. Товарно-транспортная накладная №Р-1К от 08.07.2016г.

347. Накладная на перемещение №2072 от 06.05.2016г.

348. Накладная на перемещение №2069 от 14.05.2016г.

349. Накладная на перемещение №2712 от 01.07.2016г.

350. Накладная на перемещение №002627 от 01.07.2016г.

351. Накладная на перемещение №2074 от 08.05.2016г.

352. Накладная на перемещение №2071 от 19.05.2016г.

353. Накладная на перемещение №002620 от 01.07.2016г.

354. Товарно-транспортная накладная №2-К от 03.06.2016г.

355. Товарно-транспортная накладная №1-К от 03.06.2016г.

356. Товарно-транспортная накладная №3-К от 03.06.2016г.

357. Товарно-транспортная накладная №1К от 18.04.2016г.

358. Накладная на перемещение №2709 от 01.07.2016г.

359. Накладная на перемещение №2713 от 01.07.2016г.

360. Накладная на перемещение №002706 от 01.07.2016г.

361. Накладная на перемещение №2065 от 11.05.2016г.

362. Накладная на перемещение №1317 от 04.04.2016г.

363. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 04.04.2016г.

364. Накладная на перемещение №1696 от 27.04.2016г.

365. Накладная на перемещение №4155 от 25.10.2016г.

366. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 25.10.2016г.

367. Накладная на перемещение №1368 от 05.04.2016г.

368. Накладная на перемещение №3287 от 15.12.2016г.

369. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.12.2016г.

370. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.04.2016г.

371. Накладная на перемещение №3989 от 13.10.2016г.

372. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 13.10.2016г.

373. Накладная на перемещение №1635 от 16.10.2016г.

374. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 16.10.2016г.

375. Накладная на перемещение №1303 от 01.07.2016г.

376. Накладная на перемещение №3122 от 04.08.2016г.

377. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 04.08.2016г.

378. Накладная б/н от 13.08.2016г.

379. Накладная на перемещение №2310 от 15.06.2016г.

380. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.06.2016г.

381. Накладная на перемещение №4638 от 01.12.2016г.

382. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.12.2016г.

383. Накладная на перемещение №4842 от 29.12.2016г.

384. Накладная б/н от 05.10.2016г.

385. Накладная б/н от 20.09.2016г.

386. Накладная на перемещение №4837 от 29.12.2016г.

387. Накладная на перемещение №116 от 09.01.2017г.

388. Накладная на перемещение №1983 от 19.05.2016г.

389. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 12.05.2016г.

390. Накладная на перемещение №3137 от 05.08.2016г.

391. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.08.2016г.

392. Накладная на перемещение №4180 от 26.10.2016г.

393. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.08.2016г.

394. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 26.10.2016г.

395. Накладная на перемещение №3291 от 10.08.2016г.

396. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 10.08.2016г.

397. Накладная на перемещение №1099 от 12.09.2015г.

398. Накладная на перемещение №3534 от 13.09.2016г.

399. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 13.09.2016г.

400. Накладная на перемещение №3425 от 05.09.2016г.

401. Накладная на перемещение №2861 от 21.07.2016г.

402. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 21.07.2016г.

403. Накладная на перемещение №4853 от 29.12.2016г.

404. Накладная на перемещение №3995 от 13.10.2016г.

405. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 13.10.2016г.

406. Требование №986, №987, №988 от 29.06.2016г.

407. Требование №988 от 29.06.2016г.

408. Накладная на перемещение №2075 от 30.05.2016г.

409. Накладная №033 от 30 марта 2015г.

410. Накладная б/н от 30 марта 2016г.

На переданный товар истцом оформлен универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 581 от 24.08.2017 на сумму 14 509 505 руб. 44 коп., который письмом исх. № 1836 от 06.10.2017 был направлен в адрес ООО «КХЭМ-Восток» для подписания и оплаты.

ООО «КХЭМ-Восток» письмом исх. № 46/17 от 18.10.2017 сообщило об отказе в подписании УПД № 581 от 24.08.2017.

Оплату за переданный товар ООО «КХЭМ-Восток» не произвело.

Претензией исх. № 012/2179 от 07.11.2017 АО «Энергоремонт» требовало оплатить задолженность за поставленный товар в размере             14 509 505 руб. 44 коп. 

ООО «КХЭМ-Восток» претензию оставило без ответа и удовлетворения, что послужило основанием для обращения АО «Энергоремонт» в Арбитражный суд Хабаровского края с настоящим иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ.  

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Правоотношения сторон основаны на обязательствах по поставке и подлежат регулированию нормами главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и общими положениями ГК РФ об обязательствах.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно пункту 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Пунктом 1 статьи 486 ГК РФ предусмотрено, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Истцом в подтверждение факта передачи товаров ответчику представлен в материалы дела универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 581 от 24.08.2017 на сумму 14 509 505 руб. 44 коп., который ответчиком не подписан, а также накладные на перемещение и акты приема-передачи материалов в монтаж, в которых имеются подписи уполномоченных представителей ООО «КХЭМ-Восток», подтверждающие получение строительных материалов.

С учетом отдельных возражений ответчика истец уточнил исковые требования, уменьшив их размер до 11 450 158 руб. 62 коп.

Согласно уточненному расчету истца, сумма задолженности в размере 11 450 158 руб. 62 коп.  складывается из следующих позиций по УПД № 581 от 24.08.2017, подтверждаемых первичными документами о передаче товаров:  

№ п/п по УПД

Наименование товара

Стоимость по УПД

Документ о передаче товара

1

Арматура 10 A III прутки 25Г2С ГОСТ 5781-82

99 317,00

1. Накладная на перемещение №2443 

от 20.06.2016г.;  

2. Накладная на перемещение №3435 

от 05.09.2016г.

2

Цемент М400 50 кг

80 757,60

8. Накладная на перемещение №1633 

от 25.04.2016г.; 

6. Накладная на перемещение №1694 

от 27.04.2016г.;

10. Накладная на перемещение №1876 от 11.05.2016г.

3

Цемент ПЦ-400/50 кг

30 360,00

12. Накладная на перемещение №1297 от 25.03.2016г. 

4

Профиль вертикальный СТАФФ ПВ 20x20x65 Зм

53 988,38

14. Накладная на перемещение №3291 от 10.08.2016г. 

5

ФИО4 "СТАФФ" нерж. 10 мм

99,99

14. Накладная на перемещение №3291 от 10.08.2016г.; 

16. Накладная на перемещение №64 

от 18.01.2016г.

6

Заклепка вытяжная 4,0*10,0 мм нерж. сталь

33 847,33

14. Накладная на перемещение №3291 от 10.08.2016г. 

7

Дюбель фасадный универсальный S-UF 10x80 HEX

29 476,53

14. Накладная на перемещение №3291 от 10.08.2016г.

8

Гидротэкс-В 25 кг (водоостанавливающий)

7 788,35

17. Накладная на перемещение №3294 от 13.08.2016г.

9

Албес белый 3,7

4 162,42

19. Накладная на перемещение №4409 от 14.12.2016г.

10

Албес белый 0,6

4 042,94

19. Накладная на перемещение №4409 от 14.12.2016г. 

11

Угол пристенный PL 19x19 белый 3м

1 320,66

19. Накладная на перемещение №4409 от 14.12.2016г. 

12

Подвес-евро

2 595,78

20. Накладная на перемещение №3287 от 15.12.2016г.

13

ТЕФОНД Плюс 2,07x20м

53 109,65

21. Накладная на перемещение №3440 от 05.09.2016г. 

14

Кисть радиаторная угловая

1 214,40

23 Накладная на перемещение №4295 от 03.11.2016г.

15

Ворота сварные 2000x6000 зеленые

71 625,31

25. Накладная на перемещение №3627 от 21.09.2016г.

16

Плита минераловатная 1200*600*50 мм

19 130,85

27. Накладная на перемещение №3475 от 06.09.2016г.

17

Дюбель для изоляции Партнер-ДВ 10x160 IZO

6 130,98

29. Накладная на перемещение №4210 от 31.10.2016г.

18

Шпатлевка гипсовая 20 кг

3 286,97

31. Накладная на перемещение №3629 от 16.09.2016г. 

19

Столб круглого сечения Д=60мм высота 2500мм

951,78

32. Накладная на перемещение №3616 от 20.09.2016г. 

20

Сетка панель 2500*2035, 5мм, 4 ребра

84 026,36

32. Накладная на перемещение №3616 от 20.09.2016г. 

21

Калитка 2000*900 с засовом (фланец 240*186мм)

9 310,40

32. Накладная на перемещение №3616 от 20.09.2016г. 

22

Столб круглого сечения Д=60мм высота 2100мм

46 724,04

32. Накладная на перемещение №3616 от 20.09.2016г. 

23

ГКЛВ 2500*1200*12,5

532,31

34. Накладная на перемещение №3730 от 30.09.2016г. 

24

Профиль направляющий ППН 28x27x0,5

376,47

34. Накладная на перемещение №3730 от 30.09.2016г. 

25

ГВЛВ 2500*1200*10

14 967,48

34. Накладная на перемещение №3730 от 30.09.2016г.

26

Шпатлевка гипсовая финишная 

25 кг

7 691,20

34. Накладная на перемещение №3730 от 30.09.2016г. 

27

Кафель стеновой Юнона желтая 200x300

20 329,06

35. Накладная на перемещение №3989 от 13.10.2016г.

28

Кафель стеновой Белая премиум 200x300

13 236,96

36. Накладная на перемещение №4155 от 25.10.2016г. 

30

Эмаль ПФ-115 белая 25 кг

25 050,03

34. Накладная на перемещение №3730 от 30.09.2016г. 

31

Смесь сухая ремонтная MasterFlow мешок 30 кг

309 124,38

Акт приема-передачи оборудования в монтаж №б/н от 17.03.2015

33

Отвод крутоизогнутый 159*8

53 682,56

392. Накладная на перемещение №4180 от 26.10.2016г.

34

Краска огнезащитная Defender (25кг)

814 786,50

72. Накладная на перемещение №4308 от 07.11.2016г.;

114. Накладная на перемещение N04635 от 06.12.2016г.;

71. Накладная на перемещение №4640 от 07.12.2016г.;

74. Накладная на перемещение №4775 от 22.12.2016г.

35

Профнастил НС-21 1051(1000) (6000*0,7мм RAL5005 (синий))

57 380,39

76. Накладная на перемещение №3907 от 10.10.2016г.

37

Отвод крутоизогнутый 159*4,5

15 081,23

78. Накладная на перемещение №3994 от 14.10.2016г.

38

Дюбель для изоляции 10x90

2 433,86

80. Накладная на перемещение №4139 от 15.10.2016г.

40

Профиль вертикальный ПВ 20x20x65x3000

73 835,81

23. Накладная на перемещение №4295 от 03.11.2016г.

41

Кафель стеновой Вечер-1 200x300

4 796,18

36. Накладная на перемещение №4155 от 25.10.2016г. 

42

Техноэласт Фикс ЭПМ

395 423,84

29. Накладная на перемещение N«4210 от 31.10.2016г.

43

Пленка гидро-ветрозащитная 1600*31250 80 г/м2 50м2

3 213,13

29. Накладная на перемещение N84210 от 31.10.2016г.

44

ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (6 плит) 1200x600x50мм

22 618,01

29. Накладная на перемещение №4210 от 31.10.2016г.

45

Профиль горизонтальный ПГ 40*40 Зм

5 768,46

23. Накладная на перемещение №4295 от 03.11.2016г. 

46

Пена монтажная Момент 65 л 850 мл всесезон. проф

10 055,30

23. Накладная на перемещение №4295 от 03.11.2016г.

47

Шайба плоская оцинк. 20,0 (25 кг)

3 749,66

86. Накладная на перемещение №1793 от 04.05.2016г. 

48

Подвес Евро

147,71

19. Накладная на перемещение №4409 от 14.12.2016г.

49

Техноэласт ЭКП сланец серый

517 995,29

84. Накладная на перемещение №2420 от 21.06.2016г.;

89. Накладная на перемещение №3154 от 09.08.2016г.;

91. Накладная на перемещение №4668 от 09.12.2016г.

50

Профнастил С-21 0,7 мм

71 967,77

336. Накладная на перемещение №3476 от 03.09.2016г. 

51

Шпатлевка Старатели КР 20 кг

80 707,30

93. Накладная на перемещение №3529 от 01.09.2016г.

52

Шуруп 5,5*19 синий

2 833,59

95.   Накладная на перемещение №4489 от 22.11.2016г.

53

клей плиточный "Стандарт"

1 933,97

97.   Накладная на перемещение №4485 от 22.11.2016г.

54

Отвод крутоизогнутый 57*3

1 159,83

97.   Накладная на перемещение №4485 от 22.11.2016г.

55

Плита BAJKAL (20шт/уп)

35 703,35

101. Накладная на перемещение №4373 от 14.12.2016г. 

56

Плинтус Идеал орех миланский 2,5м

1 190,10

104. Накладная на перемещение №4533 от 25.11.2016г. 

57

Арзамит - 5 порошок

37 436,92

106. Накладная на перемещение №4669 от 09.12.2016г.

58

Арзамит - 5 раствор

56 037,15

106. Накладная на перемещение №4669 от 09.12.2016г.

59

Плитка к/у ТКШ ПС-8-35

119 893,19

106. Накладная на перемещение №4669 от 09.12.2016г.

60

Подвес Евро (1,5 м)

288,39

19. Накладная на перемещение №4409 от 14.12.2016г. 

61

Линолеум Acczent Mineral Pro 100011 / 3

43 091,54

Акт приема-передачи оборудования в монтаж №б/н от 28.12.2016

62

Техноруф В60 1200*600*30 мм 5 плит

415 244,54

109. Накладная на перемещение №4774 от 22.12.2016г.

63

Профнастил С-44 1035 (980)х6000х0,7мм (5005 синий)

2 906,45

111. Накладная на перемещение №4911 от 29.12.2016г. 

64

OSB-3 Kronospan 1220x2440x22

11 759,44

112. Накладная на перемещение №4771 от 22.12.2016г.

65

Линолеум Зм Идеал

4 871,23

114. Накладная на перемещение №4635 от 06.12.2016г.

66

Плинтус

425,06

116. Накладная на перемещение №4181 от 26.10.2016г.

68

Бетонная смесь тяжелого бетона В 20 ПЗ F200 W6 ГОСТ 7473-2010

252 714,11

128. Накладная на перемещение №2065 от 11.05.2016г.;

127. Накладная на перемещение №2066 от 17.05.2016г.;

174. Накладная на перемещение №2536 от 01.06.2016г.;

126. Накладная на перемещение №002624 от 01.07.2016г.;

125. Накладная на перемещение №002626 от 01.07.2016г.;

124. Накладная на перемещение №002628 от 01.07.2016г.;

123. Накладная на перемещение №002629 от 01.07.2016г.;

184. Накладная на перемещение №2707 от 01.07.2016г.;

185. Накладная на перемещение №2709 от 01.07.2016

69

Труба 159x4,5 ГОСТ 10705-80 ст20

121 170,63

129. Накладная на перемещение №2391 от 18.06.2016г.

70

Краска ВД 14 кг

33 200,00

134. Накладная на перемещение №2745 от 01.07.2016г.;

136. Накладная на перемещение №3316 от 23.08.2016г.;

140. Накладная на перемещение №3518 от 08.09.2016г.;

131. Накладная на перемещение №3675 от 27.09.2016г.;

138. Накладная на перемещение №3723 от 30.09.2016г.;

132. Накладная на перемещение №4014 от 14 10 2016г.

71

АЛЬФАПОЛ ШТ-1/25 кг

2 449,05

142. Накладная на перемещение №2855 от 21.07.2016г.

72

Бишофит отвердитель 210ж/200л

8 568,10

142. Накладная на перемещение №2855 от 21.07.2016г.

73

Щебень 40*70

37 889,27

145. Накладная на перемещение №1520 от 12.04.2016г. 

75

Песок из отсевов дробления

333 231,37

145. Накладная на перемещение №1520 от 12.04.2016г.;

157. Накладная на перемещение №1695 от 27.04.2016г.;

159. Накладная на перемещение №1957 от 17.05.2016г.;

164. Накладная на перемещение №2740 от 01.07.2016г.;

160. Накладная на перемещение №2015 от 20.05.2016г.;

162. Накладная на перемещение №2042 от 24.05.2016г.

76

Профиль 27x60

13 115,52

142. Накладная на перемещение №2855 от 21.07.2016г.

77

Грунтовка интерьерная акриловая GOLexpert (Юл)

2 149,48

367. Накладная на перемещение №1368 от 05.04.2016г. 

79

Гипсокартон 1200x2500x12,5мм

3 643,31

8. Накладная на перемещение №1633 от 25.04.2016г.

80

Профиль стеновой ПС 100*50 Зм

9 172,96

8. Накладная на перемещение №1633 от 25.04.2016г. 

81

Комплект уголков "Идеал" Орех миланский

331,93

104. Накладная на перемещение №4533 от 25.11.2016г. 

82

Цемент М400 (50 кг.)

8 500,99

284. Накладная на перемещение №3617 от 20.09.2016г.

83

Стеклообои Рогожка средняя "GlassBand"1x25M 80гр/м2

8 288,32

114. Накладная на перемещение №4635 от 06 12.2016г. 

84

Клей обойный д/стеклооб. Quelyd, 500г.

1 786,16

114. Накладная на перемещение №4635 от 06.12.2016г. 

85

Штукатурка гипсовая СТАРАТЕЛИ 30кг.

29 321,89

180. Накладная на перемещение №1703 от 27.04.2016г.;

170. Накладная на перемещение №1794 от 05.05.2016г.;

168. Накладная на перемещение №2343 от 16.06.2016г.;

84. Накладная на перемещение №2420 от 21.06.2016г.;

172. Накладная на перемещение №2529 от 29.06.2016г.;

93. Накладная на перемещение №3529 от 01.09.2016г.

86

Шпатлевка КР СТАРАТЕЛИ 20кг. финишная

20 953,65

180. Накладная на перемещение №1703 от 27.04.2016г.

87

Сетка арматурная сварочная 100x100/2,0хЗ,0/ВР-14(с.)ТУ

5 683.70

226. Накладная на перемещение №1762 от 03.05.2016г.

88

Колер Palizh MIX 006 желтый кукурузный 0,02л

829.82

227. Накладная на перемещение №1700 от 27.04.2016г.

89

Палиж Грунтовка интерьерная акриловая (Юл)

3 582,48

227. Накладная на перемещение №1700 от 27.04.2016г. 

90

Отсев дробления

205 639,01

232. Накладная на перемещение №2309 от 15.06.2016г.;

230. Накладная на перемещение N«2311 от 15.06.2016г.;

234. Накладная на перемещение №2716 от 01.07.2016г.;

229. Накладная на перемещение №3655 от 01.07.2016г.

91

Раствор М-150

3 090,50

235. Накладная на перемещение №2715 от 01.07.2016г. 

92

Шпатлевка КР СТАРАТЕЛИ 20кг. финишная

54 711,18

275. Накладная на перемещение №2039 от 24.05.2016г.;

236. Накладная на перемещение №2076 от 26.05.2016г.;

239. Накладная на перемещение №2382 от 18.06.2016г.;

84. Накладная на перемещение №2420 от 21.06.2016г

93

Цемент М400 (50 кг.)

63 332,35

245. Накладная на перемещение №2157 от 01.06.2016г.;

246.Накладная на перемещение №2182 от 02.06.2016г.;

84. Накладная на перемещение №2420 от 21.06.2016г.;

297. Накладная на перемещение №2809 от 18 07.2016г.

94

Краска огнезащитная Defender

868 293,70

248. Накладная на перемещение №2031 от 24.05.2016г.;

236. Накладная на перемещение №2076 от 26.05.2016г.;

250. Накладная на перемещение №2134 от 31.05.2016г.;

252. Накладная на перемещение №2169 от 01.06.2016г.

95

Бетонная смесь тяжелого бетона В22.5 ПЗ F200 W6

787 311,05

12 Л Накладная на перемещение №2066 от 17.05.2016г.;

255. Накладная на перемещение №2068 от 15.05.2016г.;

254. Накладная на перемещение №2073 от 07.05.2016г.;

174. Накладная на перемещение №2536 от 01 06 2016г. 

96

ТЕФОНД рулон 2,07x20м

6 940,14

142. Накладная на перемещение №2855 от 21.07.2016г.-

97

Поддон

43 212,38

260. Накладная на перемещение №1305 от 01 04.2016г. ;

259. Накладная на перемещение №2858 от 02.07.2016г.;

142. Накладная на перемещение №2855 от 21.07.2016г.;

265. Накладная на перемещение №3601 от 05.09.2016г.;

238. Накладная на перемещение №3932 от 11.10.2016г.;

262. Накладная на перемещение №4272 от 01.12.2016г.;

263. Накладная на перемещение №4854 от 29.12.2016г.

98

сетка арматурная сварочная 100x100/1,0х2,0/ВР-15(с.)ТУ

89 583,78

267. Накладная на перемещение №2190 от 03.06.2016г. 

99

сетка арматурная сварная 100x100/1,0х2,0/ВР ф 4ТУ21

16 350,94

269. Накладная на перемещение №2790 от 14.07.2016г.;

142. Накладная на перемещение №2855 от 21.07.2016г.

100

Краска интерьерная строительная акриловая 14 кг

35 381,56

168. Накладная на перемещение №2343 от 16.06.2016г.;

84. Накладная на перемещение №2420 от 21.06.2016г.

101

сетка арматурная сварочная 100x100/1,0х2,0/ВР-15(с.)ТУ

16 829,98

142. Накладная на перемещение №2855 от 21.07.2016г.

102

Герметик Сазиласт-24 Снежинка полиуретан (16,5 кг) белый

11 271,47

131. Накладная на перемещение №3675 от 27.09.2016г. 

103

Раствор М-100

41 779,14

174. Накладная на перемещение №2536 от 01.06.2016г.;

353. Накладная на перемещение №002620 от 01.07.2016г.;

274. Накладная на перемещение №002621 от 01.07.2016г.;

273. Накладная на перемещение №002625 от 01.07.2016г.;

270. Накладная на перемещение №2710 от 01.07.2016г.

104

Кронштейн КР 100*50*50*2,0

3 489,51

14. Накладная на перемещение №3291 от 10.08.2016г.

105

Кирпич М-150

369 729,08

260. Накладная на перемещение №1305 от 01.04.2016г.;

84. Накладная на перемещение №2420 от 21.06.2016г.;

142. Накладная на перемещение №2855 от 21.07.2016г.;

265. Накладная на перемещение №3601 от 05.09.2016г.;

238. Накладная на перемещение №3932 от 11.10.2016г.;

262. Накладная на перемещение №4272 от 01.12.2016г.;

263. Накладная на перемещение №4854 от 29.12.2016г.

106

Щебень 5*10

17811,14

278. Накладная на перемещение N«2500 от 17.06.2016г. 

107

Сетка арматурная сварная 100x100/1,0x2,0/ ВР-1,5

79 035,24

305. Накладная на перемещение N«3428 от 05.09.2016г.

108

АЛЬФАПОЛ АМШ/25 кг

1 426,93

142. Накладная на перемещение №2855 от 21.07.2016г.

109

АЛЬФАГРУНТ концентрат/10л

6 462,65

280. Накладная на перемещение N«4657 от 08.12.2016г.

110

Соединитель желоба д 140

200.38

282. Накладная на перемещение №2815 от 15.07.2016г.

111

Медная лента 801

1 443,63

284. Накладная на перемещение N«3617 от 20.09.2016г.

112

Штукатурка гипсовая 30 кг

17 487,37

307. Накладная на перемещение N«1488 от 14.04.2016г.;

286. Накладная на перемещение №1857 от 10.05.2016г.;

275. Накладная на перемещение №2039 от 24.05.2016г.;

172. Накладная на перемещение N«2529 от 29.06.2016г.

113

Свая С 50-35-3

154 289,48

288. Накладная на перемещение №1589 от 02.11.2015г. 

114

Свая С 90.35-11

34 449,49

288. Накладная на перемещение №1589 от 02.11.2015г.

115

Плита дорожная ПД 6

138 847,36

289. Накладная на перемещение №107 от 24.01.2017г.

118

Бетон ВЗО с ПФМ

170 461,07

Накладная на перемещение №2747 

от 01.07.2016

119

Портландцемент марки ПЦ-400-Д20 50 кг

11 415,21

293. Накладная на перемещение №3621 от 21.09.2016г.

120

Шпатлевка Старатели финишная КР-20 кг

28 639,54

29. Накладная на перемещение №4210 от 31.10.2016г. 

121

Сетка арматурная сварная 100x100/1,0х2,0/ВР 15 ТУ 21

93 952,33

295. Накладная на перемещение №3297 от 10.08.2016г.;

303. Накладная на перемещение №3317 от 18.08.2016г.

122

Пластина полиизобутиленовая 

ПСГ-2.5

244 425,45

297. Накладная на перемещение №2809 от 18.07.2016г.;

106. Накладная на перемещение №4669 от 09.12.2016г.

124

Смесь сухая ремонтная MasterFlow@928 (мешок 30 кг.)

103 667,25

Акт приема-передачи оборудования в монтаж №б/н от 17.03.2015

127

сетка арматурная сварная 100х100/2,0хЗ,0/ВР-1 5 (с.) ТУ 21

14 174,77

303. Накладная на перемещение №3317 от 18.08.2016г. 

128

Профиль 27/28 Зм

3 697,66

142. Накладная на перемещение №2855 от 21.07.2016г.;

176. Накладная на перемещение №3149 от 08.08.2016г.;

178. Накладная на перемещение №3238 от 12.08.2016г.

129

Плитка керамическая 200*300

6 193,51

176. Накладная на перемещение №3149 от 08.08.2016г. 

131

Краска В/Д Интерьерная 14 кг

41 516,74

342. Накладная на перемещение №1699 от 27.04.2016г.;

227. Накладная на перемещение №1700 от 27.04.2016г.;

10. Накладная на перемещение №1876 от 11.05.2016г.;

168. Накладная на перемещение №2343 от 16.06.2016г.;

340. Накладная на перемещение №2441 от 24.06.2016г.;

336. Накладная на перемещение №3476 от 03.09.2016г.

132

Пленка гидро-ветрозащитная арированная 1600*31250 80 г/м2 50м2

5 140,98

29. Накладная на перемещение №4210 от 31.10.2016г.

134

Раствор М150

113 962,11

348. Накладная на перемещение №2069 от 14.05.2016г.;

347. Накладная на перемещение №2072 от 06.05.2016г.;

350. Накладная на перемещение №002627 от 01.07.2016г.;

123. Накладная на перемещение №002629 от 01.07.2016г.;

349. Накладная на перемещение №2712 от 01.07.2016г.

135

Бетонная смесь тяжелого бетона В 15 ПЗ F200 W4 ГОСТ 7473-2010

246 216,76

128. Накладная на перемещение №2065 от 11.05.2016г.;

359. Накладная на перемещение №2713 от 01.07.2016г.;270. Накладная на перемещение №2710 от 01.07.2016г.;185. Накладная на перемещение №2709 от 01.07.2016г.;184. Накладная на перемещение №2707 от 01.07.2016г.;

360. Накладная на перемещение №002706 от  01.07.2016г.;124. Накладная на перемещение №002628 от 01.07.2016г.;353. Накладная на перемещение №002620 от 01.07.2016г.;174. Накладная на перемещение №2536 от 01.06.2016г.;352. Накладная  на перемещение №2071 от 19.05.2016г.

136

Шпатлевка КР 20 кг финишная

40 885,17

362. Накладная на перемещение №1317 от 04.04.2016г. - КХЭМ

137

Цемент 50кг М-400 Спасскцемент 

d 20

99 091,44

367. Накладная на перемещение №1368 от 05.04.2016г.;102. Накладная на перемещение №4531 от 25.11.2016г.;36. Накладная на перемещение №4155 от 25.10.2016г.;138. Накладная на перемещение №3723 от 30.09.2016г.;20. Накладная на перемещение №3287 от 15.12.2016г.;84. Накладная на перемещение №2420 от 21.06.2016г.;162. Накладная на перемещение №2042 от 24.05.2016г.;364. Накладная на перемещение №1696 от 27.04.2016г.

138

Портландцемент ПЦ 400-Д20 50 кг

87 517,74

373. Накладная на перемещение №1635 

от 25.04.2016г.;

36. Накладная на перемещение №4155 от 25.10.2016г.;

35. Накладная на перемещение №3989 от 13.10.2016г.;

93. Накладная на перемещение №3529 от 01.09.2016г.;

295. Накладная на перемещение №3297 от 10.08.2016г.;

376. Накладная на перемещение №3122 от 04.08.2016г.;

134. Накладная на перемещение №2745 от 01.07.2016г.;

375. Накладная на перемещение №1303 от 01.07.2016г.    

139

Техноэласт ЭПП (рулон)

183 602,10

170. Накладная на перемещение №1794 от 05.05.2016г. 

140

Щебень 20x40

53 433,60

159. Накладная на перемещение №1957 от 17.05.2016г. 

141

Щебень фракции 20-40

100 778,74

232. Накладная на перемещение №2309 от 15.06.2016г. 

142

Отвод 90*133x4 ст 20

971,52

381. Накладная на перемещение №4638 от 01.12.2016г.

143

Отвод кругоизогнутый 159*6

6 387,85

381. Накладная на перемещение N«4638 от 01.12.2016г.

144

Песок

37 849,68

162. Накладная на перемещение №2042 от 24.05.2016г.;

386. Накладная на перемещение №4837 от 29.12.2016г.

145

Техноэласт ЭПП (м2)

676 521,47

180. Накладная на перемещение №1703 от 27.04.2016г.; 

388. Накладная на перемещение №1983 от 19.05.2016г.; 

297. Накладная на перемещение №2809 от 18.07.2016г.; 

390. Накладная на перемещение №3137 от 05.08.2016г.; 

88. Накладная на перемещение №4910 от 29.12.2016г.; 

387. Накладная на перемещение №116 от 09.01.2017г.

146

Фланец 1-150-16 ст.20

14 709,48

392. Накладная на перемещение №4180 от 26.10.2016г.

147

Паронитовая прокладка 55*55*2

4 212,45

14. Накладная на перемещение №3291 от 10.08.2016г.

148

Профиль горизонтальный СТАФФ ПГ 40x40 3 м

35 195,07

14. Накладная на перемещение №3291 от 10.08.2016г. 

149

Профиль вертикальный Z-образный 20x20x40 3 м

1 090,28

14. Накладная на перемещение №3291 от 10.08.2016г. 

150

Болт 24*130 ГОСТ 52644-2006 кл.пр. 10,9

2158,15

397. Накладная на перемещение №1099 от 12.09.2015г. 

151

Пленка 200мкм, ширина 3 м

11 941,60

398. Накладная на перемещение №3534 от 13.09.2016г.

152

Гайка оцинк М16. ГОСТ 5915-70

200,79

381. Накладная на перемещение №4638 от 01.12.2016г.

153

Гайка оцинк М20. ГОСТ 5915-70

6 502,82

86. Накладная на перемещение №1793 от 04.05.2016г. 

154

Краска Homaton 10 л

6 967,57

138. Накладная на перемещение №3723 от 30.09.2016г. 

155

Арматура 12 А Ш 25Г2С ГОСТ 5781-82

309 967,71

2. Накладная на перемещение №3435 

от 05.09.2016г.

156

Арматура 12 A III 25Г2С ГОСТ 5781-82

818 258,42

401. Накладная на перемещение №2861 от 21.07.2016г.;

400. Накладная на перемещение №3425 от 05.09.2016г.;

403. Накладная на перемещение №4853 от 29.12.2016г. 

157

Отвод РР 110x45 гр

476,05

404. Накладная на перемещение №3995 от 13.10.2016г.

Всего 

11 450 158,62

Оценив представленные в дело доказательства, проверив расчет истца, суд признает доказанным факт передачи истцом товаров ответчику на общую сумму 11 450 158 руб. 62 коп. 

Доказательств оплаты долга в указанном размере ответчик суду не представил.

Возражения ответчика, изложенные в отзыве на иск и письменных объяснениях от 07.05.2018, судом отклоняются.

При уточнении исковых требований истец частично учел возражения ответчика и исключил позиции товара, по которым отсутствуют первичные документы, подтверждающие получение товара ООО «КХЭМ-Восток».

Довод ответчика о том, что истцом не доказан факт передачи товара и его получения уполномоченными представителями ООО «КХЭМ-Восток», опровергается материалами дела. Как видно из накладных на перемещение и актов приема-передачи оборудования в монтаж, строительные материалы получали представители ООО «КХЭМ-Восток» ФИО5, ФИО6 и ФИО7

Истцом в материалы дела представлены копии доверенностей типовой формы № М-2 в отношении указанных лиц, выданные ООО «КХЭМ-Восток». 

Согласно сведениям о застрахованных лицах за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, представленным ОПФР по Приморскому краю и самим ответчиком, ФИО6 и ФИО7 являются работниками ООО «КХЭМ-Восток». 

ФИО5 в числе застрахованных лиц не значится. Однако из представленных самим ответчиком в материалы дела товарных накладных № 852 от 11.11.2015 и № 883 от 20.11.2015 следует, что ФИО5 от лица ООО «КХЭМ-Восток» неоднократно получал строительные материалы от АО «Энергоремонт» в рамках договора поставки №2Д от 26.02.2015 и подписывал товарные накладные. Полномочия ФИО5 на получение ТМЦ подтверждены доверенностями типовой формы № М-2 от 01.12.2015 №1 (срок действия до 30.12.2016), от 01.11.2015 №101 (срок действия до 30.11.2015).  

Кроме того, истцом в материалы дела представлена копия общего журнала работ № 6, в котором в Разделе 1 ФИО5 указан как заместитель ген. директора по производству ООО «КХЭМ-Восток».

Довод ответчика о том, что по накладным № 2536 от 01.06.2016, № 2707 от 01.07.2016, № 2500 от 17.06.2016, № 2343 от 16.06.2016 был получен товар, который вошел в состав товарной накладной № 154 от 31.03.2017, не принимается судом, поскольку не подтвержден относимыми и допустимыми доказательствами.

По утверждению истца и согласно представленной им расшифровке передаточных документов по реализации № 581 от 24.08.2017, вышеуказанные накладные входят в УПД № 581 от 24.08.2017.

Подлежит отклонению довод ответчика о не подтверждении истцом факта передачи товара по позиции № 31 УПД (Смесь сухая ремонтная MasterFlow мешок 30 кг на сумму 309 124,38 руб.) и по позиции 124 УПД (Смесь сухая ремонтная MasterFlow@928 (мешок 30 кг.) на сумму 103 667,25 руб.). 

Передача указанного товара подтверждается Актом приема-передачи оборудования в монтаж №б/н от 17.03.2015. При этом, ссылка ответчика на то, что по Акту приема-передачи оборудования в монтаж №б/н от 17.03.2015 передавался иной товар (Смесь сухая ремонтная ЕМАСО), не принимается судом, поскольку, согласно пояснениям истца и представленным общедоступным сведениям из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», смесь сухая ремонтная MasterFlow 928 и Смесь сухая ремонтная ЕМАСО – это наименование одного и того же товара. Обратное ответчиком не доказано. 

На основании изложенного исковое требование о взыскании основного долга в размере 11 450 158 руб. 62 коп. подлежит удовлетворению.

Государственная пошлина по иску в размере 80 251 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ответчика в федеральный бюджет на основании положений статьей 102, 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КоксоХимЭлектроМонтаж-Восток» в пользу Акционерного общества «Энергоремонт» основной долг в размере 11 450 158 руб. 62 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КоксоХимЭлектроМонтаж-Восток» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 80 251 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                    Д.Л. Малашкин