РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   06 мая 2024 года    

по делу А33-27245/2023 Красноярск  

«06» мая 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования администрация города Ужура Ужурского района Красноярского  

края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «РегионИнвест» (ИНН  

2466111334, ОГРН 

<

***>) в течении двух месяцев с момента вступления в законную силу решения суда произвести устранение недостатков выполненных работ в  

рамках исполнения гарантийных обязательств 

по муниципальному контракту № 1-20/104 от 13.05.2020:  

- произвести ремонт и восстановление фонарей 12 шт., опор освещения объекта, подсветки памятника «Железнодорожник» 4шт. и покрытие самого памятника;  

- восстановить бетонное основание двух теневых навесов;  - восстановить работоспособность часов;  

- восстановить и закрепить скамейки 10 шт.; 

- произвести частичное восстановление резинового покрытия детской площадки;  по муниципальному контракту № 1-20/106 от 18.05.2020:  

- восстановить освещения памятка «Железнодорожник»;  - устранить частичное отслаивание и потертость разметочной дорожной краски;  

- произвести замену деформированного бордюрного камня;  - усилить основание скамеек, обеспечить их устойчивость;  - произвести замену потертого резинового покрытия под качелями.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РегионИнвест» (ИНН  

2466111334, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. 

Судья Н.А. Мурзина