ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

дело № А40-48217/20

 

Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2020 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 21 сентября 2020 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Бодровой Е.В., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  Ответчика 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.07.2020г. (резолютивная часть от 06.07.2020г.) по делу № А40-48217/20 

по иску ООО "ТЮС-БАЙКАЛ" (ОГРН 

<

***>) к МУП "СЭМ" (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании,

 

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен 

 

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ТЮС-БАЙКАЛ" (далее – истец, заказчик) предъявило МУП "СЭМ" (далее – ответчик, подрядчик) иск о взыскании суммы неустойки в размере 2 836 249,09 руб. за просрочку выполнения работ по договору субподряда № 49/С-2017 от 07.11.2017 г. за период с 21.08.2018 г. по 25.05.2020 г. (с учетом уточнения заявленных исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 06.07.2020г., изготовленным в полном объеме 13.07.2020г. исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу. 

Неявившиеся стороны уведомлены о времени и месте рассмотрения дела посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте суда в сети Интернет (т. 1 л.д. 94). 

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.

Установлено, что между ООО «ТЮС-Байкал» (подрядчик) и МУП «СЭМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 49/С-2017 от 07.11.2017 г. на выполнение работ по проекту «Развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Лена - Хани Восточно-Сибирской железной дороги». 

До настоящего времени договор не расторгнут. 

В соответствии с п. 1.1 договора, субподрядчик обязан в установленный договором срок выполнить строительные работы по проекту: «Развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Лена - Хани Восточно-Сибирской железной дороги», а подрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену. Общие сведения об объеме и содержании поручаемых субподрядчику работ содержатся в Приложении № 1 к договору. 

Согласно п. 4.1.4. договора, субподрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, передать подрядчику результат работ в установленный срок в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением объекта. 

Согласно п. 2.1 дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2018 г. к договору цена работ составляет 2 258 160,10 руб. 

Дополнительным соглашением № 2 к договору стороны указали сроки выполнения работ по этапу «Устройство кюветов», которые указаны в Приложении № 2 к дополнительному соглашению № 2. 

В силу абзаца 2 пункта 12.2 договора, за нарушение промежуточных сроков и конечного срока выполнения работ субподрядчик уплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1% от договорной цены за каждый день просрочки. При задержке выполнения работ свыше 30 дней субподрядчик уплачивает неустойку в размере 0,2% от договорной цены за каждый последующий календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств. 

Таким образом, истец заявляет требование о взыскании суммы неустойки в размере 2 836 249,09 руб. за просрочку выполнения работ «Устройство кюветов» по договору субподряда № 49/С-2017 от 07.11.2017 г. за период с  21.08.2018 г. по 25.05.2020 г. 

Доказательств погашения неустойки в добровольном порядке ответчик не представил.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Учитывая указанные нормы закона и установленные судом фактические обстоятельства спора, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции обоснованно взыскал с ответчика в пользу истца неустойку 2 836 249,09 руб. за период с 21.08.2018 г. по 25.05.2020 г. Расчет неустойки проверен и признан правильным. 

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что дополнительным соглашением от 16.07.2018г. № 2 стороны изменили срок окончания работ, – не может быть принят судом апелляционной инстанции в качестве отмены или изменения решения суда, поскольку расчет неустойки произведен истцом в соответствии с указанным выше дополнительным соглашением от 16.07.2018г. № 2, в связи с чем, 06.07.2020г. истцом было заявлено об уменьшении размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ (т. 1 л.д. 79-80).

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13.07.2020г. (резолютивная часть от 06.07.2020г.) по делу № А40-48217/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

 

Председательствующий судья                                                        Е.Е. Кузнецова

 

Судьи                                                                                                 Е.В. Бодрова  

 

                                                                                                            В.И. Тетюк    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.