АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-1604/2020

13 мая 2021 года

город Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 22 апреля 2021 года.

Решение изготовлено в полном объеме 13 мая 2021 года.

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Радвановской Ю.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Обществу с ограниченной ответственностью «Таграс-Энергосервис» к Обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» о взыскании денежных средств,

с участием представителей участников процесса: не явились;

УСТАНОВИЛ:

ООО «Таграс-Энергосервис» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ООО «Феникс» о взыскании денежных средств.

В судебное заседание 22.04.2021г. лица, участвующие в деле, явку своих уполномоченных представителей в судебное заседание не обеспечили, суд в порядке положений статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ признал сторон извещенным о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

До начала судебного заседания от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его уполномоченного представителя, которое было удовлетворено судом.

В отсутствии ходатайств, свидетельствующих о невозможности рассмотрения данного дела, а также во избежание нарушения процессуальных сроков, принимая во внимание полноту материалов дела, суд признал возможным рассмотреть его по существу.

Судом установлены следующие обстоятельства.

10.12.2019г. между ООО «Феникс» и ООО «Таграс-Энергосервис» был заключен договор подряда № 865.

Согласно пункта 2.1 договора подрядчик обязуется в установленные договором сроки, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к договору), требованиями применимых норм и правил и условиями договора, выполнить на объекте работы и передать результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и сроки, предусмотренные договором.

Стороны признают, что результатом по договору являются работы, выполненные в полном объеме и надлежащим образом в соответствии с Техническим заданием и требованиями применимых норм и правил, и принятые заказчиком работы с необходимой исполнительной документацией, позволяющие ввести коммерческую эксплуатацию Объекта в установленном законодательством Российской Федерации (при условии полного устранения выявленных недостатков). В результате завершения выполнения работ в установленные сроки подрядчиком должна быть обеспечена в полном объеме возможность полноценного и качественного функционального и коммерческого использования объекта в соответствии с характеристиками, установленными в Проектной документации (пункт 2.1.1 договора).

Работы на объекте считаются полностью выполненными и завершенными после подписания сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), а также оформлением Акта о завершении работ по договору (Приложения №1 к договору). Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ переходит к заказчику только с момента подписания сторонами указанного Акта (пункт 2.2 договора).

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что его цена является твердой и составляет: 5 300 000.00 руб., в том числе НДС 20% - 883 333.33 руб., без учёта стоимости оборудования поставки заказчика (Приложение № 6 к договору).

Согласно пункта 4.1.1 договора заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 2 500 000.00 руб., в том числе НДС 20% 416 666.67 руб. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заказчиком счета на оплату, выставленным подрядчиком.

В соответствии с пунктом 9.4.1 подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения работ в полном объеме передать заказчику результаты работ и отчетную документацию, указанную в пункте 9.4.3 договора.

Согласно условиям пункта 9.4.3 договора, для приемки результатов работ подрядчик передает заказчику следующие отчетные документы, оформленные и подписанные подрядчиком в двух экземплярах:

(а) Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

(б) Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

(в) Акт приема-передачи исполнительной документации с приложением к нему полного комплекта исполнительной документации;

(г) Счет-фактура.

Последующие платежи осуществляются по завершении этапа работ согласно графика производства работ (Приложение № 5 к договору) на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за соответствующий отчетный период, пропорционально выплаченному авансу, а также суммы гарантийного удержания. Оплата производится в течение 60 (шестидесяти) дней после приемки Актов выполнения работ на основании предъявленных счетов-фактур (пункт 4.2.1 договора).

Из стоимости работ, предъявленных к оплате, подлежит пропорциональному вычету сумма авансового платежа, уплаченного заказчиком в соответствии с пунктом 4.1.1 договора и сумма гарантийного удержания, составляющая сумму в размере 5% (пять процентов) от акта выполненных работ, обеспечивающая надлежащее исполнение подрядчиком обязательств по договору в гарантийный период (пункт 4.2.2 договора).

Согласно пункта 5.1 договора сроки выполнения работ по договору определяются согласно графика производства работ (Приложение № 5 к договору). Под датой окончания работ по договору стороны понимают завершение работ в полном объеме и устранение подрядчиком всех дефектов/недостатков и подписание сторонами Акта о завершении работ по договору.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения подрядчиком своих обязательств по договору, подрядчик направляет заказчику Акт об исполнении сторонами обязательств по договору, оформленный по форме, указанной в Приложении № 2 к договору. Подрядчик направляет такой Акт только после выполнения всех своих гарантийных обязательств, включая устранение всех дефектов, которые должны быть устранены по обязательствам подрядчика в гарантийный период (пункт 12.4.1 договора).

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от подрядчика Акта об исполнении сторонами обязательств по договору, заказчик обязан подписать его и при наличии какой-либо задолженности перед подрядчиком завершить с ним взаиморасчеты либо в указанный срок предоставить подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от подписания указанного Акта (пункт 12.4.2 договора).

В случае не подписания заказчиком Акта об исполнении сторонами обязательств по договору в срок, предусмотренный в пункте 12.4.2. и не предоставлением заказчиком в указанный срок в письменном виде мотивированного возражения, подрядчик вправе в одностороннем порядке подписать указанный Акт только при условии выполнения подрядчиком в полном объеме обязательств по гарантийному периоду в соответствии с договором и при отсутствии какой-либо задолженности перед заказчиком по договору. При этом подрядчик обязан сделать в таком Акте запись об одностороннем его подписании в связи с не подписанием и не предоставлением заказчиком в срок, установленный пунктом 12.4.2 договора мотивированного возражения от подписания указанного Акта, и выслать такой Акт в адрес заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в пункте 12.4.2 договора, в противном случае такой Акт не является документом, обладающим юридической силой и не подтверждает факт исполнения подрядчиком всех своих обязательств по договору (пункт 12.4.3 договора).

Согласно пункта 14.1 договора в случае нарушения подрядчиком сроков начала и/ или окончания работ по договору по вине подрядчика, заказчик вправе на основании письменной претензии выставить подрядчику неустойку в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от цены договора за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства, но не более 10 % (десяти) процентов от цены договора.

Пунктом 19.5 договора предусмотрено, что он вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору либо до его расторжения в соответствии с положениями статьи 17 договора.

Так, согласно материалов дела, на основании счета на оплату № 453 от 10.12.2019г., выставленного подрядчиком, заказчик перечислил ему аванс в размере 2 500 000.00 руб., что подтверждается платежным поручением № 7104 от 11.12.2019г..

В соответствии с Приложением № 5 к договору (График производства работ), в 2019 году подрядчик должен был выполнить работы на сумму 2 500 000.00 руб..

Вместе с тем, как указывает истец в своем исковом заявлении, подрядчик свои обязательства по договору не выполнил, указанные в пункте пункта 9.4.3 договора документы не представил.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 6582 от 08.10.2020г. с требованием о возврате денежных средств.

Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения истца и иском в суд.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Так, согласно искового заявления  истец просил суд взыскать с ответчика сумму неотработанного аванса в размере 2 500 000.00 руб., пени за просрочку исполнения обязательства за период с 11.12.2019г. по 26.11.2020г. в сумме 530 000.00 руб..

 

 

Так, по своей правовой природе договор № 865 от 10.12.2019г. является договором строительного подряда, в связи с чем возникшие между сторонами правоотношения регулируются параграфами 1, 3 и 5 главы 37 ГК РФ и Федеральным законом от № 44-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 ГК РФ подрядные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основании государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии с частью 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с положениями  статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

Как установлено судом, ООО «Таграс-Энергосервис» на основании счета № 453 от 10.12.2019г. перечислило на расчетный счет ООО «Феникс» денежные средства в сумме 2 500 000.00 руб., указанное подтверждается платежным поручением № 7104 от 11.12.2019г..

Согласно пункта 5.1 договора сроки выполнения работ по договору определяются согласно графика производства работ (Приложение № 5 к договору). Под датой окончания работ по договору стороны понимают завершение работ в полном объеме и устранение подрядчиком всех дефектов/недостатков и подписание сторонами Акта о завершении работ по договору.

Графиком производства работ определено, что работы должны были быть выполнены в 2020 году.

Ответчиком в материалы дела не были представлены доказательства выполнения работ.

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По смыслу главы 37 ГК РФ целью заключения договора подряда является получение заказчиком надлежащего результата выполненных работ.

Согласно статьи 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Из условий заключенного договора следует, что срок окончания работ установлен сторонами.

В установленный договором срок подрядчик работу в полном объеме не выполнил.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору, истец претензией № 6582 от 08.10.2020г. потребовал возвратить неотработанный аванс, заявив данное требование, заказчик считается утратившим интерес к дальнейшему исполнению условий договора, а договор - прекратившим свое действие.

Указанному корреспондирует правовая позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.05.2018г. № 309-ЭС17-21840.

Положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать у ответчика неосвоенную сумму аванса в качестве неосновательного обогащения.

Согласно статье 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Для возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо наличие совокупности следующих обстоятельств: приобретение или сбережение имущества (денежные средства) на стороне приобретателя и уменьшение его на стороне потерпевшего; убытки потерпевшего являются источником обогащения приобретателя; отсутствует надлежащее правовое основание для наступления вышеуказанных имущественных последствий.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статья 65 АПК РФ).

При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (частью 2 статьи 9 АПК РФ).

Факт перечисления ответчику денежных средств в сумме 2 500 000.00 руб. подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 7104 от 11.12.2019г. и ответчиком не оспорено.

Доказательств выполнения работ на указанную сумму ответчиком не представлено, правом на заявление ходатайства о назначении судебной экспертизы в порядке статьи 82 АПК РФ ответчик также не воспользовался.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в части взыскания неотработанного аванса 2 500 000.00 руб..

Истцом также ко взысканию заявлена пеня за просрочку исполнения обязательства за период с 11.12.2019г. по 26.11.2020г. в сумме 530 000.00 руб..

Указывая, что ответчиком нарушены сроки выполнения работ по договору, истец просит взыскать с ответчика договорную неустойку.

Согласно статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Ответственность исполнителя за нарушение сроков выполнения работ согласована сторонами в пункте 14.1 договора.

Согласно пункта 14.1 договора в случае нарушения подрядчиком сроков начала и/ или окончания работ по договору по вине подрядчика, заказчик вправе на основании письменной претензии выставить подрядчику неустойку в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от цены договора за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства, но не более 10 % (десяти) процентов от цены договора.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что сроки выполнения работ по договору определяются согласно графика производства работ (Приложение № 5 к договору), согласно которого работы должны были быть выполнены в 2020 году.

При этом, суд учитывает, что истцом заявлены требования о взыскании пени за период 11.12.2019г. по 26.11.2020г., что не принимается судом, так как срок выполнения работ на конец периода расчета неустойки еще не истек.

Таким образом, изучив материалы дела, суд считает требования истца о взыскании пени за просрочку исполнения обязательства за период с 11.12.2019г. по 26.11.2020г. в сумме 530 000.00 руб. не подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, пропорционально удовлетворенным требованиям.

Учитывая, что истцом ко взысканию заявлена сумма в общем размере 3 030 000.00 руб., то с учетом положений пункта 1 части 1 статьи 333.21 НК РФ подлежит оплате государственная пошлина в сумме 38 150 руб. (при цене иска 3 030 000.00 руб. госпошлина составляет: 33 000.00 + 0.5% от (3 030 000.00 - 2 000 000.00) = 33 000.00 + 5 150.00).

Таким образом, при пропорциональном распределении судебных расходов с ответчика в пользу истца надлежит взыскать расходы по оплате государственной пошлины в сумме 31 477.00 руб. (2 500 000.00 руб. (размер удовлетворенных требований) х 38 150.00 руб. (размер государственной пошлины) / 3 030 000.00 руб. (размер заявленных ко взысканию требований).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Таграс-Энергосервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства в сумме 2 500 000.00 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 31 477.00 руб..

3. В удовлетворении оставшейся части требований – отказать.

4. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

5. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                                                Ю.А. Радвановская