312/2017-33934(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;  

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-30970/2016

город Саратов

01 марта 2017 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Государственное жилищное  строительство» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов в пользу Комитета  по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации  муниципального образования «Город Саратов», г. Саратов (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>) неустойку за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию за период с  01.10.2014 по 27.11.2014 в размере 1669457 руб. 40 коп.; неустойку за нарушение срока  передачи объектов долевого строительства за период с 16.10.2014 по 19.01.2015 в размере  2763240 руб. 09 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Государственное жилищное  строительство» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 45163 руб.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или  кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба  подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья А.В. Кузьмин