АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 122390/23-67-999

г. Москва

31 августа 2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 24 августа 2023 года  Полный текст решения изготовлен 31 августа 2023 года  

Арбитражный суд в составе:  

Судья В.Г. Джиоев (единолично) 

при ведении протокола помощником судьи Н.С. Сидоровой,  рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011  

дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АП СТРОЙ" (107076, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, КОЛОДЕЗНЫЙ ПЕР., Д. 2А, СТР. 2,  ПОМЕЩ. XXV, КОМ. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.02.2020,  ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗТРЕЙД" (430030,  РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, САРАНСК ГОРОД, ВАСЕНКО 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.09.2014, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 5 993 337,06 руб., при участии: от истца: ФИО1, дов. от 12.12.2022г. от ответчика: ФИО2 по дов-ти от 23.08.2023 

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АП СТРОЙ"  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗТРЕЙД" (далее – ответчик) о  взыскании неотработанного аванса по договору от 13.10.2022г. № 13/10 в размере 5  993 337 руб. 06 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за  период с 05.05.2023 по дату фактического исполнения обязательства.  

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих  обязательств по договору строительного подряда в установленные сроки.  

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.  

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, отзыв н  представил.  

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые  требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.  

Как усматривается из материалов дела, 13.10.2022г. между ООО «АП Строй» -  Генподрядчиком и ООО «СоюзТрейд» - Подрядчиком был заключен Договор подряда   № 13/10, по условиям которого Подрядчик принял на себя обязательство по заданию  Генподрядчика выполнить комплекс работ по изготовлению и монтажу ограждений  лестничных маршей и ограждений балкона на Объекте строительства по адресу: 

<

...>, в полном объеме в соответствии с условиями  Договора, проектной и рабочей документацией, Протоколом согласования договорной  цены (Приложение № 1 к Договору), Графиком производства работ (Приложение № 2 к  Договору), Техническим заданием (Приложение № 10 к Договору), требованиями  СНиП, СП, ГОСТ и других нормативных актов, с поэтапным подписанием актов о  приемке выполненных работ, а Генподрядчик - принять результат Работ и оплатить его  на условиях настоящего Договора.  

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором  строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися  в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

В соответствии с п. 1.3. п. 1 Договора сроки выполнения работ определяются  Сторонами в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору). При этом  выполнение Работ производится с соблюдением Графика производства работ  (Приложение № 2 к Договору) – и должно быть завершено не позднее 60 дней с  момента получения на расчётный счет Подрядчика аванса, при наличии  стройготовности участка под установку ограждений лестничных маршей и ограждений  балкона.  

В силу п.п. 2.1.1. п.2 Договора Генподрядчик вправе оплатить Подрядчику  аванс в сумме 9 863 416,50 руб., в т.ч. НДС 20% - 1 643 902,75р., по предварительно  согласованному с Генподрядчиком счету с указанием суммы оплаты, в течение 5 (пяти)  рабочих дней с даты предоставления счета на оплату Подрядчиком. Аванс может  выплачиваться частями.  

Дополнительным соглашением № 1 от 24.11.2022г. Сторонами согласованы  дополнительные работы на Объекте и увеличение стоимости работ на 5 000 000 (пять  миллионов) рублей, в том числе НДС 20% - 833 33 (восемьсот тридцать три тысячи  триста тридцать три) рубля 33 копейки. Общая стоимость всех работ по Договору  составила 21 439 027 (двадцать один миллион четыреста тридцать девять тысяч  двадцать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 20% - 3 573 171 (три миллиона  пятьсот тридцать семь тысяч сто семьдесят один) рубль 25 копеек. (Приложение № 1 к  Дополнительному соглашению № 1 от 24.11.2022г.). В соответствии с п. 4  Дополнительного соглашения № 1 ООО «АП Строй» должно было оплатить ООО  «СоюзТрейд» авансовый платеж в размере 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч)  рублей, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления счета на оплату.  

Дополнительным соглашением № 2 от 30.01.2023г., в связи с необходимостью  проведением дополнительных работ, стоимость работ по Договору была увеличена на  3 057 060 (три миллиона пятьдесят семь тысяч шестьдесят) рублей, в том числе НДС  20% - 509 510 (пятьсот девять тысяч пятьсот десять) рублей и составила 24 496 087  (двадцать четыре миллиона четыреста девяноста шесть тысяч восемьдесят семь) рублей  50 копеек, в том числе НДС 20% - 4 082 681 (четыре миллиона восемьдесят две тысячи  

шестьсот восемьдесят один) рубль 25 копеек (Приложение № 1 к Дополнительному  соглашению № 2 от 30.01.2023г.).  

В соответствии с пунктом 5 Дополнительного соглашения № 2 от 30.01.2023г.  оно не меняет действия остальных пунктов Договора. То есть сроки выполнения всех  работ, в том числе и согласованных в Дополнительных соглашениях, остались  прежними.  

ООО «АП Строй» во исполнении своих обязательств перечислило на расчетный  счет ООО «СоюзТрейд» аванс в размере 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей,  в том числе НДС 20%:  

27.10.2022г. по п/п № 2156 - 4 000 000 (четыре миллиона) рублей; 

30.11.2022г. по п/п № 2502 - 5 000 000 (пять миллионов) рублей;  09.12.2022г. по п/п № 2639 - 5 000 000 (пять миллионов) рублей.  

05.05.2023г. в связи с нарушением сроков выполнения работ и прекращением  ООО «СоюзТрейд» работ без объяснения причин, ООО «АП Строй» в одностороннем  порядке отказалось от исполнения условий Договора № 13/10 от 13.10.2022г., направив  ООО «СоюзТрейд» Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора и с  требованием возвратить неотработанный аванс (исх. № 48).  

На момент направления уведомления ООО «СоюзТрейд» выполнено, а ООО  «АП Стой» приняло работ на общую сумму 8 006 662 (восемь миллионов шесть тысяч  шестьсот шестьдесят два) рубля 94 копейки, в т.ч. НДС 20%, а именно:  

- Акт (КС-2) № 1 от 28.12.2022г. и справка № 1 (КС-3) от 28.12.2022г. на сумму 1  980 000 рублей;  

- Акт (КС-2) № 2 от 28.12.2022г. и справка № 2 (КС-3) от 28.12.2022г. на сумму 2  969 602, 94 руб.;  

- Акт (КС-2) № 3 от 30.01.2023г. и справка № 3 (КС-3) от 30.01.2023г. на сумму 3  057 060, руб.  

Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотрен и условиями  самого Договора.  

В соответствии с п.п. 11.1. п. 11 Договора, Генподрядчик вправе в любое время в  одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях  (включая, но не ограничиваясь): нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, в  том числе увеличения сроков окончания выполнения Работ, либо нарушения  начальных/конечных/промежуточных сроков выполнения Работ (отдельного этапа  Работ согласно Графика производства работ) более чем на 2 (две) недели или  несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, и в случае нарушения  иных обязательств, предусмотренных Договором, в том числе в случае невыполнения  предписания/не устранения замечаний/предписаний, путем письменного уведомления  Подрядчика за 5 (пять) дней до предполагаемого расторжения, возместив при этом  Подрядчику расходы, произведенные им и принятые Генподрядчиком Акты по форме  КС-2 и Справки по форме КС-3 при исполнении обязательств по настоящему Договору.  

При расторжении Договора в одностороннем порядке в соответствии с п. 11.1  настоящего Договора, Генподрядчик обязан письменно уведомить Подрядчика об  одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом Договор будет считаться  расторгнутым по истечении 5 (пять) дней со дня отправления Генподрядчиком  уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. (п.п. 11.2. п. 11  Договора).  

Подпунктом 11.4. п. 11 Договора предусмотрена обязанность Подрядчика при  расторжении Договора подряда в течение 5 (пять) рабочих дней с момента  предъявления Генподрядчиком соответствующего требования вернуть Генподрядчику  денежные средства, полученные им по Договору в качестве аванса и не  подтвержденные фактически выполненными Работами, а также уплатить проценты на  сумму аванса, подлежащего возврату Генподрядчику по ставке 25% (двадцать пять)  

процентов годовых, начисляемых за период с момента получения авансового платежа  по Договору и до момента фактического поступления суммы аванса, подлежащего  возврату на расчётный счет Генподрядчика.  

В согласованные Сторонами работы выполнены не были, более того ООО  «СоюзТрейд» самоустранился от выполнения работ. Неотработанный аванс в размере  5 993 337 (пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи триста тридцать семь)  рублей 06 копеек не возвратил.  

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными  обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или  иными правовыми актами.  

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено,  что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.  По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки  завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не  установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором,  подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и  промежуточных сроков выполнения работы.  

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата  выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику  обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что  работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия  заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено  положениями статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или  частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор  считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 3 статьи 450  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при  расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до  расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей  их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются  неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма  Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49  «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о  неосновательном обогащении»).  

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации  лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой  оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица  (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или  сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев,  предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая  отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ в  установленный договором срок на сумму перечисленных денежных средств,  установленный факт расторжения договора подряда и отсутствие правовых оснований  для удержания ответчиком денежных средств, требования истца о взыскании  

неотработанного аванса по договору от 13.10.2022г. № 13/10 в размере 5 993 337 руб. 06  коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.  

Истцом заявлено требования о взыскании процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 05.05.2023 по дату фактического исполнения  обязательства.  

В силу п. 2 ст. 1107 на сумму неосновательного денежного обогащения  подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того  времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности  получения или сбережения денежных средств.  

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания  денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат  уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой  Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.  

Представленный истцом расчет подлежащих взысканию процентов, проверен  судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.  

В соответствии с п.48 Постановления Пленума Верховного суда от 24 марта  2016 г. № 7 сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ,  определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до  указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по  требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с  установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии  требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до  момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом  день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности  кредитору, включается в период расчета процентов.  

Таким образом, Истец вправе требовать присуждения процентов за пользование  чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ по день фактического  исполнения Ответчиком обязательства.  

С учетом изложенного, требования истца о взыскании процентов за пользование  чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 05.05.2023 по дату  фактического исполнения обязательств, начисляемых на сумму долга в размере 5  993 337 руб. 06 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.  

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на  исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле  доказательствам.  

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном  и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое  доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими  доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее  установленной силы.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СОЮЗТРЕЙД" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АП СТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) сумму неотработанного  аванса по договору от 13.10.2022г. № 13/10 в размере 5 993 337 (пять миллионов  девятьсот девяносто три тысячи триста тридцать семь) руб. 06 коп., проценты за  пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с  05.05.2023 по дату фактического исполнения обязательств, начисляемые на сумму  долга в размере 5 993 337 руб. 06 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в  размере 52 967 (пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят семь) руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья В.Г. Джиоев