РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 

16.04.2018 года                                                                    Дело № А40-24159/18-110-174

Резолютивная часть решения объявлена 09.04.2018 года 

Решение в полном объеме изготовлено 16.04.2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ" (ОГРН 

<

***>, 664047, 

<

...>) к акционерного общества "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОЛОГИИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (ОГРН 

<

***>, 107031, 

<

...>) о взыскании 2 131 221,82 руб.,

при участии:

от истца –ФИО2 по дов.  от 29.06.2017,

от ответчика- не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ" обратилось с иском к акционерному обществу "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОЛОГИИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" о взыскании 2 131 221,82 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по Договору подряда №28-12-МиПИ от 15.10.2012г.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, а также о рассмотрении спора по существу в случае его неявки и в отсутствие заявленных возражений против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в I инстанции, в заседание не явился, возражений против открытия судебного заседания в I инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не заявил. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в его отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 15.10.2012г. между ООО «Сибирский проектный институт» (подрядчик) и ГУП г. Москвы «Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования» (ныне АО «Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования») (заказчик) заключен Договор подряда № 28-12-МиПИ (т. 1 л.д. 66-87), предусматривающий выполнение изыскательских работ для строительства объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области «Ворота Байкала», участок «Гора Соболиная», в т.ч. объекты строительства: эксплуатационно-техническая база ОАО «ОЭЗ» на территории предгорного района, эксплуатационно-техническая база ОАО «ОЭЗ» на прибрежной территории, система электроснабжения, внутриплощадочные магистральные водопроводные сети питьевой воды, хозяйственно-бытовая канализация, внутриплощадочные сети теплоснабжения. В подлежащие выполнению работы входит: № А40-127765/14 -сбор исходных данных; - разработка программы инженерных изысканий; - согласование инженерных изысканий с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно- технического обеспечения, иными уполномоченными органами и организациями, техническое сопровождение прохождения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту; доработка документации с учетом замечаний уполномоченных органов и организаций. Дополнительным соглашением от 24.12.2013г. № 1 стоимость работ, предусмотренных Договором подряда от 15.10.2012г. № 28-12-МиПИ, согласована равной 6 626 047,83руб. и разделена на этапы, подлежавшие выполнению согласно календарного графика: I этап стоимостью 1 689 642,20руб. вкл. НДС - в срок до 30.12.2013г.; II этап стоимостью 1 391 470,04руб. вкл. НДС - в срок до 30.12.2013г.; III этап стоимостью 993 907,18руб. вкл. НДС - в срок до 30.12.2013г.; IV этап стоимостью 894 516,46руб. вкл. НДС - в срок до 30.12.2013г.; V этап стоимостью 1 656 511,96руб. вкл. НДС - в срок до 14.03.2014г. Также Дополнительным соглашением от 24.12.2013г. № 1 предусмотрено выполнение дополнительной работы стоимостью 1 284 940,49руб. в срок до 14.03.2014г..

Постановлением 9 арбитражного апелляционного суда от 07.09.2016г. по делу № А 40-127765/2017г. установлено, что работа по этапам №№ I, II, III, IV и дополнительная работа была подрядчиком выполнена в полном объеме.

Данное обстоятельство подтверждается: - подписанными обеими сторонами накладными от 02.04.2013г. № 355, 15.04.2013г. № 363, 12.06.2013г. № 376, 13.06.2013г. № 377, 14.06.2013г. № 378, 19.06.2013г. № 379, 24.07.2013г. № 403, 03.12.2013г. № 440,

24.12.2013г. № 453, в которых указано наименование переданной подрядчиком заказчику технической документации, шифр, марка, номера чертежей, кол-во листов в одном комплекте, кол-во экземпляров; - подписанными обеими сторонами Актами сдачи-приемки на выполнение работ, в которых указано, что работа удовлетворяет условиям договора: Акт № 1 от 20.01.2014г. о принятии 1-го этапа стоимостью 1 689 642,20руб. вкл. НДС; Акт № 2 от 20.01.2014г. о принятии П-го этапа стоимостью 1 391 470,04руб. вкл. НДС; Акт № 3 от 20.01.2014г. о принятии Ш-го этапа стоимостью 993 907,18руб. вкл. НДС; 4 А40-127765/14 Акт № 4 от 20.01.2014г. о принятии IV-ro этапа стоимостью 894 516,46руб. вкл. НДС; Акт № 5 от 20.01.2014г. о принятии дополнительной работы стоимостью 1 284 940,49руб. вкл. НДС. Акт о принятии V-ro этапа стоимостью 1 656 511,96руб. сторонами не подписан.

Акт о принятии заказчиком результата работы не является единственным допустимым доказательством, которым может быть подтвержден факт выполнения подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.

То, что весь обусловленный Договором объем работы выполнен, что невыполненных работ не имеется, что работа в т.ч. по V-му этапу стоимостью 1 656 511,96руб. подлежит оплате, подтверждается следующим.

В рамках работы по V-му этапу предполагалось выполнение подрядчиком следующего: участие в техническом сопровождении результатов инженерных изысканий гос. экспертизы и устранении замечаний гос. экспертизы.

Данный этап Договора завершен, что подтверждается тем, что результаты инженерных изысканий, выполненные подрядчиком в рамках предыдущих этапов, получили положительное заключение государственной экспертизы от 16.05.2014г. № И-0947-0947/06.13.

Замечания гос. экспертизы подрядчиком не устранялись, т.к. замечаний гос. экспертизы не имелось, т.к. результаты инженерных изысканий, выполненные подрядчиком в рамках предыдущих этапов, с первого и единственного раза, когда они были предъявлены на государственную экспертизу, получили положительное заключение.

После того, как разработанная подрядчиком документация 16.05.2014г. получила положительное заключение государственной экспертизы, никакие иные работы подрядчиком более выполнению не подлежат, т.к. Договор выполнен в полном объеме и надлежащим образом.

Документами, подтверждающими факт передачи подрядчиком результата работы в полном объеме, предусмотренным Договором, Дополнительным соглашением работы, являются подписанные обеими сторонами накладные от 02.04.2013г. № 355, 15.04.2013г. № 363, 12.06.2013г. № 376, 13.06.2013г. № 377, 14.06.2013г. № 378, 19.06.2013г. № 379, 24.07.2013г. № 403, 03.12.2013г. № 440, 24.12.2013г. № 453.

Документом, подтверждающим то, что переданный подрядчиком заказчику результат работы выполнен надлежащим образом, является положительное заключение государственной экспертизы от 16.05.2014г..

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что вся выполненная подрядчиком работа подлежала оплате заказчиком, включая работу по V-му этапу, в общей сумме 6 626 047,83руб.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2016г. постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения, кассационная жалоба АО МНИИТЭП - без удовлетворения.

Результат выполненной подрядчиком изыскательской работы (технической документации) был передан заказчику по накладным от 02.04.2013г., 15.04.2013г., 12.06.2013г., 13.06.2013г., 14.06.2013г.. 19.06.2013г.. 24.07.2013г., 03.12.2013г., 24.12.2013г.

Договором предусмотрено, что передача заказчику результатов работ производится ответственному представителю заказчика по накладной с приложением документов и материалов, предусмотренных условиями Договора (п. 4.1.4.); по завершении каждого этапа работ, устранению всех замечаний, выданных заказчиком, а также при отсутствии у заказчика замечаний, завершении согласований уполномоченными органами и организациями, проводившими согласование, подрядчик передает заказчику по накладной комплект документации, оформленный в соответствии с условиями договора, оригиналы иных документов, подтверждающих согласование документации организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (инженерно-технического обеспечения, иными уполномоченными органами и организациями, а также Акт сдачи-приемки этапа работ в 2-х экземплярах и счет-фактуру (п. 4.2.4.); заказчик не позднее 20 рабочих дней со дня получения от подрядчика соответствующего комплекта документов осуществляет приемку работ и подписывает Акт сдачи-приемки работ (п. 4.2.5.).

Таким образом, по условиям Договора именно дата передачи технической документации, являющейся результатом изыскательских работ, определяет дату завершения выполнения подрядчиком работ; Акт сдачи-приемки является вторичным документом, удостоверяющим отсутствие у сторон спора по объему, качеству, др. характеристикам результата работы.

В соответствии с п.5.3.3. Договора оплата за выполненные работы производится Заказчиком после завершения отдельных этапов работ в соответствии с календарным планом работ на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки этапа работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от даты получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика.

Акты сдачи-приемки работ № 1 от 20.01.2014г. о принятии 1-го этапа стоимостью 1 689 642,20руб. подписан сторонами 20.01.2014г.; Акт № 2 о принятии 2-го этапа стоимостью 1 391 470,04руб. подписан сторонами 20.01.2014г.; Акт № 3 о принятии 3-го этапа стоимостью 993 907,18руб. подписан сторонами 20.01.2014г.; Акт № 4) о принятии 4-ro этапа стоимостью 894 516,46руб. подписан сторонами 20.01.2014г.; Акт № 5 о принятии дополнительной работы стоимостью 1 284 940,49руб подписан сторонами 20.01.2014г.

Следовательно, Ответчик обязан был оплатить работы, выполненные подряд-чиком по договору на сумму 5 004 841,19руб., не позднее 10 февраля 2014г.

В рамках работы по V-му этапу предполагалось выполнение подрядчиком следующего: участие в техническом сопровождении результатов инженерных изысканий гос. экспертизы и устранении замечаний гос. экспертизы.

Данный этап Договора завершен, что подтверждается тем, что результаты инженерных изысканий, выполненные подрядчиком в рамках предыдущих этапов, получили положительное заключение государственной экспертизы от 16.05.2014г. № И-0947-0947/06.13

Соответственно, Ответчик обязан был оплатить работы, выполненные по V-му этапу стоимостью 1 656 511,96руб., не позднее 06.06.2014г.

Однако, в установленный договором срок оплата работ, выполненных ООО «СИБ-ПРОЕКТ» по договору подряда от 15.10.2012г. № 28-12-МиПИ, со стороны АО МНИИ-ТЭП не была произведена.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А 40-127768/2014 вступило в законную силу в соответствии с п.5 ст. 271 ГК РФ 07.09.2016г.

На основании чего истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 131 221,82 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами произведен истцом на условиях ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, проверен судом и признан правильным.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110,123,156,169-171 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  акционерного общества "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОЛОГИИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"  в пользу общества с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ" 2 131 221 руб. 82 коп. процентов, 33 656 руб. в возмещение расходов по госпошлине. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко