АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 (дополнительное) (резолютивная часть)

Дело № А47-1308/2022

г. Оренбург

18 июля 2024 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Никулиной М.В., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Погосян Л.Г., рассмотрел в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Жилищно-технический сервис 1»  (462429, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области, к Управлению  жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Администрации г.Орска  

об обязании управление жилищно-коммунального, дорожного  хозяйства и транспорта администрации г. Орска в течении месяца с  даты вступления в законную силу решения суда, с учетом погодных  условий для данного вида работ, устранить недостатки, возникшие в  результате некачественного выполнения работ по капитальному  ремонту кровли многоквартирного дома № 58 по ул. Кутузова в г.  Орске, а именно:  

-демонтаж стяжки из асфальтобетона на площади 557 кв.м.  согласно план схемы дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303  от 19.12.2023;  

 -устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 ГОСТ  31377-2008, с армированием сеткой ГОСТ 23279-85g 40 мм по первому  проекту кровли МУП «Орскстройремзаказчик» на площади 557 кв.м.  согласно план схемы дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303  от 19.12.2023;  

-монтаж нижнего слоя ковра - флексоизол ТПП-3, 1 слой по  проектной документации на площади 577 кв.м согласно план схемы  дефектов заключения эксперта 092-19-2-0303 от 19.12.2023;  

 -монтаж верхнего слоя ковра - флексоизол ТПП-4, 1 слой по  проектной документации на площади 557 кв.м. согласно план схемы  дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303 от 19.12.2023;  

- устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетона р=800  кг/м3 от 0 до 130 мм по проектной документации на площади 557 кв.м.  согласно план схемы дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303  от 19.12.2023;  

- отгрунтовать праймером битумным ТехноНИКОЛЬ № 01 по  проектной документации на площади 557 кв. м согласно план схемы  дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303 от 19.12.2023;  

разработать проект производства работ для выполнения работ по  ремонту кровли многоквартирного дома № 58 по ул.Кутузова в. г.Орске;  

а также о взыскании госпошлины в размере 6 000 рублей (с  учетом уточнений от 19.06.2024),  

при участии в деле третьих лиц - общество с ограниченной  ответственностью «ПКФ Тандем» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, Оренбургская область, г.Орск), МУП  «Орскстройремзаказчик»( ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>;  Оренбургская область, г.Орск).  

Руководствуясь статьями 101, 106, 110, 112, 167-170, 178, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Расходы за проведение судебной экспертизы в сумме 72 000 руб.  отнести на Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства  и транспорта Администрации г.Орска.  

Дополнительное решение может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через  Арбитражный суд Оренбургской области.  

 Судья М.В.Никулина