23/2022-47623(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть Дело № А43-22216/2019 

г. Нижний Новгород 15 марта 2022 года  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180-182, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний Новгород, в течение 4 месяцев с  момента вступления решения суда в законную силу устранить дефекты, допущенные  при производстве капитального ремонта фасада и крыши многоквартирного дома № 6 по  ул. Верхне-Волжская набережная г.Нижнего Новгорода, выполненного в рамках  договора от 29.12.2017 № 02/1/2-07/6-2017-СМР и дополнительных соглашений к нему  (с приложениями), а именно:  

- расчистить поверхность стен от шпаклевочных и штукатурных слоев на  отслаивающихся и слабых поверхностях;  

- выполнить мероприятия по подготовке основания для проведения работ по  устройству фасадов в соответствии с требованиями СП (свода правил);  

- произвести ремонт штукатурки дефектных участков; 

- произвести сплошное выравнивание стен с предварительной подготовкой  поверхности в целях приведения поверхности в соответствие с требованиями,  предъявляемыми к высококачественной штукатурке;  

- произвести подготовку поверхностей карнизов, балконов, цоколя в соответствии с  требованиями СП (свода правил);  

- произвести окрашивание фасада, цоколя, карнизов, балконов;  

- произвести разборку покрытий кровли, конька, примыканий, водосточной  системы, системы снегозадержания с возможным сохранением материала для  повторного использования;  

- произвести разборку деревянной обрешетки; 

- произвести демонтаж стропил, имеющих следы грибковых повреждений, с  конструкциями, не соответствующими требованиям НПА (нормативно-правовых актов);  

- произвести демонтаж гидроизоляционного слоя кровли;  - произвести работы по устройству стропильной системы в необходимом объеме;  

- выполнить работы по устройству гидроизоляционного слоя, обрешетки, покрытия  кровли, конька, примыканий, водосточной системы, системы снегозадержания в  соответствии с требованиями НПА (нормативно-правовых актов), СП (свода правил);  

- произвести демонтаж пароизоляционного материала с поверхностей  утеплителя чердака;  

- произвести ревизию утеплителя с необходимой заменой замоченных участков и  ремонтом в местах возможного несоответствия раскладки и отсутствия утеплителя;  

- произвести укладку пароизоляционного слоя с необходимым нахлестом в месте  стыковки соседних полотен материала и с проклейкой стыков;  

- выполнить необходимые примыкания пароизоляционных материалов. 

В случае неисполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области в  установленный срок, взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального  ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской  области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний Новгород, в пользу  общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Нижегородец-1»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний Новгород, неустойку в размере 2000  руб. 00 коп. за каждый календарный день просрочки до момента фактического  исполнения решения.  

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Нижний Новгород, в пользу общества с  ограниченной ответственностью Управляющая компания «Нижегородец-1» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), 

<

...> руб. 00 коп. расходов на  оплату услуг специалистов; 75014 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя;  148 000 руб. 00 коп. расходов по оплате судебной экспертизы; 6 000 руб. 00 коп. расходов  на оплату государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать поле вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Отказать автономной некоммерческой организации «Центр экспертиз Торгово-промышленной палаты Нижегородской области» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>), г.Нижний Новгород, в выплате 137700 руб. 00 коп. вознаграждения  экспертам за проведение экспертизы.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Нижегородец-1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний Новгород, с  депозитного счета суда денежные средства в сумме 87300 руб. 00 коп., перечисленные по  платежному поручению от 08.06.2020 № 391. Обществу с ограниченной ответственностью  Управляющая компания «Нижегородец-1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  г.Нижний Новгород, представить реквизиты для перечисления денежных средств с  депозитного счета суда.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная  инвестиционная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний  Новгород, с депозитного счета суда денежные средства в сумме 50400 руб. 00 коп.,  перечисленные по платежному поручению от 09.06.2020 № 714. Обществу с ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажная инвестиционная компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Нижний Новгород, представить реквизиты для  перечисления денежных средств с депозитного счета суда.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого  судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный  апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Судья Е.Н. Алмаева 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 21.01.2022 9:11:02

Кому выдана Алмаева Елена Николаевна