52/2017-65441(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А13-5480/2017

город Вологда

19 июня 2017 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л :

внести изменения в государственный контракт от 05.12.2016 № 279/16- ПКРД на «разработку проектной документации по объекту: «Капитальный  ремонт автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда  - Архангельск на участке км 221+000 - км  230+000 в Ярославской области»,  

изложить пункт 1.3 в следующей редакции: 

«1.3. Сроки выполнения работ по контракту в целом и сроки выполнения  и сдачи отдельных этапов работ определяются календарным планом работ  (Приложение № 2 к Контракту):  

Начало выполнения работ - с момента заключения контракта. 

Окончание выполнения работ (представление проектной документации с  положительным заключением государственной экспертизы) - не позднее 22  декабря 2017 года»;  

изменить сроки выполнения 3, 4, 5 этапов работ, изложенные в  календарном плане работ (приложение № 2), на сроки:  

3 этап «Проектные работы» - с 11.01.2017 до 18.08.2017. 

4 этап «Определение сметной стоимости» - с 19.08.2017 до 20.09.2017.  

5 этап «Проведение экспертизы проектно-сметной документации» - с  21.09.2017 до 22.12.2017.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Е.А.Алимова