Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-18043/2017

13 марта 2018 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Инкиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального  казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных  систем» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628412, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, заезд Андреевский, д. 6) к обществу с  ограниченной ответственностью механизированное управление «Северспецстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628403, Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра, 

<

...>) об обязании безвозмездно  устранить недостатки работ и о взыскании 521 598 рублей 21 копейки,  

с участием представителей сторон: от истца – ФИО2 по доверенности от 21.09.2017, от ответчика – не явились, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации  административных зданий и инженерных систем» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью механизированное управление  «Северспецстрой» в течение одного месяца с момента вступления решения суда в  законную силу безвозмездно произвести необходимые работы по устранению недостатков  

на объекте МБОУ СОШ № 38, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, 14а, допущенных при  выполнении работ в рамках муниципального контракта № МК-17-15 от 02.07.2015,  а именно:  

- на кровле объекта выполнить замену теплоизоляционного слоя из пенополиуретана  в местах отслоения;  

- выполнить кровельное гидроизоляционное покрытие по всей площади кровли с  расчисткой отслоившегося покрытия;  

- на кровле объекта заменить нарушенную гидроизоляцию из направляемого  материала после вскрытия пенополиуретана.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью механизированное  управление «Северспецстрой» в пользу муниципального казенного учреждения  «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» 521 598  рублей 21 копейку – сумму штрафа, а также 19 432 рубля – судебные расходы на оплату  государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Возвратить муниципальному казенному учреждению «Дирекция эксплуатации  административных зданий и инженерных систем» из федерального бюджета  государственную пошлину в размере 10 152 рублей 42 копеек, уплаченную по  платежному поручению № 429 от 12.01.2018. Возврат произвести МРИ ФНС России № 1  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный  апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной  жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд  кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В. Инкина