именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-48118/23-53-385

г. Москва

16 июня 2023 г.

Резолютивная часть объявлена 25 мая 2023 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Козлова В.Ф. единолично

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (111250, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, ДОМ 9А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.10.2016, ИНН: 

<

***>)

к ответчику

акционерному обществу «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АВИАРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ»  (196210, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2003, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 940 146 руб. 81 коп. по договору от 17.09.2020

в заседании приняли участие представители:

от истца – ФИО2 по дов. от  21.12.2022 № Д-1/769 (диплом)

от ответчика - ФИО3  по дов. от 21.10.2020 № 15 (диплом)

установил:

В Арбитражный суд города Москвы обратилась Росгвардия с иском к ответчику АО «СПАРК» о взыскании 940 146 руб. 81 коп. неустойки за нарушение срока выполнения работ.

От ответчика поступил отзыв, из которого следует, что работы выполнялись поэтапно, неустойку следует начислять по каждому изделию, переданного заказчику.

Изучив доводы, исследовав доказательства, суд установил следующее.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (поставщик) заключен договор (государственный контракт) от 17.09.2020 № 202018010408200

<

***> / 0195400000220000401, предметом которого является выполнение ремонтных работ на вертолетах заказчика в соответствии с техническим заданием - приложением № 1, и ведомостью выполняемых работ - приложение № 2 к контракту.

Согласно техническому заданию, работы выполняются на пяти вертолетах: RF-28967, RF-34280, RF-34321, RF-34304, RF-34226, по каждому изделию установлен различный объем работ и различная стоимость работ.

Цена контракта 14 415 892,03 руб. (п. 4.1).

Работы выполняются в месте нахождения изделий, передача изделий для выполнения работ и прием изделий после выполнения работ оформляется актом подписываемым получателем и исполнителем. Результат выполненных работ принимается получателем с оформлением акта приемки-сдачи (п. 6.1).

Приемка осуществляется на основании извещения направленного исполнителем в адрес ВП МО РФ о готовности предъявить результат работ для приемки (п. 6.6).

Работы подлежат контролю качества и приемке ВП МО РФ в течение времени, необходимого для их проверки в объеме требований, установленных технической документацией и контрактом. Не позднее 24 часов после окончания приемки ВП МО РФ выдает Исполнителю удостоверение по установленной форме (п. 6.8, 6.9).

Окончательная приемка работ производится получателем при наличии в соответствующем разделе формуляра записи о выполнении работ, а также при наличии удостоверения ВП МО РФ на принятое изделие.

Окончательная приемка выполненных работ по объему, качеству, на соответствие результату и иным требованиям, установленным в контракте, производится получателем с оформлением Акта приемки-сдачи выполненных работ (п. 6.13.1). Поэтапная приемка работ производится только с согласия Заказчика (п. 6.13.3).

Днем исполнения обязательств исполнителем является дата подписания получателем Акта приемки-сдачи (п. 6.16).

В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств, нарушение сроков выполнения работ), предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных (п. 8.4).

Контракт действует до 1 ноября 2020 г. (п. 13.1), работы должны быть выполнены в срок по 1 октября 2020 г. (п. 13.2).

Фактическая приемка работ по замене агрегатов и комплектующих на пяти вертолетах производилась по каждому изделию с оформлением отдельного приемо-сдаточного акта (ПСДА): от 09.10.2020 в отношении RF-28967, от 22.10.2020 в отношении RF-34280, от 19.11.2020 в отношении RF-34321, от 16.10.2020 в отношении RF-34304, от 24.08.2021 в отношении RF-34226.

В указанные в актах даты изделия принимались получателями и убывали в места постоянного базирования.

Работы приняты получателями по Актам приемки-сдачи выполненных работ от 09.10.2020, от 22.10.2020, от 19.11.2020, от 16.10.2020, от 24.08.2021, дата окончания работ указана в каждом акте: 09.10.2020, 09.10.2020, 09.10.2020, 16.10.2020, 24.08.2020.

Итоговый Акт выполненных работ по форме приложения № 4 к контракту подписан сторонами 31 августа 2021 г., согласно акту, фактическая стоимость выполненных работ составила 11 500 266,79 руб. и согласована сторонами в соглашении о прекращении обязательств по контракту от 14.09.2021.

Истец просит взыскать неустойку за 327 дней просрочки с 02.10.2020 по 24.08.2021.

Суд признает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Отношения сторон урегулированы положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», положениями общей части ГК РФ об обязательствах, главы 39 ГК РФ о возмездном оказании услуг в части, не урегулированной положениями названных законов, а также условиями договора.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре (ст. 779, 781 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (ст. 309 ГК РФ).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, законом или договором может быть предусмотрена денежная сумма - неустойка (пеня, штраф), которую должник обязан уплатить кредитору (ст. 330 ГК РФ).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое ссылается как на основание своих требований и возражений (ст. 65 АПК РФ).

Истец произвел расчет неустойки на всю цену контракта за период до даты принятия работ на последнем изделии.

Вместе с тем, работы принимались по каждому изделию отдельно. Потребительскую ценность имеет каждое отдельное изделие, которые не связаны в единый технологический комплекс, который мог бы функционировать только при наличии всей совокупности составляющих элементов.

Принятые получателями вертолеты убывали в места постоянной дислокации и использовались или могли быть использованы для выполнения возложенных на них задач.

Таким образом, так как истец получал положительный результат работ поэтапно, на не по завершению работ на последнем изделии, неустойку следует также начислять поэтапно, с учетом стоимости работ по каждому изделию и периодам просрочки.

Просрочка выполнения работ по вертолету RF-28967 составила 8 дней с 02.10.2020 по 09.10.2020, по вертолету RF-34280 составила 8 дней с 02.10.2020 по 09.10.2020, по вертолету RF-34321 составила 8 дней с 02.10.2020 по 09.10.2020, по вертолету RF-34304 составила 15 дней с 02.10.2020 по 16.10.2020, по вертолету RF-34226 составила 327 дней с 02.10.2020 по 24.08.2021, окончательная стоимость работ по каждому вертолету составила соответственно 1 227 167,69 руб., 393 429,89 руб., 180 681,54 руб., 7 056 311,24 руб., 2 642 676,43 руб.

Неустойка составляет 246 102,52 руб. (1 227 167,69 х 7,5% / 300 х 8) + (393 429,89 х 7,5% / 300 х 8) + (180 681,54 х 7,5% / 300 х 8) + (7 056 311,24 х 7,5% / 300 х 15) + (2 642 676,43 х 7,5% / 300 х 327).

Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации (п. 42.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Списание неустоек регламентируется Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (вместе с «Правилами осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», далее также «Правила»).

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением указанных в п. 2 Правил.

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек осуществляется заказчиком в полном объеме: если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек не превышает 5 процентов цены контракта; если неуплаченные неустойки начислены вследствие неисполнения поставщиком обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (пп. «а», «в» п. 3 Правил); если неуплаченные неустойки начислены вследствие неисполнения поставщиком обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, (штрафов, пеней) (пп. «д» п. 3 Правил); в размере 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек до 1 января 2021 г. (пп. «б» п. 3 Правил).

Спорный контракт к исключениям из п. 2 Правил не относится, установленная судом сумма неустойки не превышает 5 процентов цены контракта, и подлежит списанию на основании пп. «а» п. 3 Правил. Списание неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика, который в целях списания неустоек обеспечивает сверку расчетов с поставщиком по начисленным и неуплаченным суммам неустоек.

Учитывая изложенные обстоятельства, требования о взыскании неустойки суд оставляет без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 9, 65, 71, 75, 102, 110, 167-171 АПК РФ, суд

решил:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                                       Козлов В.Ф.