Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-6332/2017

г. Хабаровск

25 августа 2017 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена  24 августа 2017 г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Ж.А. Усенко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрел в заседании суда дело по иску федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома «Восточный» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 129110, 

<

...>)

к федеральному  государственному унитарному  предприятию «Главное военно-строительное управление № 6» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680000, 

<

...>)

об обязании устранить нарушения при строительстве  объектов

При участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, действующего по доверенности № 3 от 10.01.2017г;

от ответчика – ФИО3, действующего по доверенности ; 4/310 от 30.05.2017г; ФИО4, действующей по доверенности № 4/315 от 30.05.2017г;

       В судебном  заседании объявлялся перерыв в порядке статьи 163 АПК РФ с 22 по 24 августа 2017года.  

УСТАНОВИЛ:

Федеральное казенное  учреждение «Дирекция космодрома «Восточный» (далее  - истец, ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный») обратилось в арбитражный  суд с иском к  федеральному  государственному унитарному  предприятию «Главное военно-строительное управление № 6» (наименование федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление  специального строительства  по территории  Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» изменено на  федеральное  государственное унитарное  предприятие «Главное военно-строительное управление № 6» на основании ст. 124 АПК РФ), (ответчик, ФГУП «ГВСУ № 6) об  устранении  в срок до 30.09.2017г выявленных в период строительства   объектов замечаний    и нарушений, оформленных предписаниями по следующим  государственным контрактам:  № 873-КИ106/12 от 03.07.2012г (предписания № 35, 57, 123, 140, 205, 209, 231, 14, 18, 31, 40, 55, 61, 65, 75, 76, 86, 187, 196, 211, 8, 9, 10); № 873-КИ108/12 от 03.07.2012г (предписания №№ 68, 87, 75, 113, 112, 156, 176, 196, 201, 217, 225, 227, 228, 3, 20, 22, 24, 27, 30, 37, 68, 69, 70, 84, 85, 91, 90, 95, 96, 109, 110, 108, 129, 130, 137, 153, 154, 161, 165, 178, 186, 209, 7, 6, 22, 27, 28, 33, 39), № 873-ИВ015/12  от 21.12.2012г (предписание № 93 от 07.07.2016г), № 873-ИВ005/11 от 22.12.2011 (предписания №№ 53, 66, 82, 95, 124, 138, 12, 10, 11, 47, 62, 63, 136, 139), № 873-ИВ014/12 от 21.12.2011 (предписания №№ 198, 199, 200, 94), № 873-ИВ003/12 от 01.06.2012г (предписания №№ 97, 167), № 873-ИВ002/13/217 от 11.03.2013г (предписания №№ 163, 100).

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представители ответчика не признали исковые требования,  отрицая факт  получения  предписаний и отсутствие  в журналах производства  работ отметок о наличии  замечаний.

Выслушав  пояснения представителей сторон, исследовав   материалы дела, судом установлено следующее.

Между сторонами  заключен ряд государственных контрактов: от 03.07.2012г № 873-КМ106/12 на строительство  стартового комплекса РН «Союз» площадка 1С, от 03.07.2012 № 873-КМ108/12 «Строительство  технического комплекса площадка 2», от 21.12.2012г № 873-ИВ015/12 «Создание  объектов системы безопасности  космодрома», от22.12.2011г № 873-ИВ005/11 «Создание  промышленной  строительно-эксплуатационной  базы космодрома 1 этап», от 21.12.2011 № 873-ИВ014/12 «Строительство водозаборных сооружений объектов космодрома на площадках 2,3,4,9 (1-яочередь), от 01.06.2012г № 873-ИВ003/12 «Строительство автомобильных дорог космодрома (1-я очередь, П этап),  от 11.03.2013г № 873-ИВ002/13/217 « Строительство  железных дорог  космодрома (1-я очередь, п этап).

По условиям  контрактов ответчик (генподрядчик)  обязался осуществить работы по строительству объектов,  необходимые  для их ввода в эксплуатацию, в соответствии с  проектной и  рабочей документацией и  условиями договоров, обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии  с рабочей документацией, своевременное устранение  недостатков и дефектов, выявленных при производстве, приемке и в течение  гарантийного срока, возникших по вине  генподрядчика (п.п.2.3, 7.2.19 контракта).

В соответствии с п. 7.2.34 контрактов  генподрядчик обязался исполнять полученные в ходе  выполнения работ указания заказчика-застройщика, которые заносятся   в соответствующие журналы, в срок, установленный  предписанием заказчика-застройщика, устранять обнаруженные  им недостатки  в выполненной  работе и иные отступления от рабочей документации и условий контрактов.

В соответствии  с разделом 6  контрактов  заказчик (функции заказчика перешли к  истцу от  Федерального космического агентства)  осуществляет  строительный контроль  выполнения  работ.

Как следует из материалов  дела,  в период строительства  объектов (2015-2016гг), истцом  выдан ряд предписаний  по устранению  выявленных нарушений,  которые на  момент обращения истца с настоящим иском в суд  не устранены.

В ходе судебного разбирательства в целях уточнения  перечня   недостатков, не устраненных  к моменту  вынесения судебного акта, сторонами оформлен реестр незакрытых предписаний с учетом  мероприятий  по их  устранению. Реестр подписан руководителями  ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный»  и ФГУП «ГВСУ № 6». С учетом  согласованного сторонами перечня недостатков  истец уточнил исковые требования, которые суд  полагает  обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

     В соответствии с п. 3 статьи 52  Градостроительного кодекса РФ  лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда), проектной документацией, требованиями к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации,  извещать застройщика, технического заказчика, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов (п.6 сьатьи 52 Градостроительного кодекса РФ).

В силу п. 7 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ замечания застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, привлекаемых ими для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.

В судебном  заседании установлен факт   выдачи  заказчиком   предписаний для  устранения  недостатков,  приведения  работ в соответствии с проектом, для предоставления   отсутствующей исполнительной  документации и актов освидетельствования  скрытых работ. При этом, отсутствие  в отдельных документах подписи   подрядчика не может свидетельствовать о том, что подрядчику было неизвестно о наличии  тех или иных недостатков – в дело  представлена  претензия  от 01.02.2017г, направленная ответчику с приложением   сводной таблицы предписаний,  и указанием срока устранения  недостатков,   представлен подписанный руководителями истца и ответчика сводный реестр с перечнем предписаний, места   обнаружения недостатков, перечня  работ, необходимых  для их устранения,  и срока устранения –  возражения  ответчика в данной части не принимаются судом.

    Возражения  ответчика    о невозможности  исполнить требования истца в части  работ, об исполнении которых  заявлено  в предписаниях   (по контрактам № 873-КИ 106/12 от 03.07.2012г, 873-108/12 от 03.07.2012г, 873-ИВ005/11 от 22.12.2011г)    ввиду расторжения контрактов и передачи незавершенных объемов иной подрядной организации не могут  быть приняты судом в отсутствие  соответствующих доказательств.

 Доказательства  в обоснование возражений ответчика в части отсутствия в журналах производства работ  соответствующих замечаний, также не представлены в материалы дела.

С учетом изложенного, при наличии  установленной законом  и условиями государственных контрактов  обязанности подрядчика  на своевременное  устранение  недостатков работ и выполнение  работ  в соответствии с  проектной и рабочей документацией,  суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме с  установлением   реального срока  для их устранения – не позднее  2-х месяцев послед  вступления в законную силу решения суда.

Расходы  по уплате  госпошлины относятся на ответчика   в силу статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Обязать федеральное  государственное унитарное  предприятие «Главное военно-строительное управление № 6» не  позднее   двух  месяцев  после вступления в законную силу  решения суда  устранить замечания, выявленные  в процессе строительства по следующим  государственным контрактам:

1. По государственному контракту от 03.07.2012 № 873-КИ106/12 «Строительство стартового комплекса РН "Союз" площадка 1С» - 

№     35     от 25.03.2015

со сроком исполнения до 10.04.2016

В помещениях стартового сооружения (ГП1) устранить протекание воды по деформационному шву блоков А и Б, через гидрошпонки, с отм. 0.000 до отм. - 16.000

№     57     от 09.06.2015

со сроком исполнения до 17.06.2015

Молниеотвод: выполнить СМР по устройству молниеотводов по ГП 19А, Б

№     123     от 26.08.2015

со сроком исполнения до 06.09.2015

В помещениях стартового сооружения (ГШ) произвести освидетельствование всех работ, выполненных перед чистовой отделкой помещений

№     140     от 22.09.2015

со сроком исполнения до 02.10.2015

Камеры разводки коммуникаций: восстановить сэндвич-панели на стенах камер

№     205     от 17.11.2015

со сроком исполнения      до

В помещениях стартового сооружения (ГШ) осуществить работы по затирке поверхности и заделки

 

30.11.2015

отверстий под крепление опалубки в осях 9-12 и пешеходных потерн

№ 209 от 25.11.2015

со сроком исполнения до 10.12.2015

Наружное освещение: осуществить лабораторные измерения монолитной бетонной конструкции, при неудовлетворительных результатах осуществить заново бетонирование фундаментов опор наружного освещения проект 860/1С-ЭС4 при соответствующей температуре наружного воздуха, с выполнением мероприятий по подготовке основания и соблюдения условий по уходу за уложенной бетонной смесью

№ 231 от 25.12.2015

со сроком исполнения до 31.12.2015

В помещениях стартового сооружения (ГШ): в помещении № 148 (помещение блока клапанов) установить электрообогревали, соответствующие РД 860/1С-1-ОВ; в помещении № 149 (помещение электрооборудования и пневмощитов) установить регистры системы отопления, соответствующие РД 860/1 С-1-ОВ

№ 14 от 28.01.2016

со сроком исполнения до 15.02.2016

МК в кабельных тоннелях: выполнить проектное решение № 105/В-15 от 21.10.2015 к альбому KTM.022.013.il/OH, по заземлению лотков кабельных тоннелях 28/1, 28/3, 28/6, 28/7, 28/8, 28/10, 28/16, 28/17

№ 18 от 09.02.2016

со сроком исполнения до 26.02.2016

На командном пункте (ГПЗ) при монтаже систем отопления производить сварку труб диаметром 15 мм в соответствии со СНиП 3.05.01-85

№ 31 от 10.03.2016

со сроком исполнения до 20.03.2016

В помещениях стартового сооружения (ГШ) установить стеклокерамическое покрытие «Теплометт-эластик» в помещениях 1-го этажа с толщиной, соответствующей РД 860/1С-1-СП1.7

№ 40 от 04.04.2016

со сроком исполнения до 10.04.2016

На командном пункте (ГПЗ) в станциях пожаротушения (пом. 132, 216, 223) сварные соединения трубопровода автоматического газового пожаротушения выполнить с требованиями ГОСТ 16037-80 («Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры», устранив при этом наплывы, окалены, и шлак

№ 55 от 07.04.2016

со сроком исполнения до 11.04.2016

На насосной станции (ГП25): 1. При производстве работ завершить монтаж систем АСУ ПЗ, общеобменной вентиляции, тепловой вентиляции, установки обеззараживания воды (4 шт) систем В1 и В2, автоматика насосных групп систем В1 и В2, смонтировать датчики уровня воды в 1 и 2 пожарных резервуарах (ПНВ провести); 2. При производстве сварочных работ по монтажу труб системы В1, сварочные швы выполнить согласно ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»; 3. При производстве работ выполнить монтаж подвесного крана в помещении 101;

 

4. При выполнении работ по монтажу и опрессовке трубных систем восстановить конструкцию отмостки.

№     61     от 14.04.2016

со сроком исполнения до 22.04.2016

В помещениях стартового сооружения (ГШ) осуществить омоноличевание в нижней части закладных деталей (ЗД1.2, ЗД1.3, ЗД1.5) под путь МБО при бетонировании защитного покрытия плиты покрытия блока А в осях 1-2/Д, 1-2/Л.

№     65     от 05.05.2016

со сроком исполнения до 15.06.2016

На командном пункте (ГПЗ) щиты ГЩРДП1, ГЩРДП2, ГЩРДПЗ, ГЩРДП4 установить соответствующие проекту 860/1С-3-ЭМ4 листы 7-9, установить блок автоматического переключения (БАП)

№     75     от 30.05.2016

со сроком исполнения до 20.12.2016

В помещениях стартового сооружения (ГШ) двери ДПМ-02/60К (Е1-60) заменить на двери ДСН-ДН 1-2-2 Ml У

№      76     от 30.05.2016

со сроком исполнения до 30.06.2016

В помещениях стартового сооружения (ГШ) устранить протекание воды в стенах 1-го этажа в осях 7-11/Д-Л, 3-4 этажей по оси 1

№     86     от 22.06.2016

со сроком исполнения до 10.07.2016

Убежище (ГП 27): в пом. 002, 005, 012, 006, 011 устранить протекание воды, выполнить гидроизоляцию

№     187     от 21.11.2016

со сроком исполнения до 15.12.2016

Наружное освещение: восстановить кабельную линию наружного освещения от опоры № (25) 1,8 до опоры № (25) 1,11, от опоры № (24А) 1,5 до опоры № (224А) 1,9 и от опоры № (25)1,8 до опоры № (25)1,17

№     196     от 01.12.2016

со сроком исполнения до 15.12.2016

Восстановить кабельные линии Л24А-7, Л24А-14 от ТП24А до сооружения 26/1

№    211     от 20.12.2016

со сроком исполнения до 30.12.2016

В помещениях стартового сооружения (ГШ) устранить трещины, раскрытием до 7 мм, выполнить герметичность деформационных швов газохода

№      8      от 01.02.2017

со сроком исполнения до 16.02.2016

Общие и специальные журналы работ по строительству зданий и сооружений стартового комплекса ведутся с нарушением РД 11-05-2007 - устранить нарушения и выполнить в соответствии с РД 11-05-2007

№      9      от 03.02.2017

со сроком исполнения до 18.02.2016

Узлы крепления металлических лестниц вентиляционных каналов 1-6 не соответствуют РД 860/1С-1-СП1.5.1 - заменить узлы

№     10     от 03.02.2017

со сроком исполнения до 18.02.2016

Работы по устранению протечек воды 1,3,4 этажей ведутся без предоставления проекта производства работ согласованного   с   проектной   организацией, представить проект; производимые скрытые работы не предъявляются к освидетельствованию - представить к освидетельствованию скрытые работы

2. По государственному контракту от 03.07.2012 № 873-КИ108/12 «Строительство Технического комплекса площадка 2» - 

3. 

№ 68 от 17.07.2014

со           сроком исполнения 31.07.2014

МИК РН, сборочно-испытательная часть (ГШ): Заполнить общий журнал работ и специальные журналы работ в соответствии с требованиями РД 11-05-2007 и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

№ 87 от 14.04.2015

со сроком исполнения до 25.07.2015

ЗНС (ГП 11.1): устранить нарушения оформления общего журнала работ; журналы на сварочные работы, на монтаж строительных конструкций, на установку высокопрочных болтов с контролируемым натяжением в соответствии СП 70.13330.2012 отсутствуют, а генподрядчику были выданы - представить журналы; отсутствуют приказы о закреплении ответственных на сварочные работы и работы по установке высокопрочных болтов - представить приказы.

№ 75 от 29.06.2015

со сроком исполнения до 15.07.2015

ЗНС (ГП 11.1): работы по устройству покрытия из профилированного листа кровли начаты без оформления актов на скрытые работы - оформить необходимые акты; устройство покрытия из профилированного листа не соответствует требованиям проекта № 860/2-1-11.1 КМ 1 лист 31 - выполнить в соответствии с проектом.

№ 113 от 11.08.2015

со сроком исполнения до 30.08.2015

Склад блоков РН (ГП 2): представить общий журнал производства работ

№ 112 от 11.08.2015

со сроком исполнения до 20.08.2015

ЗНС (ГП 11.1): работы по выполнению облицовки фасадов 2-х и 3-х этажных административных пристроек панелями Краспан-ST начаты с нарушением требований проекта № 860/2-1-11.1-АР1 листы 32,33,34,35,36,37 - выполнить в соответствии с проектом; не выполнены условия примечания: п. 3 (листы 32,33,34,35,37), п.4 (лист 36) - выполнить.

№ 156 от 05.10.2015

со сроком исполнения до 10.10.2015

КОС (ГП 25). Производственное здание с АБК (ГП - 25.2). Монтаж оконных блоков выполняется без представления исполнительной документации на монтаж элементов фахверка, стеновых сэндвичпанелей. Монтаж окон ведется с отклонениями от проекта (отсутствуют профили ПГ1ЖН по габаритной толщине панелей, отсутствуют паропроницаемые гидроизоляционные ленты). Не выполнена горизонтальная оклеенная гидроизоляция л с/б цокольной панели. Не закреплены узлы стоек площадки Н-1, узлы фахверка. Работы по монтажу подвесного крана, в нарушение требований, выполняются без предъявления исполнительной документации на балки крановых путей, по балкам не выполнены     упоры.     Монтаж     технологического  

 

оборудования (отстойники, аэротенки, биореакторы и т.д.)   ведется   на   фундамент   ФОМ-1,   имеющий отклонения  горизонтальных  отметок  превышающие предельно   допустимые.   На   объекте   отсутствуют журналы работ, специальные журналы. Не представлен журнал входного контроля - устранить

№ 176 от 02.11.2015

со сроком исполнения до 30.11.2015

МИК КА (ГП 4): устранить нарушение требований проекта  860-2-1   ОВ1   по  установлению  регистров отопления    (регистры   отопления    установлены    в соответствии планового и высотного положения по месту,   где   должно   быть   выполнено   перильное ограждение смотровых площадок, а по высоте нет соответствия  требованиям  проекта  по  положению регистров от поверхности смотровых площадок). В соответствии проекта регистры отопления должны находиться     с     креплением     у     ограждающих конструкций).

№ 196 от 10.11.2015

со сроком исполнения до 20.11.2015

КОС (ГП 25). Производственный корпус с АБК (ГП-25.2). Ведутся общестроительные работы по АБК, монтаж технологического оборудования в производственном корпусе. 

 Не     представлены    паспорта    на    монтируемое технологическое оборудование - представить. 1)в целях подтверждения соответствия монтируемого технологического оборудования проекту, представить паспорта; 2)технологические  трубопроводы  предусмотреть  из коррозийно-стойких труб по ГОСТ 9941-81; 3)монтируемое оборудование крепить к фундаментам фланцами и крепежом из комплекта поставки; 4)в местах присоединения трубопроводов к насосам предусмотреть гибкие вставки; 5)крепление трубопроводов не оговоренные в рабочей документации  осуществить по месту по типовым сериям 3.903-10 выпуск 5; 5.900-7 выпуск 3, выпуск 8; 6)материал   настила   и   ступеней   должен   быть цельнооцинкованным; 7) крепление секций между собой и к закладным элементам блоков емкостей должно осуществляться болтовыми  соединениями,  входящими  в  комплект поставки.

№ 217 от 02.12.2015

со сроком исполнения до 10.12.2015

КОС (ГП 25). Производственный корпус с АБК (ГП-25.2). Не представлено согласование проектной организации по    монтажу   технологического    оборудования   -представить.

№ 225 от 14.12.2015

со сроком исполнения до 30.12.2015

МИК КА, РБ и КГЧ (ГП 4): выполнить расположение ламелей   (направляющих   пластин   потока  воздуха) соответственно    требованиям    забора    воздуха    -горизонтально.

№ 227 от 22.12.2015

со сроком исполнения до 30.12.2015

Метрологическая база (ГП-15). Ведутся   работы   по   устройству   монолитных   ж/б конструкций    выше    отм.    0,000.    В    нарушение нормативных документов по строительству, работы ведутся       без       предъявления       исполнительной документации на фундаменты и плиты перекрытия техподполья. По   блоку  №  3   не  представлена  исполнительная документация на устройство монолитной ж/б плиты убежища. Не     представлена     технологическая     карта     на бетонирование конструктивов в зимних условиях - представить     исполнительную    документацию     и технологическую карту.

№ 228 от 22.12.2015

со сроком исполнения до 31.12.2015

Комплекс       очистных       сооружений       (ГП-25). Производственный корпус с АБК (ГП-25.2). При     монтаже     технологического     оборудования допущены     нижеперечисленные     отклонения     от проектной документации - устранить: 1)емкостное оборудование выполнено из «черного» металла   (проектом    предусмотрено    нержавеющее железо); 2) мощность воздуходувов - 7,5  квт.  (Проектная мощность   -   22   квт.)   Марки   воздуходувов   не соответствуют проектным. 3) в монтаже используются ершовые загрузки. (В проекте загрузки «Био-блок-200»). 4)внутреннее     заполнение     фильтров     ФОВ     -антрацитовая   загрузка.   (В   проекте   окислительно-сорбционная загрузка).

 

5)марка насоса подачи осадка на фильтр-пресс не соответствует проектной. 6) марка установки приготовления и дозирования флокулянта не соответствует проектной. 7)марка   установки   приготовления   и   дозирования коагулянта не соответствует проектной. 8)марка установки технического водоснабжения не соответствует проектной. 9)марка   погружного   эжектора   не   соответствует проектной. 10)марка расходомера не соответствует проектной.

№ 3 от 13.01.2016

со сроком исполнения до 25.01.2016

МИК КА, РБ и КГЧ (СИЧ): устранить нарушение требований проекта № 860-2-1-4 КЖ 5 листы № 8, № 9: 1) На        участках        прохождения        через деформационные   швы   зазоры   в   стыках   рельс освободить от бетона на всю высоту рельса; 2) В желобе между рельсом и контруголком убрать наплывы неубранного бетона, мусора; 3) При прохождении уголка контррельса через деформационные   швы   обеспечить   зазор   (разрыв контррельса); 4) На   концевых   участках   рельсовых    путей выполнить упоры.

№ 20 от 15.02.2016

со сроком исполнения до 20.02.2016

Котельная (ГП 19.1) 1)не предоставлены общий и специальные журналы работ (РД 11-05-2007) - представить; 2) не внесены изменения в проектную документацию -внести изменения; 3) не предоставлен ППР на устройство свайного фундамента   (п. 8.1   государственного   контракта)   -предоставить; 4) не   проверена   несущая   способность   свай   по результатам динамических испытаний (СНиП П-Б.5- 67 п.6) - проверить и представить заключение; 5) при    производстве    работ    по    устройству металлического ростверка нарушены требования СП 70.13330.2012 - устранить следующие нарушения: -в нарушение требований п. 10.1.1 не предоставлен документ о специальном сварочном образовании на руководителя сварочных работ; -в нарушение требований п. 10.1.2 не предоставлен проект производства сварочных работ на устройство ростверка; -в нарушение требований п. 10.1.3 не предоставлены документы на рабочих-сварщиков, подтверждающие право выполнения сварочных работ;

 

-в нарушение требований п. 10.1.4 до начала сварочных работ не проводилась сварка и испытание пробных (допускных) образцов; -в нарушение требований п. 10.4 не предоставлены документы, подтверждающие выполнение контроля качества сварных соединений. 6)В   нарушение   требования   СП   70.13330.2012   и государственного контракта п.8.1 не предоставлен ПНР на монтаж дымовых труб - предоставить; 7)При монтаже дымовых труб нарушены требования СП 70.13330.2012 - устранить следующие нарушения: - на динамометрические ключи, предназначенные для натяжения и контроля натяжения не предоставлен паспорт с отметкой метрологической лаборатории о проведении поверки; не     предоставлены     результаты     тарировки динамометрических ключей, заносимые в «Журнал тарировки ключей»; - не предоставлен «Журнал выполнения соединений на болтах с контролируемым натяжением»; - на   стыках   отсутствует   клеймо   бригадира   и ответственного лица. 8)   В   нарушение   требования   СП   70.13330.2012, государственного контракта п. 8.1 и инструкции по монтажу котельной не предоставлен ППР на монтаж блоков котельной - предоставить; 9)При монтаже БМК допущены нарушения требований рабочей документации шифр 500.12: сорваны фасонные элементы;  не скреплены между собой верхние и нижние блок-модули; не везде установлены приборы КИП; в некоторых местах не качественно выполнена антикоррозионная    обработка    трубопроводов;    на кабелях ввода в щиты управления отсутствуют бирки; в местах   примыкания   перегородок   не   установлены нащельники;   не   полностью   выполнено   крепление трубопроводов к поддерживающим конструкциям, все дефлекторы зашиты   с внутренней стороны кусками ДВП; не расключены эл.привода жалюзийных решеток; в    пожарных    щитах    отсутствуют    наконечники пожарного ствола; не убран строительный мусор из котельной - устранить.

№     22     от 25.02.2016

со           сроком исполнения 15.03.2016

МИК РН (ГШ): выполнить   монтаж   (внутренних)   ограждений проходных площадок и лестниц в осях 3-1/-Я/2, 3-11-Е/1-И в отм. (-0,150)-(+26.000). (3-178-2 КМ Изм.З лис. 65,66); - выполнить монтаж элементов площадки по оси 3-11/С на отм. (+5,600) - (+13.800). (3-178-2 КМ Изм. 3 лис.36,

 

37 узел 1); - выполнить монтаж элементов по оси 3 на отм. (+5,600) - (+13.800). (3-178-2 КМ Изм. 3 лис.19 разрез 3- 3); - установить заглушки по тормозному настилу по оси 3-11 на отм. +26,000. (3-178-2 КМ Изм.З лис. 13 деталь А); - выполнить ограждения ОГ-1 в помещениях согласно рабочей документации 860/2-1-1 - АР-3, АР-4, АР-5; - выполнить в межколонном пространстве бетонные площадки 815 (1200x2200) в осях М-И/11 и Ю-Ф/11. (860/2-1-1-АС-6 лис. 13,14).

№ 24 от 29.02.2016

со сроком исполнения до 30.03.2016

Склад блоков РН (ГП 2): очистить   проходные   рабочие   отверстия   труб диаметром      325      мм.,     системы     оборотного водоснабжения В7 для отвода воды из каналов в осях А-Б-2/1 -4/1; - смонтировать трубы ТР-1 в осях А-Б - 2/1 - 4/1 (для отвода воды с рельсового пути) согласно проекта 860/2-1-2КЖ изм. 1, л.5; - установить балку 18Б1 для опирания перегородки в местах проходах каналов ЭМ, в осях Г-В/20 - 3-4, согласно проекта 860/2 - 1-2АР изм. 4, л. 5;8.

№ 27 от 02.03.2016

со сроком исполнения до 05.03.2016

Тепловые сети 1)не предоставлены общий и специальные журналы работ (РД 11-05-2007) - представить; 2)в  нарушение  требований  рабочей  документации 860/2- 1/КЖ лист 1 п.7 общих указаний, выполнено устройство   фундаментов   опор   надземной   части тепловой     сети     без     утверждения     проектной организацией принятых конструкций фундаментов или внесения корректировки в проектную документацию по материалам освидетельствования грунтов - утвердить; 3) не внесены изменения в рабочую документацию, обусловленные инициативой генерального подрядчика по   замене   оборудования,   материалов,   изменению расстановки  оборудования,  технологии  выполнения строительных работ, а также устранением дефектов, допущенных при строительстве - внести изменения; 4)не    выполнен    монтаж    системы    оперативного дистанционного контроля за состоянием изоляционного слоя трубопроводов - выполнить; 5)не установлены индикаторы коррозии в тепловых камерах УТ1, УТ5, УТЮ, УТ12 - установить; 6)люки на тепловых узлах смонтированы с занижением на 15-20 см - перемонтировать; 7)в   нарушение   требований   СНиП   3.05.03-85,   в

 

представленных актах о проведении испытаний трубопровдов на прочность и герметичность (по форме СНиП 3.05.03-85 прил.2) отсутствует подпись представителя эксплуатационной организации -подписать; 8)в нарушение требований СНиП 3.05.03-85, в представленных актах о проведении промывки (продувки) трубопроводов (по форме СНиП 3.-05.03-085 прил.З) отсутствует подпись представителя эксплуатационной организации - подписать; 9)не предоставлены акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (по форме РД 11-02-2006, прил.5) - предоставить; 10)не предоставлен проект производства работ на устройство тепловой сети - предоставить; 11) не предоставлено удостоверение о качестве монтажа трубопровода (п. 196 ФНП) - предоставить; 12)не предоставлены паспорта тепловой сети и тепловых пунктов с результатами технических освидетельствований (п.362, п.364 ФНП) -предоставить; 13)не предоставлена программа (технологическая карта) проведения испытаний тепловых сетей на прочность и плотность (гидростатического и манометрического испытания на герметичность), утвержденная техническим руководителем организации и согласованная с эксплуатирующей организацией (п. 103 ФНП) - предоставить; 14)не предоставлена программа (технологическая карта) промывки или продувки тепловых сетей, утвержденная техническим руководителем организации и согласованная с эксплуатирующей организацией (п. 103 ФНП) - предоставить; 15)не предоставлена программа прогрева и пуска в работу тепловой сети, утвержденная техническим руководителем организации и согласованная с эксплуатирующей организацией (п. 103,199 ФНП) -предоставить; 16)в нарушение требований СП 124.13330.2012 приложение Е, не выполнена проверка соответствия показателей качества сетевой воды тепловых сетей требованиям, указанных в таблице Е. 1. - проверить.

№     30     от 03.03.2016

со сроком исполнения до 30.03.2016

МИК КА, РБ и КГЧ (СИЧ) (ГП 4): устранить нарушение целостности крепления элементов перильного заполнения ходовых мостиков; выполнить перильное ограждение на всех участках на ходовых мостиках

№     37     от29.03.2016

со сроком исполнения     до

МИК РН (ГП1):

15.04.2016

-утеплить фасад минераловатными плитами «ВЕНТИ БАТТС» в районе установки оконных блоков; -утеплить    зоны    крепления    гидроизолирующего полотна; - установить крышки водоотвода, нижние крышки ригеля (860/2-1-1-АР-1 изм. 2 лист 16 узлы № 6,7,8; 860/2-ДСС. 724-Р\^50+Н1-КМузел 1).

№ 68 от 16.05.2016

со сроком исполнения до 01.06.2016

КПП (ГП21.1). 1)устройство кровельного покрытия из ПВХмембраны выполнено  с  браком,   с  нарушением  технологии, требований проектной и нормативной документации -переделать; 2)не        выполнено        требуемое        закрепление водоизоляционного ковра к несущим конструкциям покрытия - выполнить; 3)не  обеспечена  герметичность  водоизоляционного ковра,    в    результате    чего    нижележащие    слои кровельного   пирога   подвергнуты   намоканию   -обеспечить герметичность.

№ 69 от 16.05.2016

со сроком исполнения до 01.06.2016

КПП (ГП21.3). 1)устройство кровельного покрытия из ПВХмембраны выполнено  с  браком,   с  нарушением  технологии, требований проектной и нормативной документации -переделать; 2)не        выполнено       требуемое        закрепление водоизоляционного ковра к несущим конструкциям покрытия - выполнить; 3)не  обеспечена  герметичность  водоизоляционного ковра,    в   результате   чего    нижележащие    слои кровельного   пирога   подвергнуты   намоканию обеспечить герметичность.

№ 70 от 16.05.2016

со сроком исполнения до 15.06.2016

Карпом (ГП 22). 1)устройство кровельного покрытия из ПВХмембраны выполнено  с  браком,   с  нарушением  технологии, требований проектной и нормативной документации -переделать; 2)не        выполнено       требуемое        закрепление водоизоляционного ковра к несущим конструкциям покрытия - выполнить; 3)не  обеспечена  герметичность  водоизоляционного ковра,    в    результате   чего    нижележащие    слои кровельного   пирога   подвергнуты   намоканию   -обеспечить герметичность; 4)полы в помещении 122 выполнены с нарушением требований проектной документации, в конструкции отсутствует гидроизоляция (2 слоя «гидроизола») и утеплитель «пеноплекс» - переделать.

№ 84 от 07.06.2016

со сроком исполнения до 14.04.2016

Внутриплощадочная АД. 1. На ПК 0+50-ПК 1+50 АД ТК 4 произошел провал   земляного   полотна,   дорожной   одежды, бордютного камня, разрушен тротуар - устранить; 2. Застой воды на проезжей части АД ТК 2, АД ТК4 (не работает ливневая канализация) - устранить.

№ 85 от 10.06.2016

со сроком исполнения до 30.06.2016

МИК КА (ГП 4) СИЧ: заменить деформированные сэндвич-панели

№ 91 от 04.07.2016

со сроком исполнения до 20.07.2016

Метрологическая     база     (ГП      15.1).     Здание Метрологической базы с ГО. На территории производства работ: 1 Отсутствуют ограждения строительной площадки -установить ограждения; 2)наличие большого количества строительного мусора - убрать мусор; 3)на строительной площадке отсутствуют средства пожаротушения     (огнетушители)     -     установить огнетушители; 4)складирование материалов на строительной площадке ведется не надлежащим образом (на грунт без наличия деревянных прокладок) - осуществить складирование с наличием деревянных прокладок.

№ 90 от 04.07.2016

со сроком исполнения до 20.07.2016

Метрологическая база (ГП 15.2 - 15.3). Здание гаража на 7 автомобилей, склад ЛВЖ, ГЖ, ЛКМ и химикатов. На территории производства работ: 1 Отсутствуют ограждения строительной площадки -установить ограждения; 2)наличие большого количества строительного мусора - убрать мусор; 3)на строительной площадке отсутствуют средства пожаротушения     (огнетушители)     -     установить огнетушители; 4)складирование материалов на строительной площадке ведется не надлежащим образом (на грунт без наличия деревянных прокладок) - осуществить складирование с наличием деревянных прокладок.

№ 95 от 08.07.2016

со сроком исполнения до 31.07.2016

МИК КА, РБ и КГЧ (ГП 4): осуществить работы по устройству кровли на АПЧ и СИЧ. Провести работы по устройству кровли на АПЧ и СИЧ. На кровле СИЧ обеспечить: А)сохранение верхней части сэндвич-панелей; Б) положение водосливных воронок в нижних отметках слива;

 

В) слив с мест застоя воды; Г)   восстановление   крепления   теплоизоляции   и мембраны кровли. На кровле АПЧ обеспечить: А) на плитах покрытия лестничных клеток удаление воды от атмосферных осадков, строительного мусора; Б) удаление строительного мусора с мембраны кровли, укладки строительных материалов и конструкций на прокладки.

№ 96 от 12.07.2016

со сроком исполнения до 25.07.2016

Комплекс котельной № 2 (ГП 19). 1)сливная эстакада не оборудована - оборудовать; 2)  насосная станция не обвязана,  не установлено оборудование, кровля не завершена - устранить; 3)топливопровод не смонтирован - смонтировать; 4)резервуарный парк: монтаж не завершен - завершить; 5)гидроиспытания не проведены - провести; 6)размыт грунт под емкостями - устранить.

№ 109 от 26.07.2016

со сроком исполнения до 20.08.2016

Метрологическая база (ГП 15.1). 1)не устранены замечания акта проверки № 22 от 15.02.2016,  выданного  начальником  отделения   119 ГАСН - устранить замечания;

№ 110 от 26.07.2016

со сроком исполнения до 20.08.2016

Гараж (ГП 15.2): 1)не устранены замечания акта проверки № 22 от 15.02.2016 г. 119 отдела ГАСН - устранить; 2)  нарушена технология  нанесения  огнезащитного состава   (инструкция   №    103-И-У-М    ООО   ТД «Ассоциация Крилак») - устранить; 3)теплоизоляция       перегородок       С112,СПЗ,С382 выполнена не проектным  материалом  (фактически изделиями    теплоизоляционными    из    стеклянного волокна ISOVER,  вместо проектного материала -плиты минераловатные «Туф Баттс С» ROCK WOOL) -заменить теплоизоляцию.

№ 108 от 26.07.2016

со сроком исполнения до 20.08.2016

Склад ЛВЖ, ЛКМ (гп 15.3). 1)не устранены замечания акта проверки № 22 от 15.02.2016 г. 119 отдела ГАСН - устранить.

№ 129 от 25.08.2016

со сроком исполнения до 10.09.2016

Гараж (ГП 15.2): 1)работы ведутся по комплекту чертежей КМД по устройству НФС «КРАСПАН» 29/14-КИ 29.04.14, не согласованным    с    генеральным    подрядчиком    -переделать; 2)не    выдержан    температурный    разрыв    между

 

вертикальными направляющими фасадных кассет КраспанКомпозит (см.узел Б лист 21) - переделать; 3)крепление вертикальных направляющих к кронштейну стальными коррозионно-стойкими заклепками выполнено не по проекту (см. разрез 4-4 лист 22) - переделать.

№ 130 от 25.08.2016

со сроком исполнения до 10.09.2016

Склад ЛВЖ (ГП 15.3). 1)работы ведутся по комплекту чертежей КМД по устройству НФС «КРАСЛАН» 31/14-КИ 29.04.14, не согласованным с генеральным подрядчиком -переделать; 2)не выдержан температурный разрыв между вертикальными направляющими фасадных кассет КраспанКомпозит (см.узел Б лист 16) - переделать; 3)крепление вертикальных направляющих к кронштейну стальными коррозионно-стойкими заклепками выполнено не по проекту (см. разрез 3-3 лист 17) - переделать.

№ 137 от 09.09.2016

со сроком исполнения до 30.09.2016

ЗНС, производственная часть: устранить место застоя воды на кровле (некачественно выполненная разуклонка) и проверить кровельный ковер из мембраны на герметичность (в помещениях № 1074, № 1076 Производственной части на полах скопления воды после дождевых осадков), выполнены работы по укладке геотекстиля и щебня - переделать работы

№ 153 от 05.10.2016

со сроком исполнения до 20.10.2016

МИК КА, РБ и КГЧ (ГП 4): заменить разбитые стекла, остеклить полностью.

№ 154 от 06.10.2016

со сроком исполнения до 12.10.2016

Благоустройство. Выполнен монтаж решеток дождеприемников, крышки люков колодцев по проездам с нарушением требований ГОСТ Р 50597-93 п.3.1.10 - перемонтировать.

№ 161 от 12.10.2016

со сроком исполнения до 30.10.2016

Здание Метрологической базы с ГО (ГП-15.1). 1)в результате проводимых работ осях А-Ж/15-21, выше отм. - 2500 в ряде мест нарушен утепляющий слой (слои пеноплекса проплавлены либо смяты, в пазах слоев утеплителя наличие строительного мусора) - восстановить утепляющий слой; 2)полотна мембраны PLANTER geo, по предусмотренному краю между собой не сварены, мембрана имеет многочисленные разрывы - заменить, сварить; 3)защита гидроизоляционного слоя от грунта обратной засыпки в осях Б-И/15 выполнена непроектным материалом (листами ДСП), согласно проекта 860/2-1-15.1-АР изм.2 мембрана PLANTER geo - выполнить надлежащим образом

№ 165 от 13.10.2016

со сроком исполнения до 15.11.2016

ФИО5, РБ и КГЧ (ГП 4): в соответствии с конструкцией наливных антистатических полов «Sikafloor-262 AS N» и технологией их устройства до устройства гладкого финишного слоя полов выполнить работы по укладке самоклеящейся токопроводящей медной ленты, токоотводящих элементов и работы по устройству промежуточного слоя из эпоксидного состава с электропроводным графитовым наполнителем.

№ 178 от 01.11.2016

со сроком исполнения до 17.11.2016

МИК РН (ГП1): - устранить нарушения требований проекта № 17/14-КИ 04.03.2014 «Устройства навесной фасадной системы Краспан» лист 20 фрагмент 5, согласно л.42 установить неподвижные кронштейны НК 400.Ц.2Р вместо подвижных кронштейнов НК Н 210.Ц. устранить нарушения требований пожарной безопасности пр. № 17/14-КИ 04.03.2014 лист.5: над эвакуационными выходами установить навесы (козырьки) более 2.0 метров.

№ 186 от 17.11.2016

со сроком исполнения до 02.12.2016

Инженерный корпус (ГП 5): оформить проектно-сметную документацию для работ по монтажу навесной фасадной системы

№ 209 от 16.12.2016

со сроком исполнения до 30.12.2016

Метрологическая база с лабораторией экологического мониторинга, лабораторией по проверке диэлектрических защитных средств. Гараж на 7 спецавтомобилей (ГП 15.2). В ходе работ по устройству внутриплощадочных сетей водоотведения К1" от кол. 117 до кол. 119 (вдоль осей Г/1-9) был нарушен защитный слой теплоизоляции и гидроизоляции (мембрана Planter Standart) стены цоколя - восстановить.

№ 7 от 25.01.2017

со сроком исполнения до 10.02.2017

Инженерный корпус (ГП 5): производить работы по устройству фасадной системы с освидетельствованием скрытых работ и оформлением Акта освидетельствования скрытых работ согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства», а также устранить отклонения от рабочей документации.

№ 6 от 25.01.2017

со сроком исполнения до 10.02.2017

Комплекс сооружений пожарного депо (ГП 17). Работы по устройству напольного покрытия «Sikafloor» выполнены без освидетельствования подготовленного основания и оформления Актов освидетельствования скрытых работ нарушение СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Также работы выполнялись по температуре окружающей среды и отдельных поверхностей ниже требуемой в СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные работы», в следствии чего работы выполнены с нарушением технологии - переделать работы в соответствии с установленными          требованиями,          провести 

 

освидетельствование   подготовленного   основания   и оформить Акты освидетельствования скрытых работ..

№ 22 от 10.03.2017

со сроком исполнения до 25.03.2017

Склад блоков РН «Союз-2» (ГП2). Устройство плиты покрытия в осях В-Б/1; 3-2/1 на высотной   отметке   +19,880   до   +   20,000   было произведено без освидетельствования скрытых работ и оформления акта освидетельствования скрытых работ на предыдущие работ в нарушение требования СП 48.13330.2011    «Организация   строительства»,    что привело к ее прогибу более 15 см и приведет к ее полному    разрушению    и    нарушению    техники безопасности -   переделать работы в соответствии с установленными          требованиями,          провести освидетельствование   подготовленного  основания   и оформить Акты освидетельствования скрытых работ.

№ 27 от 16.03.2017

со сроком исполнения до 31.03.2017

Здание метрологической базы с ГО (ГП 15.1). 1)монтаж    НФС    «КРАСПАН»    выполняется    по несогласованному    КМД    30/14-КИ    29.04.14    с генподрядчиком; 2) раскладка фасадных кассет по блоку № 2 не соответствует   (КМД   30/14-КИ   29.04.14   лист  21), выполняется по РД860/2-15.1-АР изм.2 лист 26; 3)откосы оконных и дверных проемов по блоку 1,2 выполнены из непроектного материала, нарушение требований пожарной безопасности (см.общие данные КМД 30/14-КИ 29.04.14 лист № 3); 4)перед монтажом НФС  «КРАСПАН» обнаружены места между монолитным ригелем  и  кладкой  из керамзитобетонных блоков без наличия монтажной пены (вразрез с проектом 860/2-15.1-КР1,КР2,КРЗ); 5)при обследовании поверхности разуклонки кровли по 1,2   блоку   обнаружены   многочисленные   дефекты (раковины, наплывы). Требования - устранить нарушения, переделать

№ 28 от 17.03.2017

со сроком исполнения до 01.04.2017

Инженерный корпус (ГП 5). Работы     выполняются     без     освидетельствования ответственных   конструкций   и   оформления   актов ответственных конструкций (нарушение требований СП   48.13330.2011   «Организация   строительства»   -провести освидетельствование и оформить акты

№ 33 от 29.03.2017

со сроком исполнения до 13.04.2017

Склад блоков РН «Союз 2» (ГП 2) Наливное   покрытие   «Betonol   196»   выполнено   с нарушением технологии, а именно: 1)наливное  покрытие  отходит  от  основания,   что свидетельствует о недостаточной адгезии; 2)на наливном покрытии появились выпуклости в виде пузырей,  что  свидетельствует о неподготовленном

 

основании. Требования - Переделать наливное покрытие

№      39      от 25.04.2017

 

Инженерный комплекс (ГП 5) Монтаж элементов металлоконструкций фонаря в осях Д-В; 2-4 на высотной отметке +9,300 выполнен в нарушение требований проекта 860/2-1-5-кж14 лист 6. Балки Б 1 выполнены сварные из двух кусков без согласования с проектным институтом, смонтированы и по ним ведутся работы по устройству светового фонаря - переделать с соблюдением требований

№ 201

От 11.11.2015г

Метрологиче.база (ГП 15.1 здание) – не представлена исполнительная документация по устройству свайных фундаментов второго блока песчаной и бетонной подготовок ростверка, гидроизоляции бетонной подготовки – представить.

Представить исполнительную документацию на устройство монолитного ж/д ростверка первого блока; представить общий и специальные журналы, зарегистрированные в ГАСН

3. По государственному контракту от 21.12.2012 № 873-ИВ015/12 «Создание объектов системы безопасности космодрома» - 

№     93     от 07.07.2016

со сроком исполнения до 12.07.2016

Автомобильная     дорога     охраны     технического комплекса. 1)на ПК 2+00 - ПК 3+00 произошел размыв земляного полотна и дорожной одежды - устранить; 2)ПК 1+00 - ПК 4+00 разрушен водоотводной лоток -восстановить водоотводной лоток.

4. По государственному контракту от 22.12.2011 № 873-ИВ005/11 «Создание промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома» I этап 

№     53     от 29.05.2015

со сроком исполнения до 15.07.2015

Ограждение высотой 2.5 (ГП 16). Устранить повреждения ограждения.

№     66     от 17.06.2015

со сроком исполнения до 25.06.2015

Станция биологической очистки сточных вод (ГП 21, 22). Осуществить качественную гидроизоляцию кровли.

№     82     от 06.07.2015

со сроком исполнения до 10.07.2015

Административное здание (ГП-30). В   ходе   осмотра   вновь   выявлены   подтопления подвальных   помещений.   Вода   поступает   с   пола приямков ОПЗ, ОП4 - устранить.

№     95     от 22.07.2015

со сроком исполнения до 30.07.2015

СТО (ГП 2-3). Кровля и дождевая канализация К2 сооружения не до конца выполнена и обильные осадки попадают внутрь здания, которые приводят в негодность конструкции, вентиляционное оборудование, отделки и огнезащиту здания - выполнить работы в соответствии с проектом.

№     124     от 26.08.2015

со сроком исполнения до 04.09.2015

Склад строительных материалов (ГП 1-3). Наблюдаются   протечки   на   стенах   и   полах   в помещениях,      связанные      с      некачественным выполнением гидроизоляции кровли и сетей дождевой канализации - выполнить работы в соответствии с

 

проектом. Выявлены   протечки   кровли   в   местах   монтажа водосточных   воронок,    нарушение    герметичности стыков  труб  ливневой  канализации  -  устранить, выполнить работы в соответствии с проектом Обнаружены   многочисленные   порывы   полимерной мембраны - устранить. Внутри здания очень высокая влажность, в связи с чем в    негодность    пришла    огнезащита    колонн восстановить. Не приняты меры по просушке здания, не работает вентиляция и закрыты ворота - просушить, устранить.

№ 138 от 18.09.2015

со сроком исполнения до 01.10.2015

Склад строительных материалов (ГП 1-3). На световых фонарях кровли выявлены протечки, плохая герметизация швов, нарушение герметичности стыков труб ливневой канализации - переделать. Внутри здания очень высокая влажность, не приняты меры по просушке здания, не работает вентиляция и закрыты ворота, в связи с чем в негодность пришла огнезащита    колонн    -    просушить,    устранить, восстановить. Появились   грибковые   образования   на   стенах   и потолках   в   помещениях,   многочисленные   места намокания подвесных потолков типа «Армстронг» -устранить, переделать.

№ 12 от 22.01.2016

со сроком исполнения до 01.03.2016

Автотранспортное хозяйство (ГП-2.1). При   наступлении   отрицательных   температур   в э/с/бетоном силовом полу начали появляться новые трещины - переделать

№ 10 от 22.01.2016

со сроком исполнения до 01.03.2016

Административное здание (ГП-30). Работы выполнены не качественно. При визуальном осмотре всей поверхности пола и мест примыканий выявлены недостатки. На основании под покрытием пола имеются вздутия и глубокие трещины. В стыках покрытия из ковровых плит и на самом покрытии заметны следы клея. На поверхности покрытия из ковролина  имеются  вздутия   (воздушные   пузыри). Видны    разрушения    поверхности    покрытия    из керамогранитных плит (сколы, трещины, выбоины), неровности   плоскости,   выступы,   не   качественное заполнение швов. Горизонтальные и вертикальные швы не   однотипны   и   не   равномерны   по   ширине. Пространство   между   стеной   и   облицовкой   не полностью заполнено раствором. В некоторых участках отсутствует    сцепление    плитки    с    подлежащим основанием. Плинтус не плотно прилегает к стене и

 

полу. Наблюдаются зазоры и щели между плинтусами и покрытием    пола    или    плинтусами    и    стенами (перегородками). Соединение плинтусов по длине и стыковка внешних  и внутренних углов плинтусов выполнены не верно. Крепежные элементы плинтуса не заделаны - устранить все нарушения.

№ 11 от 22.01.2016

со сроком исполнения до 22.02.2016

Административное здание (ГП-30). Работы выполнены не качественно. На поверхности стен   выявлены   местные   разрушения   штукатурки, фактурного и окрасочного слоев (трещины, выбоины). Также на окрашенной поверхности стен видны пятна, брызги, просвечивания лежащих ниже слоев, следы кисти   и   валика.   Обнаружены   трещины   в   межкомнатных перегородках из пазогребневых плит. Трубы систем отопления окрашены не равномерно, заметны просветы и подтеки краски. На лицевой поверхности подоконных досок имеются видимые повреждения. Наблюдаются    зазоры    в     местах     примыканий подоконных досок с оконными блоками - устранить все нарушения.

№ 47 от 06.04.2016

со сроком исполнения до 15.04.2016

Пож.депо (ГП 23-1), Склад огнетушащих средств (ГП 23-2). 1)Пожарное депо на 6 авто (ГП-23-1). Наблюдаются следы    протечек,    связанные    с    некачественным выполнением гидроизоляции кровли.  В  некоторых помещениях выявлены водные течи на стенах, полах, потолках,  в  связи  с  чем   в  негодность  пришли выполненные работы по отделке помещений. Также видны    протечки    кровли    в    местах    монтажа вентиляционных коробок - переделать. 2)Склад огнетушащих средств (ГП-23-2). Не смонтированы дефлектора на кровле, что приводит к затоплению полов внутри здания - смонтировать.

№ 62 от 21.04.2016

со сроком исполнения до 01.06.2016

Пож. Депо (ГП 23-1). - Плоскость поверхности смонтированного подвесного потолка типа «Армстронг», облицованная плитами, имеет  неровности.  Наблюдаются  перепады  высот, зазоры,   повреждения   потолочного   профиля.   На поверхности плит потолка заметны загрязнения, пятна, царапины, вмятины и другие видимые повреждения -переделать. - При   наступлении   отрицательных  температур   в бетонном силовом полу появились новые трещины. В некоторых участках видны разрушения (крошение) бетона.  Также на поверхности покрытия имеются сколы,   выбоины.   В   некоторых   местах   требуется шлифовка бетона- переделать. На поверхности покрытия из линолиума заметны загрязнения, пятна, прожженные места, царапины. В некоторых помещениях наблюдаются открытые швы между смежными кромками полотнищ линолиума, не плотно приклеенные  стыковочные швы, волны, вздутия, края линолиума, не спрятанные под плинтус. Уложенный линолиум на подоснове не соответствует требованиям проектной документации 943-ИВ 001/11/0795/6-23-1-АР из.1 лист 9 (про проекту линолиум поливинилхлоридных безосновный 5мм) – переделать.  Видны разрушения поверхности покрытия из керамогранитных, керамических плит (сколы, выбоины, трещины), неровности плоскости, выступы, пятна на плитах,некачественное заполнение швов. Горизонтальные  и вертикальные швы не однотипны и неравномерны по ширине. В некоторых участках отсутствует сцепление плитки с подлежащим основанием. Также видны  разнотонности плит в пределах одного помещения – переделать. В покрытии полов из деревянных реек образовались щели, предположительно в связи с  усыханием. Напольное  резиновое покрытие полов выполнено с нарушением  проектной документации – переделать в соответствии с проектом.  В некоторых участках напольный  деревянный и  пластиковый плинтус со встроенным кабель-каналом не плотно прилегает к стене или полу. Наблюдаются зазоры и щели  между плинтусами и покрытием пола или плинтусами и стенами (перегородками). В некоторых  помещениях фурнитура (уголки, заглушки, соединительные муфты) не подобрана  под цвет плинтуса. Имеются некачественно прикрепленные участки  плинтуса и  фурнитуры – устранить. В некоторых участках отсутствует  сцепление керамического плинтуса с основанием – устранить. На поверхностях стен, окрашенных водоэмульсионной  или эмалевой красками, выявлены местные разрушения штукатурки, фактурного и  окрасочного слоев (трещины, выбоины, царапины вздутия, отслоение). На окрашенных поверхностях стен видны загрязнения, пятна, брызги, просвечивания лежащих ниже слоев. Видны  местные исправления, которые выделяются на общем фоне. На окрашенных поверхностях стен  заметны следы намокания, вздутия, пятна с затечными  контурами, образовавшиеся в результате неоднократного затопления здания, в связи с некачественно выполненной  гидроизоляцией кровли. Имеются  плохо закрепленные кабель-каналы – переделать. На стенах облицованных керамической плиткой заметны  разнотонности плит в пределах одного помещения. Наблюдаются  пропуски в заполнении швов. Горизонтальные и вертикальные швы не однотипны и не равномерны по ширине. Видны разрушения раствора в швах. Декоративные  внешние  уголки приклеены не плотно. В отдельных местах наблюдается разрушение, отслоение облицовки – переделать. Трубы систем отопления окрашены неравномерно, заметны  просветы и подтеки краски. В некоторых участках  необходимо заделать пространство в местах сопряжений отделочных покрытий  с трубами отопления. Выявлены протечки в системе отопления -  устранить. В некоторых помещениях повреждены  стеклопакеты (разбиты или имеют трещины). На поверхности дверных блоков наблюдаются пятна, царапины и следы ржавчины – устранить.

№ 63 от 26.04.2016

со сроком исполнения до 30.05.2016

Наружные сети (Kl, К2, Tl, Т2). Во многих местах колодцы дождевой канализации К2 забиты льдом или песком - очистить. Бытовая канализация К1 от СТО (ГП 2-3) до станции биологической очистки сточных вод (ГП 21) при испытаниях  в  августе  2015  года  не  работала -восстановить работу. Некоторые   колодцы   не   закрыты   люками   и   не ограждены - закрыть люками и оградить. Тепловые сети в некоторых участках находятся в подвешенном    состоянии    и    не    опираются    на фундаменты (бетонные блоки вышли из проектного положения  и  трубы  не  опираются  на  опоры)  - устранить.

№ 136 от 05.09.2016

со сроком исполнения до 17.09.2016

Пожарное депо на 6 автомобилей ГП 23-1, 23-2. Нарушена  гидроизоляция   кровли   здания   и   вода попадает в помещения №№ 222, 238, 231, холл второго этажа. Во многих оконных проемах стеклопакеты разбиты или имеют трещины. Разрушена отмостка и вода попадает на фундамент здания - переделать, заменить.

№ 139 от 05.09.2016

со сроком исполнения     до

Административное здание (ГП-30). Переделать ливневую канализацию.

26.09.26г

5. По государственному контракту от 21.12.2011 № 873-ИВ014/12 «Строительство водозаборных сооружений объектов космодрома на площадках 2,3*4,9 (1-я очередь) - 

№     198     от 01.12.2016

со сроком исполнения до 05.12.2016

ВЗС № 3. Подземные павильоны над артскважинами (ГП3.1,ГП3.2). Работы   по   устройству   павильонов   (армирование, бетонирование фундаментов и все последующие) не были предъявлены строительному геодезическому и техническому надзору - предъявить.

№     199     от 01.12.2016

со сроком исполнения до 05.12.2016

ВЗС № 3. Станция водоподготовки с насосной станцией 2-го подъема (ГП 1). Утеплитель  цоколя  открыт  и  подвержен  влиянию атмосферных осадков - закрыть. Отсутствуют нащельники в окнах и стыках стеновых панелей - установить. Гидроизоляция,   а   также   утепление   фундамента нарушено - устранить.

№     200     от 01.12.2016

со сроком исполнения до 05.12.2016

ВЗС № 3. Станция водоподготовки с насосной станцией 2-го подъема (ГП 1). Провести     антикоррозионную     защиту     сварных соединений,    металлических    конструкций    здания станции    водоподготовки,     произвести    протяжку болтовых соединений.

№     94     от 07.07.2016

со сроком исполнения до 07.08.2016

ВЗС №5. Установить    временное    ограждение,     освещение строительной     площадки,     убрать     строительные материалы из котлована.

6. По государственному контракту от 01.06.2012 № 873-ИВ003/12 «Строительство автомобильных дорог космодрома (1-я очередь) II - этап» 

№     97     от 13.07.2016

со сроком исполнения до 17.07.2016

Автомобильная дорога к пиротехнической позиции. 1. МГТ   на   ПК   0+30   разрушено   бетонное укрепление русла на выходном оголовке трубы -устранить. 2. ПК 0+40 размыто основание под водосбросами на откосе насыпи - устранить.

№     167     от 14.10.2016

со сроком исполнения до 01.11.2016

Станция Промышленная 1 - Аэропортовый комплекс. Искусственные сооружения. МГТ   30+80   -   на   входном   оголовке   провал металлической гофрированной трубы на 23 сантиметра, на   выходном   оголовке   разрушено   укрепление   -устранить

7. По государственному контракту от 11.03.2013 № 873-ИВ002/13/217 «Строительство железных дорог космодрома (1-я очередь) II - этап» 

№     163     от 16.10.2015

со сроком исполнения до 26.10.2015

Ж/д   станция   Промышленная   1   -   аэропортный комплекс. Искусственные сооружения. МГТ   1+49   трещины   в   монолитном   укреплении входного оголовка, разрушено укрепление выходного оголовка - устранить; МГТ   5+36   трещины   в   монолитном   укреплении входного и выходного оголовков - устранить; МГТ   8+40   трещины   в   монолитном   укреплении входного оголовка, размыв укрепления русла на выходе трубы - устранить; МГТ 35+00 просадка трубы и земляного полотна над трубой, застой воды в теле трубы - устранить; МГТ   40+04   трещины   в   монолитном   укреплении входного и выходного оголовков - устранить; МГТ   50+83   трещины  в  монолитном   укреплении входного и выходного оголовков, не убран грунт на откосе насыпи у выходного оголовка - устранить; МГТ 72+31 труба заилена песком на 70№ (СПиП 3.06.04-91) - устранить.

№     100     от 18.07.2016

со сроком исполнения до 23.07.2016

Ж/д станция Промышленная 1 - Аэропорт МГТ 55+00. МГТ на ПК 55+00 разрушено укрепление откосов насыпи и русла, на входном и выходном оголовках вымыло несчетное основание - устранить.

Взыскать с  федерального  государственного унитарного  предприятия 

«Главное военно-строительное управление № 6»  в пользу федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома «Восточный»  расходы по уплате госпошлины в сумме  6 000 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                         Ж.А. Усенко