18/2018-36056(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6 http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-1229/2017

г.Чита

23 апреля 2018 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Перспектив" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) безвозмездно в течение 30 дней с момента  вступления судебного акта в законную силу устранить недостатки работ, выполненных  по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта  «Развязка в разных уровнях на пересечении автодороги Улан-Удэ-Забайкальск и  автодороги Чита-Смоленка - подъезд к федеральной автодороге Чита-Хабаровск (район  Каштака) № 5-ЭА/2015 от 10.06.2015 года а именно:  

1) на ПК 11+68 восстановить водоотводное сооружение в соответствии с  проектом (лист 28 рабочей документации 11-К/2011-СК1.3, выпуск 6):  

- очистить водоприемный колодец ДК-6 от мусора и наносов песка; 

- демонтировать блоки ФБС-24Х6ХЗ в количестве 3 штук;  

-установить водоотбойные блоки ВБ-1 (06x02x1) в количестве - 9 штук. Блоки  смонтировать с упором на кольцо дождеприемного колодца с омоноличиванием и  заделкой швов цементным раствором;  

- восстановить обочину и откос вокруг ограждения (из водоотбойных блоков ВБ- 1) с уплотнением земляного полотна и восстановлением травяного покрова для  укрепления откоса;  

- место сбора воды выполнить в соответствии с проектом: по касательной с  небольшой треугольной площади (лист 28 рабочей документации 11-К/2011-СК.1.3,  выпуск 6).  

2) на участке автодороги от ПК 11+91 до ПК 12+68 (правый боковой проезд)  заменить некачественные бордюрные камни БР-300Х30Х18 в количестве 12 штук (36  погонных метров) на новые бордюрные камни, не имеющие повреждений, с заделкой  швов цементным раствором, устройством цементно-бетонного основания,  восстановлением асфальтобетонного покрытия вдоль смонтированного бордюрного  камня.  

3) на участке автодороги ПК-11+00 - ПК 14+80 (с левой стороны)  протяженностью 380 метров, площадью восстановления - 1700 кв. м:  

- выполнить планировку обочины и откосов с уплотнением земляного полотна  (высотой откосов до 4,5 метров) и укреплением обочины посевом трав.  

- при планировании откосов на ПК 13+43 устранить последствия размыва  земляного полотна вокруг оголовка водопропускной трубы, засыпав место размыва  щебнем с уплотнением земляного полотна, отсыпать землей растительной с  укреплением обочины посевом травяного полотна. Привести ширину обочины в  соответствие с проектом (рабочая документация 11 -К/2011-СК. 1.3, лист 7).  

Истец вправе осуществить соответствующие действия за счет ответчика со  взысканием с него необходимых расходов в случае, если ответчик не исполнит  решение в течение установленного срока.  

Производство в части требований об обязании устранить недостатки работ,  выполненных по муниципальному контракту № 5-ЭА/2015 от 10.06.2015 года, а  именно: установить светильники наружного освещения ЖКУ 50N-150-001 в количестве  2 штук, ЖКУ 50N-250-001 в количестве 15 штук прекратить.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Перспектив»  в пользу комитета градостроительной политики администрации городского округа  «Город Чита» 45 840 руб. судебных издержек.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Перспектив" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Е.В. Гончарук