АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-7744/2017

г. Новосибирск

20 июня 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 июня 2017 года,

решение в полном объёме изготовлено 20 июня 2017 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Печуриной Ю.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тенёвой Т.В., рассмотрев  в судебном заседании дело  по иску общества с ограниченной ответственностью "НФТРЕЙД" (ОГРН 

<

***>), г Новосибирск к открытому акционерному обществу "Строительное управление № 9" (ОГРН 

<

***>), г Новосибирск 

 о взыскании 20 629 302 руб. 58 коп.,

 при участии в судебном заседании представителей:

 от истца: ФИО1, директор, протокол № 6 от 16.02.2017, паспорт,

 ФИО2, по доверенности от 04.04.2017, удостоверение,

от ответчика: не явился, извещен.

у с т а н о в и л:

Иск заявлен о взыскании задолженности  по договорам  на выполнение подрядных работ   года на общую сумму  20 629 302 руб. 58 коп.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, извещенный о месте и времени рассмотрения спора по последнему известному месту нахождения, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, мотивированного отзыва, возражений на иск не представил.

Надлежащим образом извещенный ответчик в судебное заседание не явился, заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с невозможностью явки представителя.

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

На основании части 3 указанной статьи в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

Отложение рассмотрения дела на основании части 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является не обязанностью, а правом суда, предоставленным законодательством для обеспечения возможности полного и всестороннего рассмотрения дела. При этом положенные в обоснование заявленного стороной ходатайства об отложении рассмотрения дела доводы оцениваются судом с точки зрения необходимости и уважительности.

В заявленном ходатайстве об отложении судебного разбирательства ответчик указывает на невозможность присутствия представителя в судебном заседании, не указывая при этом причин невозможности явки другого представителя или руководителя юридического лица.

Учитывая то обстоятельство, что ответчиком не представлено уважительных причин невозможности явки представителя, суд полагает ходатайство подлежащим отклонению в связи с отсутствием оснований для отложения судебного разбирательства.

Руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя  ответчика  по имеющимся в деле доказательствам.

 Как следует из материалов дела,  04 марта  2015 года между акционерным  обществом "Строительное управление № 9" (далее – ответчик, заказчик) и  обществом с ограниченной ответственностью "НФТРЕЙД" (далее – истец, подрядчик) заключен договор  на выполнение подрядных работ № 1-04/03/2015-НФ (с дополнительными соглашениями от 27.04.2016, от 03.08.2015, от 10.08.2015, от 11.08.2015, от 24.08.2015, от 02.09.2015), в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы, указанные в п. 1.1.2 договора и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить. Работы должны быть выполнены согласно проекту П428.61-1-АР2.1, разработанному ООО фирмой «Инжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

Стоимость отделочных работ составляет 15 648 000 руб., в том числе НДС 2 386 983 руб. 05 коп.

Срок выполнения работ:

-начало работ-16 марта 2015 года.

-окончание работ -01 июня 2015 года.

Дополнительным соглашением от 02.09.2015 стороны пришли к соглашению, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика дополнительные работы (п.1.дополнительного соглашения).

П. 2 дополнительного соглашения стороны увеличили общую стоимость выполнения работ, на 161 568 руб. Общая сумма по договору с учетом дополнительного соглашения составляет 17 058 632 руб., в том числе НДС 18% 2 602 164 руб. 20 коп.

Срок выполнения дополнительных работ – с момента подписания соглашения по 03.09.2015.

Оплата выполненных дополнительных работ осуществляется в следующем порядке:

4.1. оплата выполненных подрядчиком дополнительных работ (за вычетом гарантийной суммы) производится заказчиком в течение 5 дней с даты приемки заказчиком выполненных работ (подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 заказчиком без замечаний)  или по истечении срока для рассмотрения акта по форме КС-2 и при получении  от подрядчика счета на оплату, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанной заказчиком без замечаний, исполнительной документации на выполненный объем работ, по акту приема-передачи исполнительной документации и счета-фактуры.

Заказчик оплачивает подрядчику удержанную гарантийную сумму в размере 5% от цены фактически выполненных работ (окончательный платеж) по истечении 6 месяцев с даты приемки заказчиком выполненных работ в полном объеме при условии устранения выявленных недостатков и выполнения подрядчиком всех своих обязательств по настоящему соглашению (п.4.2. дополнительного соглашения).

01 июня 2015 заключен договор  на выполнение подрядных работ № 1-01/06/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АР2.1.,разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

Стоимость отделочных работ составляет 3 879 079 руб. 93 коп.. в том числе НДС 18% 591 724 руб. 06 коп.

Срок выполнения работ:

-Начало работ-22 июня 2015 года.

-Окончание работ -01 августа 2015 года.

Оплата работ заказчиком подрядчику производится следующим образом:

5.1.1. договора заказчик до начала выполнения работ производит оплату аванса 70% от основных материалов, в размере 2 244 430 руб. 95 коп. в том числе НДС 18% 342 370 руб. 82 коп. Остаток 30% от основных материалов в размере 961 898 руб. 98 коп., в том числе НДС 18% 146 730 руб. 35 коп. оплачивается в срок до 15 июля 2015 года.

5.1.2. 95% стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами справок по формам КС-2 и КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объему работ.

5.1.3. 5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после проведения всех испытаний и сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приема-передачи, а также актов испытаний и приемки систем, устранения всех замечаний.

09.11.2015 заключен договор  на выполнение подрядных работ № 1-09/11/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

Стоимость отделочных работ составляет 7 954 476 руб., в том числе НДС 18% 1 213 394 руб. 64 коп.

Срок выполнения работ:

-Начало работ-11 ноября 2015 года.

-Окончание работ-25 декабря 2015 года.

Оплата работ заказчиком подрядчику производится следующим образом:

5.1.1. заказчик до начала выполнения работ производит оплату аванса в размере 2 386 342 руб. 80 коп., в  том числе НДС 18% 364 018 руб. 39 коп.

5.1.2. 95%  стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами справок по формам КС-2 и КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объему работ.

5.1.3. 5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после проведения всех испытаний и сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приема-передачи, а также актов испытаний и приемки систем, устранения всех замечаний.

 18.05.2015 сторонами заключен договор на выполнение подрядных работ № 1-18/05/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ  и оплатить. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АР2.1. разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

Стоимость отделочных работ составляет 1 750 104 руб., в том числе НДС 18% 266 965 руб. 02 коп.

Срок выполнения работ:

-Начало работ-18 мая 2015 года.

-Окончание работ- 05 июня 2015 года.

Оплата работ заказчиком подрядчику производится следующим образом:

5.1.1. 95%  стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами справок по формам КС-2 и КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объему работ.

5.1.3. 5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после проведения всех испытаний и сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приема-передачи, а также актов испытаний и приемки систем, устранения всех замечаний.

26 июня 2015 стороны заключили договор на выполнение подрядных работ № 1-26/06/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы  и сдать результаты работ заказчика, а заказчик обязуется принять результаты работ  и  оплатить их. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АР2.1. разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

Стоимость отделочных работ составляет 1 149 480 руб. в том числе НДС 18% 175 344 руб. 41 коп.

Срок выполнения работ:

- Начало работ-3 июля 2015 года.

- Окончание работ – 21 июля 2015 года.

Оплата работ заказчиком подрядчику производится следующим образом:

5.1.1. заказчик до начала выполнения работ производит оплату аванса 30% от стоимости выполненных работ в размере 344 844 руб. , в том числе НДС 18% 52 603 руб. 32 коп.

5.1.2. 95%  стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами справок по формам КС-2 и КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объему работ.

5.1.3. 5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после проведения всех испытаний и сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приема-передачи, а также актов испытаний и приемки систем, устранения всех замечаний.

28 сентября 2015 года стороны заключили договор на выполнение подрядных работ № 1-28/09/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы  и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АР2.1., разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика- из его материалов, его силами и средствами.

Стоимость отделочных работ  составляет 4 495 935 руб.. в том числе НДС 18% 685 820 руб. 59 коп.(п. 3.1. договора).

Срок выполнения работ:

       -Начало работ – 01 октября 2015 года.

       - Окончание работ – 30 октября 2015 года.

Оплата работ заказчиком подрядчику следующим образом:

       5.1.1. заказчик до начала выполнения работ производит оплату аванса 70% от основных материалов, в размере 2 441 134 руб. 50 коп., в том числе НДС 18% 372 376 руб. 45 коп. Остаток 30% от основных материалов в размере 1 046 200 руб. 50 коп., в том числе НДС 18% 159 589 руб. 91 коп. оплачиваются в срок до 16 октября 2015 года.

        5.1.2. 95%  стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами справок по формам КС-2 и КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объему работ.

        5.1.3. 5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после проведения всех испытаний и сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приема-передачи, а также актов испытаний и приемки систем, устранения всех замечаний.

01 июня 2015 года стороны заключили договор на выполнение подрядных работ № 2-01/096/2015-НФ подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АР2.1., разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

Дополнительным соглашением стороны пришли к соглашению, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика дополнительные работы.

П. 2. Дополнительного соглашения увеличена общая стоимость выполнения работ на 50 625 руб. Общая сумма по договору с учетом дополнительного соглашения составляет 4 605 665 руб., в том числе НДС 18% 702 559 руб. 07 коп.

Срок выполнения дополнительных работ- с момента подписания соглашения  по 30 сентября 2015г.

Оплата выполненных дополнительных работ осуществляется в следующем порядке:

4.1. оплата выполненных подрядчиком дополнительных работ (за вычетом гарантийной суммы) производится заказчиком в течение 5 дней с даты приемки заказчиком выполненных работ (подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 заказчиком без замечаний)  или по истечении срока для рассмотрения акта по форме КС-2 и при получении  от подрядчика счета на оплату, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанной заказчиком без замечаний, исполнительной документации на выполненный объем работ, по акту приема-передачи исполнительной документации и счета-фактуры.

Заказчик оплачивает подрядчику удержанную гарантийную сумму в размере 5% от цены фактически выполненных работ (окончательный платеж) по истечении 6 месяцев с даты приемки заказчиком выполненных работ в полном объеме при условии устранения выявленных недостатков и выполнения подрядчиком всех своих обязательств по настоящему соглашению (п.4.2. дополнительного соглашения).

10 августа 2015 года стороны заключили договор на выполнение подрядных работ № 1-10/08/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ  и оплатить их.  Работы должны быть выполнены согласно проекта П 428.61-1-АР2.1., разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

Стоимость отделочных работ составляет 1 074 156 руб. 50 коп., в том числе НДС 18% 163 854 руб. 38 коп. (п. 3.1. договора).

Срок выполнения работ:

-Начало работ – 12 августа 2015 года.

-Окончание работ- 31 августа 2015 года.

Оплата работ заказчиком подрядчику производится следующим образом:

5.1.1. заказчик до начала выполнения работ производит оплату аванса 70 % от основных материалов в размере 479 959 руб. 55 коп., в том числе НДС 18% 73 214 руб. 17 коп. Остаток 30 % от основных материалов в 205 696 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% 31 377 руб. 50 коп. оплачивается в срок до 20 августа 2015 года.

5.1.2. 95%  стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами справок по формам КС-2 и КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объему работ.

5.1.3. 5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после проведения всех испытаний и сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приема-передачи, а также актов испытаний и приемки систем, устранения всех замечаний.

08 мая 2015 года стороны заключили договор на выполнение подрядных работ № 1-08/05/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АР2.1.,разработанного ООО фирма «Инзжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика- из его материалов, его силами и средствами.

Стоимость отделочных работ определена в размере 315 руб. за м.п. с НДС 18% на 10 225 метров погонных и составляет 3 220 875 руб., в том числе НДС 18% 491 319 руб. 92 коп. (п.3.1. договора).

Срок выполнения работ:

-Начало работ - 25 мая 2015 года.

-Окончание работ- 01 августа 2015 года.

Оплата работ заказчиком подрядчику производится следующим образом:

5.1.1. Заказчик до начала выполнения работ производит оплату аванса в размере 2 254 612 руб. 50 коп., в  том числе НДС 18% 343 923 руб. 94 коп.

5.1.2. 95%  стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами справок по формам КС-2 и КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объему работ.

5.1.3. 5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после проведения всех испытаний и сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приема-передачи, а также актов испытаний и приемки систем, устранения всех замечаний.

26 марта 2015 года стороны заключили договор на выполнение подрядных работ № 1-26/03/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы, и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АР2.1., разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика-из его материалов, его силами и средствами.

Стоимость отделочных работ составляет 15 262 071 руб. 20 коп., в ом числе НДС 18% 2 328 112 руб. 56 коп.

Срок выполнения работ:

-Начало работ- 01 мая 2015 года.

-Окончание работ- 15 июля 2015 года.

Оплата работ заказчиком подрядчику производится следующим образом:

5.1.1. заказчик до начала выполнения работ производит оплату аванса 70% от основных материалов в размере 7 927 199 руб. 84 коп., в том числе НДС 18% 1 209 233 руб. 87 коп. остаток 30% от основных материалов в размере 3 397 371 руб. 36 коп., в том числе НДС 18% 518 243 руб. 09 коп. оплачивается в срок до 15 мая 2015 года.

5.1.2. 95%  стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами справок по формам КС-2 и КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объему работ.

5.1.3. 5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после проведения всех испытаний и сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приема-передачи, а также актов испытаний и приемки систем, устранения всех замечаний.

 12 февраля 2015 года стороны заключили договор на выполнение подрядных работ № 1-12/02/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АР2.1., разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. 

Дополнительным соглашением от 03 августа 2015 года стороны установили, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика дополнительные работы.

Увеличить общую стоимость выполнения работ на 1 000 руб. Общая сумма по договору с учетом дополнительного соглашения составляет 7 659 851 руб. 55 коп., в том числе НДС 18% 1 168 451 руб. 93 коп.

Срок выполнения работ- с момента подписания настоящего соглашения по 21 августа 2015 года.

Оплата выполненных дополнительных работ осуществляется в следующем порядке:

4.1. оплата выполненных подрядчиком дополнительных работ (за вычетом гарантийной суммы) производится заказчиком в течение 5 дней с даты приемки заказчиком выполненных работ (подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 заказчиком без замечаний)  или по истечении срока для рассмотрения акта по форме КС-2 и при получении  от подрядчика счета на оплату, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанной заказчиком без замечаний, исполнительной документации на выполненный объем работ, по акту приема-передачи исполнительной документации и счета-фактуры.

Заказчик оплачивает подрядчику удержанную гарантийную сумму в размере 5% от цены фактически выполненных работ (окончательный платеж) по истечении 6 месяцев с даты приемки заказчиком выполненных работ в полном объеме при условии устранения выявленных недостатков и выполнения подрядчиком всех своих обязательств по настоящему соглашению (п.4.2. дополнительного соглашения).

07 мая 2015 года стороны заключили договор на выполнение подрядных работ № 1-07/05/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АП2.1.,разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика- из его материалов, его силами и средствами.

 Дополнительным соглашением стороны установили, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика дополнительные работы (п. 1. Доп. Соглашения).

Увеличить общую стоимость выполнения работ на 5 283 руб. Общая сумма по договору с учетом дополнительного соглашения составляет 1 350 081 руб., в том числе НДС 18% 205 944 руб. 56 коп.

Срок выполнения дополнительных работ – с момента подписания соглашения по 21.08.2015г.

Оплата выполненных дополнительных работ осуществляется в следующем порядке:

4.1. оплата выполненных подрядчиком дополнительных работ (за вычетом гарантийной суммы) производится заказчиком в течение 5 дней с даты приемки заказчиком выполненных работ (подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 заказчиком без замечаний)  или по истечении срока для рассмотрения акта по форме КС-2 и при получении  от подрядчика счета на оплату, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанной заказчиком без замечаний, исполнительной документации на выполненный объем работ, по акту приема-передачи исполнительной документации и счета-фактуры.

Заказчик оплачивает подрядчику удержанную гарантийную сумму в размере 5% от цены фактически выполненных работ (окончательный платеж) по истечении 6 месяцев с даты приемки заказчиком выполненных работ в полном объеме при условии устранения выявленных недостатков и выполнения подрядчиком всех своих обязательств по настоящему соглашению (п.4.2. дополнительного соглашения).

24 марта 2015 года стороны заключили договор на выполнение подрядных работ № 1-24/03/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АР2.1., разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

Дополнительным соглашением стороны установили, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика дополнительные работы.

Увеличить общую стоимость выполнения работ на 16 500 руб. Общая сумма по договору с учетом дополнительного соглашения составляет 7 542 300 руб., в том числе НДС 18% 1 150 520 руб. 34 коп.

Срок выполнения дополнительных работ - с момента подписания настоящего соглашения по 04 сентября 2015г. (п. 3. Доп.соглашения).

Оплата выполненных дополнительных работ осуществляется в следующем порядке:

4.1. оплата выполненных подрядчиком дополнительных работ (за вычетом гарантийной суммы) производится заказчиком в течение 5 дней с даты приемки заказчиком выполненных работ (подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 заказчиком без замечаний)  или по истечении срока для рассмотрения акта по форме КС-2 и при получении  от подрядчика счета на оплату, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанной заказчиком без замечаний, исполнительной документации на выполненный объем работ, по акту приема-передачи исполнительной документации и счета-фактуры.

Заказчик оплачивает подрядчику удержанную гарантийную сумму в размере 5% от цены фактически выполненных работ (окончательный платеж) по истечении 6 месяцев с даты приемки заказчиком выполненных работ в полном объеме при условии устранения выявленных недостатков и выполнения подрядчиком всех своих обязательств по настоящему соглашению (п.4.2. дополнительного соглашения).

07 июля 2015 стороны заключили договор на выполнение подрядных работ № 1-07/07/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АР.2.1, разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика- из его материалов, его силами и средствами.

Стоимость отделочных работ составляет 1 352 971 руб. 44 коп., в том числе НДС 18% 206 385 руб. 47 коп.

Срок выполнения работ:

-Начало работ- 07 июля 2015 года.

-Окончание работ- 15 августа 2015 года.

Оплата работ заказчиком подрядчику производится следующим образом:

5.1.1. 95%  стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами справок по формам КС-2 и КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объему работ.

5.1.3. 5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после проведения всех испытаний и сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приема-передачи, а также актов испытаний и приемки систем, устранения всех замечаний.

20 июля 2015 года стороны заключили договор на выполнение подрядных работ № 1-20/07/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АР2.1., разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

Срок выполнения работ: 

-Начало работ- 20 июля 2015 года.

-Окончание работ- 20 августа 2015 года.

Оплата работ заказчиком подрядчику производится следующим образом:

5.1.1. заказчик до начала работ производит оплату аванса 70% от основных материалов в размере 1 197 918 руб. 05 коп., в том числе НДС 18% 182 733 руб. 26 коп. Остаток 30% от основных материалов в размере 513 393 руб. 45 коп.. в том числе НДС 18% 78 314 руб. 26 коп. оплачивается в срок до 08 августа 2015 года.

5.1.2. 95%  стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами справок по формам КС-2 и КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объему работ.

5.1.3. 5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после проведения всех испытаний и сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приема-передачи, а также актов испытаний и приемки систем, устранения всех замечаний.

07 мая 2015 года стороны заключили договор на выполнение подрядных работ № 2-07/05/2015-НФ, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы, и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АР.2.1, разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

Дополнительным соглашением стороны установили, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика дополнительные работы.

 Увеличить общую стоимость выполнения работ на 126 251 руб. Общая сумма по договору с учетом дополнительного соглашения составляет 1 698 256 руб., в том числе НДС 18% 259 056 руб.

Срок выполнения дополнительных работ- с момента подписания настоящего соглашения по 20 сентября 2015г. (п. 3. Доп. соглашения).

Оплата выполненных дополнительных работ осуществляется в следующем порядке:

4.1. оплата выполненных подрядчиком дополнительных работ (за вычетом гарантийной суммы) производится заказчиком в течение 5 дней с даты приемки заказчиком выполненных работ (подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 заказчиком без замечаний)  или по истечении срока для рассмотрения акта по форме КС-2 и при получении  от подрядчика счета на оплату, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанной заказчиком без замечаний, исполнительной документации на выполненный объем работ, по акту приема-передачи исполнительной документации и счета-фактуры.

Заказчик оплачивает подрядчику удержанную гарантийную сумму в размере 5% от цены фактически выполненных работ (окончательный платеж) по истечении 6 месяцев с даты приемки заказчиком выполненных работ в полном объеме при условии устранения выявленных недостатков и выполнения подрядчиком всех своих обязательств по настоящему соглашению (п.4.2. дополнительного соглашения).

07 мая 2015 года стороны заключили договор на выполнение подрядных работ № 3-07/05/2015-НФ, в соответствии с которым, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы должны быть выполнены согласно проекта П428.61-1-АР2.1., разработанного ООО фирма «Инжтекс» г. Новосибирск. Работы выполняются иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

Дополнительным соглашением стороны установили, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика дополнительные работы.

Увеличить общую стоимость выполнения работ на 172 157 руб. Общая сумма по договору с учетом дополнительного соглашения составляет 4 337 619 руб., в том числе НДС 18% 661 670 руб. 69 коп.

Оплата выполненных дополнительных работ осуществляется в следующем порядке:

4.1. оплата выполненных подрядчиком дополнительных работ (за вычетом гарантийной суммы) производится заказчиком в течение 5 дней с даты приемки заказчиком выполненных работ (подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 заказчиком без замечаний)  или по истечении срока для рассмотрения акта по форме КС-2 и при получении  от подрядчика счета на оплату, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанной заказчиком без замечаний, исполнительной документации на выполненный объем работ, по акту приема-передачи исполнительной документации и счета-фактуры.

Заказчик оплачивает подрядчику удержанную гарантийную сумму в размере 5% от цены фактически выполненных работ (окончательный платеж) по истечении 6 месяцев с даты приемки заказчиком выполненных работ в полном объеме при условии устранения выявленных недостатков и выполнения подрядчиком всех своих обязательств по настоящему соглашению (п.4.2. дополнительного соглашения).

При рассмотрении спора, суд исходит из того, что в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. 

В период с марта  2015 года по ноябрь 2015 года, истцом   выполнены работы на сумму  71 929 660 руб. 19 коп., что подтверждается представленными в материалы дела двусторонними актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписанными со стороны истца и ответчика. Претензий и замечаний на момент приемки от ответчика не поступало.

В свою очередь ответчик оплатил работы частично в размере 51 300 357 руб. 61 коп. В связи с чем, у ответчика перед истцом образовалась задолженность в размере 20 629 302 руб. 58 коп.

Кроме того, ответчик подтвердил задолженность, подписав акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 19.10.2016

Истцом в адрес ответчика направлялась претензия, которая оставлена без удовлетворения. В связи с тем, что ответчик  претензию не исполнил, истец обратился с настоящим иском в суд.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается

        В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Поскольку ответчиком не представлено доказательств оспаривания количества и качества выполненных работ, следовательно, ответчик обязан   оплатить их стоимость в сроки, установленные договором.

Так как на момент рассмотрения спора сумма долга ответчиком не оплачена и не оспорена, долг в размере 20 629 302 руб.58 коп. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. ст. 309, 310, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, истцом  заявлено требование о взыскании с ответчика судебных расходов, связанных с расходами по оплате услуг представителя в сумме 50 000 руб.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесены к судебным издержкам. При этом право на возмещение таких расходов возникает при условии фактически понесенных стороной затрат, получателем которых является лицо (организация), оказывающее юридические услуги. Оказание и оплата услуг представителя в сумме 50 000 руб., подтверждается представленными истцом документами: соглашением об оказании юридической помощи от 27.03.217, платежным поручением № 4397 от 31.03.2017.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Как следует из статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы на оплату услуг представителя взыскиваются судом в разумных пределах. С учетом объема выполненных работ (услуг), их сложности, цены иска, количества судебных заседаний в которых участвовал представитель истца (2 судебных заседания), суд находит подлежащим удовлетворению заявление истца о возмещении судебных расходов в размере 50 000 руб., поскольку доказательств чрезмерности понесенных расходов ответчиком не представлено.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску отнесены судом на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь 110, 167 – 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с открытого акционерного общества "Строительное управление № 9"  (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "НФтрейд" (ОГРН 

<

***>) 20 629 302 рубля 58 копеек долга, 50 000 рублей расходов на оплату услуг представителя и 126 146 рублей 51 копейку судебных расходов в виде уплаченной госпошлины.

После вступления решения в законную силу выдать исполнительный лист.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г.Томск).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                                  Ю.А.Печурина