АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

«08» мая 2018 года по результатам рассмотрения дела № А31-11028/2017 по  исковому заявлению Комитета по управлению муниципальным имуществом  городского округа город Буй (ИНН 4402003263, ОГРН 1034417360141) к обществу  с ограниченной ответственностью «Буйская строительная компания» (ИНН  4401166804, ОГРН 1154401008739) об обязании ответчика в течение 30 (тридцати)  дней со дня вступления в законную силу решения суда безвозмездно устранить  недостатки переданных по контрактам, заключенным в период с 02 по 16 августа  2013 года №№ 04.04.13.0101.7, 04.04.13.0111.7, 04.04.13.0124.7, 04.04.13.0130.7,  04.04.13.0131.7, 04.04.13.0132.7, квартир №№ 1, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14,  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29 в многоквартирном жилом  доме по адресу: Костромская обл., г. Буй, ул. 10 годовщины Октября. д. 12, а  именно: выполнить работы по осушению подвала, восстановить цементное  покрытие входных крылец, восстановить разрушенные участки ограждений крыши  жилого дома, восстановить окрасочный слой цоколя в местах отслоения,  произвести переустановку (повторный монтаж) всех окон в квартирах 5, 6, 8, 9, 10,  11, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, расположенных в жилом доме по  адресу: Костромская обл., г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 12 в количестве 44  штук; устранить причину обмерзания воздухозаборных труб газовых котлов,  образования конденсата на воздухозаборных трубах и передних стенках газовых  котлов в квартирах №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, для этого установить адаптеры, согласно рабочей  документации (п. 17.2.), установить антиуклон труб забора воздуха, утеплить  трубы забора воздуха, установить конденсатоотводчики на трубы забора воздуха, а  также произвести утепление плиты потолочного перекрытия над квартирой № 28 (с  учетом уточнений),  

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора: временного управляющего ООО «Буйская  строительная компания» Ермолаевой Елены Вячеславовны,  

арбитражным судом первой инстанции в составе судьи Котина Алексея  Юрьевича, руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, принято решение, суд  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Буйская строительная  компания» (ИНН 4401166804, ОГРН 1154401008739) в течение 30 (тридцати) дней  со дня вступления в законную силу решения суда безвозмездно устранить  недостатки переданных по контрактам, заключенным в период с 02 по 16 августа  2013 года №№ 04.04.13.0101.7, 04.04.13.0111.7, 04.04.13.0124.7, 04.04.13.0130.7,  

04.04.13.0131.7, 04.04.13.0132.7, квартир №№ 1, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14,  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 в многоквартирном жилом  доме по адресу: Костромская область, город Буй, улица 10 годовщины Октября,  дом 12, а именно:  

- выполнить работы по осушению подвала; - восстановить цементное покрытие входных крылец; - восстановить разрушенные участки ограждений крыши жилого дома; - восстановить окрасочный слой цоколя в местах отслоения; 

- произвести переустановку (повторный монтаж) всех окон в квартирах 5, 6, 8,  9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 расположенных в жилом доме  по адресу: Костромская область, город Буй, улица 10 годовщины Октября, дом 12 в  количестве 44 штук;  

- устранить причину обмерзания воздухозаборных труб газовых котлов,  образования конденсата на воздухозаборных трубах и передних стенках газовых  котлов в квартирах №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, для этого установить адаптеры, согласно рабочей  документации (п. 17.2.), установить антиуклон труб забора воздуха, утеплить  трубы забора воздуха, установить конденсатоотводчики на трубы забора воздуха;  

- произвести утепление плиты потолочного перекрытия над квартирой № 28.  Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «Буйская  строительная компания» (ИНН 4401166804, ОГРН 1154401008739) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 рублей.  

Ответчику предлагается добровольно уплатить в доход федерального бюджета  государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления в законную  силу решения суда в порядке, установленном в статье 333.18 Налогового кодекса  Российской Федерации и представить доказательства ее уплаты в арбитражный  суд.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по  истечении 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда в случае  непредставления стороной сведений о ее добровольной уплате.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд  кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что решение было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Костромской области.  

Резолютивная часть решения

 объявлена в судебном заседании и приобщена к  делу.  

 Судья А. Ю. Котин