АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А84-8481/22

09 декабря 2022 г.

г. Севастополь

 

Резолютивная часть решения объявлена «07» декабря 2022 года.  

Решение в полном объёме изготовлено «09» декабря 2022 года.

 

Арбитражный суд  города Севастополя в составе судьи Ражкова Р.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению от 29.09.2022 № 31-15/1437дсп, уточненному заявлениями от 22.11.2022, от 06.12.2022,

Федерального государственного унитарного предприятия "13 судоремонтный завод Черноморского Флота" Министерства обороны Российской Федерации (Город Севастополь, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к Акционерному обществу "Центр судоремонта "Звездочка" (Город Северодвинск ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании неустойки по договору,   

в отсутствие представителей сторон, 

при ведении протокола судебного заседания 07.12.2022 секретарем судебного заседания ФИО1, 

УСТАНОВИЛ:

истец  обратился в Арбитражный суд города Севастополя с иском к ответчику о взыскании неустойки за период с 11.03.2022 по 02.09.2022 в размере 13 556 (Тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть)  рублей 37 копеек, расходов на оплату государственной пошлины в размере 2 000 рублей.

Определением от 06.10.2022 исковое заявление принято к производству суда.

20.10.2022 от ответчика поступил отзыв на исковое заявление. 

20.10.2022 от ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии лица, участвующего в деле.

Определением от 09.11.2022 суд назначил дело к судебному разбирательству.

10.11.2022 от ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии лица, участвующего в деле.

22.11.2022 от ФГУП "13 СЗЧФ" Министерства обороны Российской Федерации поступило заявление об уточнении размера исковых требований, в которых истец просит взыскать  с ответчика неустойку за период 11.03.2022 по 31.03.2022 в размере 2 088, 70 рублей. 

В судебном заседании 01.12.2022 представитель истца выразил правовую позицию относительно предмет спора, ответил на вопросы суда. 

Суд в судебном заседании 01.12.2022 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял заявление об уточнении размера исковых требований, объявил перерыв в целях предоставления времени истцу для уточнения исковых требований. 

Лица, участвующие извещены надлежащим образом о начавшемся процессе. Сведения размещены в сети Интернет на сайте www.arbitr.ru.

07.12.2022 от ФГУП "13 СЗЧФ" Министерства обороны Российской Федерации поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии лица, участвующего в деле.

07.12.2022 от ФГУП "13 СЗЧФ" Министерства обороны Российской Федерации поступило заявление об уточнении размера исковых требований, в которых истец просит взыскать  с ответчика неустойку за период 11.03.2022 по 31.03.2022 в размере 952, 97 рублей. 

Суд в судебном заседании 07.12.2022 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял уточнение размера исковых требований.

Истец и ответчик  явку уполномоченных представителей в судебное заседание 07.12.2022 не обеспечили, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом, о чем свидетельствуют материалы дела.

С учетом изложенного, по мнению суда, материалы дела достаточно характеризуют спорные правоотношения, основания для отложения рассмотрения дела отсутствуют, а дело подлежит рассмотрению в отсутствие представителей сторон по имеющимся в деле материалам.

Имеющиеся в деле доказательства исследованы и оценены судом в совокупности по правилам статей 65, 70, 71 АПК РФ.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

05.11.2020 между Федеральным государственным унитарным предприятием «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны Российской Федерации (далее - ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, Исполнитель, Истец), в лице Директора с одной стороны и Акционерным обществом «Центр судоремонта «Звёздочка» (далее - АО «ЦС «Звёздочка», Заказчик, Ответчик), в лице ВРИО директора головного филиала «5 Судоремонтный завод» АО «ЦС «Звёздочка», с другой стороны заключен договор № 1921187301441442209007222/120/20 (далее - Договор).

Протоколом разногласий от 06.11.2020 ориентировочная цена Договора составила 358 270,03 руб. (п.п. 4.1 Договора).

По условию п. 2.1 Договора Исполнитель обязался выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и своевременно сдать их результаты  Заказчику, а Заказчик обязался принять и оплатить данные Работы.

Согласно п. 4.2 Договора, цена на работы, установленная в настоящем Договоре  на 2020 год является ориентировочной, и подлежит переводу в фиксированную после выполнения работ в соответствии с Ведомостью исполнения (приложение № 1 к Договору).

Перевод цены из ориентировочной в фиксированную оформляется дополнительным соглашением к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

Срок выполнения работ, согласно Ведомости исполнения, являющейся приложением к Дополнительному соглашению к Договору от 14.12.2021 № 2 - до 10.04.2021.

07.07.2021 Исполнитель направил Заказчику Технический акт от 10.04.2021 № 112/20/1 с приложениями, сопроводительным письмом.

Техническим актом от 10.04.2021 № 112/20/1 зафиксирован факт выполнения работ Исполнителем по Договору.

23.12.2021 Заказчик подписал акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

Согласно п. 7.7 Договора, Заказчик проводит авансирование Исполнителя после заключения настоящего Договора в размере 30% от цены Договора в течение 20 рабочих дней с момента получения от Исполнителя счета на оплату аванса.

Согласно п. 7.4 Договора, оплата за фактически выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 30 рабочих дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, но не ранее поступления соответствующих денежных средств от Государственного заказчика и при условии предоставления Исполнителем Заказчику:

-счета на выполненные Работы в 1 экземпляре;

-счета-фактуры в 1 экземпляре;

-акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 2);

-технического акта (Приложение № 3);

-перечень выполненных работ (приложение № 4);

-итоговый перечень использованного ЗИП, сырья и материалов (при необходимости) (приложение № 5);

-график выполнения работ (приложение № 7);

-отчет о ходе выполнения работ (приложение № 8);

-протокол согласования фиксированной цены (приложение № 9).

21.01.2021 Заказчик провел авансовый платеж по договору, что подтверждается платежным поручением № 97178 от 20.01.2021 на сумму 107 481,01 рублей. 

16.12.2021 Исполнитель направил Заказчику пакет документов для перевода цены Договора из ориентировочной в фиксированную и заключения соответствующего Дополнительного соглашения по Договору (п. 4.2 Договора).

Во исполнение п. 4.2 Договора Стороны заключили Дополнительное соглашение № 2 от 14.12.2021 с приложениями на изменение цены договора из ориентировочной в фиксированную. Согласно п. 1. Дополнительного соглашения № 2 от 14.12.2021, цена Договора составляет 288 999,08 руб. и является фиксированной (п. 2 Дополнительное соглашения №2).

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ от 22.12.2021, подлежит оплате по окончательному расчету по Договору сумма в размере 181 518,07 рублей. 

11.01.2022 Исполнитель направил Заказчику обращение исх. № 31-4/22 от 10.01.2022 с приложенным счетом-фактурой № 86 от 23.12.2021, № 85 от 23.12.2021. 

Данный факт подтверждается приложенной копией обращения в материалы дела.   

12.01.2022 Исполнитель направил Заказчику счет от 11.01.2022 № 1 на окончательный расчет на сумму 181 518,07 рублей. 

25.01.2022 Заказчик получил все документы от Исполнителя для проведения окончательного расчета по Договору. Срок окончательного расчета по Договору - 30 рабочих дней от получения документов, согласно п. 7.4 Договора, то есть до 10.03.2022. 

В установленный Договором срок Заказчик не выполнил обязательство по окончательному расчету.

22.04.2022 Исполнитель дополнительно уведомил Заказчика исх. № 31-4/3843 от 22.04.2022 о задолженности последнего по окончательному расчету в рамках Договора о необходимости принятия мер по погашению долга.

ФГУП «13 СРЗ» МО РФ в адрес Ответчика за исх. от 30.06.2022 № 31-13/5189 направлено требование - претензия.

Согласно ответу на требование - претензию Ответчик письмом от 08.07.2022  № 877/1344 предложил погасить имеющуюся задолженность в соответствии с графиком платежей, связи со сложной финансовой ситуацией.

Истец вышеуказанное предложение отклонил, что подтверждается письмом от 13.07.2022 №31-13/6185. 

02.09.2022 Ответчик оплатил оставшуюся задолженность по Договору в размере 181 518,07 рублей, что подтверждается платежным поручением № 3540.

В связи с неисполнением Ответчиком условий Договора, Истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

В ходе судебного разбирательства истец неоднократно уточнял исковые требования, в том числе 06.12.2022.

Дело рассмотрено по уточненным требованиям. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательство должно быть исполнено надлежащим образом в соответствии с условиями договора. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами и это предусмотрено статьей 310 ГК РФ.

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение  убытков в соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ.

Пунктом 9.5 Договора установлено, в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки ключевой ставки Банка России от неоплаченной цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Истцом был произведён расчёт неустойки за ненадлежащее исполнение Заказчиком условий Договора в части сроков оплаты в размере 952,97 рублей за период с 11.03.2022 по 31.03.2022.

Расчет истца судом проверен и признан арифметически верным.

При таких обстоятельствах суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно платежному поручению № 419 от 27.09.2022 истцом при подаче иска в суд была оплачена государственная пошлина в сумме 2 000 руб. за требования о взыскании 13 556 рублей 37 копеек.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Севастополя

РЕШИЛ:

Исковые требования по заявлению от 29.09.2022 № 31-15/1437дсп, уточнённому заявлениями исх. № 31-15/196дсп от 16.11.2022, исх № б/н от 06.12.2022, удовлетворить.

Взыскать с Акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Архангельская область) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «13 Судоремонтный завод Черноморского Флота» Министерства Обороны Российской Федерации (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Севастополь) неустойку в сумме 952 (Девятьсот пятьдесят два) рубля 97 копеек, а также взыскать расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 (Две тысячи) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его вынесения в Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.

Судья 

Р.А. Ражков