Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-9400/2023

г. Хабаровск

22 сентября 2023 года

Решение в виде резолютивной части принято 14 августа 2023 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи С.М. Курносовой,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 121353, г. Москва, муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4; почтовый адрес: 680000, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Энергоремсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 115093, г. Москва, муниципальный округ Даниловский, ул. Павловская, д. 6)

о взыскании 529 141 руб. 48 коп.

У С Т А Н О В И Л :

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – истец, ПАО «Россети») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Энергоремсервис» (далее – ответчик, ООО «Энергоремсервис») о взыскании пени за нарушение сроков окончания выполнения работ по договору № 801240 от 20.04.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ по инвестиционному проекту: «Реконструкция ПС 220 кВ Архара (Оснащение инженерно-техническими средствами охраны)» за период с 01.04.2022 по 10.03.2023 в размере 529 141 руб. 48 коп., пени за нарушение сроков окончания работ в размере 0,2% от цены договора, начиная с 11.03.2023 и до момента фактического исполнения обязательств, а также расходов по государственной пошлине в размере 13 583 руб.

Определением суда от 23.06.2023 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), возбуждено производство по делу № А73-9400/2023.

Ответчику предложено в срок до 17.07.2023 представить в суд мотивированный отзыв на исковое заявление с приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно заявленных требований. Лицам, участвующим в деле, разъяснено право представить в арбитражный суд, и направить друг другу дополнительные документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок не позднее 08.08.2023.    

В соответствии с частью 5 статьи 228 АПК РФ дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов.

Стороны извещены надлежащим образом в соответствии с требованиями статей 121, 123 АПК РФ о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. 

Ответчиком 12.07.2023 посредством электронной системы подачи документов «Мой арбитр» направлен отзыв на исковое заявление, в соответствии с которым ООО «Энергоремсервис» не согласно с исковыми требованиями, просило суд применить статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), и снизить размер неустойки, ссылаясь на несоразмерность предъявленной к взысканию неустойки, указывая, что договором установлена неустойка исходя из размера 0,2 % (73% годовых), заявленная сумма пени составляет 68,8% от цены договора. Истцом не представлено доказательств соразмерности заявленной им к взысканию неустойки последствиям нарушенного ответчиком обязательства. Указывает на вину обеих сторон в допущении просрочки окончания работ, ссылаясь на те обстоятельства, что заказчиком исходные данные для подготовки инженерных изысканий были переданы подрядчику с нарушением сроков и не в полном объеме.

Истец 21.07.2023 направил возражения на отзыв ответчика, с доводами ООО «Энергоремсервис» не согласился, возражал против снижения неустойки по статье 333 ГК РФ, просил удовлетворить заявленные исковые требования в полном объеме. 

Арбитражным судом в соответствии с частью 1 статьи 229 АПК РФ 14.08.2023 принята и размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» резолютивная часть решения.     

ПАО «Россети» посредством электронной системы подачи документов «Мой арбитр» (вх. № 156136) в пределах срока, установленного частью 2 статьи 229 АПК РФ, обратилось в арбитражный суд с заявлением о составлении мотивированного решения суда.  

В соответствии с частью 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

ПАО «Россети» (ранее – ПАО «ФСК ЕЭС») является сетевой организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС), владеет на праве собственности объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляет следующие виды деятельности: услуги по передаче и распределению электрической энергии и по присоединению к электрическим сетям (пункт 3.2 устава ПАО «Россети»).

ПАО «Россети» относится к стратегическим акционерным обществам, акции которых находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации (Указ Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»).

Во исполнение инвестиционной программы, утвержденной Приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 и от 27.12.2017 № 31@ между ПАО «Россети» (ранее – ПАО «ФСК ЕЭС») (далее – заказчик) и ООО «Энергоремсервис» (далее – подрядчик) 20.04.2021 заключен договор № 801240 на выполнение проектно-изыскательских работ по инвестиционному проекту: «Реконструкция ПС 220 кВ Архара (Оснащение инженерно-техническими средствами охраны)» (далее – договор), согласно пункту 2.1 которого подрядчик обязался выполнить комплекс работ по выполнению проектных работ по объекту, в том числе:  

- предпроектное обследование,

- выполнение инженерных изысканий,

- разработка Проектной документации (в том числе локальных смет и сводного сметного расчета),

- проведение экспертизы сметной документации,

- разработка Закупочной документации, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором.

В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ по договору:

- начало выполнения работ – с момента заключения договора, 

- окончание выполнения работ – 30.11.2021. 

Выполнение отдельных работ, входящих в общий комплекс работ по договору, осуществляется подрядчиком в сроки, указанные в календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 1). 

В приложении 1 к Договору, а именно календарным графиком выполнения работ и стоимости, установлены: 

- срок выполнения работ по разработке проектной документации (предпроектное обследование, инженерные изыскания, разработка проектной документации (в т. ч. см. часть), экспертиза сметной части проекта) – 31.10.2021. Стоимость данных работ составляет 749 565 руб. 84 коп.; 

- срок выполнения работ по разработке закупочной документации –30.11.2021. Стоимость данных работ составляет 19 535 руб. 16 коп. 

Стоимость всех работ по договору согласно календарному графику выполнения работ и стоимости составила 769 101 руб.

В соответствии с пунктом 4.1 договора цена договора, указанная в календарном графике выполнения работ и стоимости, в текущих ценах не является твердой и не является приблизительной, стоимость работ по договору составляет не более 640 917 руб. 50 коп., кроме того, НДС 128 183 руб. 50 коп. Общая стоимость договора с НДС составляет не более 769 101 руб.

В цену договора входят все расходы подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе: вознаграждение подрядчика за отчуждение исключительных прав на результат работ в случае их возникновения, оплата счетов специализированных организаций и счетов организаций по проведению экспертизы.

Пунктами 8.3, 8.4 договора предусмотрен порядок выполнения и приемки работ по инженерным изысканиям, в том числе, в течение 15-ти календарных дней после заключения договора подрядчик выполняет расчеты стоимости инженерных изысканий путем разработки соответствующих смет. Результат расчетов (сметы на выполнение инженерных изысканий) направляется подрядчиком на согласование заказчику.

Инженерные изыскания выполняются в сроки, установленные в календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение № 1 к договору). 

Разработка и приемка проектной документации предусмотрена статьей 9 договора, порядок выполнения и приемка закупочной документации установлен статьей 10 договора. 

Согласно пункту 12.3 договора все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 15 календарных дней с даты получения стороной, которой предъявлена претензия, соответствующей претензии.

В соответствии с пунктом 5.1.1 Задания на проектирование от 09.10.2020 № 61/5п «Реконструкция ПС 220 кВ Архара» (Оснащение инженерно-техническими средствами охраны)» предпроектное обследование проводится проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на ПС и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

На письмо подрядчика от 02.06.2021 № У-6/6 заказчиком в его адрес была направлена имеющаяся информация (письмо от 18.06.2021 № МЗ/2/2938), а также разъяснено, что остальную информацию подрядчику необходимо получить в ходе проведения предпроектного обследования. 

Как следует из содержания искового заявления, подрядчиком допущено нарушение срока выполнения работ (срок выполнения работ – 30.11.2021), работы по договору не выполнены.

Период просрочки установленного договором срока окончания выполнения всех работ по состоянию на 10.03.2023 составил 465 дней, с 01.12.2021 по 10.03.2023.

Истцом в целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес ответчика 06.04.2023 направлена претензия от 14.03.2023 № ЦЗ/1/368 с требованием в течение 15-ти календарных дней с момента ее получения оплатить пени в размере 529 141 руб. 48 коп., а также по 1 538 руб. 20 коп. за каждый последующий день просрочки исполнения обязательств, начиная с 11.03.2023 до фактической даты исполнения обязательств.  

Претензия истца осталась без ответа и удовлетворения, пеня в добровольном порядке ответчиком не погашена, что послужило основанием для обращения ПАО «Россети» в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. 

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Сложившиеся между сторонами правоотношения квалифицированы судом как подлежащие регулированию нормами главы 37 ГК РФ о подряде, а также общими положениями ГК РФ об обязательствах.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ). 

В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. 

В силу пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (статья 708 ГК РФ).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, а часть 2 статьи 9 АПК РФ предусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за период с 01.04.2022 по 10.03.2023 в размере 529 141 руб. 48 коп.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 11.2.1 договора подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику за нарушение сроков окончания работ по договору, в том числе, по причине некачественного выполнения работ – пени в размере 0,2 % от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Учитывая установленный выше факт нарушения ответчиком срока окончания работ по договору, суд полагает, что в данном случае имеются достаточные правовые основания для привлечения ООО «Энергоремсервис» к договорной ответственности в виде начисления пени.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 АПК РФ).

Согласно расчету истца размер пени за указанный выше период составил 529 141 руб. 48 коп. 

Расчет неустойки, произведенный истцом в соответствии с условиями заключенного контракта, проверен судом, и признан арифметически верным. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Оснований для освобождения ООО «Энергоремсервис» от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства судом из материалов дела не установлено. 

Так ответчик указывает на вину обеих сторон в допущении просрочки окончания работ, ссылаясь на те обстоятельства, что заказчиком исходные данные для подготовки инженерных изысканий были переданы подрядчику с нарушением сроков и не в полном объеме. 

При этом доводы ответчика ничем не подтверждены, доказательств факта просрочки заказчиком срока по передаче исходных данных, либо совершения иных действий (бездействия) согласно условиям заключенного договора, суду не представлено, в связи с чем, не могут быть приняты судом и признаны обоснованными.

Вместе с тем, заявляя требование о взыскании неустойки за период с 01.04.2022 по 10.03.2023 в размере 529 141 руб. 48 коп. истец не учел следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей настоящей статьи – мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

В акте Правительства Российской Федерации о введении моратория могут быть указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых распространяется действие моратория.

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве, в том числе не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Целью введения моратория, предусмотренного статьей 9.1 Закона о банкротстве, является обеспечение стабильности экономики путем оказания поддержки отдельным хозяйствующим субъектам. Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 9.1 Закона о банкротстве правила о моратории не применяются к лицам, в отношении которых на день введения моратория возбуждено дело о банкротстве.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Из анализа вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что мораторий на банкротство является адресной мерой государственной поддержки. По общему правилу, действие моратория распространяется на всех подпадающих под него лиц, которые не обязаны доказывать свое тяжелое материальное положение для освобождения от ответственности за нарушение обязательств в период моратория. При этом освобождение от финансовых санкций распространяется как на требования, возникшие до введения моратория, так и на требования, возникшие в период действия моратория. 

Правила о моратории, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497, распространяют свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений (граждане, включая индивидуальных предпринимателей, юридические лица), за исключением лиц, прямо указанных в пункте 2 данного постановления (застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов), независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

С учетом приведенных норм Закона о банкротстве и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, с 01.04.2022 до окончания срока моратория начисление неустойки (пени) на установленную судебным актом задолженность не производится.

На основании изложенного, исковое требование о взыскании пени за период просрочки с 01.04.2022 по 30.09.2022 не подлежит удовлетворению.

Ответчиком также заявлено ходатайство об уменьшении подлежащей взысканию неустойки на основании статьи 333 ГК РФ ввиду ее несоразмерности последствиям нарушенного обязательства. 

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд пришел к следующему.

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ, а также разъяснений пункта 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7) подлежащая уплате неустойка может быть уменьшена судом, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Согласно пункту 71 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7, если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 73 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 Гражданского кодекса РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

В пункте 77 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 разъяснено, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Принимая во внимание, что в данном случае, установленная в договоре неустойка в размере 0,2% от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки является чрезмерно высокой, и значительно превышает действующую в спорный период (на момент исполнения договора, подачи иска и принятия судебного акта) ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, учитывая компенсационный характер неустойки, в целях соблюдения баланса интересов сторон, суд считает возможным уменьшить размер причитающейся к взысканию с ответчика в пользу истца неустойки до 0,1 % от цены договора.

По расчету суда, неустойка (пеня) за период просрочки выполнения работ с 01.10.2022 по 10.03.2023, исходя из ставки 0,1 % от цены договора, составит 123 825 руб. 26 коп.  

При таких обстоятельствах, исковое требование ПАО «Россети» о взыскании с ООО «Энергоремсервис» неустойки полежит удовлетворению частично – в размере 123 825 руб. 26 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать.

Поскольку ответчиком не представлены доказательства погашения долга подлежит удовлетворению также исковое требование о взыскании неустойки (пени) по ставке 0,1% от цены договора в размере 769 101 руб. за каждый день просрочки, начиная с 11.03.2023 по день фактического исполнения обязательства по выполнению работ.

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 13 583 руб. (платёжное поручение от 02.06.2023 № 85648).

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Принимая во внимание, что исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца следует взыскать судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 357 руб.

Руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Энергоремсервис» об уменьшении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворить. 

Исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергоремсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) сумму пени за нарушение сроков окончания работ по договору № 801240 от 20.04.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ по инвестиционному проекту: «Реконструкция ПС 220 кВ Архара (Оснащение инженерно-техническими средствами охраны)» за период с 01.10.2022 по 10.03.2023 в размере 123 825 руб. 26 коп., исходя из ставки 0,1 % (с учетом моратория, установленного Постановлением Правительства  № 497 от 28.03.2022), начиная с 11.03.2023 пени по день фактического исполнения обязательств по договору из расчета 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, а также расходы по государственной пошлине в размере 6 357 руб.   

Арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 АПК РФ.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                           С.М. Курносова