АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-8500/22-47-67

г. Москва

21 июня 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 06 июня 2022года Полный текст решения изготовлен 21 июня 2022 года 

Арбитражный суд в составе судьи Эльдеева А.А., при ведении протокола судебного  заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело  

по исковому заявлению (заявлению) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "ХИМКИМОЛЖАНИНОВО" (141402, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ХИМКИ Г.О.,  ХИМКИ Г., ХИМКИ Г., ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., СТР. 25, ЭТАЖ 19, ПОМЕЩ. 35,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.12.2002, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "РОССЕТИ  МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (115114, 

<

...>, СТР 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН:  

<

***>, КПП: 772501001) о взыскании задолженности в размере 25 308 651, 84 руб.  

при участии представителей: согласно протоколу  

УСТАНОВИЛ:

АО «ХИМКИМОЛЖАНИНОВО» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с  иском к ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» о взыскании 25 308 651, 84 руб.  неустойки по Договору № ИЛ-13-302-978(951553) от 26.07.2013 об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям.  

Истец исковые требования поддержал по изложенным в исковом заявлении  обстоятельствам.  

Ответчик по иску возразил по изложенным в письменном отзыве доводам.  Исследовав письменные доказательства, суд установил.  

Между ООО «Сервисная компания «Индустриальный парк» (реорганизовано путем  присоединения к АО «Химки-Молжапиново», Истец) в качестве Заказчика, и Открытым  акционерным обществом «Московская объединенная электросетевая компания» (после  реорганизации - Публичное акционерное общество «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ  РЕГИОН») в качестве Исполнителя (Ответчик) заключен Договор от 26.07.2013 № ИЛ-13302-978(951553) об осуществлении технологического присоединения к электрическим  сетям (далее «Договор»).  

Согласно п. 2.1.1 Договора Исполнитель в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев  с даты заключения Договора обязуется осуществить мероприятия по технологическому  присоединению, предусмотренные Договором.  

Исполнитель направил в адрес Заказчика акт об осуществлении технологического  присоединения, подписанный со стороны Исполнителя 20 августа 2021 года, что  

подтверждает исполнение условий договора 20 августа 2021 года. При этом стороны  новые сроки подключения не согласовывали, а ранее согласованные сроки не продлевали.  

Пунктом 4.3 Договора предусмотрена неустойка в случае нарушения  Исполнителем срока, установленного пунктом 2.1.1. Договора, которая рассчитывается  как произведение 0,014% ставки рефинансирования Центрального Банка Российской  Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за  технологическое присоединение по Договору за каждый день просрочки.  

Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации,  установленная на дату заключения договора - 5,5%.  

Плата за технологическое присоединение по условиям Договора с учетом  дополнительного соглашения составляет 29 962 059,26 руб.  

Ответчик перечислил обусловленную Договором плату по платежным поручениям  

 № 71 от 22.08.2013 на сумму 11 736 217, 58 руб.,  № 42 от 01.04.2014 на сумму 15 648 290,10 руб.,  № 6 от 15.08.2014 на сумму 11 736 217,58 руб. 

Таким образом размер неустойки рассчитывается как произведение 0,014% ставки  рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации и платы за  технологическое присоединение 0,014*5,5%*29 962 059,26 рублей=23 070,79 рублей за  каждый день просрочки исполнения обязательств.  

Просрочка исполнения обязательств Исполнителем составляет 2218 дней с 27 июля  2015 года.  

Таким образом размер неустойки составляет 23 070,79*2218= 51 171 002, 53 руб. 

С учетом срока исковой давности просрочка исполнения обязательств со стороны  Исполнителя составляет 1097 дней, а размер неустойки составляет сумму в размере 25 308  651,84 руб. (23 070,79*1097=25 308 651,84 рублей).  

Претензий со стороны Ответчика в адрес Истца о порядке и способе исполнения  Истцом технических условий не поступало, при этом фактом подключения  энергопринимающих устройств Истца Ответчик подтвердил выполнение Истцом своих  обязательства в объеме, достаточном для фактического подключения,  замечаний/комментариев в адрес Истца не поступало.  

В соответствии положениями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N  861 (ред. от 30.06.2021) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к  услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» (Далее Правила   № 861) мероприятия по технологическому присоединению включают в себя (см. пункт 18  Правил недискриминационного доступа № 861):  

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их  согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского  управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических  системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с  системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в  технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со  смежными сетевыми организациями;  

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно  обязательствам, предусмотренным техническими условиями;  

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного  участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за  исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о  градостроительной деятельности разработка проектной документации не является  обязательной;  

г) выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление  сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под  действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с  техническими условиями;  

д) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических  условий;  

е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств  должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому  надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также  соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если  технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с  таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах  12.1 - 14 настоящих Правил, осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств  должен осуществляться с участием сетевой организации и заявителя);  

ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов  заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация  коммутационного аппарата в положении "включено”).  

Таким образом, «мероприятия по технологическому присоединению выполняются  сетевой организацией, и только она может нести ответственность за их несвоевременное  исполнение, заказчик исполнить мероприятия по технологическому присоединению не  может в принципе, это противоречит правовой природе договора и Правилам  присоединения, конечным выгодоприобретателем от выполнения работ по договору  возмездного оказания услуг является именно сетевая организация, выгода которой от  исполнения договора заключается в получении денежных средств за выполненные  работы» (см. дела № А40-154290/2020, № А41-60236/2018).  

В свою очередь денежные средства по договору об осуществлении  технологического присоединения оплачены Истцом в полном объеме.  

Указанные обстоятельства явились основаниями для обращения с настоящим  иском в суд.  

Исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям. 

Как установлено судом 26 июля 2013 года между ООО «СК «Индустриальный  парк» и ПАО «Россети Московский регион» (исполнитель, сетевая организация, до  переименования - ПАО «МОЭСК») заключён договор № ИА-13-302-978(951553)  технологического присоединения административно-складского комплекса,  расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0040302:44 по  адресу: Московская область, Химкинский район, к электрической сети ПАО «Россети  Московский регион».  

Технические характеристики энергопринимающих устройств: 

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 4 000  кВт, в том числе по этапам: I этап - 2 000 кВт, II этап - 2 000 кВт;  

- категория надёжности: III (третья); 

- класс напряжения электрической сети, к которой осуществляется технологическое  присоединение: 10 кВ.  

Стоимость договора: 39 120 725 руб. 26 коп., в том числе НДС 18 % в размере 5 967  568 руб. 26 коп.  

Дополнительным соглашением от 15 декабря 2014 года № 1 между ПАО «Россети  Московский регион» и ООО «СК «Индустриальный парк» был изменён объём  выполняемых сетевой организацией мероприятий, приняты к исполнению новые  технические условия от 13 августа 2014 года № 34-08/1248-4423 и, как следствие, изменён  размер платы по договору, который стал составлять 29 962 059 рубль 26 коп. (включая  НДС 18 % в размере 4 570 483 руб. 26 коп.).  

Вследствие этого, со стороны сетевой организации образовалось неосновательное  обогащение в виде разницы между оплаченной суммой (39 120 725 руб. 26 коп.) и  стоимостью договора (29 962 059 руб. 26 коп.) в размере 9 158 666 руб., которую ПАО  «Россети Московский регион» перечислило на расчётный счёт ООО «СК  «Индустриальный парк» платёжным поручением от 07.05.2015 № 16653.  

28 ноября 2019 года ООО «СК «Индустриальный парк» прекратило свою  деятельность реорганизацией путём присоединения к АО «Химки-Молжаниново» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее - заявитель, заказчик) о чём имеется запись в  едином государственном реестре юридических лиц.  

Следовательно, правопреемником ООО «СК «Индустриальный парк» и  действующим заказчиком по договору № ИА-13-302-978(951553) является АО «ХимкиМолжаниново».  

Процесс технологического присоединения энергопринимающих устройств  заявителя к электрической сети сетевой организации (далее - технологическое  присоединение) установлен статьёй 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об  электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) и Правилами технологического  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого  хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям  (далее - Правила технологического присоединения), утверждёнными Постановлением  Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.  

Сетевая организация в своей части мероприятия по технологическому  присоединению выполнила и 25 мая 2021 года направила в адрес АО «ХимкиМолжаниново» подписанное со своей стороны дополнительное соглашение № 2 об  изменении стоимости договора в связи с увеличением ставки НДС до 20 процентов (до  размера 30 469 890 руб. 77 коп., в том числе НДС 5 078 315 руб. 13 коп.), а также  подписанный со своей стороны акт об осуществлении технологического присоединения, в  котором кроме технических характеристик технологического присоединения указана  также и стоимость технологического присоединения, которая составляет 30 469 890 руб.  77 коп., в том числе НДС именно 20 %, в размере 5 078 315 руб. 13 коп., в результате чего  со стороны заказчика образовалась задолженность в размере 507 831 руб. 51 коп.  Корреспонденция получена ответчиком 4 июня 2021 года.  

От заказчика в предельно разумный срок не поступили ни подписанный с его  стороны акт об осуществлении технологического присоединения, ни возражение против  этого акта, ни какое-либо иное письмо.  

По этой причине исполнитель, выдержав разумный срок для возвращения  заказчиком по договору подписанного со своей стороны акта об осуществлении  технологического присоединения либо мотивированного возражения на него, на  основании пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сделал  отметку в этом же акте об осуществлении технологического присоединения о  неподписании заказчиком акта, подписал его ещё раз со своей стороны и проставил дату20 августа 2021 года.  

После этого, 2 сентября 2021 года истец направил претензию об оплате  образовавшейся задолженности в рамках соблюдения обязательного досудебного порядка  урегулирования спора с предоставлением подписанного акта об осуществлении  технологического присоединения от 20 августа 2021 года.  

Претензия получена 6 сентября 2021 года. Задолженность заказчик оплачивать  отказался и после обращения сетевой организации в Арбитражный суд города Москвы  решением от 10 января 2022 года по делу № А40-227960/2021 с АО «ХимкиМолжаниново» в пользу ПАО «Россети Московский регион» было взыскано 507 831 руб.  51 коп.  

Основания для отказа в иске.  

На основании ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не  

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с п.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор  не обязан доказывать причинение ему убытков.  

В соответствии с пункта 2.3.2 договора заказчик обязуется выполнить технические  условия к договору в течение срока их действия и в течение 10 (десяти) рабочих дней  после выполнения технических условий письменно уведомить об этом исполнителя.  

Срок исполнения мероприятий со стороны сетевой организации составляет 24  месяца с даты заключения договора, однако это правило действует исключительно при  соблюдении заказчиком установленных для него положений договора (пункт 2.1.1),  например, обязанности об оплате договора (пункт 2.3.1 договора) и выполнении  технических условий в своей части (пункт 2.3.2 договора).  

В случае нарушения заказчиком срока выполнения своих мероприятий, сетевая  организация на основании абзаца 2 пункта 2.1.1 договора вправе в одностороннем порядке  увеличить срок выполнения своих обязательств на соответствующий срок просрочки  заказчика.  

В соответствии с пунктом 4.3 договора в случае нарушения исполнителем срока,  установленного пунктом 2.1.1 договора, при отсутствии нарушения заказчиком  обязательств, установленных пунктами 2.3.1, 2.3.2 договора, за исключением 2.1.8  договора, исполнитель обязан оплатить заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с  даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки  рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату  заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по  договору за каждый день просрочки.  

Основанием для взыскания неустойки с сетевой организации, является отсутствие  нарушений со стороны заявителя, полное соблюдение им условий договора.  

Однако отсутствие уведомления со стороны заявителя об исполнении мероприятий  в своей части в адрес сетевой организации свидетельствует об их неисполнении  заявителем.  

Ни до момента направления сетевой организацией 25 мая 2021 года  дополнительного соглашения № 2 об изменении стоимости договора в связи с  увеличением ставки НДС до 20 процентов, ни до даты подписания сетевой организацией  акта об осуществлении технологического присоединения в одностороннем порядке 20  августа 2021 года заявитель не направил уведомления об исполнении им мероприятий по  технологическому присоединению.  

Сравнительный анализ изложенных выше положений договора показывает  следующий порядок исполнения договора:  

- заказчик и сетевая организация обязаны одновременно выполнять мероприятия в  своей части;  

- заказчик обязан уведомить сетевую организацию об исполнении заказчиком в  своей части мероприятий по технологическому присоединению;  

- сетевая организация выполняет свои мероприятия в течение 24 месяцев с даты  заключения договора при условии выполнения заказчиком мероприятий,  предусмотренных техническими условиями;  

- сетевая организация не обязана уведомлять заказчика о выполнении мероприятий  по технологическому присоединению в своей части, поскольку основанием для взыскания  с сетевой организации неустойки является одновременное исполнение заказчиком  мероприятий в своей части и неисполнение мероприятий сетевой организацией в своей  части;  

- заказчик имеет право на взыскание с исполнителя неустойки только в случае  отсутствия нарушений договора со своей стороны, а со стороны заказчика  предусмотренные техническими условиями мероприятия по сей день не выполнены.  

Акт об осуществлении технологического присоединения,  составленный ПАО «Россети Московский регион», правомерность которого подтверждена  вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 10 января  2022 года по делу № А40- 227960/2021, подтверждает исполнение мероприятий по  технологическому присоединению только со стороны сетевой организации.  

Об этом свидетельствует акт об осуществлении технологического присоединения  от 20 августа 2021 года № 1/ИА-13-302-978(951553) в следующих его пунктах:  

а) в пункте 2 - не указана величина номинальной мощности присоединённых  трансформаторов (кВА), поскольку сетевой организации эта величина неизвестна по  причине отсутствия исполнения договора со стороны АО «Химки Молжаниново» и  уведомления об этом сетевой организации;  

б) в пункте 3 - наименование электроустановки (оборудования) заявителя:  «Болтовое соединение кабельных наконечников КЛ-10 кВ в СП-10 кВ в направлении ЭПУ  заявителя». Болтовое соединение не может быть энергопринимающим устройством, а  указано оно именно потому, что сведения об электроустановке (оборудовании) у сетевой  организации просто отсутствуют по причине отсутствия уведомления об этом со стороны  заявителя.  

Более того, у ПАО «Россети Московский регион» отсутствует акт об  осуществлении технологического присоединения объектов АО «Химки-Молжаниново» к  электрической сети сетевой организации, подписанный со стороны АО «ХимкиМолжаниново».  

Со стороны АО «Химки-Молжаниново» не получено уведомление об исполнении  заказчиком мероприятий в своей части.  

Об этом прямо свидетельствует пункт 7.1 акта об осуществлении технологического  присоединения: «Подача напряжения на энергопринимающие устройства заявителя будет  осуществлена после уведомления заявителем сетевой организации о выполнении  заявителем технических условий, проверки сетевой организацией выполнения заявителем  технических условий в своей части, отсутствии замечаний по выполнению технических  условий».  

Подписанный со стороны ПАО «Россети Московский регион» акт об  осуществлении технологического присоединения по договору № ИА-13-302-978(951553)  от 20 августа 2021 года в сетевую организацию не поступил.  

Таким образом, подтверждено исполнение мероприятий по техническим условиям  только со стороны сетевой организации.  

Учитывая изложенное, просрочка со стороны ответчика отсутствует, исковые  требования удовлетворению не подлежат.  

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании ст.ст. 1, 10, 309, 310, 330, 779 ГК РФ, ст.ст.153, 154, 158 ЖК РФ,  руководствуясь ст.ст. 64, 65, 104, 110, 123, 124, 167-171 АПК РФ суд  

РЕШИЛ:

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья А.А. Эльдеев 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 11.01.2022 5:38:33

Кому выдана ЭЛЬДЕЕВ АРСЛАН АЛЕКСЕЕВИЧ