4473/2018-481761(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-894/2018

22 августа 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 августа 2018 года. Полный текст решения изготовлен 22 августа 2018 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Сергеева О.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Панюшкиным Н.В.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ИНВЕСТ" (адрес: Россия  125080, г МОСКВА, 

<

...> ОГРН: 

<

***>);  

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "БПС" (адрес: Россия 191015,  Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 51. лит. А, ОГРН: 

<

***>);  

о взыскании 13 751 116 руб. 87 коп. 

при участии - от истца: ФИО1 по доверенности от 21.12.17, - от ответчика: ФИО2 по доверенности от 14.03.18, 

установил:

ООО "СТРОЙСНАБ" обратилось с исковым заявлением о взыскании с ООО  "БПС" 13 651 116 руб. 87 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 100 000  руб. 00 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами на основании  договора уступки права требования от 01.12.17.  

В связи с расторжением по соглашению сторон договора уступки права  требования (цессии) от 01.12.17 по заявлению ООО "СТРОЙСНАБ" определением от  15.08.18 истец заменен на ООО "АЛЬФА ИНВЕСТ".  

До принятия решения истец в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил исковые  требования и просит взыскать 18 037 293 руб. 58 коп. задолженности по договору  субподряда № 26/11-13 от 26.11.13 и 5 328 257 руб. 07 коп. процентов за пользование  чужими денежными средствами.  

Уточнения приняты судом. Ответчик иск отклонил. Судом установлено: 

Между ООО "БПС" – подрядчик и ООО "АЛЬФА ИНВЕСТ" – субподрядчик был  заключен договор субподряда № 26/11-13 от 26.11.13 на выполнение строительно- монтажных работ на объекте «гарнизонный дом офицеров» в городе Мирный  Архангельской области.  

Согласно п.3.1 цена договора составляет 42 611 240 руб. 77 коп.  

Согласно подписанному сторонами акту сверки расчетов по состоянию на  31.12.14 работы выполнены истцом на общую сумму 62 659 667 руб. 34 коп.  

С учетом частичной оплаты задолженность ответчика по оплате работ в  настоящее время составляет 18 037 293 руб. 58 коп. и подлежит взысканию.  

Проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 5 328 257 руб.  07 коп. взысканию не подлежат, в связи с неисполнением истцом требований  Федерального закона от 29.12.12 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» по  открытию отдельного счета.  

Ответчик письмами от 03.11.15 исх. № 158, от 20.12.16 исх. № 147 предлагал  истцу открыть отдельный счет в любом отделении АО «Газпромбанка» для погашения  суммы задолженности.  

Истец требования действующего законодательства своевременно не исполнил,  поэтому нет оснований для возложения ответственности за просрочку платежа на  ответчика.  

Расходы по государственной пошлине в размере 91 756 руб. 00 коп. относятся на  ответчика. В связи с увеличением суммы иска с ответчика подлежит взысканию в доход  федерального бюджета 21 430 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Руководствуясь статьями 309, 310, 395, 711 Гражданского кодекса Российской  Федерации, статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БПС" в пользу общества  с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ИНВЕСТ" 18 037 293 руб. 58 коп.  задолженности и 91 756 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БПС" в доход  федерального бюджета 21 430 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Сергеева О.Н.