Арбитражный суд Псковской области

ул. Свердлова, 36, г. Псков, 180000

http://pskov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А52-1251/2024

город Псков

12 августа 2024 года

Резолютивная часть решения оглашена 29 июля 2024 года

 

Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Лазаревой С.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Лосевой Э.А., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации Плюсского района Псковской области  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>)

к акционерному обществу «Хатман Групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 141402, 

<

...>, к.Д, помещ.27)

о взыскании 66 175 632 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 глава района,  ФИО2 - представитель по доверенности;

от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Администрации Плюсского района Псковской области  (далее – истец, Администрация) обратилась в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Хатман Групп» (далее – ответчик, Общество) уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ и принятым протокольным определением от 15.05.2024, о взыскании 72 006 910 руб. 43 коп., в том числе 60 890 328 руб. 29 коп. основного долга, 724 306 руб. 90 коп. штраф, 4 560 997 руб. 34 коп. пени, 5 831 277 руб. 90 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами 15.09.2023 – по 06.05.2024 и далее проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неоплаченного долга за каждый день просрочки по день фактического погашения долга из расчета ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей в соответствующие периоды.

В судебном заседании представители истца исковые требования поддержали в полном объеме по основаниям изложенным в исковом заявлении и дополнениях к нему.

Ответчик каких-либо ходатайств, возражений не представил, будучи надлежащим образом, извещенным о времени и месте рассмотрения дела.

В порядке части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) стороны извещены арбитражным судом о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу по адресам регистрации согласно сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц.  Кроме того, электронный образ определения суда от 11.03.2024, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, размещен на официальном ресурсе «Картотека арбитражных дел», что подтверждается отчетом о публикации судебного акта. Соответствующие доказательства в материалах дела имеются.

Определения суда направлены ответчику по юридическому адресу. В соответствии с частью 4 статьи 121 АПК РФ судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического лица, которое определяется на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Корреспонденция суда, направленная в адрес ответчика, была возвращена органом связи с отметкой «истек срок хранения». Неполучение корреспонденции по месту регистрации, в связи с отсутствием по данному адресу или несовершение действий по получению почтовой корреспонденции, является риском ответчика, влекущим для него неблагоприятные последствия. При таких обстоятельствах извещение ответчика о начавшемся судебном процессе является соответствующим статье 123 АПК РФ.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав имеющиеся в деле письменные доказательства, выслушав представителей истца, суд установил следующее.

Между Администрацией (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Хатман Групп» (правопреемник Акционерное общество «Хатман Групп») (подрядчик) 18.11.2022 по результатам открытого конкурса в электронной форме заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Строительство Центра культурного развития на 125 мест в 

<

...>» (ИКЗ 223601600082560160100100270014120414) (далее – Контракт), по условиям которого Подрядчик принимает на себя генеральный подряд на выполнение работ по объекту: «Строительство Центра культурного развития на 125 мест в 

<

...>)» (далее - работы) в соответствии с описанием объекта закупки и Ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение № 1 к Контракту), проектной документацией, графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к  контракту), сметой контракта и Перечнем видов и объемов работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц. Своевременно сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Контракта.

В соответствии с пунктом 1.6 Контракта результатом выполненной работы является построенный объект капитального строительство, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.

Пунктом 2.1 контракта определены следующие календарные сроки исполнения Контракта: контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.12.2023, а в части исполнения обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

Подрядчик выполняет работы с момента заключения контракта до 15.12.2023 (с учетом срока приемки законченного строительством объекта Заказчиком).

Согласно пункту 2.2. контракта объем работ по Контракту должен быть исполнен по месяцам в соответствии с Графиком.

Пунктом 3.4 контракта предусмотрено авансирование в размере 30% от цены Контракта.

15.09.2022 Заказчиком заключен договор с Управлением капитального строительства о проведении строительного контроля №16/08/2022.

Согласно протоколу рабочего совещания по подготовке документации и строительству Центра культурного развития в с. Ляды в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» от 25.11.2022 Общество проинформировало, что оно готово приступить к работам до 10.12.2022, подтвердило получение рабочей документации с указанием сроков ознакомления 20 дней без препятствий к началу выполнения работ, а также перечень работ со сроком исполнения до 31.12.2022 будет направлен Обществом в срок до 01.12.2022.

30.11.2022 между Заказчиком и Обществом подписан акт приема-передачи строительной площадки.

06.12.2022 между Обществом и АО «Авиапромстрой» заключен договор подряда №20/П/ХТМ-АПС (предмет договора: строительство объекта).

07.12.2022 между АО «Авиапромстрой» и ООО «СтройРекорд» заключен договор субподряда №20/СП/АПС-СТР (предмет договора: строительство объекта).

08.12.2022 письмом №52 ООО «Строй рекорд» информирует Заказчика о заключении договор субподряда №20/СП/АПС-СТР с АО «Авиапромстрой» (предмет договора: строительство объекта). Также требует от заказчика решения вопроса в части технологического присоединения объекта к электросетям на период строительства, поскольку из пояснений электроснабжающей организации, подключение по временной схеме мощностью 120 кВт отсутствует.

08.12.2022 Заказчиком выплачен аванс на сумму 43 458 414 руб. (платежное поручение  от 08.12.2022№593900).

12.12.2022 (исх. №477-ОД) Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области выносит приказ о внесении изменений в Реестр объектов капитального строительства «Строительство центра культурного развития на 125 мест в зале по адресу: Псковская область, Плюсский район, СП «Лядская волость», 

<

...>».

Согласно протоколу совещания о строительстве объекта Центра культурного развития на 125 мест в с. Ляды от 14.12.2022 рекомендовано Заказчику направить в адрес Общества планы проверок от Государственного строительного надзора; Обществу рекомендовано обеспечить техническое присоединение объекта к энергоносителям (дизельный электрогенератор или временная комплексная трансформаторная подстанция) в срок до 30.12.2022, а также подать заявку об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» в срок до 21.12.2022.

20.12.2022 (исх. СХ-07/5140) Протокол совещания о строительстве объекта Центра культурного развития на 125 мест в с. Ляды. Заказчику рекомендовано направить  в адрес Общества планы проверок от государственного строительного надзора. Обществу рекомендовано обеспечить техническое присоединение объекта к энергоносителям (дизельный электрогенератор или временная комплексная трансформаторная подстанция в срок до 30.12.2022, а также подать заявку об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Северо-Запад" в срок до 21.12.2022.

27.12.2022 (исх. №12/2701) Общество направляет в адрес Заказчика запрос о направлении ответственного представителя заказчика 28.12.2022 для составления акта ГРО в соответствии с приложением №1 передачи реперов на местности.

29.12.2022  ООО «Стройрекорд» направляет в адрес заказчика заявление о выдаче разрешения на проведение земляных работ.

30.12.2022 составлен акт №1/ЦКР приемки геодезической разбивочной основы для строительства.

30.12.2022         (исх. №355) Администрация сельского поселения «Лядская волость» направляет ООО «СтройРекорд» разрешение на производство земляных работ.

            10.01.2023 составлен акт освидетельствования скрытых работ №1 (вид работ: валка деревьев с последующей корчевкой пней в границах земельного участка КН 60:16:0060106:1 Оси 7-9/А-Ж). Начало работ 09.01.2023 - окончание работ 10.01.2023 (1 день). Разрешение на производство работ по разработке котлована механизированным способом.

21.01.2023 составлен акт освидетельствования и приемки котлована №1 (устройство фундаментов и монолитных стен).

24.01.2023 составлен акт освидетельствования скрытых работ №2 (вид работ: устройство котлована) Начало работ 15.01.2023 - окончание работ 24.01.2023 (9 дней). Разрешение на производство работ по устройству основания из щебня.

30.01.2023 (исх. №53) ООО «Стройрекорд» направляет в адрес Заказчика предъявительское письмо, с требованием направить уполномоченного представителя заказчика для освидетельствования скрытых работ и приемки работ по устройству котлована, в срок до 12 часов 00 минут 31.01.2023.

02.02.2023 (исх. №268) Управление капитального строительства направляет в адрес Заказчика и Общества выявленные в результате контроля замечания (нарушение сроков выполнения работ по устройству фундаментов, монтажу металлоконструкций, лестниц и др; не предоставление исполнительной документации от ООО "Хатман-Групп" (общий журнал работ; проект производства работ и др).

03.02.2023 (исх. №428) Заказчик направляет ООО «Августина» предложение о заключении договора авторского надзора по объекту как с исполнителем ПСД. В случае невозможности согласовать заключение авторского надзора с другой организацией.

03.02.2023 (исх. №430) Заказчик требует от Общества предоставить: проект производства работ; исполнительную геодезическую схему на котлован, заверенную геодезистом; акт освидетельствования и приёмки котлована; общий журнал работ; журнал входного контроля в срок до 08.02.2023. Также Заказчик требует устранить отставание от графика производства работ, и установить видеонаблюдение.

03.02.2023 (исх. №12) ООО «Августина» сообщает Заказчику о невозможности произвести авторский надзор, в связи с большой занятостью и отдаленностью объекта.

07.02.2023  ООО «РегионТехСтрой» направляет Заказчику Протокол №1 проверки уплотнения устройства щебеночного основания дна котлована (заключение: коэффициент уплотнения соответствует проекту и нормативном требованиям).

08.02.2023 Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области формирует Протокол осмотра (внеплановая выездная проверка).

09.02.2023 (исх. №60) ООО «Стройрекорд» информирует Заказчика о нехватке информации в проекте КР (12 пунктов: отсутствие прогонов покрытия, нет привязок стоек СТ относительно осей и др). Документация в части раздела КМ не соответствует пунктам 5 и 6 ГОСТ 21.502-2016 «Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций». При этом в составе документации отсутствует раздел КМ, без которого последующая разработка КМД и изготовление металлоконструкций невозможна. Также требует от Заказчика предоставить недостающую документацию.

10.02.2023 (исх. №14) Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области формирует Акт выездной проверки.

10.02.2023 (исх. №523) Заказчик направляет запрос ООО «СпектрСтройПроект» о рассмотрении запроса ООО «Стройрекорд» №60 от 09.02.2023 и требует направить ответ обратно Заказчику.

14.02.2023 (исх. №569) Заказчик направляет Комитету по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области ссылку на видеонаблюдение и инструкцию по установке по объекту Строительства.

15.02.2023 (исх. №593) Заказчик направляет в адрес общества претензию (требование) в связи с просрочкой обязательств, предусмотренных контрактом №20 от 18.11.2022. Требует ускорить выполнение работ, в том числе увеличить число работников, в срок до 17.02.2023.

16.02.2023 (исх. №62) ООО «Стройрекорд» направляет в адрес Заказчика предъявительское письмо, с требованием направить уполномоченного представителя заказчика для освидетельствования скрытых работ и приемки работ по проливу основания из щебня горячим битумом, в срок до 12 часов 00 минут 17.02.2023.

28.02.2023 (исх. №64) ООО «Стройрекорд» информирует Заказчика о выявленных недостатках в рабочей документации Том 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 0420-КР (4 пункта: отсутствует узел примыкания монолитной стены к колоннам в осях 1-2/В, 7/В-Г, отсутствует узел прохода стены монолитной через монолитную балку в осях 1/Е-Ж и 1/И.) Требует от Заказчика в кратчайшие сроки устранить недостатки.

01.03.2023 протоколом совещания по вопросу строительства №2 ООО «Стройрекорд» поручено продолжить работы по армированию, устройству опалубки фундаментов, до выполнения работ в полном объеме.

01.03.2023 (исх. №3689-12-02) Министерство культуры Российской Федерации направляет в адрес Общества уведомление о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по видам работ, в том числе реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем; реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей и др.

01.03.2023 (исх. №167) ЗАО «Псковский трест инженерно-строительных изысканий» направило в адрес Заказчика акт контрольного осмотра котлована.

01.03.2023 (исх. №715) Заказчик направляет ООО «СпектрСтройПроект» на рассмотрение запрос ООО «Стройрекорд» №64 от 28.02.2023.

02.03.2023 (исх. №СХ/11-08/430) (ответ на исх. №269 от 14.02.2023) Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области требует от Заказчика предоставить ссылку онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующую подпункту «а» пункта 4.3.13 Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 02.02.2023 №58643000-1-2023-008, подпункту «б» пункта 14 государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной постановлением Правительства от 31.05.2019 №696.

03.03.2023 ЗАО «Псковский трест инженерно-строительных изысканий» направило в адрес Заказчика акт контрольного отбора проб грунта.

07.03.2023 (исх. №67) ООО «Стройрекорд» направляет в адрес Заказчика запрос о согласовании выполнения рабочего шва бетонирования на отм. -3.100 (в связи с оптимизацией строительного процесса по устройству монолитных фундаментов ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4, ФМ-5).

07.03.2023 (исх. №774) Заказчик требует от общества в кратчайшие сроки обеспечить видеонаблюдение на объекте в соответствии с условиями контракта.

09.03.2023 (исх. №784) Заказчик направляет ООО «СпектрСтройПроект» запрос о согласовании выполнения рабочего шва бетонирования на отметке - 3,100 по прилагаемой схеме (письмо ООО «Стройрекорд» от 07.03.2023№67).

09.03.2023 (исх. №68) ООО «Стройрекорд» информирует Заказчика, о передаче 01.03.2023 разработанных схем каркасов и монтажных схем представителю авторского надзора с перечнем вопросов, однако по состоянию на 09.03.2023 ответа о разрешении вопросов не поступало.

10.03.2023 (исх б/н) Протокол совещания по вопросу строительства №3. ООО «Стройрекорд» рекомендовано обеспечить локальный прогрев основания, заливку фундаментов, геодезический контроль выполненных работ не менее 2 раз в неделю с фиксацией отметок в отдельном журнале в срок до выполнения работ в полном объеме. Обеспечить организацию постоянного видеонаблюдения за объектом и предоставить ссылку на видеокамеру в соответствии с требованиями. Продолжить работы по армированию, устройству опалубки фундаментов, до выполнения работ в полном объеме. ООО «СпектрСтройПроект» обеспечить внесение изменений в проектную документацию, предусмотрев производство работ по прогреву основания, геодезическому контролю за отметками, компенсирующие мероприятия по отклонению в отметках фундаментов. В срок до 17.03.2023.

14.03.2023 (исх. №663) Управление капитального строительства направляет в адрес Заказчика и общества, выявленные в результате контроля замечания (7 пунктов: нарушение условий хранения материалов и конструкций на объекте (на улице без навеса); ведение работ до получения акта контрольного осмотра котлована; нарушение сроков выполнения работ (отставание от графика производства) и иные нарушения).

15.03.2023 (исх. №835) Заказчик сообщает ООО «Стройрекорд» о ранее направленных схемах каркасов (металлоконструкций) и монтажных схем, и требует направить ответ о согласовании схем каркасов и монтажных схем, также направить ответ в адрес ООО «Стройрекорд».

16.03.2023 (исх. №850) Заказчик информирует общество об установлении фактов не устранения замечаний, изложенных в Журнале строительного контроля. Также 14.03.2023 от управления капитального строительства поступило письмо с указанием о неисполнении подрядной организацией мероприятий необходимых для устранения замечаний, в связи с чем требует от Общества устранить все замечания, выявленные управлением капитального строительства и предоставить информацию об устранении, в срок до 20.03.2023.

16.03.2023 ООО «РегионТехСтрой» направляет Заказчику Протокол №2 Неразрушающий контроль прочности бетона, определение фактического класса бетона (заключение: бетонное основание Фм-1, Фм-2, Фм-3, Фм-4, Фм-5, ФЛм1 соответствует 100% от проектной прочности).

16.03.2023 (исх. №853) Заказчик направляет в адрес Общества и ООО «Стройрекорд» с требованием устранить выявленные Управлением капитального строительства замечания, произвести испытания бетона, согласовать с авторским надзором и приступить к работам согласно ранее направленному в адрес Заказчика графику (работы по заливке фундамента должны начаться 17.03.2023).

17.03.2023 (исх. №75) ООО «Стройрекорд» направляет в адрес Заказчика протокол лабораторных испытаний бетонного основания фундаментов и монолитных стен, подтверждающих марку бетона. Также информирует Заказчика о направлении предъявительского письма от 30.01.2023 №53 по устройству котлована. Прилагает комплект подписанной исполнительной документации, однако на момент подписания авторский надзор отсутствовал. Планирует произвести заливку бетона 21.03.2023.

21.03.2023 Протокол совещания по вопросу строительства №4: Обществу совместно с ООО «СтройРекорд» и Управлением капитального строительства, необходимо внести в проект производства работ мероприятия, предусматривающие работу в зимний период и обеспечить геодезический контроль за отметками, с последующим направлением результатов в адрес Управления капитального строительства и ООО «СпектрСтройПроект». А также обеспечить освидетельствование в присутствии специалиста Управления капитального строительства во взаимодействии субподрядной организации ООО «СтройРекорд» подбетонного слоя основания под фундаментами с оформлением соответствующего протокола в срок до 27.03.2023. ООО «СтройРекорд» необходимо  обеспечить организацию постоянного видеонаблюдения за объектом и предоставить Заказчику и Комитету по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области ссылку на видеокамеру в соответствии с требованиями.

22.03.2023 ООО «Экспертбетон» издает протокол №288 "Испытание под бетонки бетона В7.5 неразрушающим методом контроля (заключение: доля фактической прочности бетона под бетонки от проектной 74,2 %) .

22.03.2023 (исх. 22-03-2023-АН) (ответ на письмо №784 от 09.03.2023) ООО «СпектСтройПроект» информирует Заказчика о согласовании выполнения рабочего шва бетонирования на отметке -3,100 при условии предоставления схемы организации рабочего холодного шва бетонировании при соблюдении требований СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», при этом неоговоренные специально в проектной и рабочей документации швы должны выполняться с внесением в проект производства работ и исходя из своих технологических возможностей. Также сообщает, что по состоянию на 22.03.2023 письмо ООО «Стройрекорд» от 07.30.2023№67 не предоставлено.

ООО «Экспертбетон» направляет ООО «СтройРекорд» протокол №289 о проведении испытаний контрольных образцов бетона на прочность (заключение: фактический класс бетона монолитных конструкций (схема Г) соответствует классу В7,5, согласно ГОСТ 18105-2010).

23.03.2023 (исх. №797) Управление капитального строительства направляет в адрес Заказчика выявленные в результате контроля замечания (существенное отставание от сроков выполнения работ; часть работ не сдана и не принята Управлением капитального строительства, так как  документы не предоставлялись; нарушение иных сводов правил по строительству).

24.03.2023 (исх. №76) ООО «Стройрекорд» направляет в адрес Заказчика и АО «Авиапромстрой» ППР с устраненными замечаниями и сканы протоколов лабораторных испытаний бетонного основания фундаментов. Также требует в кратчайшие сроки рассмотреть документацию и санкционировать проведение работ по бетонированию фундаментов и монолитных стен на отм. -3.700.

27.03.2023 (исх. №78) ООО «Стройрекорд» направляет в адрес Заказчика и АО «Авиапромстрой» требование о  направлении ответов на письма (№60 от 09.02.2023, №64 от 28.02.2023, №68 от 09.03.2023) в срок до 29.03.2023.

28.03.2023 (исх. №953) Заказчик направляет Обществу претензию об устранении нарушений обязательств по муниципальному контракту №20 от 18.11.2022.        Ранее Заказчиком 07.03.2023 Обществу направлялось письмо №774 с разъяснением, что ссылка для скачивания не соответствует требованиям Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации,  а также требует от общества обеспечить видеонаблюдение в режиме реального времени за строительством объекта в течение всего периода выполнения работ на объекте в течение 10 рабочих дней с момента получения.

28.03.2023 Протокол совещания по вопросу строительства №5: ООО «Стройрекорд» разрешено выполнение работ по устройству монолитных фундаментов с условием обследования грунта котлована в срок до полного выполнения. Также ООО «СтройРекорд» рекомендовано согласовать дальнейшее действие по устройству монолитных фундаментов во взаимодействии с Управлением капитального строительства, в срок до 30.03.2023, организовать обследование грунта котлована и предоставить акт обследования,  в срок до 04.04.2023,  обеспечить организацию постоянного видеонаблюдения за объектом и предоставить ссылку на видеокамеру в соответствии стребованиями, в срок до 05.04.2023. ООО «Стройрекорд» необходимо доработать проект производства работ, а Управлению капитального строительства обеспечитьпроверку проекта производства работ. ООО «СпектрСтройПроект»предоставить письменное заключение по вопросам обращений №60 от09.02.2023, №64 от 28.02.2023, №68 от 09.03.2023,  в срок до 03.04.2023.

30.03.2023 (исх. №2) Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области направляет Заказчику предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при обеспечении организации производства работ (не предоставление Управлению капитального строительства документации в необходимом объеме при организации работ по устройству котлована ).

30.03.2023 (исх. №878) Управление капитального строительства направляет в адрес Заказчика и Общества результаты испытаний прочности бетонной подготовки проведенной службой контроля ООО «ПК «ЖБИ-1» (протоколы испытаний №247 от 25.03.2023, №248 от 25.03.2023, №249 от 27.03.2023), а также информирует о необходимости выполнения демонтажных работ существующих бетонных подготовок и заливке новых с соблюдением технологии производства.

31.03.2023 (исх. 31/2-03-2023-АН) ООО "СпектрСтройПроект" направляет в адрес заказчика пояснения на письмо №987 от 31.03.2023. (ответ на письма ООО «СтройРекорд» №60 от 09.02.2023, №606 от 16.02.2023, №64 от 28.02.2023, №68 от 09.03.2023, №175 от 01.03.2023, №835 от 15.03.2023, №78 от 27.03.2023), о том что рабочая документация по объекту не может быть использована для выполнения строительно-монтажных работ в полном объёме (нет узла крепления стоек СТ к балкам покрытия; отсутствуют узлы опирания прогонов на стены).

 04.04.2023 (исх. №264) ЗАО Псков ТИСИЗ направляет ООО «СтройРекорд» результаты работ по определению грунта (после оттаивания) в котловане и его плотности из проб, отобранных в котловане строящегося объекта, с рекомендациями.

04.04.2023 Протокол совещания по вопросу строительства №6.Решено  проработать вопрос о расторжении договора с ООО «СпектрСтройПроект» и обеспечить заключение договора с другой организацией в целях осуществления авторского надзора на объекте. В срок до 14.04.2023. ООО «СтройРекорд» рекомендовано продолжить выполнения работ по устройству монолитных фундаментов между осями «1 -4» и «А-Л», устройству подбетонного слоя в осях «5-9», в срок до выполнения работ в полном объеме, а также предоставить акт обследования грунта котлована в срок до 07.04.2023, обеспечить организацию постоянного видеонаблюдения за объектом и предоставить ссылку на видеокамеру в соответствии с требованиями в  срок до 10.04.2023.

04.04.2023 (исх. №04/0404) (ответ на исх. №1005 от 31.03.2023) Общество информирует Заказчика о предоставлении документации (8 пунктов) в момент приемки выполненных работ представителю управления капитального строительства. Однако были выявлены замечания по оформлению, после исправления документация будет направлена в управление капитального строительства в срок до 04.04.2023. Также Обществом даны ответы на вопросы и по перечню замечаний, внесенных в журнал работ представителем Управления капитального строительства.

13.04.2023 Протокол совещания по вопросу строительства. Заказчик должен провести проверку устранения замечаний, указанных в журнале работ, с оформлением снятия замечаний в журнале в срок до 20.04.2023, связаться с ООО «ГрандСитиСтрой» для получения приказа ответственного лица за проведение авторского надзора по ЦКР в срок до 17.04.2023, совместно с ООО «СтройРекорд» откорректировать график выполнения работ по строительству ЦКР в срок до 17.04.2023. ООО «СтройРекорд»должен  обеспечить проведение испытаний подбетонки и готовых частей фундаментов, предоставить протокол испытаний в срок до 20.04.2023, продолжить выполнение работ по армированию, устройству опалубки фундаментов, устройству фундаментов, в сроск до полного выполнения. Во взаимодействии с авторским надзором (ООО «ГрандСитиСтрой») рекомендовано проработать вопрос устройства холодного шва в стене монолитной.

19.04.2023 (исх. №86) ООО «Стройрекорд» направляет Заказчику запрос о согласовании выполнения рабочего шва бетонирования на отметке 0,000.

24.04.2023 (исх. №1263) Заказчик направляет ООО «ГрандСитиСтрой» запрос о согласовании выполнения рабочего шва бетонирования на отметке 0,000. (по запросу ООО «Стройрекорд» №86 от 19.04.2023).

24.04.2023 (исх. №1266) Заказчик направляет ООО «ГрандСитиСтрой» запрос о согласовании обратной засыпки котлована песком, выемка которого была произведена при устройстве котлована, либо направит мотивированный отказ.

26.04.2023 (исх. №04/2603) Общество направляет в адрес Заказчика на согласование КМД, разработанный заводом изготовителем. А также просит Заказчика направить КМД в адрес авторского надзора и автора проекта, в случае отсутствия замечаний согласовать документацию для отправки на завод-изготовитель.

27.04.2023 (исх. №1303) Заказчик направляет ООО «ГрандСитиСтрой» запрос о проверке и согласовании КМД.

03.05.2023 (исх. №1360) Заказчик информирует от ООО «ГрандСитиСтрой» о дате и времени рабочего совещания, в связи с чем, требует предоставить ответы на письма Заказчика №1266 от 24.04.2023 (о согласовании обратной засыпки котлована) и №1303 от 27.04.2023 (о согласовании КМД) в срок до 10.05.2023 либо направить представителя к началу рабочего совещания 12.05.2023 к 14 час. 30 мин.

11.05.2023 (исх. №64) (ответ на письмо №1303 от 27.04.2023) ООО «ГрандСитиСтрой» сообщает Заказчику, что проверка и согласование деталировочных чертежей, выполненных изготовителем конструкций не входит в компетенцию авторского надзора за строительством объекта. При этом, комплект чертежей КМД считает достаточным к исполнению.

11.05.2023 (исх. №65) (ответ на письмо №1266 от 24.04.2023) ООО «ГрандСитиСтрой» направляет в адрес Заказчика ответ о согласовании устройства обратной засыпки песком, выемка которого была произведена при устройстве котлована с послойным уплотнением грунта пневматическими трамбовками в объеме 3064,84 м3.

11.05.2023 (исх. №66) (ответ на письмо №1263 от 24.04.2023) ООО «ГрандСитиСтрой» направляет в адрес Заказчика ответ о согласовании выполнения рабочего шва бетонирования на отметке 0,000 (согласно из схемы в запросе ООО «Стройрекорд» №86 от 19.04.2023).

12.05.2023 Протокол совещания по реализации проекта: заказчик должен обеспечить ежедневные рабочие совещания по объекту, в срок до 31.05.2023. ООО «Стройрекорд» должно обеспечить темпы выполнения работ с привлечением большего количества рабочих и техники для выхода на сроки исполнения графика работ по контракту. Завершить обратную засыпку котлована в срок до 24.05.2023. Общество должно предоставить Управлению капитального строительства документы в полном объеме по первой очереди работ, в срок до 17.05.2023.

15.05.2023 (исх. №05/1501) Общество информирует Заказчика о реорганизации ООО «Хатман Групп» в форме преобразования (все права и обязанности юридического лица перешли АО «Хатман Групп» как правопреемнику).

17.05.2023 (исх. №91) ООО «Стройрекорд» информирует Заказчика и АО «Авиапромстрой» о выявленных недостатках в проектно-сметной документации (2 пункта, например: рабочая документация Том 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 0420-КР работы по утеплению всего контура здания керамзитовым гравием общим объемом 42,7 м3 не учтены в ЛСР приложенным к контракту и др.).

24.05.2023 Протокол совещания по вопросу реализации проекта: Заказчику совместно с ООО «Стройрекорд» указано рассмотреть вопрос по сбросу дождевых стоков с площадки в срок до 06.06.2023. ООО «Стройрекорд» должно обеспечить темпы выполнения работ с привлечением большего количества рабочих и техники для выхода на сроки исполнения графика работ по контракту, завершить обратную засыпку котлована и с 01.06.2023 приступить у устройству монолитной плиты перекрытия.

07.06.2023 между Заказчиком и обществом заключено дополнительное соглашение №4 (к муниципальному контракту №20 от 18.11.2022) о внесение изменений в ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.

07.06.2023 (исх. №96) ООО «Стройрекорд» информирует Заказчика и АО «Авиапромстрой» о систематическом срыве поставок готовой бетонной смеси от завода ООО «Гранит» и заводом ООО «Стройресурс», в связи с чем возможна корректировка графика производства работ, при этом ООО «Стройрекорд» было готово принять поставки бетонной смеси заводами и выполнить запланированные работы по бетонированию 10.05.2023, 16.05.2023, 22.05.2023, 26.05.2023, 05.06.2023, 07.06.2023.

07.06.2023 (исх. №06/0703) Общество направляет в адрес Заказчика откорректированную смету контракта. А также информирует Заказчика, что запланированные   работы   по   бетонированию   10.05.2023,   16.05.2023, 22.05.2023, 26.05.2023, 05.06.2023, 07.06.2023. не выполнялись, по причине систематического срыва поставок готовой смеси заводом ООО «Гранит» и заводом ООО «Стройресурс», в связи, с чем возможна корректировка графика производства работ.

13.06.2023 (исх. №71) ООО «ГрандСитиСтрой» направляет в адрес Заказчика ответ о согласовании утеплителя - керамзитовый гравий от отм. -0.800 до отм. - 0.430 (по всему контуру) по уклону 800 мм ширина, проект Том 4 КР лист 5; по наружному контуру, ширина 800 мм, Том 4 КР лист 6.

13.06.2023 (исх. №72) ООО «ГрандСитиСтрой» направляет в адрес Заказчика письмо о возможности согласования изменения пирога основания по крыльца в связи с опиранием крылец на щебеночное основание, пропитанное горячим битумом; указало, что при этом, выполнение работ по устройству бетонной подготовки считают нецелесообразным.

13.06.2023 (исх. №73) ООО «ГрандСитиСтрой» направляет в адрес Заказчика предложение о целесообразности применения бетона марки В15Б150, для конструктива крылец (№1, №2, №3, №4, №5).

13.06.2023 (исх. №73) ООО «ГрандСитиСтрой» направляет в адрес Заказчика письмо о возможности согласования замены пеноблока Д800 на газобетонный блок D500, без увеличения сметной стоимости.

13.06.2023 (исх. №74) ООО «ГрандСитиСтрой» направляет в адрес Заказчика разъяснения: все поверхности подземных вновь возводимых железобетонных. конструкций, соприкасающихся с грунтом, защищаются 2 слоями обмазочной гидроизоляции из горячей битумной мастики. (согласно проекта Том 4 КР, лист 24, пункт 21 «Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения»).

14.06.2023 (исх. №97) ООО «Стройрекорд» направляет в адрес Заказчика запрос о согласовании рабочего шва при заливке плиты пола на отм. 0.000 в осях Д-Е/3-9 (приложение: схема рабочего шва).

15.06.2023 (исх. №98) ООО «Стройрекорд» направляет в адрес Заказчика запрос о возможности изменения проектного решения по отведению ливневых стоков и предоставить техническое решение с выпуском дождевой воды на рельеф. (причина: повышение эксплуатационных затрат предусмотренной проектом накопительной емкостью объемом 50 м3).

19.06.2023 (исх. №75) ООО «ГрандСитиСтрой» направляет в адрес Заказчика ответ о согласовании рабочего шва, согласно приложенного чертежа.

21.06.2023 (исх. №77/1) ООО «ГрандСитиСтрой» направляет в адрес Заказчика ответ о согласовании количества крылец (№1, №2, №3, №4, №5), согласно проекта Том 3 АР.

28.06.2023 (исх. №06/2803) Общество информирует Заказчика, что Общество самостоятельно должно выполнить работы на сумму не менее 25% от суммы контракта. На основании обращения Заказчика (исх. №1883 от 23.06.2023), Общество информирует, что согласно разделению Объемов работ с ООО «Стройрекорд» работы должны начаться с сентября 2023 года, а также об открытии обособленного подразделения, в целях выравнивания сроков производства.

04.07.2023 (исх. №2885) Заказчик уведомляет Общество, ООО «Стройрекорд», ООО «ГрандСитиСтрой» о дате рабочего совещания, назначенного на 04.07.2023.

06.07.2023 (исх. №07/0606) Общество сообщает Заказчику о невозможности присутствия на рабочем совещании (причина: Общество совместно с ООО «Стройрекорд» прорабатывают вопрос о привлечении дополнительных трудовых ресурсов для начала работ по наружным тепловым сетям.) Указывает, что Общество направит Заказчику не позднее 11.07.2023 откорректированный график. Отставание от графика вызвано удорожанием материалов и отказом ряда организаций от сотрудничества. Также Общество просит рассмотреть возможность прибытия представителя для рабочей встречи после 10.07.2023.

10.07.2023 (исх. №07/1002) Общество направляет в адрес Заказчика документы по предписанию Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области, в части нарушения предельно допустимых отклонений вертикальных конструкций колонн в осях И/1, В/1, Л/6. Данные колонны демонтированы и возведены новые.

13.07.2023 (исх. №2090) Управление капитального строительства информирует Заказчика об отказе в подписании актов выполненных работ формы КС-2  (причина: выявлены отступления от условий контракта (7 пунктов: отсутствуют документы на бетон В15 в объёме 14,9 м3, отсутствует акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку фундаментов и др.).

14.07.2023 (исх. №РК-11-2075) (ответ на письмо №2093 от 11.07.2023 и №2093 от 14.07.2023) Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области информирует Заказчика об устранении выявленных нарушений и считает возможным возобновление производства работ на объекте.

20.07.2023 (исх. №2188) Заказчик направляет в адрес Общества письмо Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области от 14.07.2023 №РК-11-2075 о возможности возобновления производства работ на объекте. А также требует от Общества предоставить Заказчику и Комитету по региональному контролю и надзору Псковской области исполнительно-техническую документацию, подтверждающую безопасную эксплуатацию колонн после выполнения демонтажа и бетонирования в осях И/1, В/1 и Л/6.

20.07.2023 (исх. №2190) Заказчик направляет в адрес Общества уведомление Управления капитального строительства об отказе подписания актов выполненных работ. Требует устранить установленные в уведомлении отступления в срок до 24.07.2023 и направить в адрес Управления капитального строительства исполнительную документацию.

26.07.2023 (исх. №99) ООО «Стройрекорд» направляет в адрес Заказчика и АО «Авиапромстрой» запрос о предоставлении узла установки лестничной площадки, поскольку в проекте Том 4 КР в осях А-Б/7-8 он отсутствует.

26.07.2023 платежное поручение №567234, Заказчик оплатил выполненные работы по объекту на сумму 3 621 534,50 руб.

27.07.2023 (исх. №100) ООО «Стройрекорд» направляет в адрес Заказчика и АО «Авиапромстрой» запрос о предоставлении чертежа узла крепления (закладная деталь) кровельных ферм и балок, опирающихся на колонны и рассмотреть дополнительную стоимость изделия. Данный чертеж не учтен в смете контракта и отсутствует в проекте Том 4 КР в осях А-Л/1-9.

28.07.2023 (исх. №2270) Заказчик направляет в адрес общества претензию (требование) в связи с просрочкой обязательств, предусмотренных контрактом №20 от 18.11.2022, уплатить пени в размере 1 019 336,88 руб. в течение 30 рабочих дней.

28.07.2023 (исх. №07/2803) Общество информирует Заказчика об отсутствии проектного решения по обращению ООО «Стройрекорд».

Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области сообщает Заказчику и Управлению капитального строительства о выявленных нарушениях градостроительного законодательства, в части отклонения соосности вертикальных конструкций монолитной балки и колонн в осях И/1 на 3 см, в осях В/1 на 6 см и в осях Л/6 до 5 см. На основании чего следует прекратить выполнение работ до приведения конструкций к требованиям пункта 7 таблицы 5.12 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

01.08.2023 (исх. №08/0101) Общество информирует Заказчика об отсутствии технической возможности выполнить работы по бетонированию 01.08.2023 по причине того, что завод изготовитель доставит бетонную смесь не ранее 04.08.2023, что срывает график производства работ.

01.08.2023 (исх. №2326) Заказчик информирует Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №10 от 15.06.2023 в полном объеме.

08.08.2023 (исх. №08/0806) Общество направляет в адрес Заказчика запрос о расчете монолитной плиты (причина: после приема 24 м3 бетона произошло обрушение опалубки в осях В-Ж/1-4).

09.08.2023 (исх. №2394) Управление капитального строительства направляет Заказчику уведомление об отказе от подписания акта выполненных работ по причине несоответствие объемов выполненных работ учтенных в акте о приемке выполненных работ №4 от 14.07.2023. противоречие проектной документации в части выполнения работ по заливке монолитных конструкций 1 этажа в стенах осей А-Б, 3-4).

10.08.2023 (исх. №2431) Заказчик информирует Общество и ООО «Стройрекорд» о возможном варианте выполнения работ в части сети теплоснабжения, указывает на то, что после согласия Общества и ООО «Стройрекорд", Заказчик будет прорабатывать данный вопрос с авторским надзором.

14.08.2023 (исх. №№2477) Заказчик направляет в адрес Общества расчеты плиты перекрытия (предоставленные разработчиком ПСД ООО «Августина»).

16.08.2023 (исх. №2461) Управление капитального строительства направляет Заказчику уведомление об отказе от подписания актов выполненных работ. по причине выявления не соответствие применяемых материалов учтенных в КС-2 проектной документации к объекту. Требует от авторского надзора предоставить пояснения о возможности использования арматуры марки А500С вместо ЛЦА240) и АШ(А400). При этом изменения в применении арматуры необходимо оформить актом рабочей комиссии с приложением смет «+/-». Также требует корректировки в выполнении №2 от 30.04.2023 и выполнения №4 от 14.07.2023 с учетом замечаний, в целях соответствия выполненных работ КС-2.

16.08.2023 (исх. №08/1603) (ответ на исх. №2456 от 11.08.2023) Общество информирует Заказчика, что введение наблюдения в отношении субподрядчика АО «Авиапромстрой» не влияет на процесс исполнения контракта. А также не порождает права у Заказчика на возврат аванса, поскольку отсутствуют основания для прекращения договора подряда или для одностороннего расторжения в соответствии со статьей 310 и статьей 450.1 ГК РФ, Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

16.08.2023 (исх. №08/1608) (ответ на исх. №2431 от 10.08.2023) Общество информирует Заказчика о готовности принять на себя обязательства по выполнению предложенных Заказчиком измененных решений производства работ по теплотрассе, после внесения корректировки в проектные решения и выдаче новых решений в производство работ, а также проведения корректировки сметной документации.

16.08.2023 (исх. №08/1610) Общество направляет в адрес Заказчика запрос об увеличении сметной стоимости на основании Постановления Правительства РФ от 09.08.2021 №1315, а также необходимости проработать вопрос с авторским надзором о корректировке и внесении изменений в проектную документацию по причине сложности, неблагоприятно влияющие на своевременное окончание контракта (удорожание материалов из-за колебания курса валют, необходимость корректировки проектной документации (разделы имеют разночтение между собой).

17.08.2023 (исх. №08/1707) Общество информирует Заказчика о необходимости корректировки проектной документации. По состоянию на 17.08.2023 выявлены следующие замечания: конструктивные и объемно-планировочные решения (23 пункта), наружные сети теплоснабжения (4 пункта), наружный водопровод (4 пункта), внутренняя система отопления (7 пунктов), теплоснабжение приточных установок и тепловых завес (4 пункта), узел ввода (3 пункта), внутренняя канализация (8 пунктов). В связи, с чем просит Заказчика привлечь представителя авторского надзора для корректировки и при необходимости прохождения повторной экспертизы по видам работ, отсутствующих в рабочей документации.

21.08.2023 (исх. №08/2104) (ответ на письмо №2461 от 16.08.2023) Общество направляет в адрес Заказчика возражение на отказ в приемке выполненных работ. (по причине замены арматуры АШ (А400) на арматуру А500С), а также требует подтвердить выполненные работы за июль 2023 года.

28.08.2023 (исх. №08/2801) (ответ на письмо №2544 от 22.08.2023) Общество информирует Заказчика о неверном применении пункта 4.4.21 контракта, при согласовании замены арматуры, считает это некорректным и противоречащим заключению экспертизы, при этом вопрос о замене арматуры класса А240 не поднимался Обществом. Общество, получив положительное заключение экспертизы предоставит сметы «+/-», а также требует от Заказчика ускорить рассмотрения вопроса о корректировке рабочей и сметной документации на основании запросов и дополнительных работ, выявленных в ходе производства работ.

29.08.2023 (исх. №08/2901) (ответ на исх. №2270 от 28.07.2023) Общество направляет в адрес Заказчика ответ на претензию. По сносу деревьев: со стороны Заказчика решение о сохранении части деревьев выдано с опозданием, имеются замечания в части конструктивных и объемно-планировочных решений (23 пункта), в части наружных сетей теплоснабжения (4 пункта), работы по сетям электроснабжения, наружным сетям водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации будут начаты после корректировки проектных решений (вопросы направлялись Заказчику исх. №085/1707 от 17.08.2023). Также Общество информировало ранее Заказчика об отсутствии возможности выполнения работ по бетонированию, срыве поставок Заводами поставляющими бетонную смесь на объект и др. Требование к уплате пени в размере 1 019 336,88 руб. считает не обоснованной. Требует от Заказчика корректировки проектных решений и внесения корректировок в сметную документацию.

29.08.2023 (исх. №08/2903) Общество информирует Заказчика о переносе даты заливки бетона с 29.08.2023 на 31.08.2023, в связи с отсутствием своевременной возможности поставки бетона на площадку объекта у поставщика ООО «Гранит».

29.08.2023 (исх. №2597) Заказчик информирует Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области об установленном факте обрушения опалубки (уведомление от Общества №08/0806 от 08.08.2023).

30.08.2023 (исх. №109) ООО «Стройрекорд» направляет в адрес Заказчика запрос о направлении уполномоченного представителя для освидетельствования скрытых работ по устройству армирования плиты первого этажа в срок 30.08.2023 к 11 час. 00 мин.

01.09.2023 (исх. б/н) Протокол совещания по вопросу строительства. По состоянию на 01.09.2023 на объекте работает 10 человек. Выполненные работы ООО «Стройрекорд» по устройству монолитной плиты перекрытия на отметке +3,870 протяженностью 70 метров составило 1% от общего объема работ. Общество планирует до 15.09.2023, выполнить работы по армированию каркаса 2 этажа, устройству инженерных сетей, а также к 20.09.2023 выполнить заливку колонн 2 этажа (планово составляет 12% от общего объема работ). Однако фактически работы выполнены в объеме 11% (документы находятся на проверке в Управлении капитального строительства), отставание от графика работ 175 календарных дней. С 04.08.2023 Обществом нарушен подпункт 14 пункта 4.4.15. контракта от 18.11.2022 №20, а именно на объекте не работает видеокамера. Заказчик должен разместить в ЕИС: претензию о нарушении обязательств контракта, и решение о расторжении контракта в одностороннем порядке в срок до 04.09.2023, а также уведомление о возврате аванса в срок до 14.09.2023. Общество должно увеличить количество рабочих на объекте до 30 человек (для выполнения работ по кладке стен и перегородок газобетонных блоков и др. работ), предоставить отчет о расходовании средств аванса, отчет о приобретении строительных материалов с приложением документов, график выполнения строительно-монтажных работ в срок до 04.09.2023, а также график поставки строительных материалов со сроком поставки не позднее 07.09.2023 в объеме не менее 90% от закупленных объемов и поставки в полном объеме (100%) в срок до 11.09.2023.

04.09.2023 (исх. №09/0401) Общество направляет в адрес Заказчика откорректированный график производства работ (на основании совещания от 01.09.2023).

04.09.2023 (исх. №2637) Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

08.09.2023 (исх. №2675) Управление капитального строительстванаправляет в адрес Заказчика и Общества уведомление об отказе отподписания актов выполненных работ (причины: не предоставлениедокументов о поставках строительных материалов; изменение сметы контракта (исключение пунктов №31,35,52,56,71,75,90,94,111,115,290,292 из сметы контракта без обоснования; выполнение работ фактически не произведено (засыпка пазух котлована не в должном объеме) и др.

13.09.2023 (исх. №2739) Заказчик направляет Обществу претензию о возврате неосвоенного аванса по муниципальному контракту в связи с ненадлежащим исполнением и расторжением контракта в одностороннем порядке. Аванс в размере 71 032 724,45 руб.

12.09.2023 (исх. №09/1207) Общество направляет в адрес заказчика возражения на решение об одностороннем отказе от исполнения контракта №20 от 18.11.2022, требует от Заказчика отмены решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Также информирует Заказчика о необходимости корректировки рабочей документации, в части конструктивных и объемно планировочных решений (24 пункта), замечания к чертежам или их отсутствие (6 пунктов).

15.09.2023 (исх. №2764) Заказчик направляет в адрес Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области запрос о приостановке проведения проверок в рамках регионального государственного строительного надзора, в связи с расторжением договора с Обществом.

 18.09.2023 (исх. №№2782) Заказчик направляет в адрес Управления, сведения о включении АО «Хатман Групп» в  реестр недобросовестных поставщиков.

18.09.2023 Заказчик размещает сведения о расторжении контракта в ЕИС.

По результатам рассмотрения информации, полученной 18.09.2023, антимонопольным органом 28.09.2023 было вынесено решение №РНП 060/06/95-390/2023 о включении сведений об АО «Хатман Групп» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Данные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Псковской области по делу №А52-6286/2023 от 06.05.2024. Решением по делу №А52-6286/2023 от 06.05.2024 отказано в удовлетворении требований о признании незаконным и отмене решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области от  28.09.2023 №РНП 060/06/95-390/2023. В рамках рассмотрения дела № А52-6286/2023 судом исследованы и установлены обстоятельства заключения между сторонами контракта, сроках его исполнения, обстоятельства расторжения и действий сторон направленных на исполнение контракта.

В соответствии с частью 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности. Институт преюдиции требует соблюдения баланса между такими конституционно защищаемыми ценностями, как общеобязательность и непротиворечивость судебных решений, с одной стороны, и независимость суда и состязательность судопроизводства - с другой. Такой баланс обеспечивается посредством установления пределов действия преюдициальности, а также порядка ее опровержения.

Следовательно, предусмотренное частью 2 статьи 69 АПК РФ основание освобождения от доказывания во взаимосвязи с положениями части 1 статьи 64 и части 4 статьи 170 того же Кодекса означает, что фактические обстоятельства (факты), установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Высшей судебной инстанцией неоднократно давались разъяснения о том, что вне зависимости от состава лиц, участвующих в разрешении отдельного спора, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены ранее при разрешении иного спора, должна учитываться. В том случае, если суд, рассматривающий второй спор, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», пункт 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2017 № 307-ЭС15-19016). Такой подход к разрешению споров направлен на реализацию принципов стабильности и непротиворечивости судебных актов и способствует правовой определенности в правоотношениях спорящих сторон.

Таким образом, обстоятельства касающиеся правоотношений сторон, исполнение обязательств по договору, сроков выполнения работ, обстоятельств препятствующих исполнению контракта, а также добросовестности подрядчика с целью выполнения работ надлежащего качества не требуют доказывания, поскольку установлены вступившим в законную силу судебным актом.

Доказательств, в результате оценки которых суд, в рамках рассмотрения настоящего спора, мог бы прийти к иным выводам, истцом в материалы дела не представлено.

Претензионный порядок соблюден.

Заслушав пояснения истца, исследовав доказательства, находящиеся в материалах дела в соответствии со статьей 71 АПК РФ суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению на основании следующего.

В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 ГК РФ).

Из материалов дела следует, что обязательства сторон возникли из государственного контракта, а потому к спорным правоотношениям подлежат применению нормы главы 37 ГК РФ, а также Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ).

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

Исходя из пункта 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Пунктом 2 статьи 715 ГК РФ предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения договора подряда в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

В силу пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ).

Возможность одностороннего отказа (право и обязанность) от исполнения контракта была предусмотрена условиями контракта.

Положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода (пункт 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 №49 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Согласно статье 65 АПК РФ бремя доказывания обстоятельств в обоснование своих требований и возражений лежит на той стороне, которая на эти обстоятельства ссылается. В соответствии со статьями 9, 41 названного Кодекса риск наступления негативных последствий совершения или не совершения лицом, участвующим в деле, процессуальных действий и неисполнения процессуальных обязанностей несет это лицо.

Как следует из материалов дела, между сторонами был заключен контракт, факт перечисления аванса подтверждается представленными в дело платежными документами и ответчиком не опровергнуто.

Между тем ответчик обязательства на полученную сумму контракта не исполнил. Совокупность действий Подрядчика в процессе исполнения Контракта очевидно продемонстрировала Администрации, что строительство Центра культурного развития на 125 мест в селе Ляды (далее – Объект, ЦКР) не будет завершено 15 декабря 2023 года, то есть на дату завершения работ, предусмотренную Контрактом.

На момент принятия Заказчиком решения о расторжении Контракта в одностороннем порядке, то есть на 01 сентября 2023 года Подрядчиком было исполнено и подтверждено документацией обязательств на 2 795 931,09 рублей или 1,9% от цены Контракта, что подтверждается сведениями из Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС). В процессе исполнения Контракта АО Хатман Групп допущено существенное отставание от графика строительно-монтажных работ, так, на 01 сентября 2023 года минимальное отставание от даты начала выполнения работ составило 115 дней, максимальное – 175 дня. По состоянию на 01 сентября 2023 года подрядчик не приступил к 18 различным видам работ.

В соответствии с пунктом 12.6 и пунктом 12.7 Контракта погашение аванса осуществлялось пропорционально выполненным строительно-монтажным работам, подлежащим оплате при приемке заказчиком, таким образом, в счет погашения авансового платежа учтено 50% от объема выполненных подрядчиком обязательств, а сумма в размере 2,89 млн. рублей была удержана заказчиком в счет погашения аванса 15.09.2023.

Истец фактически произвел оплату ответчику по контракту в сумме 73 828 655 руб. 54 коп. стоимость работ выполненных ответчиком и принятых истцом составила 5 695 258 руб. 25 коп.

Сумма непогашенного авансового платежа рассчитывается как разница между суммой выплаченной истцом и стоимостью работ, выполненных ответчиком, и на момент расторжения Контракта составила 68 133 397 руб. 29 коп.

22.09.2023 Администрацией направлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии акционерному обществу Банку «Северный морской путь» (исх. №2821), в соответствии с которым 03.11.2023 на счет Администрации поступила сумма 7 243 069 руб. в зачет части непогашенного аванса. С учетом выплаты по независимой гарантии сумма непогашенного аванса составляет 60 890 328 руб. 29 коп.  (68 133 397,29 - 7 243 069,00).

С учетом установленных при рассмотрении спора фактических обстоятельств, представленных в дело доказательств, а также в свете вышеприведенных норм права и разъяснений, суд приходит к выводу о наличии на стороне ответчика факта сбережения денежных средств за счет истца в отсутствие для этого правового основания, в связи с чем, исковые требования о взыскании с ответчика 60 890 328 руб. 29 коп.  неосновательного обогащения являются обоснованными, соответствующими представленным в дело доказательствам, и подлежащими удовлетворению. Оснований для применения пункта 4 статьи 1109 ГК РФ ГК РФ в ходе рассмотрения спора судом не установлено.

Контракт заключен в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ одним из способов обеспечения исполнения обязательства является неустойка.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Восстановительный характер гражданско-правовой ответственности предполагает, что кредитор будет поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом (пункт 2 статьи 393 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 3 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях расторжения договора», разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора.

Согласно пункту 13.4 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением прострочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30 августа 2017 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом «г» части 3 Правил при цене контракта от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) размер штрафа составляет 0,5 % от цены контракта. Таким образом, сумма штрафа составляет 724 306 (семьсот двадцать четыре тысячи триста шесть) рублей 90 копеек (144 861 380,00 *0,5%).

Согласно пункту 13.11 Контракта в случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

Согласно пункту 13.3 Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Заказчик передал площадку Подрядчику 30.11.2022, спустя 12 дней после заключения Контракта. Представитель АО Хатман Групп во время рабочего совещания, состоявшегося 25.11.2022 заявил, что работы на строительной площадке будут начаты 10.12.2022, что подтверждается протоколом. Приступив к выполнению работ по сносу деревьев с 10.12.2022 Подрядчик на момент принятия Заказчиком решения о расторжении Контракта в одностороннем порядке, то есть на 01.09.2023, исполнил их только на 50%, при сроке исполнения 10 календарных дней. Зафиксировано 18 фактов нарушений сроков выполнения работ с просрочкой от 115 до 175 дней.

Отставание от графика выполнения работ регулярно фиксировались ГКУ ПО УКС: письмо № 663 от 14.03.2023 - 110 календарных дней, письмо № 797 от 23.03.2023 - 123 календарных дня.

Также отставание от графика производства работ зафиксировано протоколом рабочего совещания № 14 от 01.09.2023 - 175 календарных дня.

Строительные работы выполнялись АО Хатман Групп с нарушением действующих строительных норм и правил.

При исполнении Контракта АО Хатман Групп систематически допускалось нарушение его условий.

В нарушение пункта 2 и  пункта 4.4.15 Подрядчиком не обеспечено надлежащее хранение материалов в приспособленных для этого временных сооружениях (письмо ГКУ ПО УКС № 797 от 2.03.2023).

04.08.2023 при производстве Подрядчиком работ по заливке бетонного перекрытия на отметке +4.12 произошло обрушение опалубки в осях В-Ж/1-4 (далее - Происшествие).

В нарушение пункта 4.4.8 Контракта Подрядчик проинформировал Заказчика о данном происшествии только 08 августа, а не в течении 24 часов, как данный факт стал известен Подрядчику.

В соответствии с пунктом 9.1 Контракта Подрядчик со дня начала работ и до их завершения ведет Общий журнал работ, а до начала внесения записей в нем Подрядчик должен передать его на согласование Заказчику в прошнурованном, пронумерованном и заполненном виде - с указанием лиц ответственных за производство работ на Объекте. В нарушение данного пункта Подрядчик не передал своевременно Общий журнал работ, о чем сообщается в письме ГКУ ПО УКС №268 от 02.02.2023, направленном в адрес Администрации с копией АО Хатман Групп.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 4.4.15 Подрядчик обеспечивает ежедневное ведение Общего журнала работ в соответствии с порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капительного строительства РД-11-05-2007 (далее -РД-11-05-2007), утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7.

Подрядчиком ведение Общего журнала работ осуществлялось с нарушениями РД-11-05-2007.

- в нарушение пункта 9 РД-11-05-2007 ведение Общего журнала работ осуществлялось лицом, сведения о котором на титульном листе отсутствуют, а сделанные записи не удостоверены представителям Подрядчика: ФИО3, состоящем в НОСТРОЙ;

- в нарушение пункта 8.1 РД-11-05-2007 раздел 1 не содержит исчерпывающий перечень представителей инженерно-технического персонала с указанием должности, согласно приказу о назначении, в том числе от субподрядных организаций лица, осуществляющего строительство;

- в нарушение пункта 8.3 РД-11-05-2007 в разделе 3 Общего журнала работ при внесении данных о работах, выполняемых при строительстве Объекта упущено описание работ применительно к конструктивным элементам здания с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись, не приведены краткие сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях;

- в нарушение пункта 8.5 РД-11-05-2007 раздел 5 не содержит сведений о ведении строительного контроля лицом, осуществляющим строительство;

- в разделе 6 отсутствуют данные о дате подписания актов, должности, фамилии и инициалах лиц, подписавших акты, что противоречит пункту 8.6 РД-11-05-2007;

- Общий журнал работ не пронумерован надлежащим образом, указание номеров страниц имеет только раздел 3, тогда как исходя из титульного листа в данном журнале 46 страниц.

Подрядчиком нарушен подпункт 4 пункта 4.4.15 Контракта об обеспечении видеонаблюдения в режиме реального времени за 1 (один) календарный день до фактического начала выполнения работ на объекте.

Нарушение было устранено только 18.04.2023  после неоднократных обращений со стороны Заказчика, что подтверждается письмами от 03.02.2023 № 430, 07.03.2023 №774, 28.03.2023 №953, протоколами совещаний от 10.03.2023 №3, 21.03.2023 №4, 28.03.2023 №5, 04.04.2023 №6.

Протоколом от 01.09.2023 № 14 зафиксировано, что по состоянию на 01 сентября видеонаблюдение на Объекте не доступно для просмотра в течении 28 дней, то есть с даты Происшествия на Объекте от 04.08.2023 и не восстановлено до момента принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком.

В нарушение пункта 4.4.3 Контракта АО Хатман Групп в течении 10 календарных дней с даты заключения Контракта не разработал и не представил Заказчику на ознакомление проект производства работ (далее - ППР) на бумажном носителе.

Вместо Подрядчика, ППР был разработан и представлен Администрации субподрядной организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Стройрекорд» (далее - ООО Стройрекорд) письмом № 76 от 20.03.2023, то есть спустя 122 дня со дня заключения Контракта.

Фактически Подрядчик не исполнил свои обязательства по разработке ППР, до момента принятия Администрацией решения о расторжении Контракта в одностороннем порядке АО Хатман Групп не приступал к разработке ППР.

Факты отсутствия ППР на Объекте зафиксированы в разделе 4 Общего журнала работ записями от 03 марта, 16 марта 2023 года.

В нарушение п.4.4.27 Контракта Подрядчик регулярно не выполнял принятые на себя обязательства по оплате выполненных работ (ее результатов) субподрядчикам, что подтверждается письмом Комитета экономического развития и инвестиционной политике Псковской области № ЭК/11-6895 от 22.09.2023, которым в Администрацию было переадресовано обращение граждан, поступившее в интернет-приемную Правительства Псковской области и исполнительных органов Псковской области о длительной задержке по выплате заработной платы за апрель и частично март 2023 года не менее чем 10 работникам.

Во время выездных совещаний на Объекте рабочими перед Администрацией неоднократно ставился вопрос о системной задержке выплаты заработной платы, так, например, бригадир монолитчиков и прораб обосновывали отсутствие рабочих на Объекте наличием перед ними задолженности со стороны Подрядчика.

АО Хатман Групп нарушен п.15.6 Контракта, которым предусмотрена обязанность подрядчика в случае досрочного расторжения Контракта в течении 10 дней передать по акту строительную площадку с результатами выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего АО Хатман Групп имущества.

Несмотря на неоднократные обращения со стороны Администрации (исх.№2913 от 29.09.2023, исх.№ 3106 от 20.10.2023, исх.№ 3209 от 31.10.2023, исх.№ 414-ПОМ от 14.02.2024, приобщены к настоящему дополнению) в адрес АО Хатман Групп, подрядчик до настоящего момента не исполнил свои обязательства по передаче строительной площадки и по ее освобождению от строительных материалов.

Также, АО Хатман Групп не предпринял действий, направленных на сохранение свойств строительных материалов, подтверждение их происхождения и не передал их Администрации в счет авансового платежа (исх.№2763 от 15.09.2023).

Строительные материалы, находящиеся на площадке, находятся в ненадлежащих условиях: арматура не накрыта, материалы и опалубка складированы без подкладок, битум хранится на улице в зимнее время. В связи с чем дальнейшее их применение невозможно.

В нарушение пункта 8.2 Контракта АО Хатман Групп качество находящихся на строительной площадке строительных материалов не подтверждено соответствующими паспортами, сертификатами или их копиями, заверенными надлежащим образом.

Размер пени, начисленной АО Хатман Групп, в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, за период 30.11.2022 по 15.09.2023 в соответствии с нарушением графика производства работ составила  4 560 997 руб. 34 коп.

Поскольку факт неисполнения ответчиком обязательств по контракту подтвержден материалами дела, что впоследствии привело к отказу исполнения контракта, истец правомерно предъявил к взысканию неустойку в виде пеней и штрафа.

Расчет неустоек судом проверен, признан арифметически и методологически верным , при этом не является чрезмерным, оснований для применения статьи 333 ГК РФ по инициативе суда не установлено, ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ не заявлено.

В связи с расторжением контракта на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение которое не возвращено в связи с чем истец начислил на  сумму аванса – 60 890 328 руб. 29 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с пунктом 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов. Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем.

Судом проверен расчет процентов, признан верным.

Поскольку по состоянию на 29.07.2024 ответчиком задолженность не погашена, обратного в материалы дела не представлено, суд считает подлежащим удовлетворению требование о взыскании с ответчика в пользу истца процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 8 190 617 руб. 45 коп. за периоды с 15.09.2023 рассчитанные судом на дату вынесения резолютивной части решения, а с 30.07.2024проценты, рассчитанные в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды по день фактического исполнения обязательств.

Принимая во внимание, что истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в сумме 200 000 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с акционерного общества «Хатман Групп» в пользу Администрации Плюсского района 74 366 249 руб. 98 коп., в том числе 60 890 328 руб. 29 коп. задолженность, 724 306 руб. 90 коп. штраф, 4 560 997 руб. 34 коп. пени, 8 190 617 руб. 45 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.09.2023 по 29.07.2024 и далее проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неоплаченного долга за каждый день просрочки, начиная с 30.07.2024 по день фактического погашения долга из расчета ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей в соответствующие периоды.

Взыскать с акционерного общества «Хатман Групп» в доход федерального бюджета 200 000 государственной пошлины.

На решение в течение месяца после его принятия может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.

 

Судья                                                                                    С.С. Лазарева