Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-16173/2020

г. Хабаровск

25 декабря 2020 года

Решение в виде резолютивной части принято 08 декабря 2020 г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.Ю. Милосердовой

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по иску публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 117630, 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Росэнергопроект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 190005, 

<

...>, лит. Б, пом. V7, оф. 421)

о взыскании 247 377 руб. 95 коп.,

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – ПАО «ФСК ЕЭС», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Росэнергопроект» (далее – ООО «Росэнергопроект», ответчик) о взыскании неустойки в размере 247 377 руб. 95 коп.

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с правилами, установленными главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик представил отзыв на иск, в котором просил отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме, указал, что пункт 9.9 договора, на который ссылается истец, полностью посвящен инженерным изысканиям, ответчиком же истцу был направлен отчет по предпроектному обследованию, а не результаты инженерных изысканий.

Истец представил возражения на отзыв ответчика.

08.12.2020 арбитражный суд принял решение по делу путем подписания резолютивной части решения, приобщенной к делу, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.12.2020 в арбитражный суд поступило заявление ПАО «ФСК ЕЭС» о составлении мотивированного решения по правилам части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение было принято судом после исследования материалов дела по следующим основаниям.

Между ПАО «ФСК ЕЭС» (заказчик) и ООО «Росэнергопроект» (подрядчик) заключен договор № 581771 от 22.10.2019, согласно которому подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:

- инженерным изысканиям,

- оформлению прав на земельные участки для проведения проекто-изыскательских работ;

- разработке документации по планировке территории; 

- разработке проектной документации и проведению экспертизы;

- оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, отводимые под строительство объекта;

- разработке закупочной документации.

Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором.

Наименование, объемы, количество и последовательность выполнения работ определены в календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение № 1) и Задании на проектирование (техническом задании).

Согласно пункту 3 договора срок выполнения работ по договору:

начало выполнения работ с момента подписания договора,

окончание выполнения работ 31.07.2020.

Календарным графиком выполнения и стоимости работ установлены следующие сроки выполнения работ: сбор исходных данных. Предпроектное обследование: с даты заключения договора, дата окончания выполнения работ: 29.11.2019: стоимость работ 1 365 526 рублей (этап 1.1.1)

Согласно пункту 4.1 договора цена договора составляет не более 49 475 590 рублей.

Результат выполненных работ по этапу 1.1.1 договора «Сбор исходных данных. Предпроектное обследование» подрядчиком представлен заказчику на рассмотрение письмом от 29.11.2019 № 1074-К/01. При рассмотрении представленной документации были выявлены замечания, которые письмом от 22.01.2020 № ЦЗ/3-2/4 направлены подрядчику на электронную почту, в соответствии с пунктом 14.8 договора.

Согласно пункту 9.9 договора подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 рабочих дней после получения мотивированного отказа заказчика от подписания акта о выполненных работах (если иной срок не согласован письменно сторонами) и передать измененный и (или) доработанный результат инженерных изысканий заказчику.

05.02.2020 ответчик направил в адрес истца откорректированные материалы по предпроектному обследованию по этапу 1.1.1 договора в адрес истца.

В соответствии с пунктом 12.2.4 договора за нарушение срока, предусмотренного договором или соответствующим уведомлением для устранения замечаний заказчика и (или) организации по проведению экспертизы подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

В связи с нарушением подрядчиком срока устранения замечаний истцом ответчику была начислена неустойка за период с 30.01.2020 по 05.02.2020 в размере 247 377 руб. 95 коп.

18.03.2020 истцом в адрес ответчика была направлена претензия № ЦЗ/1/296 с требованием уплатить неустойку, которая оставлена последним без удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с положениями статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 3.2 договора работа по инженерным изысканиям завершается получением результата инженерных изысканий (созданием соответствующего комплекта документов), в отношении которого получено положительное заключение организации по проведению экспертизы и которой утвержден заказчиком, а также принят акт о приемке выполненных работ и передаче прав.

В соответствии с пунктом 1.14 договора результаты инженерных изысканий – документ, разработанный в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства о выполненных инженерных изысканий, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство и (или) реконструкцию объекта, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий на объекте в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий территории применительно к объекту при осуществлении строительства и (или) реконструкции объекта и после их завершении и о результатах оценки влияния строительства и (или) реконструкции объекта на другие объекты капитального строительства.

Согласно пункту 9.7 договора подрядчик обязан до предъявления заказчику согласовать результаты инженерных изысканий в специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

В соответствии с пунктом 9.8 договора после согласования со специализированными организациями результат инженерных изысканий направляется заказчику в сопровождении оформленного со стороны подрядчика в 3 экземплярах акта о выполненных работах.

Заказчик в сроки, указанные в пункте 7.1.4 договора, при отсутствии замечаний к результатам инженерных изысканий подписывает со своей стороны акт выполненных работ и один экземпляр возвращает подрядчику. При наличии у заказчика замечаний к результатам инженерных изысканий он направляет подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного акта в сроки, указанные в пункте 7.1.4 договора.

Согласно пункту 9.9 договора подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 рабочих дней после получения мотивированного отказа заказчика от подписания акта о выполненных работах (если иной срок не согласован письменно сторонами) и передать измененный и (или) доработанный результат инженерных изысканий заказчику.

Подписание заказчиком акта о выполненных работах означает возможность направления подрядчиком результата инженерных изысканий в организацию по проведению экспертизы.

Обязательства подрядчика по выполнению инженерных изысканий считаются исполненными после подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ и передаче прав.

Заказчик подписывает указанный в настоящем пункте акт после получения положительного заключения организации по проведению экспертизы в отношении результатов инженерных изысканий.

Письмом от 29.11.2019 ответчиком истцу были направлены не результаты инженерных изысканий, а материалы предпроектного обследования.

Пунктом 1.1.3 календарного графика выполнения работ и стоимости предусмотрено выполнение изыскательских работ, дата начала выполнения работ с даты заключения договора, дата окончания выполнения работ – 28.02.2020.

Исходя из изложенного, ответчиком истцу 29.11.2019 не были сданы результаты инженерных изысканий, не составлялся акт выполненных работ, истец не направлял ответчику мотивированный отказ от подписания актов выполненных работ, как установлено пунктами 9.8, 9.9 договора.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал, что в отчет по предпроектному обследованию входили такие данные, как срок эксплуатации и состояния существующих сооружений, строительных конструкций, основного оборудования ВЛ, состав и существующая схема размещения устройств (систем) автоматической диагностики, состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА в сети, прилегающей к объекту проектирования и т.п. То есть сведения, не связанные с изыскательскими работами.

Ответчик указал, что предпроектное обследование – это предварительный этап для дальнейших работ, включающий в себя сбор исходных данных для проектирования реконструкции, оценка технического состояния. Не является отдельным этапом именно для изыскательских работ.

В соответствии с пунктом 12.2.4 договора за нарушение срока, предусмотренного договором или соответствующим уведомлением для устранения замечаний заказчика и (или) организации по проведению экспертизы подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

Согласно положениям статей 1, 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в пункте первом названной статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Срок, указанный в пункте 9.9 договора применяется для устранения замечаний к результатам инженерных изысканий и не может быть применен к устранению замечаний к отчету по предпроектному обследованию.

Иных сроков для устранения замечаний к отчету по предпроектному обследованию в письме от 22.01.2020 № ЦЗ/3-2/4 истцом установлено не было.

Таким образом, ответчиком не было допущено нарушений срока для устранения замечаний, за которое может быть применена ответственность, установленная пунктом 12.2.4 договора.

Исходя из изложенного, исковое заявление удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на истца в соответствии со статьёй 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 АПК РФ.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                  А.Ю. Милосердова