АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-6485/2023

г. Чебоксары

19 марта 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 марта 2024 года.

 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Компания Прайм" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 111024, г. Москва, вн. тнр. г. м.о. Лефортово, 

<

...>, эт. 2, пом./офис XI/375,

к обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческое предприятие "Теплосфера" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 410005, г. Саратов, Саратовская область, ул. Железнодорожная д. 112,

о признании договора подряда №27/ПД-2023 на выполнение строительно-монтажных работ расторгнутым и взыскании 4 412 546 руб. 35 коп.,

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, 

публичного акционерного общества "Т ПЛЮС" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 143421, Московская область, тер. Автодорога Балтия, км 26-Й, д. 5 стр. 3, офис 506; 428022, 

<

...>),

ФИО2 (428003, Чувашская республика, Чебоксары),

при участии

от истца: ФИО3 по доверенности от 15.08.2023 (сроком по 31.12.2024),

от третьего лица ПАО "Т ПЛЮС": ФИО4 по доверенности серии 21АА 1616867 от 11.08.2023 (сроком по 31.12.2025),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Компания Прайм" обратилось в суд с иском, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческое предприятие "Теплосфера" о признании договора подряда №27/ПД-2023 на выполнение строительно-монтажных работ от 22.06.2023 расторгнутым и взыскании 4412546 руб. 35 коп. долга за выполненные работы.

В судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования согласно уточнению от 26.01.2024.

Представитель третьего лица ПАО "Т ПЛЮС" поддержал ранее изложенные доводы. В отзыве от 11.10.2023 ПАО "Т ПЛЮС" указало, что между ПАО «Т Плюс» и ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Теплосфера» заключен договор подряда №7F00-FA050/05-004/0040-2023 от 17.05.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация котельной 4-К для нужд Чувашских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс». Согласно пункту 2.1 договора сроки выполнения работ Подрядчиком определены как: начало работ - май 2023 год, окончание работ - сентябрь 2023 года. На 11.10.2023 договор является действующим и исполняется. Разрешение вопроса об удовлетворении заявленных исковых требований оставил на усмотрение суда.

Ответчик и третье лицо ФИО2 представителей в суд не направили.

Ответчик в отзыве от 29.09.2023 иск не признал, указал, что договор прекратил действие в связи с односторонним отказом истца, с 11.08.2023 между сторонами отсутствуют какие-либо гражданско-правовые отношения.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав представителей истца и третьего лица ПАО "Т ПЛЮС", изучив материалы дела, суд установил.

22.06.2023 общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческое предприятие "Теплосфера" (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Компания Прайм" (подрядчик) заключили договор подряда №27/ПД-2023, по условиям которого подрядчик обязуется с использованием материалов как Заказчика, так и Подрядчика, оборудования Заказчика, в сроки, предусмотренные статьей 2 Договора и Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Технической документацией, утвержденной Заказчиком, выполнить Модернизацию котельной 4-К (далее - Объект), указанной в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Результат Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Пунктом 2.1 договора установлены следующие сроки выполнения Работ Подрядчиком: начало работ - 22 июня 2023г., окончание работ - 15 сентября 2023г.

Согласно п.п. 2.1.1 договора промежуточные сроки выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение №3).

Пунктом 2.2 договора предусмотрено, что просрочка исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору влечет за собой соразмерное продление сроков выполнения работ Подрядчиком.

Пунктом 3.1 договора установлено, что договорная цена является твердой и составляет 36518976,58 руб. включая налог на добавленную стоимость по ставке 20%, в размере 6086496,10 руб. и устанавливается Сторонами в Приложении №2 к Договору - «Сводная смета» («Расчет Договорной цены»).

В соответствии с п.п. 3.2.1 договора оплата Договорной цены производится Заказчиком в следующем порядке:

- выплата авансового платежа в порядке и на условиях, предусмотренных п. 3.2.2 настоящего Договора;

- расчеты за выполненные Работы и принятый Результат Работ в порядке и на условиях, предусмотренных п. 3.2.3 настоящего Договора.

Согласно п.п. 3.2.1.1 договора стороны договорились о выплате Заказчиком Подрядчику аванса на условиях предоставления Подрядчиком Независимой банковской гарантии и выставления счета-фактуры.

В соответствии с п.п. 3.2.2 договора заказчик выплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере 20% от Договорной цены, что составляет 7303795,32 руб., включая НДС (20%) в сумме 1217299,22 руб.

Согласно п.п. 3.2.2.1 договора аванс выплачивается двумя платежами по 10%: первый платеж в сумме 3651897,66 руб., включая НДС, выплачивается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком оригинала счета на оплату.

Согласно п.п. 3.2.2.2 договора второй платеж в сумме 3651897,66 руб., включая НДС, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты предоставления Подрядчиком оригинала Независимой банковской гарантии и оригинала счета.

Согласно п.п. 3.2.2.4 договора Аванс зачитывается в счет оплаты принятых Заказчиком Работ пропорционально стоимости принятых Заказчиком Работ согласно подписанным Актам сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-2.

Пунктом 3.2.3 договора предусмотрено, что заказчик производит оплату выполненных работ ежемесячно по фактически выполненным объемам работ (промежуточным объемам, выполненным за отчетный месяц) на основании двухсторонне подписанных акта (актов) о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также передачи исполнительной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их предоставления путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В соответствии с пунктом 5.1 договора Техническая (Проектная и/или Рабочая) документация разрабатывается Заказчиком. 

Заказчик передает, а Подрядчик принимает утвержденную в производство работ Техническую (Рабочую) документацию (п.п. 5.1.1 договора).

Техническая (Рабочая) документация передается Заказчиком Подрядчику по разделам до начала соответствующих Работ в сроки, обеспечивающие возможность выполнения Работ в соответствии с Графиком производства работ (п.п. 5.1.2 договора).

В случае внесения изменений в переданную Заказчиком Подрядчику Техническую документацию Заказчик должен передать Подрядчику уточненную Техническую документацию (п.п. 5.1.3 договора).

Согласование и/или утверждение Заказчиком Технической документации производится путем проставления надписи «Согласовано»/«Утверждено» и подписи уполномоченного представителя Заказчика на экземплярах указанных документов (п.п. 5.1.4 договора).

Согласно пункту 5.2 договора исполнительная документация на выполненные виды работ передается Заказчику совместно с актом выполненных работ (форма КС-2).

Как указывает истец, ответчик не обеспечил передачу технической документации (в нарушение п.4.4.1, п. 5.1., 5.1.2 договора): не выдана Рабочая документация со штампом «В производство работ»; отсутствует согласование проектной документации у первоначального Заказчика (Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс») по всем разделам проектной и рабочей документации «Модернизации котельной 4-К» для нужд Чувашских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»; в разделе проекта «Тепломеханические решения» (ТМ) имеется не соответствие поставленного оборудования проектным, а именно котлы, трубопроводная арматура, насосы и их части, автоматическая электроника и электроприводы; отсутствие проектных решений по «Водоотведению и канализации»; отсутствуют проектные решения по разделу «Вентиляция»; отсутствует согласование узла учета газоснабжения в ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары»; отсутствуют рабочие чертежи по Автоматизации и Диспетчеризации Котельной №4-К; не обеспечил поставку необходимого для работы оборудования (в нарушение п.1.1. договора): Заказчик в противоречие с представленной Подрядчику технической документацией (проектной документацией) предоставил на объект оборудование в виде котлов марки RSM 1000 производства ООО «РОССЭН» г. Туймазы, Республика Башкортостан, вместо марки ПКЗ серии КВ-ГМ-10.0-150 производства ООО «ПФ «Псковский котельный завод»; документы, свидетельствующие о внесении изменений в проектную документацию по смене марки котлов, подрядчику предоставлены не были; не произвел оплату второй части авансового платежа (в нарушение п.3.2.2.2. договора). 

Подрядчик во исполнение условий договора обратился в ПАО «Сбербанк России» с заявлением о предоставлении независимой гарантии на сумму аванса. 05.07.2023 Банком была предоставлена независимая гарантия №

<

***>-23-Г2 (далее - банковская гарантия) в сумме 7303795,32 руб. на срок с 05.07.2023 по 15.09.2023, в пользу Заказчика,

Письмами №001/07-2023 от 11.07.2023, №002/07-2023 от 12.07.2023, №005/07-2023 от 21.07.2023 истец обращался в адрес ответчика с просьбой предоставить полный комплект рабочей документации со штампом в производство работ, представить технические решения, дать разъяснения по вопросам замены оборудования и разрешения прочих текущих вопросов.

Письмом №006/07-2023 от 28.07.2023 истец уведомил ответчика о приостановлении работ в виду отсутствия со стороны заказчика действий по исполнению своих договорных обязательств, неисполнение которых привело к невозможности продолжения работ.

Письмом №007/08-2023 от 01.08.2023 истец направил в адрес ответчика уведомление об отказе от договора с приложением соглашения о расторжении договора, ссылаясь на то, что заказчик не заменил техническую документацию, непригодную для выполнения работ, не представил необходимое для работы оборудование, а также нарушает условия договора в части уплаты авансовых платежей,

Отсутствие ответа на уведомление об отказе от договора явилось основанием для предъявления настоящего искового заявления в суд.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

В части 1 статьи 716 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в части 1 статьи 716 ГК РФ, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков (часть 2 статьи 716 ГК РФ).

На основании части 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в части 1 данной статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (часть 2 статьи 719 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2  статьи 450.1 ГК РФ).

Пунктом 4 статьи 450.1 ГК РФ предусмотрено, что сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Факт прекращения договорных отношений в связи с односторонним отказом истца от договора ответчиком не оспаривается.

Поскольку уведомление №007/08-2023 от 01.08.2023 об отказе от договора было получено заказчиком 04.08.2023, договор подряда №27/ПД-2023 от 22.06.2023 считается расторгнутым с 04.08.2023.

С учетом изложенного требование истца о признании договора подряда №27/ПД-2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация котельной 4-К» для нужд Чувашских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» от 22.06.2023 расторгнутым с 04.08.2023 подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании 4412546 руб. 35 коп. долга по оплате работ, выполненных по договору подряда №27/ПД-2023 от 22.06.2023 до его расторжения. 

Письмами №010/08-2023 от 11.08.2023, №011/08-2023 от 22.08.2023 истец направлял ответчику на подписание акты выполненных работ №1 от 31.07.2023, №2 от 31.07.2023.

Письмами №716 от 15.08.2023, №749 от 25.08.2023 заказчик отказался подписать представленные документы, ссылаясь на то, что работы, указанные в актах, Подрядчиком не производились, что работы, указанные в актах, не подтверждены документально, в частности отсутствуют акты скрытых работ.

По правилам статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

Статьей 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком, и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4).

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 753 ГК РФ, пунктом 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Истцом в качестве доказательств выполнения работ в материалы дела представлен договор субподряда на выполнение демонтажных работ оборудования котельной от 26.06.2023 №1, заключенный с индивидуальным предпринимателем ФИО2; акты о приемке выполненных работ №1 от 25.07.2023, №2 от 25.07.2023 и справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 25.07.2023, №2 от 25.07.2023 на общую сумму 3219941 руб.; платежные поручения №583 от 17.08.2023, №591 от 18.08.2023, №665 от 14.09.2023 об оплате; акт приема-передачи имущества, демонтированного при производстве работ, от 17.07.2023; акт контрольного замера от 31.07.2023.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта выполнения работ, их объема и стоимости.

Доказательства оплаты долга суду не представлены.

На основании изложенного требование истца о взыскании 4412546 руб. 35 коп. долга подлежит удовлетворению в заявленном размере.

В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Признать договор подряда №27/ПД-2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация котельной 4-К» для нужд Чувашских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» от 22 июня 2023 г. расторгнутым с 04 августа 2023 г.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческое предприятие "Теплосфера" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Компания Прайм" 4 412 546 (Четыре миллиона четыреста двенадцать тысяч пятьсот сорок шесть) руб. 35 коп. долга, 6 000 (Шесть тысяч) руб. расходов по государственной пошлине.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческое предприятие "Теплосфера" в доход федерального бюджета 39 063 (Тридцать девять тысяч шестьдесят три) руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

О.Е. Владимирова