АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 

Именем Российской Федерации 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Дело № А51-11821/2024

г. Владивосток

30 октября 2024 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Бурова А.В.,  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Министерства  лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов  Приморского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Федеральному государственному бюджетному учреждению  "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО  БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА "КЕДРОВАЯ ПАДЬ" И НАЦИОНАЛЬНОГО  ПАРКА "ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании штрафа, 

установил:

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды,  животного мира и природных ресурсов Приморского края обратилось в арбитражный  суд с иском к Федеральному государственному бюджетному учреждению  "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО  БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА "КЕДРОВАЯ ПАДЬ" И НАЦИОНАЛЬНОГО  ПАРКА "ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА" о взыскании 70985,69 рублей неустойки за  невыполнение противопожарных мероприятий, обязании выполнить противопожарные  мероприятия, установку и размещение стендов (аншлагов) в количестве 1 шт., установка  шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в  лесах в целях обеспечения пожарной безопасности в количестве 1 шт., устройство  противопожарной минерализованной полосы в объеме 0,4 км.  

Решением Арбитражного суда Приморского края в виде резолютивной части от  21.08.2024 (мотивированное решение от 30.08.2024) с Федерального государственного  бюджетного учреждения "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА "КЕДРОВАЯ ПАДЬ" И  НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА" в пользу Министерства лесного  хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов  Приморского края взыскано 68187,69 руб. санкций, в доход федерального бюджета  2728,00 руб. государственной пошлины. В удовлетворении остальных требований  отказано.  

Вместе с тем, арбитражным судом при принятии указанного решения не было  рассмотрено требование об обязании ответчика выполнить противопожарные  мероприятия: установку и размещение стендов (аншлагов) в количестве 1 шт., установка  Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями  судей по делу № А51-11821/2024 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных  дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал  государственных услуг (ЕСИА).  

шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в  лесах в целях обеспечения пожарной безопасности в количестве 1 шт., устройство  противопожарной минерализованной полосы в объеме 0,4 км.  

Пунктом 1 части 1 статьи 178 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд,  принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей  инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять  дополнительное решение в случае, если по какому-либо требованию, в отношении  которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было  принято решение.  

30.08.2024 судом принято дополнительное решение в виде резолютивной части  об обязании Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная  дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровя падь» и  Национального Парка «Земля леопарда»» имени Н.Н. Воронцова» выполнить  противопожарные мероприятия: установка шлагбаумов, устройство преград,  обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения  пожарной безопасности в количестве 1 шт. В удовлетворении остальных требований об  обязании отказано. С Федерального государственного бюджетного учреждения  "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО  БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА "КЕДРОВАЯ ПАДЬ" И НАЦИОНАЛЬНОГО  ПАРКА "ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА" в доход федерального бюджета взыскано 6000,00 руб.  государственной пошлины.  

20.09.2024 ответчиком подана апелляционная жалоба, в связи с чем, в  соответствии с пунктом 39 Постановления пленума Верховного суда Российской  Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений  гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» судом  изготовлено мотивированное дополнительное решение.  

Из материалов дела следует, что истцом было заявлено требование об обязании  ответчика выполнить противопожарные мероприятия: установка и размещение стендов  (аншлагов) в количестве 1 шт., установка шлагбаумов, устройство преград,  обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения  пожарной безопасности в количестве 1 шт., устройство противопожарной  минерализованной полосы в объеме 0,4 км.  

В соответствии с Таблицей 5.2.1 Проекта освоения лесов предусмотрено  выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, в том числе  устройство противопожарных минерализованных полос 0,4 км.; прочистка и  обновление противопожарных минерализованных полос в объеме 2 км.;  благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах; установка и размещение  стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной  безопасности в лесах (аншлаги) в количестве 1 шт.; установка и эксплуатация  шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничения пребывания граждан в  лесах в целях обеспечения пожарной безопасности -1 шт.  

Материалами дела установлено, что ответчиком в октябре 2023 года  осуществлено устройство противопожарной минерализованной полосы в объеме 0,4 км.,  что подтверждается путевым листом трактора № 6783-10-1, выданного 24.10.2023 и  актом № МП-003/23 приемки выполненных работ по устройству минерализованных  полос на экспериментальном участке лесничества квартал 85 выдел 17, с приложением  фотоматериалов.  

Кроме того, ответчиком также представлены доказательства размещения стенда  о размещении стенда содержащего информацию о мерах пожарной безопасности в  лесах.  

Вопреки части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации ответчиком не представлено доказательств выполнения мероприятий по  противопожарному обустройству лесов, в том числе: установка шлагбаумов, устройство  преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях  обеспечения пожарной безопасности в количестве 1 шт.  

Следовательно исковые требования об обязании ответчика выполнить  мероприятия по противопожарному обустройству лесов подлежат частичному  удовлетворению.  

Расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика,  и подлежат взысканию в федеральный бюджет, поскольку истец освобожден от оплаты  государственной пошлины.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 178 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, арбитражный суд  

р е ш и л:

Обязать Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная  дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровя  падь» и Национального Парка «Земля леопарда»» имени Н.Н. Воронцова» выполнить  противопожарные мероприятия: установка шлагбаумов, устройство преград,  обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения  пожарной безопасности в количестве 1 шт.  

В удовлетворении остальных требований об обязании отказать. 

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА "КЕДРОВАЯ ПАДЬ" И  НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА" в доход федерального бюджета  6000,00 руб. государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения апелляционной инстанции.  

Судья Буров А.В.