200/2023-56200(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-7816/2023

г. Салехард

29 ноября 2023 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Санджиева М.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  муниципального учреждения «Дирекция муниципального заказа» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Алекс-Групп»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) об обязании безвозмездно устранить  выявленные недостатки выполненных работ в рамках исполнения гарантийных  обязательств,  

при участии в судебном заседании: 

от истца посредством веб-конференции – представитель ФИО2 по  доверенности № 62/23 от 19.07.2023,  

от ответчика – представитель ФИО3 по доверенности от 25.11.2023 (личность  представителя удостоверена паспортом).  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

уточненные исковые требования муниципального учреждения «Дирекция  муниципального заказа» удовлетворить частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Алекс-Групп» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты  вступления в законную силу решения суда безвозмездно устранить выявленные  недостатки выполненных работ в рамках исполнения гарантийных обязательств по  муниципальному контракту от 21.03.2022 N«0190300003722000007, а именно: провести  ремонтные работы по устранению следов протечек в кабинетах №№ 316, 306, 314,  спортивном зале, актовом зале МБОУ СОШ № 10, расположенного по адресу: 

<

...>, а также на потолках и стенах на лестнице третьего этажа  «начальной» школы, мероприятия по сушке пола в кабинете заместителя директора,  замене линолеума, поклейке обоев. Провести качественную варку на кровле  мембранного покрытия на примыканиях кровли к вентшахтам над спортзалом, актовым  залом и санузлом третьего этажа, провести ремонт парапета.  

 

В случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскивать с  общества с ограниченной ответственностью «Алекс-Групп» (ИНН: 8618002051, ОГРН:  1158601000843) в пользу муниципального учреждения «Дирекция муниципального  заказа» (ИНН: 8905027532, ОГРН: 1028900704953) судебную неустойку в размере 5 000  рублей 00 копеек за каждый день просрочки исполнения решения до момента его  фактического исполнения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алекс-Групп» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу муниципального учреждения «Дирекция  муниципального заказа» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 6 000 рублей  расходы по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

М.А. Санджиев

Судья