68_14205322  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть) 

г. Москва Дело № А41-72283/22  «11» июля 2023 года  

 Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Быковских И. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" к ГКУ МО  "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" о внесении изменений в государственный  контракт  

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2 по дов. № 01/Д-334 от 02.12.2022 г., ФИО3 по дов. № 01/Д- 336 от 02.12.2022 г.,  

от ответчика – ФИО4 по дов. № 23 от 09.01.2023 г. 

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Внести в государственный контракт от 10.07.2018 г. № Ф.2018.322600 на  реконструкцию автомобильной дороги 

<

...> следующие изменения:  

1. Пункт 3.3. Контракта изложить в следующей редакции:  

«3.3. Окончание выполнения работ: 66 (Шестьдесят шесть) месяцев с даты начала  выполнения работ, в соответствии с Календарным графиком производства работ  (Приложение № 2 к Контракту)».  

1.1. Внести изменение в Приложение № 2 «Календарный график производства работ»  к Контракту, увеличив сроки выполнения работ с 54 месяцев до 66 месяцев.  

1.2. Внести изменение в Приложение № 22 «Сведения об обязательствах сторон и  порядке оплаты» к Контракту, увеличив в разделе «1. Сведения об обязательствах сторон»  срок окончания исполнения обязательства (указанный в строках 1, 4, 5, 6, 7) с 54 месяцев до  66 месяцев до даты 25.01.2024 г.  

2. Пункт 8.14 Контракта изложить в следующей редакции:  

«8.14. Заказчик выплачивает аванс Подрядчику на счет, открытый в Министерстве  экономики и финансов Московской области на казначейском счете № 3226 в ГУ Банка  России по ЦФО для учета операций со средствами организаций, не являющимися  участниками бюджетного процесса, в полном объеме или в части, но не более 30% от цены  Контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств, что составляет 2 332 494 729 (два  миллиарда триста тридцать два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи семьсот  

двадцать девять) руб. 51 коп., в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня выставления  Подрядчиком счета на выплату аванса.  

В случае неосвоения Подрядчиком выплаченного аванса сумма неотработанного  аванса подлежит возврату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока  выполнения работ и после направления требования заказчиком.  

В течение срока, на который произведена выплата указанного аванса, оплата работ,  выполненных за соответствующий отчетный период, осуществляется за вычетом части  суммы выплаченного аванса, равной 50% стоимости работ, выполненных за этот период».  

Взыскать с ГКУ МО "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" в пользу АО  "СТРОЙТРАНСГАЗ" 6000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья И. В. Быковских