АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский проспект, дом 19, город Владимир, 600005

тел. (4922) 47-23-41, факс (4922) 47-23-98

http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

город Владимир                                                                        

«24» января 2023 года                                             Дело № А11-9784/2021

Резолютивная часть решения объявлена 17.01.2023.

Полный текст решения изготовлен 24.01.2023.

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Бондаревой - ФИО1, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Объединение Инжстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: ул. Дворянская, д. 10А, эт. 3, пом. 83, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройтэл» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: ул. Приорова, д. 2а, 

<

...>)

о взыскании 1 000 000  рублей 00 копеек,

третьи лица:

- общество с ограниченной ответственностью «Бытпласт» (ИНН 

<

***>, адрес:111141, 

<

...>); 

- общество с ограниченной ответственностью «Соверен» (ИНН 

<

***>, адрес: 301320, 

<

...>);

- общество с ограниченной ответственностью «КЕС» (ИНН 

<

***>, адрес: 125040, 

<

...>),

при участии:

от истца – не явился, надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Владимирской области в сети Интернет;

от ответчика – не явился, надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Владимирской области в сети Интернет,

от третьих лиц - не явился, надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Владимирской области в сети Интернет,

установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Инжстрой» обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Стройтэл» о взыскании неустойки за период с 15.01.2018 по 22.04.2021 в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек.

Истец также 01.02.2022 представил заявление о зачете встречных однородных требований на сумму задолженности, взысканную с общества с ограниченной ответственностью «Объединение Инжстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройтэл» по делу № А11-17681/19 в рамках спорного договора.

ООО «Стройтэл» в отзыве на иск указало, что выполняло комплекс электромонтажных работ в качестве субподрядчика в рамках договора генерального подряда между ООО «Бытпласт» и ООО «КЕС» (генподрядчик) в период с 01.11.2017 по 27.11.2018 на объекте «Реконструкция производства по выпуску изделий из пластмасс бытового назначения с увеличением мощности до 18 000 т/год» расположенном по адресу: 

<

...>.

Окончание работ по договору № С-27/10/2017 не могло наступить 15.01.2018 в связи с неоднократными изменениями в проектно-сметной документации. Электромонтажные работы были выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Считает иск к ООО «Стройтэл» не обоснованным.

ООО «Соверн» в отзыве на иск указало, что считает иск не обоснованным на основании следующего:

- окончание работ по договору не могло наступить 15.01.2018 в связи с неоднократными изменениями в проекте;

- объемы и сметная стоимость на момент окончания работ превышала указанную сумму в иске (5 200 000 рублей 00 копеек) в связи с увеличением электромонтажных работ и изменениями в проекте;

- ООО «Соверен» в ходе рассмотрения дела А11-1768/2019 подтверждал, что ООО «Стройтэл» по договору №С-27/10/2017 производил электромонтажные работы на объекте: «Реконструкция производства по выпуску изделий из пластмасс бытового назначения с увеличением мощности до 18 000 т/год, расположенный по адресу: 

<

...> период с 01.11.2017 по 27.11.2018. 

Все работы были выполнены в установленные сроки и с удовлетворительным качеством.

Ответчик письменный отзыв на исковое заявление не представил.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Стороны, надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения дела, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

Спор рассматривается в отсутствие представителей истца и ответчика на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

27.10.2017 ООО «Объединение «Инжстрой» (заказчик) и ООО «Стройтэл» (подрядчик) заключен договор подряда №С-27/10/2017, согласно пункту 2.1 которого подрядчик обязуется выполнить на объекте комплекс электромонтажных работ (далее - «работы»), в соответствии с условиями настоящего договора, и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке, установленном настоящим договором.

В соответствии с пунктом 2.2 договора результатом работ является надлежащее выполнение подрядчиком всех работ и выполнение всех условий, предусмотренных договором. Достижение подрядчиком результата работ подтверждается подписанным сторонами актом окончательной сдачи-приемки работ.

В соответствии с пунктом 3.1 договора дата начала работ: 27.10.2017.

Дата окончания работ и сдача результата заказчику: не позднее 15.01.2018 (пункт 3.2 договора).

Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ предусмотрены графиком работ (далее - «график»), являющимся приложением к настоящему договору (пункт 3.3. договора).

Согласно пункту 3.4 договора подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ согласно действующем) законодательству и настоящему договору.

В соответствии с пунктом 4.1 договора цена работ определяется в Сметах, являющихся Приложениями к настоящему Договору, и составляет: 5 200 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 793 220 рублей 34 копеек.

Согласно пункту 5.6.1 договора передача результата работ заказчику производится после выполнения подрядчиком всех работ, предусмотренных договором, путем подписания сторонами акта окончательной сдачи-приемки работ.

Пунктом 5.6.3 договора предусмотрено, что после выполнения всех работ по договору подрядчик письменно уведомляет заказчика о готовности передать результат работ.

Одновременно с уведомлением об окончании работ подрядчик направляет заказчику следующие документы:

-Акт окончательной сдачи-приемки работ в двух экземплярах:

-Последний акт о приемке выполненных работ (КС-2);

-Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в двух экземплярах;

-Счет-фактуру в одном экземпляре:

-Исходные данные для подготовки заказчиком исполнительной документации (согласно разделу 5.3 договора), за исключением ранее переданной части такой документации.

Согласно пункту 5.6.4 договора в течение 30 (тридцати) дней с момента получения уведомления подрядчика о готовности сдать результат работ. Заказчик обязуется приступить к приемке и проверить результат работ и представленную в соответствии с п. 5.6.3 документацию.

В случае отсутствия замечаний к результату выполненных работ. Заказчик подписывает акт окончательной сдачи-приемки работ и другие документы, возвращает экземпляры подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента получения уведомления о сдаче работ (пункт 5.6.5 договора).

В пункте 5.6.15 во избежание возможных споров, стороны отдельно оговорили следующее: 

Датой получения заказчиком актов, уведомлений, писем, претензий и прочих документов по договору, датой передачи результата работ заказчику считается дата фактического вручения заказчику указанных документов. Дата вручения подтверждаться почтовыми документами или проставленной представителем заказчика отметкой о получении на копии уведомления, описи, акта и пр., либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт вручения юридически значимых сообщений и документов. 

Дата, указываемая подрядчиком в графе «дата составления» актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости работ и затрат (КС3), акте окончательной сдачи приемке работ, актах об устранении недостатков и прочих документов, может не совпадать с датой получения заказчиком актов, и является лишь датой составления таких актов подрядчиком. Стороны пришли к соглашению, что дата составления актов, указываемая Подрядчиком, не должна быть позже даты окончания отчетного периода, за который подается акт. 

Датой подписания заказчиком представленных подрядчиком актов о приемке работ (КС-2), справок (КС-3), актов окончательной сдачи-приемки работ является дата их фактического подписания и может не совпадать с датой составления и датой получения. 

Дата подписания указывается представителем заказчика при подписании, непосредственно в самом акте, либо определяется датой сопроводительного письма (описи), которым подрядчику был возвращен подписанный экземпляр акта. 

Акт будет иметь для сторон юридическую силу документа, подтверждающего выполненный объем и/или сдачу-приемку результата только при условии его подписания надлежаще уполномоченными представителями сторон, действующими на основании доверенности, либо руководителями сторон, действующими от имени сторон без доверенности, на основании учредительных документов. 

В соответствии с пунктом 9.1 договора в случае нарушения конечного и промежуточных сроков производства работ и сроков устранения недостатков работ подрядчик обязуется выплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены всех работ по договору за каждый день просрочки.

Ответчиком акт приемки выполненных работ направлен в адрес истца 16.04.2021, период просрочки сдачи работ составил 1194 дня.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия о выплате неустойки за период просрочки сдачи работ, которая осталась без ответа.

Ненадлежащее исполнение обязанностей ответчиком, послужили истцу основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

На основании части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

Проанализировав представленные доказательства, арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению исходя из следующего.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

По правилам пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Пункт 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ осуществляется в соответствии со статьей 711 этого Кодекса. 

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

В соответствии со статьей 720 заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации декларирует, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

На основании пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В пункте 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором неустойку (штраф, пеню).  

Гражданское законодательство различает законную и договорную неустойку, причем в силу части 1 статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. 

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указано, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Решением от 12.07.2021 по делу № А11-17681/2019 имеющим преюдициальное значения для рассмотрения настоящего спора, установлено, что договором стоимость работ определена в размере 5 200 000 рублей 00 копеек (приложение №1 смета на сумму 5 075 000 рублей 00 копеек и приложение №2 смета на сумму 125 000  рублей 00 копеек к договору от 27.10.2017 № С-27/10/2017). 

В процессе работ произошло изменение проекта. Сумма по приложению №1 смета 5 075 000  рублей 00 копеек увеличилась и составила 5 354 373 рублей 00 копеек. Приложение №1 смета 5 354 373 рублей 00 копеек были выполнены работы на сумму 5 302 327  рублей 50 копеек, из них оплачено на сумму 5 076 173  рублей 25 копеек. По выполненным работам согласно Приложению №1 задолженность составляет 226 154 руб. 25 коп. 

Приложение № 2 смета 125 000  рублей 00 копеек были выполнены работы на сумму 125 000  рублей 00 копеек, из них оплачено на сумму 16 240  рублей. 00 копеек. По выполненным работам согласно Приложению № 2 задолженность составляет 108 760  руб. 00 коп.

Окончательный акт приемки - сдачи выполненных работ от 28.11.2018 в произвольной форме, представленный в материалы дела направлен в адрес ответчика 16.04.2021 года. 

Доказательств иного не представлено, как и направления в адрес ответчика всей предусмотренной договором документации, в том числе справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в двух экземплярах; счет-фактуры в одном экземпляре; исходные данные для подготовки заказчиком исполнительной документации (согласно разделу 5.3. договора), за исключением ранее переданной части такой документации (пункт 5.6.3 договора).

В соответствии с пунктом 9.1 договора в случае нарушения конечного и промежуточных сроков производства работ и сроков устранения недостатков работ подрядчик обязуется выплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены всех работ по договору за каждый день просрочки.

В порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Факт нарушения ответчиком обязательств по своевременной сдаче работ подтвержден материалами дела, ответчиком надлежащими и бесспорными доказательствами не оспорен, следовательно, истец правомерно предъявил требование о взыскании неустойки. 

Расчет неустойки судом проверен.

Поскольку суд не может по собственной инициативе выйти за пределы исковых требований, оснований для взыскания неустойки в большем объеме (с учетом изменения цены договора), чем предъявлено истцом ко взысканию, у суда не имеется.

Доказательства оплаты пеней в добровольном порядке ответчиком суду не представлены. 

Оснований для снижения размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не находит, поскольку ответчик соответствующего ходатайства не заявил, доказательств явной несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушения обязательства не представил.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный суд считает требование о взыскании неустойки подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в сумме 1 000 000  рублей 00 копеек. 

Оценив доводы истца о зачете встречных однородных требований, суд первой инстанции пришел к следующему выводу.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Владимирской области от 10.02.2021 по делу № А11-17681/2019, имеющим преюдициальное значение для разрешения настоящего дела в соответствии с пунктом 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с  общества с ограниченной ответственностью «Объединение Инжстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройтэл» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность по договору от 23.10.2017 № С-27/10/2017 в размере 318 168 рублей 54 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 8138 рублей 67 копеек, в остальной части требований отказано.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2021 решение суда оставлено без изменения.

Исполнительный лист по делу не выдавался, по сведениям истца, решение по делу № А11-17681/2019 не исполнялось.

На основании статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Как разъяснено в абзаце 2 пункта 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №6 от 11.06.2020 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств», обязательства могут быть прекращены зачетом после предъявления иска по одному из требований. В этом случае сторона по своему усмотрению вправе заявить о зачете как во встречном иске (статья 132 АПК РФ), так и в возражении на иск, юридические и фактические основания которых исследуются судом равным образом (часть 1 статьи 64, части 1 - 3.1 статьи 65, часть 7 статьи 71, часть 1 статьи 168, части 3, 4 статьи 170 АПК РФ). В частности, также после предъявления иска ответчик вправе направить истцу заявление о зачете и указать в возражении на иск на прекращение требования, по которому предъявлен иск, зачетом.

Из приведённых норм права и разъяснений вытекает право ответчика на зачёт своих встречных однородных требований к истцу непосредственно в ходе рассмотрения судом спора о взыскании задолженности ответчика путём заявления суду о зачёте, которое может содержаться в возражении на иск. Такое заявление, а также основания для зачёта указанных в нём требований подлежат исследованию судом по существу наравне с иными обстоятельствами спора.

Исходя из системного толкования приведенных выше норм прав и разъяснений, следует, что независимо от процедуры проведения зачета (внесудебный, судебный) обязательства считаются прекращенными ретроспективно: не с момента заявления о зачете, заявления встречного иска, принятия/вступления в законную силу решения суда, а с момента, когда обязательства стали способны к зачету, то есть наступили условия для прекращения обязательств зачетом в соответствии со статьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предъявленная к зачету ответчиком сумма встречных требований к истцу соответствует критериям, приведенным в статье 410 Гражданского кодекса Российской Федерации и в разъяснениях пункта 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 от 11.06.2020, в связи с чем, основания для зачета у истца имеются. Форма зачета в процессе рассмотрения данного дела истцом соблюдена.

Расходы по государственной пошлине по делу в сумме 23 000 рублей 00 копеек в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Таким образом, с учетом зачета требований с ответчика подлежит взысканию неустойка в сумме 681 831 рубля 46 копеек и государственная пошлина в сумме 14 861 рубля 33 копеек.

Руководствуясь статьями 17, 65, 70, 71, 110, 167 – 171, 176, 180, 181 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройтэл» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Объединение Инжстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 681 831  рубля 46 копеек, а также расходы  по уплате государственной пошлины в сумме 14 861 рубля 33 копеек.

Выдача исполнительного листа осуществляется по правилам статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

    Судья                                                                      Ю.В. Бондарева-Битяй